20/2021-265523(3) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 16 сентября 2021 года 

по делу А33-30057/2019 Красноярск 

«16» сентября 2021 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично. 

Обязать акционерное общество "Фирма "Культбытстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) безвозмездно устранить выявленные недостатки, в рамках гарантийных  обязательств по муниципальному контракту № 03/08/15 от 05.08.2015 и № Ф.2016.242509 от  05.09.2016 в течение одного месяца с момента вступления настоящего решения в законную  силу (согласно заключения экспертов по результатам судебной строительно-технической  экспертизы по делу № А33-30057/2019 № Э-248-21 от 22.04.2021).:  

 № п/п 

Наименование работ 

Объем работ 

Жилой дом 

Жилой 

Жилой 

Всего по  

 № 27 

дом 23Б 

дом 23 

домам 

Асфальтовое покрытие отмостки и тротуаров, газоны 

1 

Ремонт асфальтобетонного  

19,1 м2 

97,1 м2 

62,5 

178,7 м2  

покрытия толщиной 0,03 м  

„2 

2 

Подсыпка песком  

19,1 м2 

97,1 м2 

62,5 м2 

178,7 м2  

среднезернистым до 100 мм  

3 

Жидкий битум  

19,1 м2 

97,1 м2 

62,5 м2 

178,7 м2  

из расчета 0,5  

л/м 

4 

Демонтаж/ устройство  

6,0 п.м. 

4,0 п.м. 

5,0 п.м. 

15,0 п.м.  

водоотводных лотков, без замены 

5 

Демонтаж/ устройство  

2,0 п.м. 

2,0 п.м. 

водоотводных лотков, с заменой  

6 

Засыпка провалов грунтом  

1,2 м3 

1,2 м3 

7 

Устройство газона (расход семян - 

2,68 м2 

2,68 м2 

36 г/м2) 

Крыльца 

8 

Демонтаж/ установка нижних  

2 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

ступеней крыльца с обеспечением  

опирания ступеней на конструкции  

крыльца 

9 

Ремонт кладки стенок крыльца  

0,068 м3 

0,068 м3 

10 

Ремонт штукатурки стен 

- 

0,5 м2 

1,4 м2 

1,9 м2 

11 

Окраска стен 

18,7 м2 

23,6 м2  

42,3 м2 

водоэмульсионной краской с  

расчисткой старой краски до 10%  

Отделка цоколя 

12 

Очистка поверхности цоколя от  

11,5 м2  

11,5 м2 

штукатурного 

слоя 

13 

Оштукатуривание поверхности  

11,5 м2  

11,5 м2 

цоколя по сетке 

14 

Окраска  

- 

- 

11,5 м2  

11,5 м2 

цоколя фасадной краской  

Внутренняя отделка помещения общего пользования, оконные блоки 

15 

Окраска 

17,9 м2  

17,9 м2 

поверхности 

водоэмульсионной 

краской, с расчисткой старой краски 

более 

35% 

16 

Снятие/ установка оконного слива 

11,2п.м.  

11,2п.м. 

из оцинкованной стали, без замены  

Вывоз строительного мусора: 

17 

Погрузка и вывоз 

1,361 т 

6,413 т 

4,138т 

11,912т 

строительного мусора 

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с акционерного общества "Фирма "Культбытстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.  

Взыскать с муниципального казенного учреждения "Управление капитального  строительства" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  43 532 руб. государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья Е.В. Курбатова