АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А83-18322/2022

18 января 2023 года

город  Симферополь

 

Резолютивная часть решения объявлена 11 января 2023 года

Решение изготовлено в полном объеме 18 января 2023 года

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Дергачева Е.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «СК Наследие» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании денежных средств, 

при участии представителей сторон:

от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 15.06.2022 № б/н;

от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности от 09.01.2023 № 186-Д,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «СК Наследие» (далее – общество, истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с иском к государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» (далее – предприятие, ответчик) о взыскании 3 596 534 руб. 98 коп. задолженности по договору на выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ №1407/447 от 16.12.2019.

В канцелярию суда 30.12.2022 от истца в материалы дела поступило заявление об увеличении размера исковых требований в порядке части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), согласно которому общество просило взыскать с ответчика 4 263 804 руб. 66 коп. задолженности и 44 319 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

10.01.2023 в судебном заседании истцом уточнялся размер исковых требований, согласно последнему заявлению, общество, в порядке части 1 статьи 49 АПК РФ, просит взыскать с ответчика 3 996 150 руб. 22 коп. задолженности и 42 981 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Поскольку указанное уточнение исковых требований не нарушает права и законные интересы ответчика, оно принимается судом к рассмотрению.

Исковые требования мотивированы нарушением ответчиком обязательств по договору на выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ №1407/447 от 16.12.2019 в части неполучения денежных средств в полном объеме согласно актам выполненных работ.

Ответчик в отзыве на исковое заявление указал, что предприятие приняло выполнение обществом строительно-монтажных работ на сумму 10 046 368 руб. с НДС, что подтверждается актами о приемке выполненных работ №№1,2,3,4,5,6 от 14.07.2022, ведомостью смонтированного оборудования №1, справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Общество надлежащим образом не исполнило обязательства по договору и допустило просрочку сроков выполнения работ. В связи с чем в соответствии с п.8.8. договора обществу начислена пеня за каждый день просрочки  выполнения обязательств. Ответчику направлено уведомление о зачете требований в одностороннем порядке об удержании пени за период с 15.12.2021 по 14.0.2022 (212 дней) в размере 669 341 руб. 59 коп.

Согласно представленного уточнения в судебное заседание от 10.01.2023 истец признал пеню в размере 669 341 руб. 59 коп.

Представитель истца просил удовлетворить исковые требования. Представитель ответчика против удовлетворения иска возражал. В судебном заседании  объявлялся перерыв, после перерыва стороны явку полномочных представителей не обеспечили.

На основании части 3 статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствии представителя сторон по имеющимся в деле доказательствам.

Исследовав доказательства представленные сторонами в подтверждение своих доводов и возражений, суд приходит к следующим выводам.

Между обществом (Подрядчик) и предприятие (Заказчик) 16.12.2019 заключен договор на выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ №1407/447, по условиям которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства «Внешнее электроснабжение электроустановок ретранслятора ФГУП «РТРС» в г. Феодосия, в близи села Подгорное, кадастровый номер земельного участка 90:24:071101:19, согласно договору технологического присоединения №051-295-0108-18 от 01.03.2018 г»; «Внешнее электроснабжение электроустановок ретранслятора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть в г. Феодосия, пгт. Орджоникидзе», согласно договору технологического присоединения №051-228-0183-17 от 23.06.2017 г»; «Внешнее электроснабжение электроустановок ретранслятора ФГУП «РТРС» в г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Гаврилова, кадастровый номер земельного участка 90:24:030102:5898, согласно договору технологического присоединения №051-2370-0185-18 от 23.04.2018 г» (далее – работы) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном договором.

Пунктом 2.1 договора установлено, что цена договора устанавливается на основании результатов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в соответствии с укрупненным сводным сметным расчетом по комплексу проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ и составляет 13 251 500 руб. (тринадцать миллионов двести пятьдесят одна тысяча пятьсот руб. 00 коп.), в т.ч. НДС 20% - 2 208 583,33 руб. (два миллиона двести восемь тысяч пятьсот восемьдесят три  руб. 33 коп.).

27.10.2022 между обществом и предприятием подписано дополнительное соглашение №3-1407/447 к договору от 16.12.2019 на выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ №1407/447, согласно которому пунктом 1.2 указанного соглашения внесли изменения в пункт 2.1. договора и согласовали цену договора в размере 12 705 116,00 руб. (двенадцать миллионов семьсот пять тысяч сто шестнадцать руб. 00 коп.), в т.ч. НДС 20% - 2 117 519,33 руб. (два миллиона сто семнадцать тысяч пятьсот девятнадцать руб. 33 коп.).

Согласно пункту 1.4.1 договора в результате работ по договору подрядчик осуществляет:

- разработку и согласование проектной, рабочей документации и сметной документации с ГУП РК «Крымэнерго» по проектируемому объекту капитального строительства, а также со всеми заинтересованными организациями и собственниками пересекаемых сооружений;

- получение положительного заключения государственной экспертизы по проверке проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ) а также достоверности определения сметной стоимости строительства; 

- выполнение строительно-монтажных работ в установленные договором сроки.

В соответствии с пунктом 3.1. договора расчет за выполнение работы осуществляются заказчиком в следующем порядке:,

по проектно-изыскательским работам - заказчик осуществляет оплату за фактически выполненные работы на основании предоставленного счета на оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания сторонами акта сдачи - приемки проектно-изыскательских работ (Приложение №3 к настоящему договору) по выполненным подрядчиком проектно-изыскательским работам в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), а также после получения положительного заключения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, проектной документации и результатов инженерных изысканий, и после сдачи заказчику всех экземпляров проектной, рабочей, сметной документаций и исходно-разрешительной документации;

по строительно-монтажным работам - текущие платежи осуществляются Заказчиком с учетом удержания 10% (десяти процентов) от стоимости работ, принятых по «Акту о приемке выполненных работа (Форма КС-2) и «Справке о стоимости выполненных работ и затрат» (Форма КС-3), установленного оборудования «Акт о приемке - передаче оборудования смонтированного на объекте(ОС-15)» пропорционально объему выполненных работ, принимаемых по данному Акту, на основании предоставленного счета на оплату в течение 30  (тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами «Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (Форма КС-3), установленного оборудования «Акт о приемке - передаче оборудования смонтированного на объекте (ОС-15)» подтверждающих выполнение соответствующих работ, их стоимость поставленных материалов/оборудования.

Окончательный расчет, за выполненные работы и поставленное оборудование в размере удержанных 10% (десяти процентов) от стоимости работ, принятых по Актам о приемке выполненных работ (Форма №КС-2) и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (Форма №КС-3), стоимости установленного оборудования «Акт о приемке - передаче оборудования смонтированного на объекте (ОС-15)» производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания сторонами «Акта приемки законченного строительством объекта электрических сетей 0,4-6-10. кВ приемочной комиссией» в установленном порядке.

Согласно акту № 1 акта сдачи - приемки проектно-изыскательских работ от 06.05.2022, подрядчик сдал, а заказчик принял работы согласно акту общей стоимостью 2 658 748, 00 руб. в том числе НДС. В акте стороны указали, что работы выполнены в полном объеме. Стороны претензий друг к другу не имеют. Проектно-сметная документация удовлетворяет условиям договора, в надлежащем порядке оформлена и передана заказчику по накладной №1 от 06.05.2022

В соответствии с  актами о приемке выполненных работ (КС-2), подписанных заказчиком, подрядчиком выполнены работы на 14 042 518, 22 руб.

Кроме того, как следует из Справки о стоимости выполненных работ и затрат от 14.07.2022 (КС-3) подписанной сторонами, общая стоимость строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат составила 14 042 518, 22 руб. 

Заказчиком оплачен авансовый платеж за строительно-монтажные работы в размере 3 811 534 руб. 80 коп., что подтверждается п/п №468 от 09.02.2021, а также за проектно-изыскательские работы в размере 1 861 123 руб. 60 коп., что подтверждается п/п №51084 от 06.07.2022. Сумма, подлежащая выплате в адрес подрядчика, составляла 11 028 607 руб. 82 коп. 

 С учетом 10% удержания от стоимости строительно-монтажных работ (п.3.1. Договора) из 14 042 518 руб. 22 коп. подлежит удержанию сумма в размере 1 404 251 руб. 82 коп.

Также заказчиком оплачены работы в размере 6 027 820 руб. 80 коп., что подтверждается п/п №512947 от 12.08.2022.

В связи с неисполнением заказчиком своих обязательств по договору, а именно полной платы принятых работ, общество обратилось с иском в арбитражный суд.

В соответствии со ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик - создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно п. 1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со ст. 711 настоящего Кодекса.

В силу п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Основанием для возникновения обязательств заказчика по оплате выполненных работ является сдача ему результата работ.

Согласно ст. 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

По смыслу названной правовой нормы документом, удостоверяющим выполнение подрядчиком работ и их приемку заказчиком, является акт приемки работ, выступающий основанием возникновения у заказчика обязанности по оплате выполненных подрядчиком работ.

В соответствии со статьей 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Согласно пункту 1 статьи 759 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком.

Объем работ, которые должен выполнить подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, изложен в пункте 1 статьи 760 ГК РФ.

В силу положений статьи 762 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором: уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ; оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре; участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

Таким образом, основанием для возникновения обязанности по оплате выполненных работ (этапа работ) является передача результата работ (этапа работ).

Статья 307 ГК РФ предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

На основании положений статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ). 

Ответчиком не оспаривал объемы, качество работ на общую сумму 14 042 518,22 руб. принятых по договору, от принятия выполненых работ не отказался, что подтверждается актом № 1 акта сдачи - приемки проектно-изыскательских работ от 06.05.2022, актами о приемке выполненных работ (КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 14.07.2022 (КС-3). Своим поведением фактически одобрил выполнение подрядчиком работ. Основания и порядок применения коэффициента приведения в указанных выше актах ответчик не обосновал.

При таких обстоятельствах действия ответчика при принятии выполненных работ по договору свидетельствует о согласовании сторонами цены договора. 

Учитывая изложенные обстоятельства, судом установлено, подтверждено материалами дела, что истцом выполнены работы по договору на сумму 14 042 518,22 руб., в связи с чем исковые требования подлежат удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 49, 110, 167 – 171, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

иск удовлетворить полностью.

Взыскать с государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СК Наследие» 3 996 150 руб. 22 коп. задолженности и 42 981 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «СК Наследие» из федерального бюджета 1 338 руб. государственной пошлины.

 Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объёме).

 

СудьяЕ.А. Дергачев