ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-229733/17-120-1854

г. Москва

21 февраля 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 14 февраля 2018 года

Решение в полном объеме изготовлено 21 февраля 2018 года

Арбитражный суд г.Москвы  в составе: 

судьи Блинниковой И.А. 

Протокол ведет секретарь судебного заседания Ларионова Н.Ю.

Рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

Министерство обороны РФ

ответчик: ООО «КомплектСнаб»

о взыскании 1 334 543,75 руб.

с участием:

от истца: ФИО1 дов. № 212/1/250 от 16.10.2017 г.

от ответчика: не явка

УСТАНОВИЛ

Министерство обороны РФ просит суд взыскать с ответчика 1 334 543,75 руб. неустойку, начисленную  за нарушение срока поставки товара по государственному контракту от 09.11.2016 № 1616187113802412245022099. 

В обоснование исковых требований истец сослался на то, что ответчик нарушил сроки поставки товара по государственному контракту, в связи с чем истец начислил предусмотренную контрактом неустойку.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащем образом о времени и месте его проведения.

Оценив представленные в материалах дела доказательства в совокупности, выслушав представителя истца, суд считает, что иск  подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Исследовав письменные доказательства, суд установил, что между Министерством обороны Российской Федерации (Заказчик) и ООО «КомплектСнаб» (Поставщик) заключен государственный контракт от 09.11.2016 № 1616187113802412245022099 (далее - контракт) на поставку средств автоматизации для арсеналов согласно перечню, утверждаемому Минобороны России: Автопогрузчик МКСМ для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2016 г.

Пунктом 4.1 контракта предусмотрена его цена, которая составляет 49 700 250 руб. Согласно п.п. 3.2.2 контракта Поставщик обязан осуществить доставку товара грузополучателям в срок до 15.12.2016, то есть до 14.12.2016 включительно.

Согласно п. 6.6 контракта датой поставки товара считается дата подписания грузополучателем акта приема-передачи товара по форме, установленной приложением № 1 к контракту.

Товар, стоимостью 9 203 750 руб. поставлен в срок, установленный контрактом, что  подтверждается актами приема-передачи товара от 29.11.2016№ 1 и от 01.12.2016 №2.

Поставка товара, на сумму 40 496 500 руб. осуществлена с нарушением срока, что подтверждается актами приема-передачи товара от 15.12.2016 №№ 3, 4, 13, от 26.12.2016 №№ 5, 7, от 27.12.2016 № 6, от 12.01.2017 № 11, от 15.01.2017 № 9, от 20.01.2017 №№10, 14, от 23.01.2017 № 12, от 24.01.2017 № 8.

Сумма неустойки составляет 1 334 543,75 руб.

В целях досудебного урегулирования спора, в адрес ответчика была направлена претензия от 07.08.2017 № 212/6/1247дсп с требованием уплаты штрафных санкций за нарушение сроков исполнения обязательств по государственному контракту.

Однако ООО «КомплектСнаб» претензию Минобороны России не удовлетворило.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с пунктом 10.2 контракта в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом,

Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается Расчет такой неустойки (пени) устанавливается в размерах, определяемых в соответствии с постановлением Правительства от 25.11.2013 № 1063, за каждый факт просрочки, но не менее законной неустойки за каждый факт просрочки.

В соответствии с Постановлением Правительства от 25.11.2013 № 1063 размер неустойки складывается из следующих показателей: (цена контракта — стоимость фактически поставленного товара)  размер ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ, на дату уплаты неустойки (пени) определяемый с учетом коэффициента  количество дней просрочки.

Согласно ст. 329-330 ГК Российской Федерацией исполнение обязательства может обеспечиваться различными способами, в том числе неустойкой (штрафом, пеней),  которой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. При этом по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии со ст. 456 Кодекса продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи; ст. 457 Кодекса устанавливает, что срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 314 Кодекса.

Таким образом, поставщик нарушил срок поставки товара, установленный контрактом,  в связи с чем иск судом удовлетворяется в размере 1 334 543,75 руб.

Государственная пошлина, от уплаты которой истец освобожден, взыскивается с ответчика в доход бюджета в соответствии со ст. 110 АПК Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 309, 329, 330, 456, 457 ГК Российской Федерации, ст. 41, 49, 110-112, 167-171 АПК Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «КомплектСнаб» (640007, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 25.08.2006 г.) в пользу Министерства обороны Российской Федерации (119019, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 27.02.2003 г.) неустойку в размере 1 334 543,75 руб. (Один миллион триста тридцать четыре тысячи пятьсот сорок три рубля семьдесят пять копеек).

            Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «КомплектСнаб» (640007, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 25.08.2006 г.) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме  26 345 руб. (Двадцать шесть тысяч триста сорок пять рублей).

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Арбитражный суд апелляционной инстанции.

Судья                                                                                            И.А.Блинникова