Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-9465/2017

07 мая 2018 года

город Якутск

Резолютивная часть решения объявлена 26.04.2018

Полный текст решения изготовлен 07.05.2018

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Терских В. С., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Никулиной В.Г., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональная техническая компания «Востокстройпроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к акционерному обществу «Госснабсбыт Якутии» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 8 007 015,31 руб.,

при участии:

от истца: не явились, извещены;

от ответчика: ФИО1 – по доверенности от 22.12.2017;

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная техническая компания «Востокстройпроект» (далее – ООО «МТК «Востокстройпроект», истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с иском к акционерному обществу «Госснабсбыт Якутии». Истец просит взыскать с ответчика задолженность по договору на строительство объекта № ДП-01-08-14 от 01.08.2014 в размере 2 916 514 руб.

Позже истец увеличил исковые требования до 8 007 015,3 руб.

Определением суда от 06.03.2018 увеличение исковых требований принято в соответствии с частью 1 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик с иском не согласен. Как считает АО «Госснабсбыт Якутии», истцом не выполнены обязанности по сдаче объекта в эксплуатацию, в связи с чем обязанность по оплате у заказчика не наступила.

Суд, исследовав материалы дела, установил следующие обстоятельства.

01.08.2014 между открытым акционерным обществом «Госснабсбыт Якутии» (заказчик) и ООО «МТК «Востокстройпроект» (подрядчик) заключен договор № ДП-01-08-14 на строительство объекта.

В соответствии с пунктом 1.1 договора подрядчик обязуется выполнить подрядные работы по строительству верхнего строения подъездных железнодорожных путей на объекте «Транспортно-логистический центр в п.Нижний Бестях» (далее – объект) по адресу: Россия, Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский район, п.Н.Бестях (в соответствии с Техническим заданием Приложение № 1 к договору), в сроки, указанные в Календарном графике производства работ (приложение № 2 к договору), а заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные подрядчиком, на условиях настоящего договора.

Пунктом 2.1 договора определено, что общая стоимость выполняемых в соответствии с настоящим договором работ составляет 50 338 382 руб., в том числе НДС 7 678 736,24 руб., в соответствии с локальным сметным расчетом.

В стоимость работ включены все расходы, связанные с выполнением работ по настоящему договору, в полном объеме, все налоги, пошлины, затраты на перебазировку техники, стоимость материалов, содержание вахтового поселка, командировочные расходы и прочие сборы и расходы, связанные с исполнением подрядчиком своих обязательств в соответствии с условиями настоящего договора, в соответствии с техническим заданием (пункт 2.2 договора).

В соответствии с пунктом 3.1.2 договора начало выполнения работ по договору – не позднее 15.08.2014, дата окончания – 01.12.2014 с приемкой последнего этапа работы по форме КС-2 и КС-3 и актом приема-передачи по форме КС-11 (пункт 3.1.3).

21.10.2014 сторонами заключено дополнительное соглашение № 1, которым изменена общая стоимость работ – 45 338 382 руб.,  кроме того пункт 4.1.3 договора изложен в редакции: «Окончательный расчет по договору, после завершения строительства, включая устранение выявленных дефектов, выполнения гарантийных обязательств, в размере 20 % от стоимости принятых заказчиком работ оплачивается не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами КС-11, оформленного в установленном порядке, а также сдачи объекта в эксплуатацию с предоставлением заказчику заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных норм и правовых актов проектной документации и исполнительно-технической документации на выполненные работы. При наличии предъявленных и не оплаченных на момент окончательного расчета штрафов и пеней стоимость выполненных работ уменьшается на сумму этих штрафов и пеней».       

Срок окончания работ определен как 75 дней в даты передачи подрядчику строительной площадки (земляного полотна), с приемкой последнего этапа работы по форме КС-2 и КС-3 и актом приема-передачи по форме КС-11.

18.12.2014 заказчиком и подрядчиком заключено дополнительное соглашение № 2.

Принимая во внимание установившуюся в месте проведения работ низкую температуру, препятствующую своевременную окончанию работ, стороны пришли к соглашению изложить пункт 3.1.3 договора в следующей редакции:

«Дата окончания выполнения работ – 26 января 2015 года, с приемкой последнего этапа работы по форме КС-2 и КС-3 и актом приема-передачи по форме КС-11». В случае, если с 06.01.2015 по 26.01.2015 возникнут актированные дни с низким температурным режимом (ниже минус 40 градусов по Цельсию), то такие дни фиксируются сторонами специальном акте подписываемом уполномоченными представителями сторон, а срок выполнения работ по настоящему договору продляется на количество таких актированных дней».

Кроме того, стороны определили, что срок окончания работ, указанный  в настоящем пункте, является для заказчика существенным условием настоящего договора. Подрядчик согласен с данным условием и гарантирует заказчику соблюдение срока выполнения работ.

Пункты договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются без изменений.

02.02.2015 ОАО «Госснабсбыт Якутии» и ООО «МТК «Востостройсервис» заключили дополнительное соглашение № 3. В соответствии с указанным соглашением:

Стороны в связи с невозможностью выполнения Подрядчиком условий Договора по срокам работ договорились изменить пункт 3.1.3 Договора, изложив его в следующей редакции: «Дата окончания выполнения работ – 28 февраля 2015 г., с приемкой последнего этапа работы по форме КС-2 и КС-3 и актом приема-передачи по форме КС-11». Срок окончания работ, указанный в настоящем пункте, является для Заказчика существенным условием настоящего Договора. Нарушение данного срока является грубым нарушением настоящего Договора. Подрядчик согласен с данным условием и гарантирует Заказчику соблюдение срока выполнения работ».

В пункте 2 дополнительного соглашения № 3 от 02.02.2015, определено, что в связи с увеличением сроков проведения работ стороны договорились снизить общую стоимость работ по договору. В соответствии с настоящим Дополнительным соглашением общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по Договору составляет: 44 838 382,00 (сорок четыре миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч триста восемьдесят два) рубля, в том числе НДС (18%) 6 839 753,19 (шесть миллионов восемьсот тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят три рубля девятнадцать копеек).

В связи с изменением общей стоимости работ по договору, стороны установили, что:

3.1. На дату подписания настоящего дополнительного соглашения заказчик фактически оплатил подрядчику сумму в размере 36 270 705,60 (тридцать шесть миллионов двести семьдесят тысяч семьсот пять рублей шестьдесят копеек) рублей (что составляет 80,9% от общей стоимости работ по Договору).

3.2.   Сумма в размере 2 017 727,19 (два миллиона семнадцать тысяч семьсот двадцать семь рублей девятнадцать копеек) рублей (что составляет 4,5% от общей стоимости работ по Договору) оплачивается заказчиком подрядчику в следующем порядке:

3.2.1.            500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей Заказчик перечисляет Подрядчику   не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты начала работы бригады Подрядчика на Объекте. Бригада Подрядчика должна быть полностью укомплектована специалистами и техникой (оборудованием), необходимыми для выполнения всех оставшихся работ.

3.2.2.            500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей Заказчик перечисляет Подрядчику не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты выполнения 1-го этапа оставшихся работ в соответствии с приложением № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

3.2.3.            500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей Заказчик перечисляет Подрядчику   не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты выполнения 2-го этапа оставшихся работ в соответствии с приложением № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

3.2.4.            517 727.19 (пятьсот семнадцать тысяч семьсот двадцать семь рублей девятнадцать копеек) не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами формы КС-11.

3.3.   Сумма окончательного платежа, установленного пунктом 4.1.3 Договора составляет 6 549 949,2 21 (шесть миллионов пятьсот сорок девять тысяч девятьсот сорок девять рублей двадцать одна копейка), (что составляет 14,6% от общей стоимости работ по Договору) и оплачивается Заказчиком Подрядчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты сдачи объекта в эксплуатацию с предоставлением Заказчику заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных норм и правовых актов проектной документации и исполнительно-технической документации на выполненные работы.

Пункты договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются без изменений.

Дополнительным соглашением № 3/1 от 27.02.2015 стороны продлили срок окончания работ до 31.05.2015.

Дополнительным соглашением № 5 от 31.05.2016 дата окончания выполнения работ определена как 31.05.2016. 

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 08.06.2017 по делу № А58-2913/2016 общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная техническая компания «ВостокСтройПроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) признано несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим утвержден ФИО2.

09.06.2017 ООО «МТК «Востокстройпроект» направило АО «Госснабсбыт Якутии» претензию от 07.06.2017, в которой потребовало оплатить задолженность за выполненные работы в сумме 2 916 514,40 руб.   

Отсутствие оплаты послужило основанием для обращения истца в суд.

Ответчик исковые требования не признал, в представленном в материалы дела отзыве и возражениях на ходатайство указал следующее:

- ответчик с момента подписания договора строительства объекта № ДП-01-8-14 от 01.08.2014 перечислил истцу 40 288 432,79 руб., остаток за вычетом платежей составляет 4 549 949,21 руб.;

- в соответствии дополнительным соглашением № 3 от 02.02.2015 сумма окончательного платежа 6 549 949,21 руб. оплачивается заказчиком подрядчику с даты подписания сторонами КС-11 и не позднее 5 рабочих дней с даты сдачи объекта в эксплуатацию с предоставлением Заказчику заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных норм и правовых актов проектной документации и исполнительно-технической документации на выполненные работы. Истцом договорные обязательства, установленные пунктом 3.3 дополнительного соглашения, не исполнены.

На основании изложенного ответчик считает, что у истца отсутствуют правовые основания для истребования указанной в ходатайстве об уточнении исковых требований суммы.

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.

Согласно пункту 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком (пункт 2 статьи 746 ГК РФ).

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу требований пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Истец, определяя размер исковых требований, указывает, что работы выполнены на сумму 43 237 853,35 руб. Оплата, по мнению истца, произведена в размере 35 230 838,04 руб.

Ответчиком в подтверждение оплаты по договору представлены платежные поручения № 400 от 07.08.2014 на сумму 15 101 514,60 руб., № 541 от 29.09.2014 на сумму 5 106 900,20 руб., № 589 от 13.10.2014 на сумму 3 291 309,64 руб., № 595 от 14.10.2014 на сумму 3 000 000 руб., № 596 от 14.10.2014 на сумму 1 875 000 руб., № 48 от 10.11.2014 на сумму 2 600 000 руб., № 78 от 19.11.2014 на сумму 2 600 000 руб., № 114 от 03.12.2014 на сумму 2 695 981,16 руб., № 59 от 12.02.2015 на сумму 500 000 руб., № 73 от 20.02.2015 на сумму 500 000 руб., № 116 от 31.03.2015 на сумму 835 132,44 руб., № 365 от 20.08.2015 на сумму 1 000 000 руб., № 452 от 17.09.2015 на сумму 1 000 000 руб., всего на сумму 40 105 838,04 руб.

Также ответчиком представлены: дополнительное соглашение № 4 от 11.03.2015, которым ОАО «Госснабсбыт Якутии» и ООО «МТК «Востокстройпроект» произвели зачет взаимных встречных требований на сумму 182 594,75 руб., письмо ООО «МТК «Востокстройпроект» от 14.10.2014 № 868/10, которым подрядчик просит заказчика произвести оплату по счета № 161 от 14.10.2014 (покупка песчано-гравийной смеси) и № 341 от 14.01.2014 (провоз груза) и зачесть данную оплату в счет оплаты работ по договору, счет на оплату ООО «Песчано-гравийный участок» № 161 от 14.10.2014 на сумму 3 000 000 руб., счет на оплату № 341 от 14.10.2014 ООО «Судоходная компания «Якутск» на сумму 1 875 000 руб. 

С учетом изложенного суд считает подтвержденными доводы ответчика об оплате выполненных работ в размере 40 288 432,79 руб. 

Общая стоимость работ определена пунктом 2 дополнительного соглашения № 3 от 02.02.2015 в размере 44 838 382 руб.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пунктам 1, 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иным правовым актом.

Пунктом 3.3 дополнительного соглашения № 3 от 02.02.2015 стороны определили, что сумма окончательного платежа 6 549 949,2 21 руб. оплачивается заказчиком подрядчику не позднее пяти рабочих дней с даты сдачи объекта в эксплуатацию с предоставлением заказчику заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных норм и правовых актов проектной документации и исполнительно-технической документации на выполненные работы.

Включение в договор подряда такого положения об оплате работ не противоречит пункту 2 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Поскольку окончательный расчет по договору производится только после завершения всего комплекса работ, основанием для перечисления истцу спорной суммы будет являться акт по форме КС-11 и представление заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных норм и правовых актов проектной документации и исполнительно-технической документации на выполненные работы.

Доказательств завершения работ, сдачи объекта в эксплуатацию и представления заказчику заключения о соответствии объекта истцом не представлено.

Сторонами не оспаривается, что по состоянию на момент рассмотрения настоящего спора строительство по объекту не окончено, договор не расторгнут, акт приемки законченного строительством объекта не подписан, объект в эксплуатацию не введен.

Поскольку порядок оплаты работы определен сторонами в дополнительном соглашении № 3 от 02.02.2015, а срок окончательной оплаты не наступил, у заказчика не возникла обязанность по оплате выполненных работ в полном объеме.

С учетом изложенного иск удовлетворению не подлежит.

При обращении в суд истцу представлена отсрочка уплаты государственной пошлины. В соответствии с правилами статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина в размере 63 035 руб. подлежит взысканию с истца в доход федерального бюджета.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

в иске отказать полностью.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональная техническая компания «Востокстройпроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 63 035 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

 

Судья

                            В.С.Терских