АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-20619/2023

г. Владивосток

20 февраля 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена  06 февраля 2024 года . 

Полный текст решения изготовлен  20 февраля 2024 года.

            Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Зайцевой Л.В.,

При ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ДНС СТРОЙ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу общество с ограниченной ответственностью «Стройтехника» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 4 342 634 рублей 75 копеек

при участии:

от истца - ФИО2, паспорт,  доверенность  от 21.02.2023 сроком на  1 год, диплом;

от ответчика -  ФИО3, паспорт,  доверенность  от 16.02.2023 сроком по 31.12.2025, диплом, 

 

установил:

Общество  с ограниченной ответственностью «ДНС СТРОЙ» (далее – истец, ООО «ДНС Строй») обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд Приморского края к обществу с ограниченной ответственностью «Стройтехника» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании неотработанного аванса в размере 4 342 634  рубля 75 копеек.

В судебном заседании истец поддержал исковые требования. 

Ответчик письменный отзыв не представил, в судебном заседании, не оспаривая факт выполнения работ, против удовлетворения исковых требований возражал. 

Оценив доводы сторон и представленные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил следующее.

21.10.2020 между ООО «ДНС СТРОЙ» (Заказчик) и ООО «Стройтехника» (Подрядчик) заключен договор подряда №DNSS-1020-283 (далее - Договор №1), согласно условиям которого Подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по возведению подпорной стены на объекте Торговый центр «Зима Южная» в п. Зима Южная Надеждинского муниципального района Приморского края, расположенный на земельном участке с кадастровыми номерами 25:10:270001:747, 25:10:270001:777, а Заказчик обязался принять и оплатить результат выполненных работ (пункты 1.1. и 1.2 Договора).

Согласно пунктам 2.1 и 2.2. Договора срок начала работ – 10.11.2020, срок окончания работ – 27.11.2020.

В силу пункта 2.3 Договора промежуточные сроки производства  работ установлены Графиком производства работ. 

Общая стоимость выполнения работ составляет 5 165 932 рубля, в том числе  НДС 20% - 860 988 рубля 60 копеек. 

Для выполнения работ по настоящему Договору Заказчик перечислил Подрядчику предварительную оплату (аванс) в размере 2 500 000 рублей, что подтверждается платёжным поручением №2490 от 05.11.2020.

При этом Подрядчик выполнил, а Заказчик принял результатов выполненных работ только на общую сумму 168 853 рубля 20 копеек, что подтверждается подписанными сторонами справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №1 от 29.09.2021 и актом о приёмке выполненных работ по форме КС-2 №1 от 29.09.2021. 

Ввиду существенного нарушения срока исполнения обязательств Подрядчиком 02.02.2023 ООО «ДНС СТРОЙ» уведомлением отказалось от исполнения Договора (письмо исх. №23-75), направленное Подрядчику 02.02.2023. 

Также 15.11.2021 между ООО «ДНС СТРОЙ» (Заказчик) и ООО «Стройтехника» (Подрядчик) заключен договор подряда №DNSS-1121-847 (далее — Договор №2), согласно условиям которого Подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по устройству фундамента жилого дома №5 жилого комплекса «Зима Южная» в п. Зима Южная Надеждинского муниципального района Приморского края, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 25:10:270001:778, а Заказчик обязался принять и оплатить результат выполненных работ (пункт 1.1. и 1.2 Договора).

Согласно пунктам 2.1 и 2.2. Договора срок начала работ – в течении 1 календарного дня  с даты передачи строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, срок окончания работ – в течение 49 календарных дней с даты начала выполнения работ.

Промежуточные сроки производства  работ установлены Графиком производства работ. 

Согласно пункта 3.1 Договора цена договора является твердой и составляет денежную сумму  в размере  12 952 441 рубль 20 копеек, в том числе НДС 20% - 2 158 740 рублей 20 копеек. 

Для выполнения работ по настоящему Договору Заказчик перечислил Подрядчику предварительную оплату (аванс) в размере 4 336 664 рубля 80 копеек, что подтверждается платёжным поручением № 4610 от 25.11.2021.

При этом Подрядчик выполнил, а Заказчик принял результатов выполненных работ только на общую сумму 56 481 рубль 60 копеек, что подтверждается подписанными сторонами справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №1 от 02.03.2022 и актами о приёмке выполненных работ по форме КС-2 №1 от 02.03.2022 на сумму 56 481 рубль 60 копеек.

24.12.2021 в рамках Договора №2 заключено дополнительное соглашение №1 (далее — Соглашение к Договору №2) на выполнение дополнительных работ по уборке снега и доработке основания, стоимость которых составила 485 000 рублей (160 000 рублей — стоимость работ по уборке снега, 285 000 рублей — стоимость работ по доработке основания).

Подрядчик выполнил, а Заказчик принял результатов выполненных работ на общую сумму 445 000 рублей 00 копеек, что подтверждается Актами сдачи-приёмки выполненных работ №4, №5 от 10.01.2022. Указанные работы оплачены не были. 

Учитывая существенное нарушение сроков исполнения обязательств ООО «Стройтехника», 01.02.2022 ООО «ДНС СТРОЙ» отказалось от исполнения Договора (письмо исх. №22-137), направленное в адрес Подрядчика 03.02.2022.

Также 22.04.2021 между ООО «ДНС СТРОЙ» (Заказчик) и ООО «Стройтехника» (Подрядчик) заключен договор подряда № DNSS-0421-562 (далее — Договор №3), согласно условиям которого Подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по устройству стен и гидроизоляции подвалов жилого дома №10 жилого комплекса «Зима Южная» Надеждинского муниципального района Приморского края, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 25:10:270001:784, а Заказчик обязался принять и оплатить результат выполненных работ (пункт 1.1. и 1.2 Договора).

Согласно пунктам 2.1 и 2.2. Договора срок начала работ - в течение 3 дней с даты передачи строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, срок окончания работ - в течение 30 дней с даты начала выполнения работ.

Цена Договора является твердой и составляет денежную сумму в размере 1 875 058 рублей 80 копеек, включая НДС 20% - 312 509 рублей 80 копеек.

Цена Договора может измениться не более чем на 10 (десять) процентов в случае выявления и подтверждения необходимости проведения дополнительных работ (Приложение к Договору) путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Окончательная стоимость работ будет уточнена по факту выполненных работ на основании актов по форме КС-2, КС-3 путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору (пункт 3.1 Договора).

Подрядчик выполнил, а Заказчик принял результат выполненных работ на общую сумму 1 875 058 рублей 80 копеек, что подтверждается подписанными сторонами справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №1 от 15.11.2021 и актом о приёмке выполненных работ по форме КС-2 №1 от 15.11.2021. работы заказчиком не оплачены.

В связи с порчей ООО «Стройтехника» давальческих материалов по договору №3 ООО «ДНС СТРОЙ» была удержана из оплаты работ сумма в размере 170 829 рублей 65 копеек на основании письма вх. №21-387 от 18.11.2021. 

Соответственно неоплаченной остались работы на сумма 1 704 229 рублей 15 копеек. 

Кроме того, 16.08.2021 между ООО «ДНС СТРОЙ» (Заказчик) и ООО «Стройтехника» (Подрядчик) заключен договор подряда № DNSS-0821-747 в редакции дополнительного соглашения №1 от 28.02.2022 года (далее — Договор №4), согласно условиям которого Подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по устройству фундамента секций ШСЗ и УСД2 жилого дома №5 жилого комплекса «Зима Южная» в п. Зима Южная Надеждинского муниципального района Приморского края, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 25:10:270001:778, а Заказчик обязался принять и оплатить результат выполненных работ (пункт 1.1. и 1.2 Договора).

Согласно пунктам 2.1 и 2.2. Договора срок начала работ – в течение 1 дня с даты передачи строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, срок окончания работ - в течение 36 (тридцати шести) календарных дней с даты начала выполнения работ.

Промежуточные сроки производства работ установлены Графиком производства работ.

Цена настоящего Договора является твердой и составляет денежную сумму в размере 6 233 948 рублей 40 копеек, в том числе НДС 20% 1 038 991 рубль 40 копеек. (пункт 3.1 Договора).

Подрядчик выполнил, а Заказчик принял результат выполненных работ на общую сумму 108 006 рублей, что подтверждается подписанными сторонами справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №1 от 16.02.2022, актом о приёмке выполненных работ по форме КС-2 №1 от 16.02.2022. Однако указанные работы заказчиком не оплачены. 

26.08.2021 между ООО «ДНС СТРОЙ» (Заказчик) и ООО «Стройтехника» (Подрядчик) заключен договор подряда № DNSS -0822-768 от 26.08.2021 в редакции дополнительного соглашения №1 от 29.10.2021 (далее — Договор №5), согласно условиям которого Подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по бетонированию монолитных участков и устройству лотков территории благоустройства объекта «Домостроительный комбинат Приморье, 3 очередь», расположенного по адресу: Надеждинский муниципальный район, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, Территория ТОР Надеждинская, ул. Центральная, д. 30, земельный участок с кадастровым номером 25:10:011500:609, а Заказчик обязался принять и оплатить результат выполненных работ (пункты 1.1. и 1.2 Договора).

Согласно пунктам 2.1 и 2.2. Договора срок начала работ – в течение 1 дня с даты передачи строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, срок окончания работ - 29.10.2021.

Цена Договора (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 29.10.2021) составила 1 535 684 рублей 40 копеек, в том числе НДС – 255 947 рублей 40 копеек. 

Заказчик внес аванс  Подрядчику в сумме 1 220 855 рублей 90 копеек, что подтверждается платежным поручением  №4438 от 10.11.2021.

Подрядчик выполнил, а Заказчик принял результат выполненных работ на общую сумму 1 232 316 рублей, что подтверждается подписанными сторонами справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №1 от 26.10.2021, №2 от 08.10.2021 и актами о приёмке выполненных работ по форме КС-2 №1 от 26.10.2021, №2 от 08.11.2021.

Задолженность заказчика по оплате выполненных работ составила 11 460 рублей 10 копеек.

Ввиду нарушения сроков исполнения обязательств Подрядчиком ООО «ДНС СТРОЙ» 02.02.2023 отказался от исполнения Договора (письмо исх. №23-76), направленного 02.02.2023 в адрес Подрядчика. 

04.08.2023 в целях взаиморасчёта по заключённым Договорам Заказчик направил в адрес Подрядчика односторонний акт зачёта встречных однородных требований, согласно которому обязательства ООО «ДНС СТРОЙ» перед ООО «Стройтехника» по оплате выполненных работ по договорам подряда № DNSS-0421-562 от 22.04.2021, № DNSS-0821 747 от 16.08.2021, № DNSS-0821-768 от 26.08.2021, № DNSS-1121-847 от 15.11.2021 в общей сумме 2 268 695 рублей 25 копеек (445 000 рублей + 1 704 229 рублей 15 копеек + 108 006 рублей + 11 460 рублей 10 копеек) прекращаются путём зачёта встречных требований у ООО «ДНС СТРОЙ» к ООО «Стройтехника» по возврату неотработанного аванса по договорам подряда № DNSS-1020-283 от 21.10.2020, № DNSS-1121-847 от 15.11.2021.

После зачета встречных однородных требований задолженность ООО «Стройтехника» составила 4 342 634 рубля 75 копеек, которая так и не была погашена. 

Уведомлениями об одностороннем отказе от договоров (письмо исх. № 22-137 от 01.02.2022, №23-75 от 02.02.2023, №23-76 от 02.02.2023), досудебными претензиями (письмо исх. № 23-61 от 30.01.2023, №23-488 от 30.06.2023) и односторонним актом зачёта встречных однородных требований Заказчик требовал возврата сумм неотработанных авансов.

Однако ответы от Подрядчика не поступали, требования не были удовлетворены, что 

Оставление досудебных претензий об оплате неотработанного аванса явилось основанием для обращения в арбитражный суд с рассматриваемым исковым заявлением.

Судом также установлено, что определением от 06.12.2023 в отношении ответчика возбуждено дело № А51-18442/2023 о его несостоятельности (банкротстве).

Однако в настоящее время какая-либо процедура банкротства в отношении ответчика не введена.

В связи с этим спор рассмотрен судом по существу.

Исследовав и оценив в соответствии со статьями 65, 71 АПК РФ представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в силу следующего.

По правилам статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. 

В соответствии со статьей 702 ГК РФ одна сторона обязуется выполнить по заданию другой стороны определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Статья 450.1 ГК РФ предоставляет стороне право на односторонний отказ от исполнения договора. Так в соответствии с указанной нормой, предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Из системного толкования статьи 450.1 ГК РФ следует, что право на односторонний отказ от исполнения договора предоставляет либо в силу закона, либо по соглашению сторон.

По смыслу пункта 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии со статьей 717 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

В рамках договора №DNSS-1020-283 от 21.10.2020 (Договор № 1) Заказчиком внесен аванс в размере 2 500 000 рублей по платёжному поручению №2490 от 05.11.2020. В рамках договора №DNSS-1121-847 от 15.11.2021 внесен аванс размере 4 336 664 рубля 80 копеек, что подтверждается платёжным поручением №4610 от 25.11.2021. Указанные денежные средства были освоены ответчиком частично. 

Однако поскольку сроки выполнения работ не соблюдены, доказательств выполнения и сдачи работ в полном объеме ответчиком не представлено, то Заказчик отказался в одностороннем порядке от исполнения Договоров, о чем Подрядчику направлены Уведомления об одностороннем отказе от договоров (письма исх. № 22-137 от 01.02.2022, №23-75 от 02.02.2023) в соответствии с пунктом 10.3 Договоров, согласно которому договоры считаются расторгнутыми  с момента получения соответствующего уведомления. 

Уведомления об одностороннем отказе от договоров (письма исх. № 22-137 от 01.02.2022, №23-75 от 02.02.2023) получены ответчиком 07.02.2022, 28.03.2023.

Соответственно, договоры расторгнуты. 

04.08.2023 в целях взаиморасчёта по заключённым Договорам Заказчик в порядк статьи 410 ГК РФ направил в адрес Подрядчика односторонний акт зачёта встречных однородных требований, согласно которому обязательства ООО «ДНС СТРОЙ» перед ООО «Стройтехника» по оплате выполненных работ по договорам подряда № DNSS-0421-562 от 22.04.2021, № DNSS-0821 747 от 16.08.2021, № DNSS-0821-768 от 26.08.2021, № DNSS-1121-847 от 15.11.2021 в общей сумме 2 268 695 рублей 25 копеек ((445 000 рублей + 1 704 229 рублей 15 копеек + 108 006 рублей + 11 460 рублей 10 копеек) прекращаются путём зачёта встречных требований у ООО «ДНС СТРОЙ» к ООО «Стройтехника» по возврату неотработанного аванса по договорам подряда № DNSS-1020-283 от 21.10.2020, № DNSS-1121-847 от 15.11.2021 на указанную сумму.

После зачета встречных однородных требований задолженность ООО «Стройтехника» составила 4 342 634 рубля 75 копеек.

На основании статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 

Согласно части 3 статьи 1103 ГК РФ положения о неосновательном обогащении подлежат применению к требованиям одной стороны в обязательстве о возврате исполненного в связи с этим обязательством. Вместе с тем стороны в силу пункта 4 статьи 452 ГК РФ стороны не вправе требовать возмещения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон. 

Из смысла названной нормы следует, что обязательным условием взыскания неосновательного обогащения является приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований.

В пункте 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 января 2000 года № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» разъяснено, что при расторжении договора сторона не лишена права истребовать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно обогатилась. Положения пункта 4 статьи 453 ГК РФ не исключают возможности истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала. При ином подходе на стороне ответчика имела бы место необоснованная выгода. Получатель средств, уклоняясь от их возврата, несмотря на отпадение основания для удержания, должен рассматриваться как лицо, неосновательно удерживающее средства. 

В рассматриваемом случае требование о возврате неосвоенной суммы оплаты по договорам, произведенной истцом, является следствием обоснованного отказа от договоров. Ответчик, в отсутствие оснований для удержания, уклоняется от возврата денежных средств истцу и является лицом, неосновательно удерживающим денежные средства.

Таким образом, ответчик обязан возвратить денежные средства истцу, если не докажет неправомерность действий истца по одностороннему отказу от договоров, факт исполнения обязательства по договору до момента его расторжения. 

Лицо, обратившееся в суд с данным требованием, в силу статьи 65 АПК РФ, должно доказать факт приобретения (сбережения) ответчиком имущества за счет истца и размер неосновательного обогащения.

Подтверждая размер неосновательного обогащения ответчика в сумме 4 342 634 рубля 75 копеек, истец в материалы дела представил платежные поручения, акт зачёта встречных однородных требований.

В свою очередь ответчик не представил доказательств освоения денежных средств в сумме 4 342 634 рубля 75 копеек, своего расчета стоимости и объема оказанных услуг.

Таким образом, с учетом того, что истец отказался от исполнения Договоров, и Договоры расторгнуты, требования истца о взыскании с ответчика неосновательного обогащения в размере 4 342 634 рубля 75 копеек, с учетом произведенного истцом зачета встречных однородных требований,  являются законными и обоснованными и подлежат удовлетворению. 

Ссылка ответчика устно в судебном заседании на то, что согласно писем от 25.02.2022 № 22-228, от 28.03.2022 № 22-363 истец также в счет взаиморасчетов между сторонами планировал принять указанные в письме от контейнеры, которые однако в расчете исковых требований они не учтены, судом не принимается, поскольку как указал истец и не опроверг ответчик, указанные переговоры ни к чему не привели и к зачету стоимость данных контейнеров принята не была. Доказательств обратного ответчиком не представлено. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ, по результатам рассмотрения спора, понесенные истцом судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройтехника» (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ДНС СТРОЙ» (ИНН 

<

***>) 4 342 634 рублей 75 копеек неосновательного обогащения, 44 713 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдается после вступления решения суда в законную силу по заявлению взыскателя.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

 

            Судья                                                                                      Зайцева Л.В.