100140_583452  

 

Арбитражный суд Республики Алтай  

649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) 

http://my.arbitr.ru/ http://altai.arbitr.ru/  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А02-807/2023

город Горно-Алтайск

20 октября 2023 года

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Новиковой О. Л., при ведении  протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном  заседании материалы дела по исковому заявлению Прокурора Республики Алтай (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 25, г. Горно-Алтайск,  Республика Алтай) к Муниципальному казенному учреждению "Городское хозяйство и  лесничество" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Строителей, д. 3/1, г. Горно- Алтайск, Республика Алтай) и к Обществу с ограниченной ответственностью  "Майминское ДРСУ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Промышленная, д. 2,  пом. 7,8, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) при участии в деле в качестве третьего  лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,  Исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления - администрация  города Горно-Алтайска (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, пр-кт.  Коммунистический, д. 18, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай),  

о признании частично недействительными дополнительные соглашения № 2 от  21.07.2022, № 3 от 07.09.2022 и № 5 от 29.10.2022 к муниципальному контракту,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

исковые требования удовлетворить. 

Признать недействительными подпункты «в», «г» в части слов « не позднее  30.09.2022 г.», «д» в части слов «Срок действия контракта: с даты заключения контракта  и до 30.09.2022 г., «ж» в части сроков начала и окончания выполнения строительно –  монтажных работ пункта 1 дополнительного соглашения № 2 к муниципальному  контракту № 210-08-21 от 31.08.2021, заключенного между Муниципальном казенным  

учреждением "Городское хозяйство и лесничество" и Обществом с ограниченной  ответственностью "Майминское ДРСУ" 21.07.2022.  

Признать недействительными пункт 2 в части слов « окончание выполнения  работ: 30.09.2022 года», пункт 3, 4, 5 в части слов « но не позднее 30.10.2022 г.», 6 в  части слов «Срок действия контракта: с даты заключения контракта и по 30.10.2022  г.» дополнительного соглашения № 3 к муниципальному контракту № 210-08-21 от  31.08.2021, заключенного между Муниципальном казенным учреждением "Городское  хозяйство и лесничество" и Обществом с ограниченной ответственностью "Майминское  ДРСУ" 07.09.2022.  

Признать недействительными пункты 4,5 в части слов « но не позднее  09.12.2022 г», 6 в части слов «Срок действия контракта: с даты заключения контракта  и по 09.12.2022 г. дополнительного соглашения № 5 к муниципальному контракту №  210-08-21 от 31.08.2021, заключенного между Муниципальном казенным учреждением  "Городское хозяйство и лесничество" и Обществом с ограниченной ответственностью  "Майминское ДРСУ" 29.10.2022.  

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Майминское ДРСУ"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Промышленная, д. 2, пом. 7,8, г. Горно- Алтайск, Республика Алтай) в доход федерального бюджета 9000 руб. государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня изготовления полного  текста решения в Седьмой арбитражный апелляционный (г. Томск) с подачей жалобы  через Арбитражный суд Республики Алтай.  

Судья О.Л. Новикова