Арбитражный суд Краснодарского края

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А32-15845/2021

г. Краснодар

27 сентября 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 15 сентября2021 года

            Полный текст решения изготовлен 27 сентября 2021 года

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Бондаренко И.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО «СПРИНТ», Республика Саха/Якутия, г. Нерюнгри, 

к АО «Краснодаргазстрой», г. Краснодар, 

третье лицо: арбитражный управляющий ФИО2, г. Ростов-на-Дону, 

о взыскании,

 

при участии в заседании: 

от истца: не явился, уведомлен, 

от ответчика: ФИО3 - паспорт, доверенность,

от третьего лица: не явился, уведомлен, 

при ведении аудиозаписи, 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО «СПРИНТ» (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с АО «Краснодаргазстрой» (далее – ответчик) в пользу ООО «СПРИНТ» задолженности в общей сумме 13 191 612,04 руб., а именно: 12 627 588,72 руб. – основного долга и 564 023,32 руб. – пени за нарушение сроков оплаты по договору субподряда № 85-71С от 20.06.2019. 

Истец и третье лицо явку представителей в судебное заседание не обеспечили, уведомлены о рассмотрении дела. От истца поступили дополнительные пояснения.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения требований истца, представил письменные пояснения.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в судебном заседании 08.09.2021 объявлен перерыв до 15.09.2021 до 16-50 часов.

После перерыва заседание продолжено в отсутствие надлежащим образом извещенных представителей сторон.

Согласно части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

В соответствии с частью 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Суд, исследовав материалы дела и оценив в совокупности все представленные доказательства, установил следующее. 

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 02 ноября 2020 года в отношении АО «Краснодаргазстрой» введена процедура банкротства - наблюдение.

Временным управляющим АО «Краснодаргазстрой» утверждена арбитражный управляющий ФИО2 (ИНН 

<

***>, адрес: 344029, г. Ростов-на-Дону, а/я 1612, регистрационный номер в государственном сводном реестре арбитражных управляющих - 16810), член Союза арбитражных управляющих «Авангард».

На момент введения в отношении Акционерного общества «Краснодаргазстрой» процедуры банкротства АО «Краснодаргазстрой» имеет неисполненные текущие денежные обязательства перед ООО "Спринт" в сумме 13 191 612,04 рублей, в том числе 12 627 588, 72 рублей - основной долг, 564 023,32 рублей пени.

Как следует из материалов дела, между ООО «СПРИНТ» (субподрядчик) и АО «Краснодаргазстрой» (подрядчик) 20.06.2019 заключен Договор субподряда № 85-71С (далее – Договор), по условиям которого субподрядчик обязуется по заданию подрядчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) выполнить работы по строительству сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения к базе ЛПУ МГ № 3 магистрального газопровода «Сила Сибири», а также сдать результат работ подрядчику, а подрядчик обязуется создать Субподрядчику указанные в Договоре условия для выполнения работ, принять результат работ и уплатить цену Договора (п. 1.1. Договора).

Объем работ по Договору определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). Работы по Договору подлежат выполнению Субподрядчиком в строгом соответствии с требованиями Применимого права и указаниями Подрядчика (пункт 1.2 Договору).

Работы по Договору выполняются для нужд филиала «НГРЭС» (пункт 1.3 Договора);

Место выполнения Работ: Саха (Якутия), г. Нерюнгри, НГРЭС (пункт 1.4 Договора);

Согласно п.п. 1.5; 1.5.1; 1.5.2 Договора, работы выполняются Субподрядчиком в следующие сроки:

- начало выполнения работ: с момента заключения договора.

- окончание выполнения работ: 31 декабря 2019 г. 

Работы, указанные в пункте 1.1 Договора, подлежат выполнению в отношении Объектов, указанных в Приложении № 10 к Договору (пункт 1.6 Договора).

В соответствии с разделом 3 Договора, 3.1. цена Договора определяется на основании сводного сметного расчета (Приложение № 4 к договору), объектного сметного расчета № 130- 1-С-19 (приложение № 4.1 к договору), локальных сметных расчетов № 130-01-04-С-19 (приложение № 4.1.1 к договору), № 130-02-04-С-19 (приложение № 4.1.2 к договору), № 130- 03-04-С-19 (приложение № 4.1.3 к договору), №130-04-04-С-19 (приложение № 4.1.4 к договору), № 130-05-04-С-19 (приложение № 4.1.5 к договору), № 130-06-04-С-19 (приложение № 4.1.6 к договору), объектного сметного расчета № 130-2-С-19 (приложение № 4.2 к договору), локальных сметных расчетов № 130-07-04-С-19 (приложение № 4.2.1 к договору), № 130-08-04-С-19 (приложение № 4.2.2 к договору), №130-09-04-С-19 (приложение № 4.2.3 к договору), объектного сметного расчета № 130-2-С-19 (приложение № 4.3 к договору), локальных сметных расчетов № 130-10-04-С-19 (приложение № 4.3.1 к договору), № 130-11-04- С-19 (приложение № 4.3.2 к договору), № 130-12-04-С-19 (приложение № 4.3.3 к договору), № 130-13-04-С-19 (приложение № 4.3.4 к договору), № 130-14-04-С-19 (приложение № 4.3.5 к договору), № 130-15-04-С-19 (приложение № 4.3.6 к договору), № 130-16-04-С-19 (приложение № 4.3.7 к договору), является предельной и составляет 293 459 028,00 (Двести девяносто три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч двадцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) - 48 909 838,00 (Сорок восемь миллионов девятьсот девять тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек.

Предельная цена Работ (без учета Лимита на непредвиденные работы и затраты) составляет 284 911 687,20 (Двести восемьдесят четыре миллиона девятьсот одиннадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 20 копеек, в том числе НДС (20%) -47 485 281,20 (Сорок семь миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч двести восемьдесят один) рубль 20 копеек (пункт 3.1.1 Договора);

Лимит на непредвиденные работы и затраты составляет 8 547 340,80 (Восемь миллионов пятьсот сорок семь тысяч триста сорок) рублей 80 копеек, в том числе НДС (20%) - 1 424 556,80 (Один миллион четыреста двадцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей 80 копеек (пункт 3.1.2 Договора);

В соответствии с п. 3.8 Договора, оплата по Договору осуществляется Подрядчиком в следующем порядке:

Авансовые платежи в счет стоимости работ в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости договора выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения подрядчиком счета, выставленного субподрядчиком, но не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала работ на объекте, определенной в соответствии с Календарным графиком производства и финансирования работ (Приложение № 3 к Договору) (пункт 3.8.1 Договора).

Последующие платежи в размере 70% (семидесяти процентов) от стоимости выполненных работ выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счёта, выставленного Субподрядчиком (пункт 3.8.2 Договора).

Окончательный расчёт за выполненные Субподрядчиком работы производится Подрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после завершения работ, устранения Дефектов, недоделок, подписания Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией, после получения целевых финансовых средств от Заказчика и при условии отсутствия взаимных претензий по оказанным Подрядчиком встречным услугам по заправке ГСМ транспорта Субподрядчика, в том числе по их оплате (пункт 3.8.3 Договора).

В соответствии с разделом 4 Договора, по завершении промежуточных (ежемесячных) объемов выполненных работ, Субподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Подрядчику подписанный со своей стороны в 3 (трёх) экземплярах Акт освидетельствования выполненных работ по форме Приложения № 8 к Договору, с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах. Приемка Подрядчиком промежуточных (ежемесячных) объемов выполненных работ означает согласие Подрядчика с их качеством и право Субподрядчика на получение оплаты за выполненные работы, при этом ответственность за сохранность результатов работ остается за Субподрядчиком до полного окончания всех работ по Договору и подписания документов, указанных в пунктах 4.2., 5.1. (пункт 4.1 Договор);

По завершении выполнения Работ по Договору Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Подрядчику подписанные со своей стороны:

         Акт КС-2 (Приложение № 12 к Договору), Справку КС-3 (Приложение № 13 к Договору) на весь объем выполненных Работ по Объекту в 3 (трёх) экземплярах с приложением Приемосдаточной и Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах;

         Акт КС-11 в 3 (трёх) экземплярах;

         Акт ОС-3 в 3 (трёх) экземплярах (пункт 4.2 Договора).

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пункте 4.1 Договора, Подрядчик подписывает и передает Субподрядчику 1 (один) экземпляр каждого указанного акта, либо направляет Субподрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ (далее - «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ, а также срок на их устранение (пункт 4.3 Договора).

К Договору субподряда № 85-71С от 20.06.2019 Сторонами подписано 5 дополнительных соглашений:

           --Дополнительное соглашение № 1 от 21.01.2020 к Договору субподряда № 85-71С от 20.06.2019, которым срок окончания выполнения работ был продлен до 30.06.2020, а также принят в новой редакции календарный график работ.

           --Дополнительное соглашение № 2 от 18.03.2020 к Договору субподряда № 85-71С от 20.06.2019, которым изменены платежные реквизиты ООО "Спринт"

           --Дополнительное соглашение № 3 от 28.05.2020 к Договору субподряда № 85-71С от 20.06.2019, которым изменены платежные реквизиты ООО "Спринт", продлен срок окончания выполнения работ до 31.07.2020, установлена предельная стоимость работ 293 229 740 рублей; аннулировано Приложение № 1, введено взамен Приложение № 1 "Техническое задание с Ведомостями объемов работ"; аннулировано Приложение № 3 "График производства работ и финансирования работ", принято в редакции Приложения № 2 к Доп. соглашению № 3; Аннулировано Приложение № 4 "Сводный сметный расчет стоимости строительства", приняты в редакции Приложения № 3 и Приложения № 3.1-3-20 к настоящего Доп. соглашению.

           --Дополнительное соглашение № 4 от 31.07.2020 к Договору субподряда № 85-71С от 20.06.2019, которым срок окончания выполнения работ был продлен до 30.09.2020 г.

            --Дополнительное соглашение № 5 от 30.09.2020 к Договору субподряда № 85-71С от 20.06.2019, которым срок окончания выполнения работ был продлен до 15.10.2020.

Истец обязательства по выполнению работ исполнил надлежащим образом, выполнив работы на общую сумму 293 229 740,68 рублей в соответствии со следующими документами:

Система водоотведения:

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №10 от 15.10.2020 на сумму 14 312 277,06 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №11 от 15.10.2020 на сумму 826 779,30 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №12 от 15.10.2020 на сумму 10 696 301,94 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №13 от 15.10.2020 на сумму 6 164 624,10 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №14 от 15.10.2020 на сумму 6 416 174,22 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №15 от 15.10.2020 на сумму 6 334 847,76 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №16 от 15.10.2020 на сумму 18 434 522,76 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №17 от 15.10.2020 на сумму 48 179 894,10 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №18 от 15.10.2020 на сумму 300 354,66 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №19 от 15.10.2020 г. на сумму 1 189 990,74 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №20 от 15.10.2020 г. на сумму 154 699,14 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 (в составе акта № 21 от 15.10.2020  на сумму 6 460 483,36 руб.) на сумму 2 519 090,32 руб.;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КСЗ от 15.10.2020 на сумму 115 529 556,10 руб.

             Система водоснабжения:

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №1 от 15.10.2020 на сумму 28 703 977,92 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №2 от 15.10.2020 на сумму 32 084 166,84 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №3 от 15.10.2020 на сумму 665 297,22 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №4 от 15.10.2020 на сумму 154 699,14 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 на сумму 1 409 935,92 руб. (в составе Акта № 21 от 15.10.2020. на сумму 6 460 483,36 руб.);

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КСЗ от 15.10.2020  на сумму 63 018 077,04 руб.;

Система Теплоснабжения:

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №5 от 15.10.2020 на сумму 102 119 390,82 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №6 от 15.10.2020 на сумму 8 022 273,48 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №7 от 15.10.2020 г. на сумму 778 276,86 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №8 от 15.10.2020 на сумму 33 550,20 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №9 от 15.10.2020  на сумму 1 197 159,06 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 на сумму 2 531 457,12 руб. (в составе Акта № 21 от 15.10.2020  на сумму 6 460 483,36 руб.);

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КСЗ от 15.10.2020 на сумму 114 682 107,54 руб.;

Согласно вышеперечисленным Актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, ответчиком приняты работы по:

1) Системе водоотведения на сумму 115 529 556,10 руб.

2) Системе водоснабжения на сумму 63 018 077,04 руб.

3) Системе теплоснабжения на сумму 114 682 107,54 руб.;

Итого: на общую сумму 293 229 740,68 рублей.

16 октября 2020 года был подписан Акт № 01 от 16 октября 2020 г. приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-11.

В соответствии с п. 3.8.3 Договора, окончательный расчёт за выполненные Субподрядчиком работы производится Подрядчиком в течение 30 календарных дней после завершения работ, устранения Дефектов, недоделок, подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

В силу п. 3.9 Договора субподряда, расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится подрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика, указанный в Договоре. Обязательство подрядчика по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета подрядчика.

Ответчиком произведена частичная оплата работ на общую сумму 280 602 151,96 рублей платежными поручениями:

Платежное поручение № 1876 от 18.07.2019 на сумму 5 988 000 руб.

Платежное поручение № 2054 от 08.08.2019 на сумму 6 320 967,84 руб.

Платежное поручение № 2227 от 27.08.2019 на сумму 16 234 752,88 руб.

Платежное поручение № 2305 от 30.08.2019 на сумму 53 322 362,88 руб.

Платежное поручение № 2480 от 23.09.2019 на сумму 34 941 405,82 руб.

Платежное поручение № 3258 от 19.11.2019 на сумму 47 613 282,71 руб.

Платежное поручение № 3760 от 27.12.2019 на сумму 10 000 000 руб.

Платежное поручение № 27 от 21.01.2020 на сумму 18 000 000 руб.

Платежное поручение № 171 от 12.03.2020 на сумму 3 000 000 руб.

Платежное поручение № 401 от 24.04.2020 на сумму 31 212 573,18 руб.

Платежное поручение № 4623 от 13.07.2020 на сумму 6 930 000 руб.

Платежное поручение № 4882 от 17.07.2020 на сумму 8 500 000 руб.

Платежное поручение № 1368 от 18.08.2020 на сумму 8 100 000 руб.

Акт № 75 от 15.10.2020 г. прекращения обязательств зачетом встречных однородных требований на сумму 4 806 091,56 руб.

Платежное поручение № 3449 от 10.11.2020 на сумму 10 198 868,84 руб.

Платежное поручение № 3451 от 11.11.2020 на сумму 702 руб.

Платежное поручение № 834 от 03.02.2021 на сумму 15 433 144,25 руб.

Остаток задолженности составил 12 627 588, 72 рублей.

Между АО "КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ» (подрядчик) и ООО "СПРИНТ" (субподрядчик) составлен и подписан акт сверки взаимных расчетов по договору за период 01.01.2017 - 18.01.2021. 

На основании данных учета акта сверки взаимных расчетов, по состоянию на 18.01.2021 задолженность АО «КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ» в пользу ООО «СПРИНТ» составила 12 627 588,72 рублей.

На сумму основного долга начислены пени.

В целях досудебного урегулирования спора, истцом в адрес ответчика 02.03.2021 направлена претензия от 25.02.2020.

Однако указанная претензия оставлена ответчиком без удовлетворения.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Проверив и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к следующим выводам. 

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, оказать услуги, уплатить деньги и т.д. (пункт 1 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Как указано в статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Спорные отношения подпадают под правовое регулирование главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, с применением в неурегулированной части общих положений о договоре подряда (параграф 1 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные параграфом 1 главы 37 ГК РФ, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров (п. 2 ст. 702 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с пунктом 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации, если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Пунктом 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ осуществляется в соответствии со статьей 711 данного Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

На основании пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В пункте 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" разъяснено, что основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Факт надлежащего исполнения истцом обязательств по договору подтверждается следующими представленными в материалы дела документами: 

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №10 от 15.10.2020 на сумму 14 312 277,06 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №11 от 15.10.2020 на сумму 826 779,30 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №12 от 15.10.2020 на сумму 10 696 301,94 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №13 от 15.10.2020 на сумму 6 164 624,10 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №14 от 15.10.2020 на сумму 6 416 174,22 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №15 от 15.10.2020 на сумму 6 334 847,76 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №16 от 15.10.2020 на сумму 18 434 522,76 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №17 от 15.10.2020 на сумму 48 179 894,10 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №18 от 15.10.2020 на сумму 300 354,66 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №19 от 15.10.2020 на сумму 1 189 990,74 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №20 от 15.10.2020 на сумму 154 699,14 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 (в составе Акта № 21 от 15.10.2020  на сумму 6 460 483,36 руб.) на сумму 2 519 090,32 руб.;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КСЗ от 15.10.2020 на сумму 115 529 556,10 руб.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №1 от 15.10.2020 на сумму 28 703 977,92 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №2 от 15.10.2020 на сумму 32 084 166,84 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №3 от 15.10.2020 на сумму 665 297,22 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №4 от 15.10.2020 на сумму 154 699,14 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 на сумму 1 409 935,92 руб. (в составе Акта № 21 от 15.10.2020  на сумму 6 460 483,36 руб.);

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КСЗ от 15.10.2020  на сумму 63 018 077,04 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №5 от 15.10.2020 на сумму 102 119 390,82 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №6 от 15.10.2020 на сумму 8 022 273,48 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №7 от 15.10.2020  на сумму 778 276,86 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №8 от 15.10.2020  на сумму 33 550,20 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 №9 от 15.10.2020  на сумму 1 197 159,06 руб.;

Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 на сумму 2 531 457,12 руб. (в составе Акта № 21 от 15.10.2020  на сумму 6 460 483,36 руб.);

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КСЗ от 15.10.2020 на сумму 114 682 107,54 руб.

Данные документы подписаны ответчиком без замечаний и возражений, что подтверждается подписями и печатями ответчика на указанных документах.

Кроме того, факт надлежащего исполнения истцом обязательств подтверждается Актом № 01 от 16 октября 2020 года приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-11.

Общая стоимость выполненных истцом работ составила 293 229 740,68 рублей, однако ответчиком оплачено 280 602 151,96 рублей.

Таким образом, задолженность ответчика по оплате работ составляет 12 627 588,72 рублей.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ответчиком доказательства оплаты работ на оставшуюся сумму в размере 12 627 588,72 руб. не представлены.

Доводы ответчика, изложенные в отзыве на исковое заявление и пояснениях, опровергаются представленными в материалы дела документами. 

Ссылка ответчика на то, что требования истца не являются текущими, отклоняется судом на основании следующего.

Как было указано ранее, на момент введения в отношении акционерного общества «Краснодаргазстрой» процедуры банкротства АО «Краснодаргазстрой» имело неисполненные денежные обязательства перед ООО "Спринт" в сумме 13 191 612,04 рублей, в том числе 12 627 588, 72 рублей - основной долг, 564 023,32 рублей пени по оплате выполненных и принятых работ по Договору субподряда № 85-71С от 20.06.2019.

Данные обязательства возникли у АО «Краснодаргазстрой» 16 ноября 2020 года, то есть через 30 календарных дней после завершения работ и подписания Акта № 01 от 16 октября 2020 года приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией по форме КС11 (пункт 3.8.3. Договора субподряда № 85-71С от 20.06.2019 г.), что подтверждается Актом № 01 от 16 октября 2020 года приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией по форме КС-11, а также перечисленными выше Актами о приемке выполненных работ и составе затрат по форме КС-2, Справками о стоимости выполненных работ по форме КС-З.

Срок исполнения указанных обязательств АО «Краснодаргазстрой» наступил 16 ноября 2020 года, т.е. после даты принятия заявления о признании должника банкротом, и после даты вынесения определения об этом (определением Арбитражного суда Краснодарского края от 18.03.2020 по Делу № А32-10551/2020 заявление кредитора ООО «Профессионал групп-Краснодар» от 12.03.2020 принято, судом возбужденно производство по делу о банкротстве АО «Краснодаргазстрой»).

В силу пункта 1 статьи 63 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)») все требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением установленного Федеральным законом порядка предъявления требований к должнику только с даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения.

Согласно статье 5 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», под текущими платежами понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после принятия заявления о признании должника банкротом, а также денежные обязательства и обязательные платежи, срок исполнения которых наступил после введения соответствующей процедуры банкротства.

Требования кредиторов по текущим платежам не подлежат включению в реестр требований кредиторов.

Кредиторы по текущим платежам при проведении соответствующих процедур банкротства не признаются лицами, участвующими в деле о банкротстве.

В соответствии со статьей 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», требования кредиторов, возникшие в период после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и до признания должника банкротом, а также требования кредиторов по денежным обязательствам, возникшие в ходе конкурсного производства, являются текущими обязательствами и погашаются вне очереди за счет конкурсной массы.

В пунктах 3 и 45 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)» разъяснено, что после введения следующей процедуры банкротства платежи по исполнению обязательств, возникших до принятия заявления о признании должника банкротом, срок исполнения которых наступил до даты введения следующей процедуры не являются текущими платежами. При этом, платежи по обязательствам, возникшим после принятия заявления о признании должника банкротом, независимо от смены процедуры банкротства, относятся к текущим платежам. Исковые, а также иные требования по таким обязательствам, рассматриваются в общем порядке, предусмотренном процессуальным законодательством.

Следовательно, задолженность ответчика относится к текущим платежам, и заявленные требования подлежат рассмотрению в общем порядке.

Также к текущим платежам относят выплаты, связанные с применением мер ответственности за нарушение обязательств по гражданско-правовым сделкам, если само обязательство относится к текущим платежам (п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 63).

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки за период с 16.11.2020 по 02.02.2021 в сумме 437 747,43 рублей и за период с 03.02.2021 по 25.03.2021 в сумме 126 275,89 рублей, - всего в общей сумме 564 023,32 рублей.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

В соответствии с положениями пункта 6.3 Договора субподряда № 85-71С от 20.06.2019 г., в случае нарушения Подрядчиком сроков оплаты, установленных разделом 4 Договора (за исключением срока оплаты авансовых платежей), Субподрядчик вправе требовать уплаты Подрядчиком исключительной неустойки в размере 0,02 (ноль целых две сотых) % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) % от несвоевременно оплаченной суммы.

В соответствии с положениями пункта 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 63 (ред. от 06.06.2014) "О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве", 11. При решении вопроса о квалификации в качестве текущих платежей требований о применении мер ответственности за нарушение обязательств (возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, взыскании неустойки, процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами) судам необходимо принимать во внимание следующее.

Требования о применении мер ответственности за нарушение денежных обязательств, относящихся к текущим платежам, следуют судьбе указанных обязательств.

Поскольку задолженность ответчика, возникшая 16 ноября 2020 года, то есть через 30 календарных дней после завершения работ и подписания Акта № 01 от 16 октября 2020 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, относится к текущим платежам и заявленные требования подлежат рассмотрению в общем порядке, то требования истца о взыскании с ответчика неустойки за период с 16.11.2020 по 02.02.2021 в сумме 437 747,43 рублей и за период с 03.02.2021 по 25.03.2021 в сумме 126 275,89 рублей, - всего в общей сумме 564 023,32 рублей, также относятся к текущим платежам и подлежат рассмотрению в общем порядке.

Представленный истцом расчет судом проверен, признан арифметически и методологически верным, ошибок в расчете судом не выявлено.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание вышеизложенное, а также отсутствие в материалах дела доказательств надлежащего исполнения ответчиком обязательств по оплате работ, период просрочки, суд приходит к выводу, что взыскание истцом с ответчика суммы основного долга в размере 12 627 588,72 рублей и 564 023,32 руб. – пени за нарушение сроков оплаты по договору субподряда № 85-71С от 20.06.2019.

не противоречит действующему законодательству, соразмерно нарушениям ответчиком обязательств, в связи с чем, является законным и обоснованным.

На основании части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Поскольку истцу при обращении в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины, размер которой составляет 88 958 рублей, то сумма госпошлины в указанном размере подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь 64-71, 110, 156, 163, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  суд 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с акционерного общества «КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ООО «СПРИНТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) основной долг в размере 12 627 588,72 руб., пени в размере 564 023,32 руб.

Взыскать с акционерного общества «КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) расходы по уплате государственной пошлины в доход федерального бюджета в размере 88 958 руб.

         Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия. 

 

Судья                                                                                                     И.Н. Бондаренко