АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-14786/2024  

от 03 марта 2025 года 

Руководствуясь статьями 106, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "СК-29" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в срок до 01.06.2025 устранить следующие недостатки выполненных работ в отношении многоквартирного дома, расположенного по адресу: Архангельская область, Ленский район, рабочий 

<

...>:  

- в квартире № 7 произвести регулировку (замену) входной двери в квартиру. - в квартире № 29 произвести ремонт электрической плиты по гарантии.  

 - в квартире № 32 произвести замену стеклопакета (створки) окна в помещении кухни с уличной стороны  

- в квартире № 33 произвести замену входной двери в квартиру  

- устранить провалы основания полотна покрытия из резины на детской площадке  

- устранить провалы основания покрытия из тротуарной плитки в районе выезда с придомовой территории  

- устранить прогибы поперечных балок основания ограждения и отрыв крепления листов к основанию на мусороконтейнерной площадке  

- в электрощитовой: отремонтировать сварное соединение нижней петли входной двери (лопнуло соединение), устранить дефект - сквозное отверстие в районе примыкания дверного блока к стене  

- произвести замену стабилизатора напряжения в щите пожарной сигнализации.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК-29» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 50 000 руб.  

государственной пошлины. 

В случае неисполнения в установленный срок решения суда взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК-29» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***> в пользу государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального строительства» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) судебную неустойку в размере 5 000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта, по дату фактического исполнения.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  

апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  

Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия. 

 ФИО1 Судья