Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ

 

 

Дело № А40-166061/23-107-1268

11 января 2024 года

г. Москва

Резолютивная часть решения изготовлена 06 декабря 2023 года

Полный текст решения изготовлен 11 января 2024 года

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Ларина М.В., единолично, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А40-166061/23-107-1268 по иску ООО "РОСЭНЕРГОПРОЕКТ" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) к ответчику ПАО "РОССЕТИ" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) о взыскании суммы задолженности по договору № 0206-2-37-02-ПИР/18 от 03.09.2018 в размере 1 540 417 р., неустойки в размере 167 238,88 р., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 9 170,47 р., при участии представителя истца: не явился, извещен, представителей ответчика: не явился, извещен, 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО "РОСЭНЕРГОПРОЕКТ" (далее - истец, Заказчик) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ПАО "РОССЕТИ" (далее - ответчик, Подрядчик) о взыскании суммы задолженности по договору № 0206-2-37-02-ПИР/18 от 03.09.2018 в размере 1 540 417 р., неустойки в размере 167 238,88 р., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 9 170,47 р. (по уточненным и принятым судом требованиям в порядке ст. 49 АПК РФ)

Стороны в судебное заседание не явились, о месте и времени его проведения извещены надлежащим образом, ответчик отзыв на иск не представил, в связи с чем, суд, учитывая их надлежащее извещение, на основании статьи 156 АПК РФ, рассмотрел дело в их отсутствие.

Выслушав лиц участвующих в деле, исследовав и оценив, имеющиеся в деле документы, выслушав лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу об обоснованности исковых требований ввиду следующего.

Как следует из материалов дела, между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Росэнергопроект» заключён договор подряда от 03.09.2018 № 0206-2- 37-02-ПИР/18 по титулу «Комплексная реконструкция ПС 500 кВ Череповецкая. Корректировка».

Решением Арбитражного суда города Санкт - Петербурга и Ленинградской области по делу А56-69067/2021 от 21 июня 2023 года ООО «РОСЭНЕРГОПРОЕКТ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена ФИО2.

ПАО «ФСК ЕЭС» переименовано в ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" на основании решения внеочередного собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14 сентября 2022 года.

В соответствии с п. 2.1 договора подрядчик обязался выполнить комплекс работ, в том числе работы по инженерным изысканиям, корректировке проектной документации и проведению экспертизы, разработке закупочной документации.

Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1) и Задании на проектирование (Техническом задании).

Цена договора определена в п.4.1. договора, с учётом дополнительного соглашения № 2 от 04.10.2021 составляет не более 42 329 050 руб., в том числе НДС. Дополнительным соглашением № 2 от 04.10.2021 Стороны уменьшили цену договора до 33 560 119.97 руб.

Порядок и условия платежей установлены сторонами в разделе 5 Договора.

Авансовые платежи составляют 30% от стоимости соответствующих работ, указанной в календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение 1) Текущие платежи по выполнению инженерных изысканий и корректировке (разработке) проектной документации в размере 40% (сорока процентов) от стоимости соответствующих работ, указанной в Календарном графике выполнения работ и стоимости выплачиваются заказчиком при наличии действующей банковской гарантии на исполнение подрядчиком обязательств по договору и при условии получения заказчиком счета подрядчика.

После получения заказчиком заключений организации по проведению экспертизы о соответствии разработанных по договору проектной документации и(или) результата инженерных изысканий требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (положительных заключений) заказчик при наличии действующей банковской гарантии на исполнение подрядчиком обязательств по договору и при условии получения заказчиком счета подрядчика осуществляет платежи по корректировке проектной документации - в размере, определенном в соответствии с п. 4.3 настоящего договора и указанном в акте о приемке выполненных работ и передаче прав, за вычетом ранее перечисленных заказчиком платежей в соответствии с пп. 5.1 и 5.2 настоящего договора в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком соответствующего акта о приемке выполненных работ и передаче прав (п. 5.3. договора).

Согласно п.5.4. договора, платежи по разработке конкурсной (закупочной) документации и работ по оформлению ЗПО и ИРД выплачиваются заказчиком при наличии действующей банковской гарантии, на исполнение подрядчиком обязательств по договору или внесения по выбору Подрядчика обеспечительного платежа, вместо предоставления указанной банковской гарантии в соответствии с условиями ст. 8 договора и при условии получения заказчиком счета подрядчика в следующем порядке:

- в размере 70% (семидесяти процентов) от фактической стоимости работ по разработке закупочной документации, определенной в соответствии с п. 4.3 договора и указанной в акте сдачи-приемки результатов выполненных работ, выплачиваются в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ.

- в размере 70% (семидесяти процентов) от фактической стоимости работ по оформлению ППТ, ПМТ, ГПЗУ, определенной в соответствии с п. 4.3 договора и указанной в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных Работ, выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи- приемки Результатов выполненных Работ.

Подрядчик разработал, заказчик принял документацию, предусмотренную п. 1.1. договора, что подтверждается Актом о приёмке выполненных работ и передаче прав № 1 от 09.09.2020, Актом о приёмке выполненных работ и передаче прав № 2 от 05.07.2021, Актом сдачи - приёмки результатов работ № 3 от 19.03.2021, Актом сдачи - приёмки результатов работ №4 от 01.02.2021 на общую сумму 38 723 511,15 руб., в том числе НДС.

Актом сдачи - приёмки результатов работ №4 от 01.02.2021 установлено принятие заказчиком результат работ на сумму 2 200 595.72 руб. Сторонами зачтены авансовые платежи в сумме 660 178, 72 руб.

Таким образом, Ответчиком не оплачены выполненные работы по договору № 0206-2-37-02-ПИР/18 от 03.09.2018 на сумму 1 540 417 р.

20.04.2023 истец направил в адрес ответчика претензионное письмо, которое оставлено без удовлетворения, в связи чем истец был вынужден обратиться в суд с настоящими требованиями, удовлетворяя которые суд исходит из следующего.

В силу положений статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается.

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее «ГК РФ»), обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 2 статьи 702 ГК РФ к отдельным видам договора подряда

(бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные Главой 37 ГК РФ, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Согласно статье 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Обязанность оплатить результат работы возникает у заказчика при условии, что работа выполнена надлежащим образом (статья 711 ГК РФ).

Подписанным Сторонами актом сдачи - приёмки результатов работ №4 от 01.02.2021 подтверждается исполнение обязательств в полном объёме.

Судом установлено и материалами дела подтверждается, что истец выполнил работы, однако, ответчик свои обязательства по их оплате не исполнил, что подтверждается представленными в материалы дела документами, в связи с чем требование Истца о взыскании с Ответчика денежных средств за выполненные работы по договору № 0206-2-37-02-ПИР/18 от 03.09.2018 в размере 1 540 417 р. на основании статей 702, 711 ГК РФ подлежит удовлетворению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в частности в случае просрочки исполнения, должник обязан уплатить кредитору определенную законом или договором неустойку (штраф, пеню). По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение убытков.

Пунктом 12.1 договора, за нарушение сроков расчетов за выполненные работы, в отношении которых оформлены «Акты о приемке выполненных работ» и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» предусмотрены пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости просроченного денежного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы задержанного платежа, начиная с 31 дня после получения счета, выставленного после подписания Заказчиком соответствующих «Акта о приемке выполненных работ» и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат».

Актом сдачи - приёмки результатов работ № 3 от 19.03.2020 установлена обязанность заказчика по оплате принятых работ в сумме 279 543,66 руб., в том числе НДС 46 590,61 руб. Обязательство в соответствии с п. 5.4. договора наступило 16.04.2021, исполнено 08.06.2020. Сумма договорной неустойки составила 13 977,18 руб.

Сумма договорной неустойки за просрочку исполнения обязательства по оплате 1 540 417,00 руб., возникшей на основании Акта сдачи - приёмки результатов работ №4 от 01.02.2021с учётом ограничения составила 154 041,70 руб.

Кроме того, Актом о приёмке выполненных работ и передаче прав № 2 от 05.07.2021 установлена обязанность заказчика оплатить 769 034.21 руб., в том числе НДС 128 172 руб. В. п 2 указанного акта указано на исполнение подрядчиком обязанности по получению в отношении документации положительного заключения государственной экспертизы № 35-1-1-3-040815-2020, утверждённое 26.08.2020 и № 02272-21/ГГЭ-22548/07-01, утверждённое 30.06.2021 в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Обязательство по оплате выполненных работ, предусмотренное п. 5.3. договора, наступило 02.08.2021, исполнено 08.10.2021.

Условие 11.1.1. Договора о неприменении иных санкций помимо обусловленных Договором также не регулирует право истца на взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами.

Согласно ч. 1 ст. 395 ГК РФ в случае неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Поскольку судом установлено отсутствие исполнения ответчиком обязательств по оплате работ в установленные сроки, то в силу п. 12.1 Договора и статей 330, 395 ГК РФ требование истца о взыскании с ответчика неустойки в размере 167 238,88 р., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 9 170,47 р. за неисполнение обязательств, согласно представленному истцом и проверенному судом расчету, признается обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с Ответчика в пользу истца в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167, 170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с ПАО "РОССЕТИ" в пользу ООО "РОСЭНЕРГОПРОЕКТ" сумму задолженности по договору № 0206-2-37-02-ПИР/18 от 03.09.2018 в размере 1 540 417 р., неустойки в размере 167 238,88 р., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 9 170,47 р. (всего задолженность, проценты и неустойка в размере 1 716 826,35 р.), государственную пошлину в размере 30 168 р.

Решение подлежит исполнению после вступления в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.   

 

СУДЬЯ

М.В. Ларин