РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-104032/2021-83-520

г. Москва

03 августа 2021 г.

Резолютивная часть решения объявлена 27 июля 2021 года ф

Решение в полном объеме изготовлено 03 августа 2021 года

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Сорокина В.П. (шифр судьи 83-520), при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ОАО "РЖД" (ИНН 

<

***>) к ООО "Корпорация Р-Индустрия" (ИНН 

<

***>) об обязании передать разрешительную и исполнительную документацию по договору № 352/Т от 06.10.2015,

при участии:

от истца –  ФИО2 на основании доверенности № ДКРС-343/Д от 28.07.2020

от ответчика –  ФИО3 на основании доверенности № 14 от 01.01.2021. 

УСТАНОВИЛ:

ОАО "РЖД" обратилось в Арбитражный суд города Москвы к ООО "Корпорация Р-Индустрия" с исковым заявлением об обязании ООО "Корпорация Р-Индустрия" передать комплект исполнительной документации по объекту «Развитие железнодорожной инфраструктуры участка Тобольск-Сургут Свердловской железной дороги. Участок Куть-Ях-Усть-Юган. 5 этап строительства участок Юнг-Ях-Ай-Ягун с сохранением однопутной вставки на участке с 586 км по 590км» согласно перечню в просительной части иска.

Истец требования поддержал согласно исковому заявлению.

Ответчик представил отзыв на исковое заявление, заявлено об оставлении искового заявления без рассмотрения относительно требований о передаче «разрешительной документации» ввиду несоблюдения претензионного порядка в части данных требований.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором.

В материалах дела имеется претензия с доказательствами ее направления ответчика.

При таких обстоятельствах суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства ответчика.

Ответчик требования не признал согласно доводам отзыва.

Выслушав представителей истца и ответчика, исследовав письменные доказательства, суд находит иск подлежащим удовлетворению в части по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 06 октября 2015 г. между ОАО «Российские железные дороги» (Заказчик) и ООО «Корпорация Р-Индустрия» (Подрядчик) заключен договор № 352/Т на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта: «Развитие железнодорожной инфраструктуры участка Тобольск-Сургут Свердловской железной дороги. Участок Куть-Ях-Усть-Юган. 5 этап строительства участок Юнг-Ях-Ай-Ягун с сохранением однопутной вставки на участке с 586 км по 590км».

Согласно п. 1.1 Договора Заказчик поручил, а Подрядчик принял на себя подряд на выполнение комплекса строительно-монтажных работ, включая пусконаладочные работы по строительству (реконструкции) объекта «Развитие железнодорожной инфраструктуры участка Тобольск-Сургут Свердловской железной дороги. Участок Куть-Ях-Усть-Юган. 5 этап строительства участок Юнг-Ях-Ай-Ягун с сохранением однопутной вставки на участке с 586 км по 590км».

Пунктом 1.2 Договора предусмотрено, что научные, технические, экономические и другие требования к выполняемым Работам должны соответствовать условиям Торгов, проведенных Заказчиком на право заключения настоящего договора, Коммерческому предложению, поданному Подрядчиком в рамках его участия при проведении Торгов, Градостроительному Кодексу, нормативно-правовым документам Ростехнадзора, иным нормативно-правовым документам РФ и субъектов РФ, ведомственным документам, распоряжениям ОАО «РЖД».

В соответствии с п. 4.2.18. Договора Ответчик обязался по окончанию строительства передать Заказчику документы, которые являются результатом работ, в том числе исполнительную документацию о выполненных строительных, монтажных работах.

Согласно п. 10.8. Договора Подрядчик передает Заказчику за 10 календарных дней до начала приемки законченного строительством Объекта два экземпляра исполнительной документации согласно перечню, заявленного Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным Работам. Перечень исполнительной документации передается Заказчику заблаговременно за 30 календарных дней до срока окончания Работ по настоящему Договору.

07 декабря 2018 г. между Истцом и Ответчиком подписан акт формы КС-14 № ц/18.

После подписания указанного акта КС-14, в исполнительной документации выявлен рад существенных замечаний, что позволяет сделать вывод о низком качестве подготовленной исполнительной документации.

Исполнительная документация направлена Ответчику на доработку на основании 4.2.30. Договора, согласно подписанному графику, переработанную исполнительную документацию Ответчик обязался предоставить до 15.12.2018 г.

Далее Ответчик неоднократно переносил срок представления переработанной исполнительной документации. Согласно письму от 08.11.2019 г. № ПС/000/0736 Ответчик гарантировал предоставления исполнительной документации в срок до 31.04.2020.

Истцом указано на то, что в период с декабря 2018 г. по настоящее время Ответчик гарантийные письма не исполнил, не устранил замечания к исполнительной документации и не вернул данную исполнительную документацию не Истцу, не эксплуатирующим подразделениям ОАО «РЖД», что подтверждается письмом от 02.05.2019 №ИСХ-9090/СВЕРД.

Истец ссылается на то, что он лишен возможности ввести объект надлежащим образом в постоянную эксплуатацию с привлечением специалистов РОСТЕХНАДЗОРА.

В силу п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком, и его приемка заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами, то есть надлежащим доказательством выполнения работ является названный документ. Исходя из назначения указанного документа, акт выполненных работ должен отражать сведения о содержании выполненных работ, их объеме.

В силу ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации лицо, осуществляющее строительство, обязано обеспечивать, в том числе ведение исполнительной документации. Состав и порядок ведения исполнительной документации, форма и порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, могут устанавливаться нормативными правовыми актами Российской Федерации (часть 9 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128 утверждены Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006) (далее Требования).

Согласно п. 5 Требований исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы, приведенные в главе II Порядок ведения исполнительной документации. Императивных норм, устанавливающих обязанность подрядчика передать заказчику исполнительную документацию, а также определяющих состав исполнительной документации подлежащей передаче подрядчику, нормы действующего законодательства не содержат.

В 2016 г. между ОАО «РЖД» и ООО «Корпорация Р-Индустрия» в рамках реконструкции и строительства объектов на участке «Тобольск-Сургут-Коротчаево Свердловской железной дороги», куда входит объект «Развитие железнодорожной инфраструктуры участка Тобольск-Сургут Свердловской железной дороги. Участок Куть-Ях-Усть-Юган. 5 этап строительства участок Юнг-Ях-Ай-Ягун с сохранением однопутной вставки на участке с 586 км по 590км», согласован и подписан Перечень исполнительной и разрешительной документации, предоставляемой Подрядной организацией, с указанием нормативных документов, которым должна соответствовать предоставляемая документация.

В силу Требований исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы, Порядок ведения исполнительной документации. Императивных норм, устанавливающих обязанность подрядчика передать заказчику исполнительную документацию, а также определяющих состав исполнительной документации подлежащей передаче подрядчику.

В соответствии со ст.726 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим.

Согласно ст. 314 ГК РФ, если в обязательстве предусмотрен срок исполнения, оно должно быть исполнено в обусловленный договором срок.

26.10.2020 Истец направил в адрес Ответчика претензию № ИСХ-4257/ДКРСТюмень с требованием о возврате исполнительной документации.

Вышеизложенные обстоятельства послужили основанием для обращения Истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

В связи с чем, ссылаясь на ст.726 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 4.2.18., п. 10.8 Договора истец обратился с настоящим иском об обязании ООО «Корпорация Р-Индустрия» передать комплект исполнительной документации по объекту «Развитие железнодорожной инфраструктуры участка Тобольск-Сургут Свердловской железной дороги. Участок Куть-Ях-Усть-Юган. 5 этап строительства участок Юнг-Ях-Ай-Ягун с сохранением однопутной вставки на участке с 586 км по 590км», а именно:

Разрешительная документация:

Документы, подтверждающие регистрацию саморегулируемой организации (согласно п. 2.55.5 ст. 52 ГрК РФ);

- Договор на СМР между ООО «Корпорация Р-Индустрия» и подрядной организацией;

- Договор на размещение производственных и бытовых отходов и копии платежных поручений (согласно Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, Постановления № 80 от 30.03.2003, по форме п. 1.2. СанПиН 2.1.7.1322003);

- Копии протоколов и удостоверений по аттестации ИТР подрядчика, ответственных за проведение работ на объекте, в области промышленной безопасности и охраны труда, электробезопасности (согласно Федеральному закону № 116-ФЗ от 21.07.1999, п. 2.55.5 ст. 52 ГрК РФ);

- Договор аренды земельного участка;

- Проект освоения земельного участка;

- Паспорт лаборатории неразрушающего контроля подрядной или привлеченной организации. Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля. Квалификационные документы специалистов неразрушающего контроля. Санитарно- эпидемиологическое заключение на право деятельности с ИЛИ. Лицензия на право деятельности в области использования ИИИ. Радиационно- гигиенический паспорт. Свидетельства о метрологической поверке (калибровке, аттестации). ( согласно СП 48.13330.2011 ОСПОРБ-99 ПБ 03- 372-00 СанПиН 2.6.1.1283-03, по форме ПБ 03-372-00 Прил.2-6);

- Акт   приема-передачи   строительной   площадки   (согласно   СП 48.13330.2011);

- Акт-допуск для производства СМР на территории организации, наряд-допуски ( согласно СНиП 12-03-2001 п.4.8, по форме СНиП 12-03-2001 Пр. «В»);

- Приказы ответственных лиц ИТР по заказчику-застройщику (согласно СП 48.13330.2011);

- Приказы на ответственных лиц ИТР по подрядчикам (согласно СП 48.13330.2011);

- Приказы на ответственных лиц ИТР по авторскому надзору (согласно СП 48.13330.2011);

- Проекты производства работ (ПНР) (согласно Постановление Госстроя РФ от 17 сентября 2002г. №122 п.4.8., п. 4.10 СНиП 3.03.01-87 п. 1.4, по форме ВСН-237-80);

Исполнительная документация:

- Обязательное требование для всех разделов: общий журнал работ и специальные журналы работ ведутся ежедневно, ответственными лицами, в рукописном виде (согласно РД-11-05-2007, СП 48.13330.2011);

- Опись (согласно ГОСТ Р 6.30.-97, раздел 1.2, П 01.03-2014, по форме Приложения Ж);

- Рабочие чертежи с нанесением допущенных отклонений, согласованных с проектным институтом и заказчиком, с подписями о соответствии выполненных в натуре работ этому проекту, а также исполнительные схемы (согласно ГрК РФ статья 52 п.7, СНиП 3.01.04-87 п.3.5 Б, СНиП 12.01-2004, п.5.14, СНиП 3.03.01-87 п. 1.5);

- Общий журнал работ (согласно СП 48.13330.2011, по форме РД 11-05-2007 При л. 1);

- Сертификаты на материалы и изделия (их заверенные копии) либо другие документы, удостоверяющие тип и качество; сертификаты соответствия Госстандарта, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, паспорта, протоколы испытаний на материалы (согласно СНиП 3.01.04-87 п.3.5в ППБ-01, СП 70.13330.2012);

- Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве, ответственных производителей работ с номерами приказов о назначении, образцами подписей (согласно ФЗ №116-ФЗ от 21.07.99г. (статья 8, п.3.1, по форме ВСН-012-88 часть2 п.2.3);

- Журналы авторского надзора (согласно ФЗ №116-ФЗ от 21.07.99г. (статья 8, п.3), по форме СП 11-110-99 п.5.1 Приложение А);

- Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта (согласно СП 48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006 прил.1);

- Акт освидетельствования разбивки и закрепления осей на местности объекта капитального строительства (участка инженерного обеспечения) (согласно СП 48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006 прил.2)

Исполнительная документация на земляные работы:

- Акт ОСР на снятие растительного слоя, на устройство естественного основания под земляные сооружения, фундаменты, трубопроводы в траншеях (согласно СП 48.13330.2011 СП 70.13330.2012, по форме РД 11-02-2006 прил.З);

-Акт ОСР на выполнение мероприятий по закреплению грунтов и подготовке основания (цементация, замачивание и т.п.) (согласно СП 48.13330.2011 СП 45.13330.2012, по форме РД 11-02-2006 прил.З);

-Акт ОСР на насыпные основания под полы (согласно СП 45.13330.2012, по форме РД 11-02-2006 прил.З);

-Акт ОСР на обратную засыпку котлованов, траншей (согласно СП 45.13330.2012, по форме РД 11-02-2006 прил.З);

-Исполнительная схема для котлованов, траншей (согласно СП 126.13330.2012, по форме ГОСТ Р 51872 прил.В;

Исполнительная документация на устройство оснований и фундаментов:

- Акты освидетельствования ответственных конструкций (Акт промежуточной приемки ответственных конструкций (систем)) свай перед забивкой (согласно СП 48.13330.2011, СП 45.13330.2012, по форме РД 11-02-2006 прил.З);

- Акт скрытых работ на забивку свай, Акт ОСР на работы, связанные со стыкованием свай, Акты испытаний свай динамической нагрузкой, Акты испытания свай статической нагрузкой если предусмотрены проектной документацией (Являются приложениями к Акту скрытых работ на забивку свай, Акт ОСР по сдачи свайного основания, Акт ОСР по устройству искусственного основания под фундаменты (согласно СП 48.13330.2011, СП 45.13330.2011,по форме РД 11-02-2006г. прил.3);

- Акт скрытых работ по армированию фундаментов, приемки опалубки, установки анкерных болтов, Акт ОСР на осадочные и температурные швы, Акт ОСР т на бетонирование фундаментов, Акт ОСР по устройству горизонтальной и вертикальной гидроизоляции, Акт ОСР на монтаж фундаментных блоков (согласно СП 48.13330.2011,СП 45.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.З);

- Акт ОСР на бурение всех видов скважин, Акт ОСР на заполнение пазух скважин, полости свай, стыковка сборных железобетонных элементов свай, армирование, монтаж оголовков (согласно СП 45.13330.2012, по форме РД 11-02-2006г. прил.3);

- Журнал Забивки свай со сводной ведомостью забитых свай (согласно СП 45.13330.2012, по форме ВСН-012-88 часть2 п.2.32);

- Журнал Бетонных работ (согласно РД 11-05-2007, по форме ф. 54);

- Журнал Сварочных работ (согласно СНиП 3.03.01.-87 п. 1.22, по форме СНиП 3.03.01.-87 Прил.2);

- Журнал Антикоррозийной защиты (согласно СП 70.13330.2012 СП 28.13330.2012, по форме СНиП 3.03.01.-87 Прил.3);

- Журнал изготовления буронабивных свай (согласно СП 70.13330.2012, РД 11-05-2007);

Исполнительная документация на несущие конструкции:

- Акт ОСР на кирпичную кладку поэтажно,Акт ОСР по армированию кладки и установки закладных деталей, Акт ОСР по устройству осадочных и температурных швов (согласно СП 45.13330.2012 СП 70.13330.2012, по форме РД 11-02-2006г. прил.3);

- Акт ОСР по защите стальных и закладных деталей от коррозии (согласно СП 45.13330.2012 СП 70.13330.2012, по форме РД 11-02-2006г. прил.3);

- Акт ОСР на кирпичные перегородки, Акт ОСР на кирпичную кладку шахты лифтов (согласно СП 45.13330.2012 СП 70.13330.2012, по форме РД 11-02-2006г. прил.3);

- Акт ОСР по устройству вентиляционных и дымовых каналов, борозд (согласно СП 48.13330.2011 СП 70.13330.2012, по форме РД 11-02-2006г. прил.3);

- Акт ОСР по предварительной подготовке поверхностей и огрунтовки, по устройству защиты закладных деталей, сварных швов от коррозии, Акт ОСР по защите стальных конструкции антикоррозийными составами на каждый слой в отдельности, Акт ОСР по огневой защите металлоконструкций, Акт ОСР по монтажу каркаса перегородок, Акт ОСР по монтажу панелей (согласно СП 48.13330.2011, СП 70.13330.2012, по форме РД 11-02-2006г. прил.3);

- Акт ОСР по устройству звукоизоляции перегородок (согласно СП 48.13330.2011, СП 70.13330.2012, по форме РД 11-02-2006г. прил.3);

- Акт ОСР по отделке каркаса перегородок;

- Акт заделки швов перегородок (согласно СП 48.13330.2011);

-  Акт приемки защитного покрытия (согласно СП 70.13330.2012, СП 28.13330.2012, по форме СНиП 3.04.03-85 прил.2);

- Журнал монтажных соединений на болтах (согласно СП 70.13330.2012, по форме СНиП 3.03.01.-87 прил.5);

- Журнал работ по монтажу строительных конструкций, Журнал сварочных работ (согласно СП 70.13330.2012 по фрме СНиП 3.03.01.-87 прил.1-2);

- Журнал антикоррозийной защиты (согласно СП 28.13330.2012, по форме СНиП 3.03.01-87 приложение 3);

- Исполнительные схемы (по форме ГОСТ Р 51872_2002 прил.В);

- Поэтажная геодезическая съемка при монтаже эстакад (согласно СП 70.13330.2012, по форме ГОСТ Р 51872_2002 прил.В);

- Акт ОСР на заделку (замоноличивание) и герметизацию стыков и швов (согласно СП 48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.З);

- Журнал замоноличивания монтажных стыков, Журнал Бетонных работ, Акт испытания несущих конструкций (согласно СП 70.13330.2012, формы СНиП 3.03.01.-87 Прил.4, Форма ф.54, СНиП 3.03.01.-87 Прил.12)

- Чертежи КМД (согласно СП 70.13330.2012); Исполнительная документация на кровлю:

- Акт ОСР по устройству основания кровли, Акт ОСР по устройству пароизоляционного слоя, Акт ОСР по устройству теплоизоляционного слоя, Акт ОСР по устройству стяжки, Акт ОСР по устройству гидроизоляционного слоя (послойная приемка), Акт ОСР по устройству проходов труб, коробов через кровлю, Акт ОСР по устройству примыкания кровли к парапетам (согласно СП 48.13330.2011, СП 17.13330.2010, по форме РД 11-02-2006г. прил.3);

- Акт освидетельствования ответственных конструкций по испытанию и приемки кровли (согласно СП 48.13330.2011, СП 17.13330.2010, по форме РД 11-02-2006г. прил.4); 

- Журнал работ по монтажу строительных конструкций (согласно СП 48.13330.2011, СП 70.13330.2012, по форме СНиП 3.03.01.-87 прил.1);

- Журнал Антикоррозийной защиты (согласно СП 48.13330.2011, СП 70.13330.2012, по форме СНиП 3.03.01.-87 прил.3);

Исполнительная документация на работы по устройству полов:

- Акт ОСРпо устройству основания под полы, Акт ОСРпо устройству подстилающего слоя, Акт ОСРпо устройству гидроизоляции, Акт ОСРпо устройству теплоизоляции, Акт ОСР по устройству стяжки (согласно СП 48.13330.2011, СП 17.13330.2010, по форме РД 11 -02-2006г. прил.3);

- Исполнительная схема проверки уклонов пола, Журнал работ по монтажу строительных конструкций, Журнал Антикоррозийной защиты (согласно СП 70.13330.2012, по формам Гост Р 51872 прил. В, СНиП 3.03.01.прил.1, прил.3);

Исполнительная документация на работы по укладке водопровода и канализации (наружные):

- Акт ОСР по подготовке основания (согласно СП 48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.3);

- Акт ОСР на укладку трубопроводов (согласно СП 129.13330.2012, по форме РД 11-02-2006г. прил.3);

- Акт ОСР по устройству колодцев и камер (согласно СП 129.13330.2012, СП 48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.3);

- Акт ОСР на заделку стыковых соединений трубопровода, Акт ОСР на герметизацию мест проходов трубопровода через стенки колодцев и камер (согласно СП 129.13330.2012, по форме РД 11-02-2006г. прил.3);

- Акт ОСР по устройству гидроизоляции сооружений (согласно СП 48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.3);

- Акт ОСР на теплоизоляцию трубопроводов (согласно СП 28.1330.2012, по форме РД 11-02-2006г. прил.З);

- Акт проверки качества сварных стыков физическими методами контроля (по необходимости) (согласно СП 129.13330.2012, по форме ВСН 478-87 прил. 14-20);

- Акт испытания безнапорного трубопровода на герметичность, Акт испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность гидравлическим (пневматическим) способом (согласно СП 129.13330.2012, по форме СНиП 3.05.04-85 прил.4,СНиП 3.05.04-85 прил.1 (3));

- Акт промывки и дезинфекции хоз. питьевого водоснабжения (согласно СП 129.13330.2012, по форме СНиП 3.05.04-85 прил. 6);

- Акт приемки защитного покрытия (согласно СП 129.13330.2012, по форме СНиП 3.04.03-85 прил.2);

- Акт освидетельствования ответственных конструкций участков сетей инженерно-технического обеспечения (согласно СП 48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.5);

- Журнал Антикоррозийной защиты (согласно СП 48.13330.2011, поформе СНиП 3.04.03-85 прил.1);

- Журнал сварочных работ (согласно СП 70.13330.2012, по форме ВСН 478-87 Форма 5);

- Акт испытания емкостных сооружений (согласно СП 70.13330.2012, по форме СНиП 3.03.01-87 прил. 12);

Исполнительная документация на внутренние санитарно-технические системы (холодное, горячее водоснабжение, канализация, вентиляция, кондиционирование воздуха):

- Акт сдачи объекта под монтаж (согласно СП 73.13330.2012, по форме РД 11-02-2006г. прил.4);

- Акт ОСР на монтаж трубопроводов внутреннего холодного и горячего водоснабжения, Акт ОСР работ на прокладку систем внутренней канализации и водостоков (согласно СП 48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.З);

- Акт испытания систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения гидростатическим или манометрическим методом (согласно СП 73.13330.2012, по форме СНиП 3.05.01-85 прил.З);

- Акт на промывку и дезинфекцию систем хозяйственно- питьевого водоснабжения (согласно СП 129.13330.2012, по форме СНиП 3.04.03-85 прил.6);

- Акт на испытание систем внутренней канализации и водостоков (согласно СП 73.13330.2012, по форме СНиП 3.05.01-85 прил. 4);

- Акт ОСР по прокладке воздуховодов (согласно СП 48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.3);

- Акт индивидуального испытания оборудования систем (вентиляция, кондиционирование и т.д.) (согласно СП 73.13330.2012, по форме СНиП 3.05.01-85 прил. 1);

- Акт теплового испытания систем отопления на эффект действия, Акт технической готовности системы вентиляции к ПНР (согласно СП 73.13330.2012, Форма произвольная, по форме Пособие к СНиП прил. 14);

Исполнительная документация на работы по благоустройству:

- Акт ОСР по приемки благоустройства вокруг объекта, Акт ОСРпо вертикальной планировке (согласно СП 48.13330.2011 119, по форме РД 11-02-2006г. прил.3);

- Исполнительная схема на вертикальную планировку (по форме СНиП 3.01.03-84 прил. 15);

Исполнительная документация на работы по устройству железнодорожного полотна:

По устройству земляного полотна:

- Общий журнал;

- Журнал уплотнения;

- Журнал входного контроля;

- Журнал геодезических работ;

- Журнал мониторинга до осадки;

-  Паспорт на карьер с договором;

- Акт разбивки осей на местности объекта капитального строительства (согласно СП 126.13330.2012, по форме РД 11-02-2006г. прил.2);

- Акты ОСР (подготовка основания):

- На срезку растительного слоя по поперечному профилю по проекту (с приложением поперечных профилей, ведомости объема, фото) (согласно СП 119.13330.2012, СП 45.13330.2012, по форме РД 11-02-2006г. прил.3);

- Замена неустойчивых грунтов в основании насыпи (вырезка торфа (ила)) (с приложением поперечных профилей, ведомости объема, протоколов на грунт (1 протокол - на 300м3 дренирующий и 500мЗ не дренирующий), 1 протокол качества применяемых грунтов на каждую суточную поставку, фото) (согласно СП 119.13330.2012, СП 45.13330.2012, по форме РД 11-02-2006г. прил.3);

- На засыпку кюветов, канав, пазух существующего пути грунтом с уплотнением (с приложением поперечных профилей, ведомости объема, протоколов уплотнения грунта (1 протокол - на 300м3 дренирующий и 500мЗ не дренирующий), 1 протокол качества применяемых грунтов на каждую суточную поставку, фото) (согласно СП 119.13330.2012, СП 45.13330.2012, по форме РД 11-02-2006г. прил.3);

- На нарезку уступов, срезку, срезку шлейфа, срезку обочины существующего пути (с приложением поперечных профилей попикетно, ведомости объема, фото) (согласно СП 119.13330.2012, СП 45.13330.2012, по форме РД 11-02-2006г. прил.3);

- На замену грунта в основаниях выемок (с приложением поперечных профилей на каждый пикет, ведомости объема, протоколов уплотнения грунта (1 протокол - на 300м3 дренирующий и 500мЗ не дренирующий), 1 протокол качества применяемых грунтов на каждую суточную поставку, фото) (согласно СП 119.13330.2012, СП 45.13330.2012, РД 11-02-2006г. прил.3);

- Акт освидетельствования скрытых работ на укладку разделительного слоя из нетканого материала геотекстиля типа «Дорнит»(с приложением исполнительных план-схем, исполнительных схем поперечных профилей, сертификатов и паспортов качества на партию) (согласно СП 119.13330.2012, СП 45.13330.2012, по форме РД 11 -02-2006г. прил.3);

- Акт освидетельствования скрытых работ на укладку теплоизоляционного слоя из экстрадированных пенополистирольных плит «Пеноплекс-45» («Экстрол-45») (с приложением исполнительных план-схем по их раскладке, исполнительных схем поперечных профилей, сертификатов и паспортов качества на партию) (согласно СП 119.13330.2012, СП 45.13330.2012, по форме РД 11-02-2006г. прил.3);

- Акт освидетельствования скрытых работ на отсыпку конусов мостов (с приложением исполнительных план-схем и профилей, протоколов на дренирующий грунт с коэффициентом фильтрации более 2м/сут (1- протокол на суточную поставку грунта, 1- протокол по послойному уплотнению грунта -300м3 грунта)) (согласно СП 119.13330.2012, СП 45.13330.2012, по форме РД 11-02-2006г. прил.3);

- Акт освидетельствования скрытых работ по устройству защитного или теплоизоляционного слоя сложенного из грунтов на откосах в выемках или насыпях (с приложением поперечных профилей, ведомости объема, фото) (согласно СП 119.13330.2012, СП 45.13330.2012, по форме РД 11-02-2006г. прил.3);

- Акт освидетельствования скрытых работ на устройство марок для мониторинга земляного полотна на осадку (с приложением поперечных профилей, ведомости объема, фото) (согласно СП 119.13330.2012, СП 45.13330.2012, СП126.13330.2012, по форме РД 11-02-2006г. прил.3);

- Акты ответственных конструкций подпорных стен, противообвальных стен и галерей, волноотбойных стенок, дренажных систем, водоотводных лотков (с приложением поперечных профилей, ведомости объема, фото) (согласно СП 119.13330.2012, по форме РД 11-02-2006г. прил.4);

- Акт освидетельствования ответственной конструкции земляного полотна (согласно СП 119.13330.2012, СП48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.4);

- Исполнительный продольный профиль ж/д линии, поперечные профили всех насыпей и выемок (согласно СП 126.13330.2012, по форме СНиП 3.01.03-84 прил. 15);

- Протоколы лабораторных испытаний грунтов и об уплотнении грунтов в насыпях (суточные) (с приложением протокола на радиологические исследования) (согласно СП 119.13330.2012, ЦУКС-799 прил. 1, по форме ГОСТ 5180-84, ГОСТ 30416-96, ГОСТ 20522-69, ГОСТ 22723);

- Акты сдачи земляного полотна под укладку пути с приложением ведомостей контрольного нивелирования по оси и бровкам земляного полотна, замеров ширины земляного полотна поверху, уклонов поверхности глинистого грунта под защитным слоем, крутизны откосов и актов проверки плотности грунтов (согласно СП 119.13330.2012, ЦУКС-799, по форме ЦУКС-799 прил. 1 (прил. 9-14));

- Ведомости сооружений земляного полотна - водоотводов, контрбанкетов, подпорных, противообвальных и волноотбойных стенок, штолен, противоналедных устройств и других (согласно СП 119.13330.2012, ЦУКС-799, по форме ЦУКС-799 прил. 1(прил. 10));

- Ведомости защитных и теплоизоляционных слоев земляного полотна, сложенного глинистыми грунтами (согласно СП 119.13330.2012, ЦУКС-799, по форме ЦУКС-799 прил. 1 (прил. 11));

- Ведомость укрепления откосов земляного полотна, русел рек, водотоков, дамб и регуляционных сооружений (согласно СП 119.13330.2012, по форме ЦУКС-799 прил. 1 (прил. 12);

- Поперечные профили насыпей и выемок, сооружаемых по индивидуальным проектам, с инженерно-геологическими разрезами и характеристиками грунтов (согласно СП 119.13330.2012, ЦУКС-799, СП126.13330.2012, по форме СП 126.13330.2012);

- Ведомость притрассовых автомобильных дорог с указанием подъездов, расположения дорог по отношению к оси пути, ширины и типа одежды (согласно СП 119.13330.2012, ЦУКС-799, по форме ЦУКС-799 прил. 1);

- Ведомость дополнительных постоянных реперов, установленных генподрядчиком, с указанием их местоположения и отметок (согласно СП 119.13330.2012, ЦУКС-799, по форме ЦУКС-799 прил. 1 (прил. 13));

- Ведомость балластных и каменных карьеров, передаваемых железной дороге, с указанием объемов и характеристик добываемых материалов (согласно СП 119.13330.2012, ЦУКС-799, по форме ЦУКС-799 прил. 1 (прил. 14));

- Акты по лабораторному испытанию грунтов, использованных для сооружения земляного полотна, акты на подготовку оснований насыпей, по замене грунтов (согласно ГОСТ 5180-84, ГОСТ 30416-96, ГОСТ 20522-69; ГОСТ 22723-2002, по форме СниП 2.05.02-85 таб. 22);

- Акты промежуточной приемки ответственных конструкций, подпорных стен, противообвальных стен и галерей, волноотбойных стенок (согласно СП 119.13330.2012, СП 45.13330.2012, ЦУКС-799, по форме РД 11-02-2006г. прил.4);

- Акты о рекультивации карьеров (согласно ЦУКС-799, по форме ГОСТа 17.5.1.01-83);

По устройству ВСП:

- Акты на скрытые работы по укладке геотекстиля, полистирола под ВСП;

- Покилометровая, поперегонная ведомость уложенных материалов верхнего строения пути с указанием типа, количества, марки бетона, породы древесины, а также года укладки шпал; типа, длины, года проката рельсов; типа и количества скреплений (согласно ЦУКС-799, по форме ЦУКС-799 прил. 1(прил. 15));

- Ведомость характеристики бесстыкового пути и учета температур закрепления сварных плетей (согласно ЦУКС-799, по форме ЦУКС-799 прил. 1(прил. 16));

- Постанционная ведомость уложенных материалов верхнего строения пути с указанием назначения и номера пути, типа и числа скреплений (согласно ЦУКС-799, по форме ЦУКС-799 прил. 1(прил. 17));

- Ведомость покилометрового запаса укладочных материалов (согласно ЦУКС-799);

- Ведомость балласта, уложенного в путь по перегонам (станциям), с данными попикетного замера ширины балластной призмы поверху, толщины балластной подушки и балласта под шпалой. Толщину балластной подушки замеряют по оси пути, а толщину балласта - на прямых в подрельсовом сечении, на кривых - по концам шпал с внутренней стороны. В тоннелях толщину балласта замеряют по концам шпал на каждом кольце или через 10 м длины тоннеля(согласно ЦУКС-799, по форме ЦУКС-799 прил. 1(прил. 18));

- Ведомость промеров положения кривых в плане (основные параметры, проектные и фактические стрелы прогиба), Ведомость возвышения наружного рельса в кривых, Ведомость балльной оценки состояния пути по данным прохода путеизмерительного вагона (согласно ЦУКС-799, по форме ЦУКС-799);

- Исполнительные планы раздельных пунктов в масштабе 1:1000 с указанием разбивочных базисов, реперов, попикетных отметок головок рельсов, расположения зданий и сооружений в пределах полосы отвода; путей и стрелочных переводов с координатами их центров, основных элементов кривых, ширины междупутий на всех пикетах, водоотводных и искусственных сооружений, водопроводных и канализационных сетей, сигналов и других устройств (согласно ЦУКС-799, СП126.13330.2012, по форме СП126.13330.2012);

- Ведомость путевых и сигнальных знаков (согласно ЦУКС-799, по форме ЦУКС-799 прил. 1 (прил. 19));

- Ведомость защитных средств: переносных щитов, заборов, живой защиты и других (согласно ЦУКС-799, по форме ЦУКС-799 прил. 1(прил. 20);

Исполнительная документация на работы по устройству труб:

- Общий журнал работ (на каждую трубу);

- Журнал погружения шпунта (при работах предусмотренных проектно-сметной документацией), Журнал бетонных работ, Журнал ухода за бетоном, Журнал сварочных работ, Журнал регистрации результатов испытаний контрольных бетонных образцов, Журнал монтажа строительных конструкций, Журнал геодезических работ, Журнал входного учета и контроля качества полученных деталей, материалов, конструкций и оборудования, Журнал по гидроизоляции и антикоррозийной защите и окраске стальных конструкций, Журнал изготовления и освидетельствования арматурных каркасов (если предусмотрено проектом) (согласно СП48.13330.2011, по форме СП48.13330.2011);

- Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности (с приложением исполнительной план - схемы закрепления осей на местности объекта капитального строительства (линейные размеры, (мм)) (согласно СП48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.2);

- Акт освидетельствования ответственной конструкции шпунта до погружения в грунт (с приложением исполнительной план- схемы шпунта (линейные размеры,(мм)),  паспорта качества и сертификат на материал шпунта), Акт освидетельствования скрытых работ по погружению шпунта (с приложением исполнительной план-схемы по погружению шпунта в грунт с разрезами (высотными отметками, (м) и линейными размерами, (мм))), Акт освидетельствования скрытых работ по устройству котлована (с приложением исполнительной план-схемы по устройству котлована с разрезами (высотными отметками, (м) и линейными размерами, (мм)), протоколов на уплотнение грунта (протокол уплотнения основания)), Акт освидетельствования скрытых работ по устройству щебеночного основания из щебня или песчано-гравийной смеси (с приложением исполнительной план-схемы с разрезами (высотными отметками, (м) и линейными размерами, (мм)), паспортов качества и сертификата на щебень или песчано-гравийную смесь, протокола на радиологические исследования), Акты освидетельствования скрытых работ на сваи перед погружением (если предусмотрено проектом) (с приложением паспортов качества), Акты освидетельствования скрытых работ на забивку свай (если предусмотрено проектом) (с приложением расчета, исполнительных схем, актами динамических и статических испытаний (по проекту)), Акт освидетельствования установленной опалубки (с приложением исполнительной план-схемы по устройству опалубки с разрезами (высотными отметками, (м) и линейными размерами, (мм)), паспортов качества на материал опалубки), Акт освидетельствования скрытых работ по устройству, армокаркаса монолитной конструкции фундамента (с приложением исполнительной план-схемы по устройству армокаркаса с разрезами (высотными отметками, (м) и линейными размерами, (мм)), паспортов качества или сертификатов на материалы армокаркаса, паспортов (сертификатов) на электроды, документа сварщика), Акт освидетельствования скрытых работ на конструкции фундамента, выполненные из монолитного железобетона (бетона) (с приложением исполнительной план - схемы по устройству фундамента из монолитного железобетона (бетона) с разрезами (высотными отметками, (м) и линейными размерами, (мм)); карты подбора состава бетона при изготовлении бетона на строительной площадке; протокола лабораторного анализа на воду при изготовлении бетона на строительной площадке; паспортов и сертификатов на материалы бетонной смеси (цемента, щебня, песка, присадок (композиционных материалов для морозостойкости и водонепроницаемости)) при приготовлении бетона на стройплощадке; паспорта качества и карточки подбора бетона для сухой бетонной смеси, приобретенной у завода изготовителя; паспорта качества на готовый бетон, приобретенный на заводе изготовителе; протоколов лабораторных испытаний контрольных образцов бетона), Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж конструкции фундамента выполненного из сборного железобетона (входит работа заделка швов цементным раствором) (с приложением исполнительной план - схемы фундамента из сборного железобетона с разрезами (высотными отметками, (м) и линейными размерами, (мм)); карточки подбора растворной смеси; протокола лабораторного анализа воды; протокола лабораторных испытаний раствора для заполнения швов; паспортов качества на цемент, песок и применяемые присадки; паспортов качества на железобетонные конструкции, Акт освидетельствования скрытых работ по гидроизоляции фундамента (с приложением исполнительной план-схемы по устройству гидроизоляции фундамента с разрезами (высотными отметками (м) и линейными размерами в (мм)); паспорта или сертификата на гидроизоляционный материал), Акт освидетельствования скрытых работ монтажа тела трубы из сборного железобетона (работы по конопатке и заделки раствором температурных швов входят в состав данного акта) (с приложением карточки подбора растворной смеси; протокола лабораторного анализа на воды; протокола лабораторных испытаний раствора для заполнения швов; паспортов качества на цемент, песок и применяемые присадки; исполнительной план - схемы по устройству тела трубы и оголовков (высотными отметками (м) и линейными размерами в (мм)); паспорт на конструкции из сборного железобетона тела трубы и оголовков), Акт освидетельствования скрытых работ по гидроизоляции тела трубы и оголовков (обмазочная и склеечная гидроизоляция) (с приложением исполнительной план-схемы по устройству гидроизоляции тела трубы и оголовков разрезами (высотными отметками (м) и линейными размерами в (мм)); паспорта или сертификата на гидроизоляционный материал), Акт освидетельствования скрытых работ на устройство котлована для устройства фундаментов лестничных сходов (с приложением исполнительной план - схемы по устройству котлована с разрезами (высотными отметками, (м) и линейными размерами, (мм)); протоколов на уплотнение грунта (выписки из журнала контроля уплотнения земляного полотна)), Акт освидетельствования скрытых работ на устройство щебеночного основания для устройства фундаментов лестничных сходов (с приложением исполнительной план - схемы по устройству котлована с разрезами (высотными отметками, (м) и линейными размерами, (мм)); паспорта качества и сертификата на щебень или песчано-гравийную смесь), Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу фундаментов из сборных железобетонных конструкций для устройства лестничных сходов (с приложением исполнительной план-схемы, паспортов на железобетонные конструкции), Акт освидетельствования скрытых работ по устройству  фундаментов лестничных сходов  из  монолитного  бетона (с приложением карты подбора состава бетона при изготовлении бетона на строительной площадке; протокола лабораторного анализа на воды при изготовлении бетона на строительной площадке; паспортов и сертификатов на материалы бетонной смеси (цемента, щебня, песка, присадок (композиционных материалов для морозостойкости и водонепроницаемости) при приготовлении бетона на стройплощадке); паспортов качества и карточки подбора бетона для бетонной смеси, приобретенной у завода изготовителя; паспорта качества на готовый бетон, приобретенный на заводе изготовителе; актов испытаний контрольных образцов бетона), Акт освидетельствования скрытых работ по гидроизоляции фундаментов из сборных железобетонных конструкций или монолитного железобетона (с приложением исполнительной план-схемы по устройству гидроизоляции фундаментов с разрезами (высотными отметками (м) и линейными размерами в (мм)); паспорта или сертификата на гидроизоляционный материал), Акт освидетельствования ответственных конструкций по монтажу лестничных сходов из сборного железобетонных конструкций (с приложением карточки подбора растворной смеси; протокола лабораторного анализа на воды; протокола лабораторных испытаний раствора для заполнения швов; паспортов качества на цемент, песок и применяемые присадки; исполнительной план-схемы по устройству лестничных сходов с разрезами (высотными отметками, (м) и линейными размерами, (мм)); паспорта на конструкции из сборного железобетона лестничных сходов), Акт освидетельствования ответственных конструкций перильного ограждения (с приложением паспортов и сертификатов на материалы (электроды); исполнительной план-схемы конструкции с разрезами (линейные размеры, мм), сертификата на сварку) (согласно СП48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.З);

- Акт освидетельствования скрытых работ на обратную засыпку тела трубы (с приложением исполнительной план- схемы), Акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания перед укрепительными работами (с приложением паспортов и сертификатов на материалы, исполнительной план-схемы);

- Акт освидетельствования ответственной конструкции лестничный сход (с приложением всех актов ОСР по лестничному ограждению и общей исполнительной план-схемы), Акт освидетельствования ответственных конструкций водопропускной трубы (с приложением всех актов ОСР и ООК по трубам и лестничным ограждениям, документами на укрепительные работы конусов, общей исполнительной план-схемой) (согласно СП48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.4);

Исполнительная документация на работы по устройству мостов:

- Общий журнал работ (на каждый мост) (согласно СП48.13330.2011, по форме РД 10-02-2007г.);

- Журнал погружения шпунта (при работах предусмотренных проектно-сметной документацией), Журнал погружения свай, Журнал вибропогружения свай-оболочек (свай) Форма 42, Журнал бетонных работ, Журнал заполнения свай оболочек (скважин) методом ВПТ, Журнал ухода за бетоном, Журнал сварочных работ, Журнал изготовления и освидетельствования арматурных каркасов для бетонирования монолитных и сборных железобетонных конструкций на строительстве (реконструкции) Форма 48, Журнал регистрации результатов испытаний контрольных бетонных образцов, Журнал замоноличивания и бетонирования стыков, Журнал контроля качества очистки элементов стальных мостовых конструкций (с соединениями на высокопрочных болтах) (для металлических мостов), Журнал контрольной тарировки ключей для натяжения высокопрочных болтов Форма 60 для мостовых конструкций (с соединениями на высокопрочных болтах) (для металлических мостов), Журнал постановки высокопрочных болтов Форма 59 (для мостовых конструкций с соединениями на высокопрочных болтах) (для металлических мостов), Журнал по гидроизоляции, антикоррозийной защите и окраске стальных конструкций, Журнал монтажа строительных конструкций, Журнал бурения для буроинъекционных и буронабивных свай (согласно проекту), Журнал бурения скважин, разбуривания уширений в основании скважин или оболочек Форма 40 (согласно проекту), Журнал геодезических работ, Журнал входного учета и контроля качества полученных деталей, материалов, конструкций и оборудования (согласно СП48.13330.2011, по форме СП48.13330.2011);

- Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности (с приложением исполнительной план-схемы закрепления осей (указываются основные и выносные отметки осей и репера СНиПЗ.06.04-91 раздел 2) объекта капитального строительства на местности) (согласно СП48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.2);

- Акт освидетельствования ответственных конструкций до (забивки, погружения) свай, свай оболочек, шпунта до погружения в грунт, до монтажа насадок, пролетных строений, шкафных стенок (согласно СП48.13330.2011 РД 11-02-2006г. прил.4);

- Акт освидетельствования скрытых работ по погружению шпунта (если предусмотрено проектом устройство шпунтового ограждения) (с приложением исполнительной план - схемы по погружению шпунта в грунт с разрезами (высотными отметками, (м) и линейными размерами, (мм))), Акт освидетельствования скрытых работ приемки буроинъекционных, буронабивных свай (с приложением исполнительной схемы планово-высотного положения свай с поперечными разрезами), Акт освидетельствования скрытых работ приемки свайного основания (скрытых работ по погружению забивных свай, свай оболочек, буроинъекционных, буронабивных свай) (с приложением исполнительной схемы планово-высотного положения свайного поля с поперечными разрезами; актов динамических и статических испытаний с расчетами отказа свай, паспортов и сертификатов на сваи) (согласно СП48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.3);

- Акт испытания свай динамической и статической (если предусмотрено проектом) нагрузками. Акт является приложением к актам ОСР по приемке свайного основания (с приложением расчета отказа свай при забивке (погружении); исполнительной схемы планово-высотного положения свайного поля с поперечными разрезами) (согласно СП48.13330.2011, по форме СП Пособие ВНИИ «Мосты и трубы»);

- Акт освидетельствования скрытых работ приемки щебеночного основания буроинъекционных, буронабивных свай (если предусмотрено проектом) (с исполнительной схемой планового и высотного щебеночного основания положения свай буроинъекционных, буронабивных свай) (согласно СП48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.3);

- Акт осмотра каркасов (с приложением исполнительной схемы, паспортов на конструкции и материалы);

- Акт освидетельствования скрытых работ устройства погружения арматурных каркасов для свай оболочек, буроинъекционных, буронабивных свай (с приложением исполнительной схемы планово-высотного положения арматурного каркаса в сваях поля с поперечными разрезами), Акт освидетельствования скрытых работ бетонирования свай оболочек и буроинъекционных, буронабивных свай (с приложением карты подбора состава бетона при изготовлении бетона на строительной площадке; протокола лабораторного анализа на воды при изготовлении бетона на строительной площадке; паспортов и сертификатов на материалы бетонной смеси (цемента, щебня, песка, присадок (композиционных материалов для морозостойкости и водонепроницаемости)) при приготовлении бетона на стройплощадке; паспорта качества и карточки подбора бетона для бетонной смеси, приобретенной у завода изготовителя; паспорта качества на готовый бетон, приобретенный на заводе изготовителе; актов испытаний контрольных образцов бетона), Акты освидетельствования скрытых работ устройства щебеночного основания под ростверк (если предусмотрено проектом) (с приложением исполнительной план-схемы с разрезами (высотными отметками, (м) и линейными размерами, (мм)), паспортов качества и сертификатов на щебень, протокола на радиологические исследования), Акты освидетельствования скрытых работ устройства опалубки для монолитных ростверков (с приложением исполнительной план-схемы, паспортов качества и сертификатов на материалы), Акты освидетельствования скрытых работ устройства армокаркасов для монолитных ростверков (с приложением исполнительной план-схемы, паспортов качества и сертификатов на материалы), Акты освидетельствования скрытых работ бетонирования монолитных ростверков (насадок) (с приложением карты подбора состава бетона при изготовлении бетона на строительной площадке; протокола лабораторного анализа на воды при изготовлении бетона на строительной площадке; паспортов и сертификатов на материалы бетонной смеси (цемента, щебня, песка, присадок (композиционных материалов для морозостойкости и водонепроницаемости)) при приготовлении бетона на стройплощадке; паспорта качества и карточки подбора бетона для бетонной смеси, приобретенной у завода изготовителя; паспорта качества на готовый бетон, приобретенный на заводе изготовителе; актов испытаний контрольных образцов бетона (количество образцов для испытания в зависимости от объема укладываемого бетона, но не менее 9 шт. на каждый замес, бетоносмеситель с завода)) (согласно СП48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.3);

- Акт геодезической проверки положения ростверка в плане и профиле (с приложением исполнительной план-схемы);

- Акты освидетельствования ответственных конструкций на смонтированные блоки насадки (сборные) (с приложением общей исполнительной план-схемы, паспортов и сертификатов материалов)) (согласно СП48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.4);

- Акт геодезической проверки положения блоков насадок (сборных) в плане и профиле (с приложением исполнительной план-схемы);

- Акт освидетельствования скрытых работ на приемку работ по замоноличиванию бетоном насадок из сборного железобетона (с приложением карты подбора состава бетона при изготовлении бетона на строительной площадке; протокола лабораторного анализа на воды при изготовлении бетона на строительной площадке; паспортов и сертификатов на материалы бетонной смеси (цемента, щебня, песка, присадок (композиционных материалов для морозостойкости и водонепроницаемости)) при приготовлении бетона на стройплощадке; паспорта качества и карточки подбора бетона для бетонной смеси, приобретенной у завода изготовителя; паспорта качества на готовый бетон, приобретенный на заводе изготовителе; актов испытаний контрольных образцов бетона (количество образцов для испытания в зависимости от объема укладываемого бетона, но не менее 9 шт. на каждый замес, бетоносмеситель с завода)), Акты освидетельствования скрытых работ устройства опалубки для бетонирования подферменников (с приложением общей исполнительной план-схемы, паспортов и сертификатов материалов), Акты освидетельствования скрытых работ по устройству арматурных каркасов подферменников (с приложением общей исполнительной план-схемы, паспортов и сертификатов материалов), Акты освидетельствования скрытых работ по устройству закладных деталей подферменников (с приложением общей исполнительной план-схемы, паспортов и сертификатов материалов), Акты освидетельствования скрытых работ устройства подферменников из монолитного бетона (с приложением карты подбора состава бетона при изготовлении бетона на строительной площадке; протокола лабораторного анализа на воды при изготовлении бетона на строительной площадке; паспортов и сертификатов на материалы бетонной смеси (цемента, щебня, песка, присадок (композиционных материалов для морозостойкости и водонепроницаемости)) при приготовлении бетона на стройплощадке; паспорта качества и карточки подбора бетона для бетонной смеси, приобретенной у завода изготовителя; паспорта качества на готовый бетон, приобретенный на заводе изготовителе; акты испытаний контрольных образцов бетона (количество образцов для испытания в зависимости от объема укладываемого бетона, но не менее 9 шт. на каждый замес бетоносмеситель с завода) (согласно СП48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.3);

- Акт геодезической проверки положения подферменников в плане и профиле (с приложением исполнительной план-схемы);

- Акты освидетельствования ответственных конструкций приемки, смонтированных шкафных блоков (с приложением общей исполнительной план-схемы, паспортов и сертификатов материалов), Акты освидетельствования ответственных конструкций приемки установленных опорных частей (с приложением общей исполнительной план-схемы, паспортов и сертификатов материалов) (согласно СП48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.4);

- Акты освидетельствования скрытых работ приемки, смонтированных плит мягкого въезда (с приложением общей исполнительной план-схемы, паспортов и сертификатов материалов) (согласно СП48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.3);

- Акты освидетельствования ответственных конструкций приемки смонтированных балок пролетных строений, в том числе и для металлических (с приложением общей исполнительной план-схемы, паспортов и сертификатов материалов) (согласно СП48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.4);

- Акт геодезической проверки положения балок в плане и профиле (с приложением исполнительной план-схемы);

- Акт освидетельствования ответственных конструкций по приемке работ по монтажу (сборке) металлических пролетных строений с постановкой высокопрочных болтов (с приложением общей исполнительной план-схемы, паспортов и сертификатов материалов, удостоверение сварщика (если предусмотрено проектом)), Акты освидетельствования скрытых работ приемки гидроизоляции шкафных блоков, блоков насадок, свай, бетонных блоков и других изделий сборного железобетона, металлических пролетных строений (с приложением общей исполнительной план-схемы, паспортов и сертификатов материалов), Акты освидетельствования скрытых работ приемки антикоррозийной защите стальных конструкций (с приложением), Акты освидетельствования скрытых работ приемки деформационных швов (с приложением) (согласно СП48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.З);

- Акты освидетельствования ответственных конструкций приемки, смонтированных тротуарных консолей (с приложением), Акты освидетельствования ответственных конструкций приемки смонтированного перильного ограждения (с приложением) (согласно СП48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.4);

- Акты освидетельствования работ по отсыпке дренирующим грунтом устоев мостов (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на устройство котлована для устройства фундаментов лестничных сходов (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на устройство щебеночного основания для устройства фундаментов лестничных сходов (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу фундаментов из сборных железобетонных конструкций для устройства лестничных сходов (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ по устройству фундаментов лестничных сходов из монолитного бетона (с приложением карты подбора состава бетона при изготовлении бетона на строительной площадке; протокола лабораторного анализа на воды при изготовлении бетона на строительной площадке; паспортов и сертификатов на материалы бетонной смеси (цемента, щебня, песка, присадок (композиционных материалов для морозостойкости и водонепроницаемости)) при приготовлении бетона на стройплощадке; паспорта качества и карточки подбора бетона для бетонной смеси, приобретенной у завода изготовителя; паспорта качества, на готовый бетон, приобретенный на заводе изготовителе; актов испытаний контрольных образцов бетона (количество образцов для испытания в зависимости от объема укладываемого бетона, но не менее 9шт. на каждый замес), Акт освидетельствования ответственных конструкций по монтажу лестничных сходов из сборного железобетонных конструкций (с приложением), Акт освидетельствования ответственных конструкций по монтажу перильного ограждения лестничных сходов (с приложением) (согласно СП48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.З);

- Акт освидетельствования ответственной конструкции лестничных сходов (после монтажа) (с приложением) (согласно СП48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.4);

- Акты освидетельствования ответственных конструкций моста (при заполнении включаются все акты ОСР, акты испытаний и акты ООК) (согласно СП48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.З);

Исполнительная документация на работы по ПГС (линейные объекты):

- Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности (с приложением исполнительной схемы разбивки и закрепления трассы кабельных линий) (согласно СП48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.2);

- Акт освидетельствования скрытых работ по устройству котлована (с приложением исполнительной план-схемы по устройству котлована с разрезами (высотными отметками, (м) и линейными размерами, (мм)), протоколов на уплотнение грунта (протокол уплотнения основания)), Акт освидетельствования скрытых работ по устройству щебеночного основания из щебня или песчано-гравийной смеси (с приложением исполнительной план-схемы с разрезами (высотными отметками, (м) и линейными размерами, (мм)), паспортов качества и сертификата на щебень или песчано-гравийную смесь, протокола на радиологические исследования), Акт освидетельствования скрытых работ по подготовке основания фундаментов (бетонная подготовка) (с приложением) (согласно СП48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.3);

- Акт освидетельствования скрытых работ на погружение свай с оформлением актов динамических и статических испытаний (с приложением);

- Акты ОСР на устройство опалубки (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на армирование фундаментной плиты (с приложением), Акт освидетельствование скрытых работ по устройству монолитной железобетонной плиты (с приложением), Акт освидетельствование скрытых работ по монтажу ленточного фундамента (с приложением), Акты освидетельствования скрытых работ по боковой гидроизоляции фундаментов (с приложением), Акты освидетельствования скрытых работ по устройству горизонтальной гидроизоляции фундаментов (с приложением), Акт освидетельствование скрытых работ на обратную засыпку котлована (с приложением), Акт освидетельствование скрытых работ на заделку пазух фундаментов (с приложением), Акт освидетельствование скрытых работ на устройство утепление стен цоколя (если предусмотрено проектом) (с приложением), Акт освидетельствование скрытых работ на устройство деформационного шва (с приложением), Акты освидетельствования скрытых работ на устройствокабельных приямков: устройство котлована, устройство щебеночного основания; монтаж фундаметных блоков и т.д. (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на устройство кабельных каналов: устройство котлована, устройство щебеночного основания; монтаж фундаметных блоков и т.д. (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж всех сборных железобетонных и металлических элементов (отдельно: перемычек, прогонов, ригелей, покрытий, сборных перегородок, диафрагм жесткости, козырьков входов, конструкций лестничных сходов, и других конструкций и их элементов)(с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ по армированию каменной кладки (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на кирпичную (каменную) кладку стен (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на кирпичные (каменные) перегородки (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на устройство монолитного железобетонного пояса (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ по анкеровке плит покрытия (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж плит (перекрытия) покрытия (поэтажно) (с приложением), Акты освидетельствования скрытых работ по бетонированию монолитных участков (с приложением), Акты освидетельствования скрытых работ на замоноличивание швов плит покрытия (поэтажно) (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на устройство армированных цементных стяжек (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на установку стропил (поэлементно: стропильных ног, кобылок, мауэрлата, ветровой связи, стойки, распределительных досок под стойку) (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на укладку прогонов (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на установку обрешётки (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на устройство  параизоляции по плитам перекрытия (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ по устройству утеплителя чердака (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж слуховых оконных блоков (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий древесины (с приложением; обязательно заключение пож. Лаборатории по огнезащите), Акт освидетельствования скрытых работ на устройство щебёночного слоя под полы (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на устройство подстилающего слоя бетона под полы (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на устройство пенополистирольных плит (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на устройство стяжки из цементно-песчаного раствора под полы (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на установку оконных блоков и отдельно дверных блоков (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на установку противопожарных дверей (с приложением; обязательно сертификат на противопожарные двери), Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж звукопоглощающих систем ТИГИ Кнауф (с приложением), Акт освидетельствование скрытых работ на монтаж каркаса подвесного потолка (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на армирование штукатурки стен по сетке (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на штукатурку стен (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на грунтовку оштукатуренных поверхностей (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на утепление фасада (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ приемки фасадов здания (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на устройство щебёночного основания под крыльцо (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на устройство монолитных фундаментов под крыльцо (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ по боковой гидроизоляции фундамента крыльца (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на устройство стяжки из цементно-песчаного раствора по крыльцу (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на устройство подстилающего слоя из щебня под отмостку (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на устройство молниезащиты и заземления строящихся зданий и сооружений с паспортами, в том числе: - Акт по присоединению заземлителей к токоотводам и токоотводов к молниеприемникам; - Акт результатов замеров сопротивлений тока промышленной частизаземлителей отдельно стоящих молниеотводов (с приложением); - Акты освидетельствования скрытых работ по устройству внутренних    и    наружных    сетей    (с    приложением),    Акт    ОУИО (освидетельствования участка инженерного обеспечения на наружное освещение (с приложением), Акт ОУИО (освидетельствования участка инженерного обеспечения (на устройство телефонной связи) (при наличии в Р.Ч.) (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на защиту наружных кабельных линий полнотелым глиняным кирпичом (при наличии в Р.Ч.) (с приложением), Акт освидетельствование скрытых работ на монтаж вентиляционных блоков (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ по уплотнению герметизации) выводов, выпусков инженерных коммуникаций через наружные стены здания (с приложением) (согласно СП48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.3);

- Акты освидетельствования участков сетей инженерно- технического обеспечения. На каждые сети отдельно: вентиляция, сигнализация, автоматизация, пожаротушение, водопроводы, канализации, отопление (теплоснабжение), связь (телефонизация, информатизация), электроосвещение и электрооборудование). (Приложение №5 РД-11-02-2006) (согласно СП48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.5)

- Акт проверки систем водоснабжения, канализации, регулировки санитарно-технических приборов (при наличии в Р.Ч.), Акт приемки водомерного узла (при наличии в Р.Ч.) (с приложением), Акт теплового испытания систем отопления (с приложением), Акт на проверку вентиляционных блоков (с приложением), Акт проверки систем дымового удаления (с приложением), Паспорт автоматической системы пожарной сигнализации и управления дымового удалением, Акты индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования (с приложением). На каждые сети отдельно: вентиляция, сигнализация, автоматизация, пожаротушение,водопроводы,        канализации,        отопление (теплоснабжение), связь (телефонизация, информатизация), электроосвещение и электрооборудование) (являются приложением к Актам освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения), Документы качества на примененные при строительстве объекта: материалы, конструкции, изделия, оборудование (паспорта, сертификаты, протоколы лабораторных испытаний и др.) (которые не были включены в акты) (в соответствии с СП48.13330.2011);

- Исполнительные планы (схемы) к каждому акту ОСР и акту освидетельствования ответственных конструкций перед установкой или монтажом с разрезами (при требовании рабочих чертежей) (с приложением) (согласно СП48.13330.2011, СП126.13330.2012, по форме СП126.13330.2012);

- Акты    освидетельствования    ответственных    конструкций    по благоустройству территории (с приложением), Акты освидетельствования ответственных конструкций в целом на здания и сооружения. (Приложение №4 РД РД-11-02-2006) (с приложением) (согласно СП48.13330.2011, по форме РД РД-11-02-2006 Приложение №4);

- Документы качества на примененные при строительстве объекта: материалы, конструкции, изделия, оборудование (паспорта, сертификаты, протоколы лабораторных испытаний и др.) (которые не были включены в акты) (согласно СП48.13330.2011);

- Исполнительные планы (схемы) к каждому акту ОСР и акту освидетельствования ответственных конструкций перед установкой или монтажом с разрезами (при требовании рабочих чертежей) (согласно СП48.13330.2011, СП126.13330.2012, по форме СП126.13330.2012);

Исполнительная документация на работы по устройствам СЦБ:

- Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности (с приложением исполнительной схемы разбивки и закрепления трассы кабельных линий) (согласно ЦУКС-799, ЦШ-571, СП48.13330.2011, СП126.13330.2012, по форме РД РД-11-02-2006 Приложение №2);

- Комиссионный акт выбора трассы для утверждения главным инженером железной дороги (при необходимости) (согласно ЦУКС-799, ЦШ-571, по форме СП36.13330.2011, ЦШ-571);

- Акты освидетельствования скрытых работ по разработке грунта в траншеях и котлованах (с приложением исполнительных план-схем и поперечного профиля устройства траншеи), Акты освидетельствования скрытых работ по устройству защитной песчаной постели под кабели СЦБ (с приложением исполнительных план-схем и поперечного профиля устройства траншеи; паспорта на песок) (если данное устройство траншеи предусмотрено проектом), Акты освидетельствования скрытых работ по устройству кабельной канализации, в том числе в местах переходов под ж.д. путями и автодорогами (с приложением исполнительных план-схем, поперечных профилей устройства кабельных канализаций, паспортов качества на продукцию), Акты освидетельствования скрытых работ по прокладке кабелей СБЗПу в траншеях и кабельной канализации (с исполнительными схемами, указанием номера кабеля, марки и ёмкости (числа жил или пар), фактической глубины заложения кабеля, приложением сертификата качества или паспорта на кабельную продукцию, с указанием соединительных и разветвительных муфт) (согласно ЦУКС-799, ЦШ-571, по форме РД РД-11-02-2006 Приложение №3);

- Акты по демонтажу релейных и батарейных шкафов и светофоров (с приложением), Акты по вводу кабелей в шкафы на перегоне (с приложением) (согласно ЦУКС-799, ЦШ-571, по форме ЦУКС-799);

- Акты освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего проводника из круглой стали Ф-16мм к устройствам СЦБ (с приложением) (согласно ЦУКС-799, ЦШ-571, по форме РД РД-11-02-2006 Приложение №3);

- Акты по устройству земляных площадок (островков) под сигнальные точки на перегоне с укреплением откосов ж. б. плитами (паспорта на ж. б. конструкции) (если предусмотрено проектом) (с приложением),Акты освидетельствования скрытых работ по устройству основания под релейные и батарейные шкафы,ж.б. стойки (деревянные сваи L=8M, каркас из бревен, если предусмотрено проектом) (с приложением) (согласно ЦУКС-799, ЦШ-571, по форме ЦУКС-799);

- Акты освидетельствования скрытых работ по огнезащите бревенчатого настила под устройства СЦБ( с обязательным приложением протоколов испытаний огнезащитного покрытия (если предусмотрено проектом)) (согласно ЦУКС-799, ЦШ-571, по форме РД РД-11-02-2006 Приложение №3);

- Акты проверки габарита приближения «Сп» напольного оборудования СЦБ (на светофоры, батарейные и релейные шкафы, муфты) (с приложением) (согласно ЦУКС-799, ЦШ-571, по форме ЦУКС-799, ЦШ-571);

- Акт освидетельствования участка инженерного обеспечения СЦБ, АБТЦ. Каждого участка по рабочей документации (с приложением) (согласно ЦУКС-799, ЦШ-571, СП48.13330.2011, по форме РД РД-11-02-2006 Приложение № 5);

- Акты рабочих комиссий о принятии устройств в эксплуатацию или передачи их на обслуживание (согласно ЦУКС-799, ЦШ-571, СП48.13330.2011, по форме СП48.13330.2011);

- Один экземпляр рабочих чертежей проекта устройств СЦБ и электроснабжения с внесенными в них изменениями. Изменения в проектной документации должны быть подписаны главным инженером проекта или лицом его заменяющим, Комплект утвержденных нетиповых установочных чертежей и копии документов, разрешающих отступления от проекта и технических условий (согласно ЦУКС-799, ЦШ-571, по форме СП70.13330.2012);

- Паспорт высоковольтной линии, Поперегонную ведомость на линии СЦБ (согласно ЦУКС-799, ЦШ-571, по форме ЦУКС-799, ЦШ-571);

- Проектные и исполнительные чертежи трасс прокладки кабелей на станциях и перегонах, Проектные и исполнительные планы (таблицы) прокладки кабелей в служебно-технических зданиях, Планы кабельных сетей станционных и перегонных устройств СЦБ (согласно ЦУКС-799, по форме СП126.13330.2012);

- Планы укладки кабелей в траншеях с указанием номера кабеля, марки и емкости (числа жил или пар), устройств СЦБ, соединительных и разветвительных муфт (согласно ЦУКС-799, по форме ЦУКС-799, СП126.13330.2012);

- Ведомость установленного оборудования устройств СЦБ на станциях и перегонах (на светофоры, батарейные и релейные шкафы, муфты кабельные концевые и универсальные), Протоколы электрических измерений кабелей СЦБ (после окончания монтажа) (согласно ЦУКС-799, по форме ЦУКС-799);

- Перечень Актов по ЦШ-571 в дополнении ЦУКС-799 (согласно ЦУКС-799, ЦШ-571);

- Комиссионные акты по выбору места установки светофоров, постройки служебно-технических зданий, Паспорта или их копии на смонтированное оборудование (светофоры линзовые, батарейные и релейные шкафы) и материалы (кабельную продукцию, муфты, трубы, колодцы и т.д.), Протоколы электрических измерений: контуров заземлений зданий и устройств СЦБ и связи (после окончания монтажа) (согласно ЦШ-571, по форме ЦШ-571);

-Монтажные схемы разветвительных кабельных муфт, светофоров, электроприводов (стрелочных переводов), рельсовых цепей (согласно ЦШ-571, по форме СП126.13330.2012);

Исполнительная документация на работы по устройствам связи (в том числе магистральных линий связи):

- Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности (с приложением исполнительной схемы разбивки и закрепления трассы кабельных линий) (с приложением) (согласно ЦУКС-799, ЦШ-571, СП48.13330.2011, СП126.13330.2012, по форме РД РД-11-02-2006 Приложение №2);

- Комиссионный акт выбора трассы для утверждения главным инженером железной дороги (при необходимости) (согласно ЦУКС-799, ЦШ-571, по форме СП36.13330.2011,ЦШ-571);

- Акты освидетельствования скрытых работ по разработке грунта в траншеях и котлованах (с приложением исполнительных план-схем и поперечного профиля устройства траншеи), Акты освидетельствования скрытых работ по устройству защитной песчаной постели под кабели связи (с приложением исполнительных план-схем и поперечного профиля устройства траншеи; паспорта на песок) (если данное устройство траншеи предусмотрено проектом), Акты освидетельствования скрытых работ по устройству кабельной канализации, в том числе в местах переходов под ж.д. путями и автодорогами (с приложением исполнительных план-схем, поперечных профилей устройства кабельных канализаций, паспортов качества на продукцию) (согласно ЦУКС-799, ЦШ-571, по форме РД РД-11-02-2006 Приложение №3);

- Акты освидетельствования скрытых работ по прокладке кабелей и монтажу муфт (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ по устройству заземлений (с приложением) (согласно ЦУКС-799, ЦШ-571, по форме РД РД-11-02-2006 Приложение №3);

- Протокол измерения сопротивления заземлений кабельных ящиков, молниеотводов и контуров (согласно ЦУКС-799, ЦШ-571, по форме ЦУКС-799, ЦШ-571);

- Акт освидетельствования участка инженерного обеспечения СС. Каждого участка по рабочей документации (с приложением) (согласно ЦУКС-799, ЦШ-571, СП48.13330.2011, по форме РД РД-11-02-2006 Приложение №5);

- Акты проверки питающих установок, Электрические паспорта на аппаратуру, тракты и каналы телефонной, телеграфной и избирательной связи, Поперегонная ведомость устройств линии связи, Протоколы электрических измерений проводов постоянным и переменным током, Паспорт магистральной кабельной линии связи, содержащий откорректированные чертежи трассы проложенных кабелей с указанием привязки и глубины заложения, прокладки кабеля в канализации, на речных кабельных переходах, переходах через полотно шоссейных и железных дорог; протоколы электрических измерений постоянным током на каждый усилительный участок; протоколы электрических измерений на каждый усилительный участок переменным током; протоколы измерения переходного затухания на ближнем конце; протоколы измерения затухания на дальнем конце между цепями кабеля; протоколы измерения асимметрии цепей относительно земли; протоколы прозвонки жил кабеля; паспорта на монтаж сложных муфт; протоколы проверки герметичности металлической оболочки кабеля и смонтированных муфт на усилительном участке (согласно ЦУКС-799, ЦШ-571, по форме ЦУКС-799, ЦШ-571);

Исполнительная документация на работы по устройствам радиосвязи:

- Акт разбивки осей объекта на местности (с приложением исполнительной план-схемы закрепления осей) (согласно СП126.13330-2012, по форме РД РД-11-02-2006 Приложение № 2);

- Акт освидетельствования скрытых работ по прокладке коаксиальных кабелей (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ по устройству молниезащиты (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ по устройству заземления (с приложением) (согласно ЦУКС-799, ЦШ-571, СП48.13330.2011, по форме РД РД-11-02-2006 Приложение №3);

- Акт освидетельствования участка инженерного обеспечения СС (с приложением) (согласно ЦУКС-799, ЦШ-571, СП48.13330.2011, по форме РД РД-11-02-2006 Приложение № 5);

- Технический паспорт на сеть радиосвязи (поездной, ремонтно-оперативной или станционной), Результаты измерений помеховой обстановки в местах установки стационарных радиостанций и вдоль перегонов с указанием места расположения потенциальных источников радиопомех (разъединители, посты секционирования, тяговые подстанции, переходы линий электропередачи через пути) (согласно ЦУКС-799, ЦШ-571, по форме приложения ЦУКС-799, ЦШ-571);

- Исполнительные схемы к актам ОСР и ОУИО (согласно ЦУКС-799, ЦШ-571, СП48.13330.2011, СП126.13330.2012, по офрме СП126.13330.2012);

- Ведомость установленной аппаратуры, устройств и оборудования на станциях и перегонах, Один экземпляр рабочих чертежей на установку аппаратуры и оборудования (согласно ЦУКС-799, ЦШ-571, по форме приложения ЦУКС-799, ЦШ-571);

Исполнительная документация на работы по энергетическому хозяйству:

- Акт разбивки осей объекта на местности (с приложением исполнительной план-схемы закрепления осей) (согласно СП48.13330.2011, по форме РД-11-02-2006 Приложение № 2);

- Акт освидетельствования скрытых работ на устройство фундаментов под КТП и опоры ВЛ (с приложением) (согласно СП48.13330.2011, по форме РД-11-02-2006 Приложение № 3);

- Акты освидетельствования скрытых работ по прокладке кабелей, устройству кабельной канализации, устройству заземления (с приложением), Акт освидетельствования участка инженерного обеспечения ЭС (с приложением), Акты проверки и регулировки защиты на питающих пунктах (согласно ЦУКС-799, СП48.13330.2011, по форме ЦУКС-799РД РД-11-02-2006 Приложение №5);

- Перечень сооружений энергетического хозяйства, Ведомость линий электропередачи (опоры, провода), Схемы электроснабжения потребителей на станциях и питания потребителей на перегонах, Акты наладки и проверки защиты оборудования электроподстанций, подстанций и линий электропередачи, Ведомость переходов ЛЭП через железнодорожные пути, силовые линии и другие сооружения с указанием габаритов, Акты проверок и приемки котельных установок, а также испытаний и замеров, определяющих соответствие санитарно-технических установок и вентиляций действующим нормам и проекту, Паспорта по устройствам электроснабжения (электростанции, подстанции, линии электропередачи, осветительные сети, прожекторные установки и другие), Акты (документы) необходимых согласований с другими организациями (по отпуску электроэнергии, подключению к сетям электросистемы и другие), Протоколы, акты и журналы по проверке, испытанию, измерениям и наладке оборудования и устройств при пусконаладочных работах, Акты испытания трансформаторного масла, которым залиты силовые и автоблокировочные трансформаторы и масляные выключатели (согласно ЦУКС-799, по форме ЦУКС-799);

Исполнительная документация на работы по устройству воздушных линий электроснабжения:

- Акт разбивки осей объекта на местности (с приложением исполнительной план-схемы закрепления осей);

- Комиссионный акт выбора трассы для утверждения главным инженером железной дороги (при необходимости) (согласно ЦУКС-799, ЦШ-571, по форме СП36.13330.2011,ЦШ-571);

- Акты освидетельствования скрытых работ на устройство фундаментов под опоры линии электроснабжения (с приложением), Акт освидетельствования ответственных конструкций на монтаж опор линии электроснабжения (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ по устройству заземления (с приложением), Акт освидетельствования участка инженерного обеспечения ЭС (с приложением) (согласно ЦУКС-799, СП48.13330.2011, по форме ЦУКС-799, РД-11-02-2006 Приложение №3, №4, 5);

- Трехлинейная схема линий электропередачи с нанесением расцветки фаз, транспозиции проводов и номеров транспозиционных опор, Монтажные таблицы проводов и тросов, Протоколы измерений сопротивления заземлений опор, Акты осмотров переходов и пересечений, составленные совместно с представителями заинтересованных организаций (по действующим не переустраивающимся переходам акты представляет заказчик) (с приложением) (согласно ЦУКС-799, по форме ЦУКС-799);

- Исполнительный план трассы (согласно ЦУКС-799, СП126.13330.2012, по форме СП126.13330.2012);

Исполнительная документация на работы по устройству кабельных линий электроснабжения:

- Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности (с приложением исполнительной схемы разбивки и закрепления трассы кабельных линий) (согласно ЦУКС-799, ЦШ-571, СП48.13330.2011; СП126.13330.2012, по форме РД РД-11-02-2006 Приложение №2);

- Комиссионный акт выбора трассы для утверждения главным инженером железной дороги (при необходимости) (согласно ЦУКС-799, ЦШ-571, по форме СП36.13330.2011,ЦШ-571);

- Акты освидетельствования скрытых работ по разработке грунта в траншеях и котлованах (с приложением исполнительных план-схем и поперечного профиля устройства траншеи), Акты освидетельствования скрытых работ по устройству защитной постели под кабели электроснабжения (с приложением исполнительных план-схем и поперечного профиля устройства траншеи; паспорта на песок), Акты освидетельствования скрытых работ по устройству кабельной канализации, в том числе в местах переходов под ж.д. путями и автодорогами (с приложением исполнительных план-схем, поперечных профилей устройства кабельных канализаций, паспортов качества на продукцию), Акты освидетельствования скрытых работ по прокладке кабелей и монтажу муфт (с приложением) (согласно ЦУКС-799 ЦШ-571 РД РД-11-02-2006 Приложение № 3);

- Акт освидетельствования скрытых работ по устройству, заземления (с приложением), Акт освидетельствования участка инженерного обеспечения ЭС (с приложением);

- Протоколы заводских испытаний, Акты испытания кабельных линий после прокладки (согласно ЦУКС-799, по форме ЦУКС-799);

Исполнительная документация на работы по устройству автомобильных дорог:

- Акт освидетельствования скрытых работ по снятию грунтов основания (с приложением), Акты освидетельствования скрытых работ по возведению и уплотнению земляного полотна(послойно) (согласно разделу И«Исполнительная документация на работы по устройству железнодорожного полотна. По устройству земляного полотна» данного перечня), Акт освидетельствования скрытых работ на устройство конструктивных слоев дорожной одежды с уплотнением (на каждый конструктив) (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на установку элементов швов, установку арматуры, заделки швов (если предусматривается проектом) (с приложением), Акт освидетельствования ответственной конструкции, (земляное полотно, и в целом после устройства дорожной одежды, С приложением схем -поперечных профилей на каждый пикет по рабочим чертежам, продольный профиль сооружения, продольный профиль водоотводода), Акты лабораторных испытаний грунтов и примененных материалов (согласно СП 48.13330.2011, СП 34.13330.2012, по форме РД 11-02-2006г. прил.З, РД 11-02-2006г. прил.4, СНиП 2.05.02-85 таб. 22);

Исполнительная документация на устройство железобетонного хранилища воды(пожарного резервуара):

- Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности (с приложением исполнительной схемы разбивки и закрепления трассы кабельных линий), Акт освидетельствования скрытых работ по устройству котлована (с приложением исполнительной план-схемы по устройству котлована с разрезами (высотными отметками,(м) и линейными размерами, (мм)), протоколов на уплотнение грунта (протокол уплотнения основания)), Акт освидетельствования скрытых работ по устройству основания под резервуар (с приложением) (согласно СП 48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.2, 3);

- Акт освидетельствования скрытых работ по бетонированию основания резервуара (с приложением), Акты освидетельствования скрытых работ по устройству днища, установку стеновых панелей, установку ригелей, плит перекрытий, установку лестниц, торкрет стен и днища (послойно) и т.д., Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж готового металлического/пластикового резервуара (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на устройство гидроизоляционного слоя (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на устройство теплоизоляционного слоя (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на обратную засыпку пазух котлована (с приложением) (согласно СП 48.13330.2011, СП 129.13330.2012, СП 70.13330.2012, по форме РД 11-02-2006г. прил.З);

- Акт освидетельствования ответственных конструкций на устройство пожарного резервуара (с приложением) (согласно СП 48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.5);

- Исполнительная схема с высотными отметками, Паспорт на хранилище (резервуаров) (согласно СП 70.13330.2012, по форме СП126.13330.2012, СНиП 3.03.01-87 прил. 13);

- Журнал сварочных работ, Журнал бетонных работ, Журнал монтажа строительных конструкций, Журнал замоноличивания монтажных стыков, Журнал Антикоррозийной защиты сварных соединений (согласно СП 70.13330.2012, по форме СНиП 3.03.01-87 прил.1-4,Форма ф. 54);

XIV. Исполнительная документация на монтаж технологических трубопроводов:

- Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности (с приложением исполнительной схемы разбивки и закрепления трассы кабельных линий) (согласно СП48.13330.2011, по форме РД 11-02-2006г. прил.2);

- Акты освидетельствования скрытых работ по разработке грунта в траншеях и котлованах (с приложением исполнительных план-схем и поперечного профиля устройства траншеи) (согласно ЦУКС-799, ЦШ-571, по форме РД РД-11-02-2006 Приложение № 3);

- Акт освидетельствования скрытых работ на устройство колодцев (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на укладку трубопроводов (с приложением) (согласно СП48.13330.2011, по форме РД РД-11-02-2006 Приложение № 3);

- Акт освидетельствования скрытых работ на устройство гидроизоляционного слоя (с приложением) (согласно СП 129.13330.2012, СП 70.13330.2012, по форме РД РД-11-02-2006 Приложение № 3);

- Акт испытания на прочность и герметичность (с приложением), Акт освидетельствования скрытых работ на обратную засыпку пазух траншеи (с приложением) (согласно СП48.13330.2011, по форме РД РД-11-02-2006 Приложение № 3);

- Акт освидетельствования участка инженерного обеспечения (с приложением) (согласно СП48.13330.2011, по форме РД РД-11-02-2006 Приложение № 5);

Исполнительная документация по строительству заземляющих устройств:

- Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств (с приложением) (согласно СНиП 12-01-0411.3.70, по форме РД 11-02-20061. Прил. 3);

- Паспорт заземляющего устройства (И 1.13-07, по форме И 1.13-07 Форма 24);

- Чертеж устройства наружного заземляющего устройства с привязкой к зданиям и сооружениям (согласно Рабочему проекту объекта);

- Протокол испытания наружного заземляющего устройства;

- Акт приемки молниезащиты (согласно ИГАСН 44/99).

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы ответчиков, оценив представленные доказательства, арбитражный суд установил, что заявленные требования обоснованы и подлежат удовлетворению в части по следующим основаниям. 

Согласно п. 4.2.18 договора подрядчик обязан передать по окончании строительства Заказчику документы, которые являются результатом Работ, в том числе:

- схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания;

- исполнительную документацию о выполненных строительных, монтажных работах;

- справку, подтверждающую соответствие параметров построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, подписанную ответственным представителем Подрядчика;

- справку, подтверждающую соответствие параметров построенного (реконструированного) объекта капитального строительства проектной документации, подписанную ответственным представителем Подрядчика;

- справки, подтверждающие соответствие параметров построенного (реконструированного) объекта капитального строительства техническим условиям, подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения;

- схемы, отображающие расположение построенных (реконструированных) объектов капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, подписанные ответственным лицом Подрядчика.

Согласно п. 4.2.19 договора подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию на выполненный объем работ одновременно с подписанием актов сдачи-приемки этих работ.

Согласно п. 4.2.23 договора подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты или протоколы о результатах испытания качества используемых на Объекте материалов, комплектующих изделий, конструкций, а также данные об их пожарной безопасности в соответствии с нормами, действующими на территории Российской Федерации.

Статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при толковании договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

Ввиду чего, суд признает обоснованными требования в части обязания ООО "Корпорация Р-Индустрия" передать ОАО "РЖД" документацию в рамках Договора № 352/Т от 06.10.2015 исходя из условий п.п. 4.2.18, 4.2.19 и 4.2.23.

В остальной части истец не обосновал необходимость предоставления документации, а также не представил доказательств наличия указанной документации у ответчика.

Согласно абз. 2 п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» при предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным. В рассматриваемом случае учитывая перечень документов регламентирующих и состав с перечень исполнительной документации, в случае принятия решения будет возможным и исполнимым

Согласно правовой позиции, сформулированной в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 22 июля 2019 г. № 306-ЭС19-2986, при отсутствии у ответчика документации, об истребовании которой заявлено в судебном порядке, у него возникает объективная невозможность исполнения обязанности по ее передаче истцу. Это, в свою очередь, исключает возможность удовлетворения судом требования об исполнении обязанности в натуре. 

Согласно разъяснениям, приведенным в абз. 4 п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. № 7, не может быть отказано в удовлетворении иска об исполнении обязательства в натуре в случае, когда надлежащая защита нарушенного гражданского права истца возможна только путем понуждения ответчика к исполнению в натуре и не будет обеспечена взысканием с ответчика убытков за неисполнение обязательства.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В силу ст. 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. Под достаточностью доказательств понимается такая их совокупность, которая позволяет сделать однозначный вывод о доказанности или о недоказанности определенных обстоятельств.

Согласно статьям 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, находит требования истца правомерными, обоснованными, подлежащими удовлетворению в части обязания ООО "Корпорация Р-Индустрия" передать ОАО "РЖД" документацию в рамках Договора № 352/Т от 06.10.2015, а именно,  1) документы, которые являются результатом Работ, в том числе:    схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания;  исполнительную документацию о выполненных строительных, монтажных работах;  справку, подтверждающую соответствие параметров построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, подписанную ответственным представителем Подрядчика;  справку, подтверждающую соответствие параметров построенного (реконструированного) объекта капитального строительства проектной документации, подписанную ответственным представителем Подрядчика;  справки, подтверждающие соответствие параметров построенного (реконструированного) объекта капитального строительства техническим условиям, подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения;  схемы, отображающие расположение построенных (реконструированных) объектов капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, подписанные ответственным лицом Подрядчика; 2) исполнительную документацию на выполненный объем работ; 3) сертификаты или протоколы о результатах испытания качества используемых на Объекте материалов, комплектующих изделий, конструкций, а также данные об их пожарной безопасности в соответствии с нормами, действующими на территории Российской Федерации.

В остальной части требования истца не обоснованы и удовлетворению не подлежат.

Расходы по оплате госпошлины в размере 6 000 руб. относятся на ответчика в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 9, 27, 64, 65, 71, 75, 167-170, 176 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства ответчика об оставлении иска без рассмотрения в части – отказать.

Обязать ООО "Корпорация Р-Индустрия" передать ОАО "РЖД" документацию в рамках Договора № 352/Т от 06.10.2015, а именно, 

1) документы, которые являются результатом Работ, в том числе: 

- схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания; 

-исполнительную документацию о выполненных строительных, монтажных работах; 

-справку, подтверждающую соответствие параметров построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, подписанную ответственным представителем Подрядчика; 

-справку, подтверждающую соответствие параметров построенного (реконструированного) объекта капитального строительства проектной документации, подписанную ответственным представителем Подрядчика; 

-справки, подтверждающие соответствие параметров построенного (реконструированного) объекта капитального строительства техническим условиям, подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения; 

-схемы, отображающие расположение построенных (реконструированных) объектов капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, подписанные ответственным лицом Подрядчика.

2) исполнительную документацию на выполненный объем работ.

3) сертификаты или протоколы о результатах испытания качества используемых на Объекте материалов, комплектующих изделий, конструкций, а также данные об их пожарной безопасности в соответствии с нормами, действующими на территории Российской Федерации.

Взыскать с ООО "Корпорация Р-Индустрия" (ИНН 

<

***>) в пользу ОАО "РЖД" (ИНН 

<

***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 6.000 руб. 00 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований – отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

               Судья                                                                                         В.П. Сорокин