АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. КазаньДело № А65-20672/2023 

Дата принятия решения –  07 декабря 2023 года.

Дата объявления резолютивной части –  30 ноября 2023 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Галеевой Ю.Н., при ведении протокола помощником судьи Шакуровой Л.Ф., рассмотрев в  судебном заседании дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью "ТОПАЗ", Камско-Устьинский район, с.Теньки, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая строительная компания "Стандарт", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 21 131 460  рублей 02 коп. задолженности,

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора – ООО СК Аманат, ООО Строй Инжиниринг,

с участием:

от истца  – не явился, извещен.

от ответчика  – ФИО1 представитель по доверенности от 11.01.2021, ФИО2. представитель по доверенности от 03.11.2023

от третьих лиц – не явились, извещены.

установил:

Истец - Общество с ограниченной ответственностью «ТОПАЗ» обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ответчику – Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая строительная компания "Стандарт"  о взыскании 21 131 460  рублей 02 коп. задолженности.

Определением  от 2.10.2023г. к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: ООО СК Аманат, ООО Строй Инжиниринг.

Ответчик в судебное заседание от 8.11.2023г. направил письменный отзыв, в котором высказал возражения.

Представитель истца присутствовал в судебном заседании от 8.11.2023г.

Определением от 8.11.2023г. суд предложил истцу в срок до 28.11.2023г. представить письменные возражения на отзыв ответчика. 

Истец в судебное заседание от 30.11.2023г. не явился, извещен, определение от 8.11.2023г. не исполнил, возражения на отзыв ответчика не представил. 

Ответчик в иске просил отказать по доводам, изложенным в письменном отзыве.

Третьи лица в судебное заседание не явились, извещены в порядке 123 АПК РФ.

Суд, руководствуясь ч.3 ст. 156 АПК РФ определил рассмотреть дело без участия истца и третьего лица.

Исследовав материалы дела, суд не находит правовых оснований для удовлетворения требований истца по следующим основаниям.

 Как следует из материалов дела, между ООО «УСК Стандарт» (Технический заказчик, ответчик) и ООО «ТОПАЗ» (Генеральный подрядчик, истец) заключены:

- договор генерального подряда № 21-942 от 30.12.2021 г. по строительству объекта: «3-х этажный 3-х секционный 71-квартирный жилой дом №4.1» расположенного по адресу: РТ, Пестречинский муниципальный район, Кощаковское сельское поселение, жилой комплекс «Усадьба Царево» (далее – договор генерального подряда № 21-942). Строительная площадка расположена на земельном участке с кадастровым номером 16:33:080402:23 общей площадью 32 058 кв.м.

Согласно п. 6.1 договора генерального подряда № 21-942 договорная цена составляет 127 095 100,87 рублей. Начало выполнения работ – 10.01.2022 г. (п. 3.2 договора генерального подряда № 21-942), окончание выполнения работ – 14.08.2022 г. (п. 3.2 договора генерального подряда № 21-942).

- договор генерального подряда № 21-943 от 30.12.2021 г. по строительству объекта: «3-х этажный 4-х секционный 97-квартирный жилой дом №4.2» расположенного по адресу: РТ, Пестречинский муниципальный район, Кощаковское сельское поселение, жилой комплекс «Усадьба Царево» (далее – договор генерального подряда № 21-943). Строительная площадка расположена на земельном участке с кадастровым номером 16:33:080402:23 общей площадью 32 058 кв.м.

Согласно п. 6.1 договора генерального подряда № 21-943 договорная цена составляет 149 453 296,35 рублей. Начало выполнения работ – 10.01.2022 г. (п. 3.2 договора генерального подряда № 21-943), окончание выполнения работ – 14.08.2022 г. (п. 3.3 договора генерального подряда № 21-943);

- договор генерального подряда № 21-944 от 30.12.2021 г. по строительству объекта: «3-х этажный 4-х секционный 107-квартирный жилой дом №4.3» расположенного по адресу: РТ, Пестречинский муниципальный район, Кощаковское сельское поселение, жилой комплекс «Усадьба Царево» (далее – договор генерального подряда № 21-944). Строительная площадка расположена на земельном участке с кадастровым номером 16:33:080402:23 общей площадью 32 058 кв.м.

Согласно п. 6.1 договора генерального подряда № 21-944 договорная цена составляет 156 238 756,46 рублей. Начало выполнения работ – 10.01.2022 г. (п. 3.2 договора генерального подряда № 21-944), окончание выполнения работ – 14.08.2023 г. (п. 3.3 договора генерального подряда № 21-944); 

- договор генерального подряда № 21-945 от 30.12.2021 г. по строительству объекта: «3-х этажный 4-х секционный 105-квартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже №4.4» расположенного по адресу: РТ, Пестречинский муниципальный район, Кощаковское сельское поселение, жилой комплекс «Усадьба Царево» (далее – договор генерального подряда № 21-945). Строительная площадка расположена на земельном участке с кадастровым номером 16:33:080402:23 общей площадью 32 058 кв.м.

Согласно п. 6.1 договора генерального подряда № 21-944 договорная цена составляет 156 399 123,18 рублей. Начало выполнения работ – 10.01.2022 г. (п. 3.2 договора генерального подряда № 21-944, окончание выполнения работ – 14.08.2022 г. (п. 3.3 договора генерального подряда № 21-944).

В соответствии с п. 6.2 указанных договоров генерального подряда расчет осуществляется согласно «Графику финансирования работ» (Приложение №2 к договорам) при соблюдении Генеральным подрядчиком «Графика производства работ» (Приложения №1 к договорам) в следующем порядке: 

- Перечисление денежных средств на сумму выполненных работ за отчетный месяц производится после подписания Сторонами ежемесячных Актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) при наличии исполнительной документации, с учетом положений п. 6.9 Договора (п. 6.2.1 Договоров).

- Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика, открытый в Уполномоченном банке не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3) на основании своевременно выставленных последним оригиналов счетов, оформленных надлежащим образом (п. 6.2.2 Договоров). 

- Расчет за последний отчетный месяц производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика, открытый в Уполномоченном банке не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

- Оплата производится Техническим заказчиком только при условии отсутствия со Стороны Технического заказчика направления письменного мотивированного отказа от подписания, представленного Генеральным подрядчиком Актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3).

В подтверждение выполненных работ ООО «ТОПАЗ» предъявлены, а ООО «УСК «СТАНДАРТ» приняты к оплате следующие документы: 

1. По договору генерального подряда № 21-942:

- Акт о приемке выполненных работ № 1 от 28.02.2022 г. на сумму 818 836,11 руб.

- Акт о приемке выполненных работ № 2 от 07.04.2022 г. на сумму 2 337 266,14 руб. 

- Акт о приемке выполненных работ № 3 от 24.05.2022 г. на сумму 4 164 735,25 руб.

- Акт о приемке выполненных работ № 4 от 24.05.2022 г. на сумму 335 391,00 руб.

Итого по указанным актам выполнено и принято работ на сумму 7 656 228,77 руб.

2. По договору генерального подряда № 21-943:

- Акт о приемке выполненных работ № 1 от 28.02.2022 г. на сумму 1 492 906,23 руб. 

- Акт о приемке выполненных работ № 2 от 07.04.2022 г. на сумму 2 140 457,51 руб. 

- Акт о приемке выполненных работ № 3 от 11.04.2022 г. на сумму 1 751 695,96 руб. 

- Акт о приемке выполненных работ № 4 от 24.05.2022 г. на сумму 2 929 879,39 руб. 

- Акт о приемке выполненных работ № 5 от 24.05.2022 г. на сумму 934 558,08 руб. 

- Акт о приемке выполненных работ № 6 от 24.05.2022 г. на сумму 8 424,00 руб.

- Акт о приемке выполненных работ №7 от 25.05.2022 г. на сумму 64 638,53 руб. 

Итого по указанным актам выполнено и принято работ на сумму 9 322 559,70 руб. 

3. По договору генерального подряда № 24-944:

- Акт о приемке выполненных работ № 1 от 28.02.2022 г. на сумму 1 077 002,98 руб.

- Акт о приемке выполненных работ № 2 от 07.04.2022 г. на суму 4 572 907,85 руб.

- Акт о приемке выполненных работ № 3 от 24.05.2022 г. на сумму 4 121 746,85 руб.

- Акт о приемке выполненных работ № 4 от 24.05.2022 г. на сумму 1 080 374,13 руб.

- Акт о приемке выполненных работ № 5 от 24.05.2022 г. на сумму 129 711,47 руб.

Итого по указанным актам выполнено и принято работ на сумму 10 981 743,28 руб. 

4. По договору генерального подряда № 21-945: 

- Акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.02.2022 г. на сумму 3 284 136,94 руб. 

- Акт о приемке выполненных работ № 2 от 07.04.2022 г. на сумму 5 726 630,69 руб. 

- Акт о приемке выполненных работ № 3 от 24.05.2022 г. на сумму 4 779 009,57 руб. 

- Акт о приемке выполненных работ № 4 от 24.05.2022 г. на сумму 2 080 560,48 руб. 

- Акт о приемке выполненных работ № 5 от 4.05.2022 г. на сумму 502 431,27 руб. 

Итого по указанным актам выполнено и принято работ на сумму 16 372 768,95 руб. 

Общая сумма выполнения 44 333 300,43 руб. 

Пунктом 1.11 указанных договоров генерального подряда предусмотрено: «Генеральный подрядчик уполномочивает Технического заказчика от имени и за счет Генерального подрядчика заключать с третьими лицами (поставщиками, изготовителями) договоры поставки строительных материалов (кирпич силикатный, утеплитель минераловатный, фасадный облицовочный материал), согласно Приложению № 14 Перечень материалов для строительства объекта, указанного в п.1.1 настоящего договора, а Генеральный подрядчик обязуется принять строительные материалы и оборудование на объекте.

Для исполнения данного поручения Технический заказчик (ответчик)  вправе:

• производить поиск и подбор поставщиков (изготовителей) строительных материалов и оборудования;

• вести переписку и телефонные переговоры с потенциальными контрагентами;

• совершать иные действия, необходимые для выполнения данного поручения.

Технический заказчик до подписания направляет Генеральному подрядчику договор поставки строительных материалов на ознакомление.

Предварительно до заключения договора Генерального подряда Генеральный подрядчик согласовал форму договора поставки» - далее по тексту – агентская схема.

Согласно п. 6.6.1 указанных договоров генерального подряда Генеральный подрядчик (истец)  поручает Техническому заказчику (ответчику) произвести оплату за строительные материалы, оборудование генерального подряда, на основании счетов на оплату, выставленных поставщиками (изготовителями) за счет денежных средств, подлежащих оплате Генеральному подрядчику в соответствии с разделом 6 указанных договоров генерального подряда.

Платежи, осуществляемые Техническим заказчиком в рамках договоров поставки, указанных в п.1.11 указанных договоров генерального подряда являются и засчитываются в качестве авансовых платежей Технического заказчика, произведенных в пользу Генерального подрядчика в рамках каждого договора генерального подряда.

Генеральный подрядчик выплачивает Техническому заказчику агентское вознаграждение в размере 1000 (Одна тысяча) рублей однократно не позднее 28.02.2023 г.

Во исполнение п. 1.11 указанных договоров генерального подряда ответчик от имени и за счет истца подписаны следующие договоры:

- договор поставки № 010-ГК от 11.04.2022 г. с ООО ПКФ СК, ИНН 

<

***> (поставка кирпича). Объект – строительная площадка (земельный участок) в жилом комплексе «Усадьба Царево» кадастровый номер № 16:33:080402:23 общей площадью 32 058 кв.м. (стр. 134, том 5).

- договор поставки № 011-ГК от 11.04.2022 г. с ООО ПКФ СК, ИНН 

<

***> (поставка кирпича). Объект - строительная площадка (земельный участок) в жилом комплексе «Усадьба Царево» кадастровый номер № 16:33:080402:23 общей площадью 32 058 кв.м. (стр. 154, том 5). 

- договор поставки № 012-ГК от 11.04.2022 г. с ООО ПКФ СК, ИНН 

<

***> (поставка кирпича). Объект - строительная площадка (земельный участок) в жилом комплексе «Усадьба Царево» кадастровый номер № 16:33:080402:23 общей площадью 32 058 кв.м. (стр. 144, том 5).

- договор поставки № 013-ГК от 11.04.2022 г. с ООО ПКФ СК, ИНН 

<

***> (поставка кирпича). Объект - строительная площадка (земельный участок) в жилом комплексе «Усадьба Царево» кадастровый номер № 16:33:080402:23 общей площадью 32 058 кв.м. (стр. 116, том 5)

- договор поставки № 01-К от 13.04.2022 г. с ООО КЫЗЫЛТАШ, ИНН 

<

***> (поставка кирпича). Объект - строительная площадка (земельный участок) в жилом комплексе «Усадьба Царево» кадастровый номер № 16:33:080402:23 общей площадью 32 058 кв.м. (стр. 126, том 5).

- договор поставки № 02-К от 22.04.2022 г. с ООО ТК ТЕПЛАЯ КЕРАМИКА, ИНН 

<

***> (поставка кирпича). Объект - строительная площадка (земельный участок) в жилом комплексе «Усадьба Царево» кадастровый номер № 16:33:080402:23 общей площадью 32 058 кв.м. (стр.103, том 5)

- договор оказания услуг № 4.1-Транспорт от 11.04.2022 г. с ООО «АЛЬТЕРНАТИВА СТС», ИНН 

<

***> (оказание услуг по перевозке). Объект - строительная площадка (земельный участок) в жилом комплексе «Усадьба Царево» кадастровый номер № 16:33:080402:23 общей площадью 32 058 кв.м.

- договор оказания услуг № 4.2-Транспорт от 11.04.2022 г. с ООО «АЛЬТЕРНАТИВА СТС», ИНН 

<

***> (оказание услуг по перевозке). Объект - строительная площадка (земельный участок) в жилом комплексе «Усадьба Царево» кадастровый номер № 16:33:080402:23 общей площадью 32 058 кв.м.

- договор оказания услуг № 4.3-Транспорт от 11.04.2022 г. с ООО «АЛЬТЕРНАТИВА СТС», ИНН 

<

***> (оказание услуг по перевозке). Объект - строительная площадка (земельный участок) в жилом комплексе «Усадьба Царево» кадастровый номер № 16:33:080402:23 общей площадью 32 058 кв.м.

- договор оказания услуг № 4.4-Транспорт от 11.04.2022 г. с ООО «АЛЬТЕРНАТИВА СТС», ИНН 

<

***> (оказание услуг по перевозке). Объект - строительная площадка (земельный участок) в жилом комплексе «Усадьба Царево» кадастровый номер № 16:33:080402:23 общей площадью 32 058 кв.м.

Ответчик произвел следующие оплаты от имени и за счет истца по договорам, заключенным по агентской схеме, в целях реализации полномочий агента согласно п. 1.11 договоров генерального подряда: 

- по договору поставки № 010-ГК от 11.04.2022 г. перечислен аванс в размере 3 937 500,00 руб., что подтверждается платежным поручением № 2668 от 20.04.2022 г. (стр. 143, том 5).

- по договору поставки № 011-ГК от 11.04.2022 г. перечислен аванс  в размере 3 937 500,00 руб., что подтверждается платежным поручением № 2669 от 20.04.2022 г. (стр. 163, том 5).

- по договору поставки № 012-ГК от 11.04.2022 г. перечислен аванс  в размере 3 937 500,00 руб., что подтверждается платежным поручением № 2670 от 20.04.2022 г. (стр. 153, том 5).

- по договору поставки № 013-ГК от 11.04.2022 г. перечислен в размере 3 937 500,00 руб., что подтверждается платежным поручением № 2671 от 20.04.2022 г. (стр.125, том 5).

- по договору поставки № 01-К от 13.04.2022 г. ООО КЫЗЫЛТАШ осуществлена поставка товара на сумму 326 080,00 руб., что подтверждается УПД № 575 от 02.04.2022 г., УПД № 584 от 04.04.2022 г. Перечислена оплата за поставленный товар в размере 326 080,00 руб., что подтверждается платежным поручением № 3373 от 18.05.2022 г. (стр. 133, том 5).

- по договору поставки № 02-К от 22.04.2022 г. ООО ТК ТЕПЛАЯ КЕРАМИКА осуществлена поставка товара на сумму 216 942,00 руб., что подтверждается УПД № 1095 от 19.04.2022 г., № 1096 от 20.04.2022 г. Перечислена оплата за поставленный товар в размере 216 942,00 руб., что подтверждается платежным поручением № 3653 от 27.05.2022 г. (стр. 114, том 5).

- по договору оказания услуг № 4.1-Транспорт от 11.04.2022 г. исполнение не производилось. 

- по договору оказания услуг № 4.2-Транспорт от 11.04.2022 г. исполнение не производилось.

- по договору оказания услуг № 4.3-Транспорт от 11.04.2022 г. ООО «АЛЬТЕРНАТИВА СТС» оказаны транспортные услуги на сумму 143 164,80 руб., что подтверждается УПД № 1002 от 28.04.2022 г. Перечислена оплата за оказанные услуги в размере 143 164,80 руб., что подтверждается платежным поручением № 3654 от 27.05.2022 г. (стр. 115, том 5).

- по договору оказания услуг № 4.4-Транспорт от 11.04.2022 г. исполнение не производилось.

Общая сумма оплат, перечисленных ООО «УСК «СТАНДАРТ» за ООО «ТОПАЗ», составляет 16 436 186 руб. 80 коп.

Все вышеуказанные платежные поручения содержат ссылку на реквизиты договора, по которому произведена оплата. 

Все договоры поставки и оказания услуг, заключенные во исполнение п. 1.11 договоров генерального подряда, содержат ссылку на соответствующий договор генерального подряда и объект.

Так, договор поставки № 010-ГК от 11.04.2022 г. в преамбуле содержит ссылку на договор генерального подряда № 21-942 от 30.12.2021 г., пункт 5 приложения № 1 к договору поставки № 010-ГК от 11.04.2022 г. – Спецификация - содержит ссылку на объект, Договор поставки № 011-ГК от 11.04.20222 г. в преамбуле содержит ссылку на договор генерального подряда № 21-943 от 30.12.2021 г., пункт 5 приложения № 1 к договору поставки № 011-ГК от 11.04.2022 г. – Спецификация - содержит ссылку на объект и т.д.

Истец получал товар – строительные материалы, приобретенные за счет денежных средств по договорам генерального подряда № 21-942 от 30.12.2021 г., № 21-943 от 30.12.2021 г., № 21-944 от 30.12.2021 г., № 21-945 от 30.12.2021 г. 

В счет оплаты работ по договорам генерального подряда, а именно в счет аванса, засчитывалась стоимость строительных материалов, что прямо предусмотрено п. 6.6.1 договоров генерального подряда: 

В общей сложности ООО «УСК «СТАНДАРТ» произведены оплаты по договору генерального подряда № 21-942 от 30.12.2021 г.:

- за выполненные ООО «ТОПАЗ» и принятые работы на сумму 818 836,11 руб. согласно платежному поручению № 2386 от 08.04.2022 г.

- за выполненные ООО «ТОПАЗ» и принятые работы на сумму 2 337 266,41 руб. согласно платежному поручению № 2569 от 15.04.2022 г.

- напрямую поставщику ООО ПКФ СК по договору поставки № 010-ГК от 11.04.2022 г. аванс за материалы на сумму 3 937 500,00 руб. согласно платежному поручению № 2668 от 20.04.2022 г. 

- за выполненные ООО «ТОПАЗ» и принятые работы на сумму 562 626,25 руб. согласно платежному поручению № 3651 от 27.05.2022 г. 

Итого сумма оплат по договору генерального подряда № 21-942 от 30.12.2021 г. составила 7 656 228,77 руб.

ООО «УСК «СТАНДАРТ» произведены оплаты по договору генерального подряда № 21-943 от 30.12.2021 г.:

- за выполненные ООО «ТОПАЗ» и принятые работы на сумму 1 492 906,23 руб. согласно платежному поручению № 2394 от 08.04.2022 г.

- за выполненные ООО «ТОПАЗ» и принятые работы на сумму 2 140 457,51 руб. согласно платежному поручению № 2570 от 15.04.2022 г.

- за выполненные ООО «ТОПАЗ» и принятые работы на сумму 1 751 695,96 руб. согласно платежному поручению № 2571 от 15.04.2022 г.

- напрямую поставщику ООО ПКФ СК по договору поставки № 011-ГК от 11.04.2022 г. аванс за материалы на сумму 3 937 500,00 руб. согласно платежному поручению № 2669 от 20.04.2022 г.

Итого сумма оплат по договору генерального подряда № 21-943 от 30.12.2021 г. составила 9 322 559,70 руб.

ООО «УСК «СТАНДАРТ» произведены оплаты по договору генерального подряда № 21-944 от 30.12.2021 г.: 

- за выполненные ООО «ТОПАЗ» и принятые работы на сумму 1 077 002,98 руб. согласно платежному поручению № 2396 от 08.04.2022 г.

- за выполненные ООО «ТОПАЗ» и принятые работы на сумму 1 959 950,00 руб. согласно платежному поручению № 2400 от 08.04.2022 г. 

- за выполненные ООО «ТОПАЗ» и принятые работы на сумму 2 612 957,85 руб. согласно платежному поручению № 2572 от 15.04.2022 г.

- напрямую поставщику ООО ПКФ СК по договору поставки № 012-ГК от 11.04.2022 г. аванс за материалы на сумму 3 937 500,00 руб. согласно платежному поручению № 2670 от 20.04.2022 г.

- напрямую исполнителю ООО АЛЬТЕРНАТИВА СТС по договору оказания услуг № 4.3–Транспорт от 11.04.2022 г. за оказанные услуги на сумму 143 164,80 руб. согласно платежному поручению № 3654 от 27.05.2022 г. 

- за выполненные ООО «ТОПАЗ» и принятые работы 278 376,00 руб. согласно платежному поручению № 3646 от 27.05.2022

- за выполненные ООО «ТОПАЗ» и принятые работы на сумму 755 849,65 руб. согласно платежному поручению № 3652 от 27.05.2022 г.

Итого сумма оплат по договору генерального подряда № 21-944 от 30.12.2021 г. составила 10 764 801,28 руб.

ООО «УСК «СТАНДАРТ» произведены оплаты по договору генерального подряда № 21-945 от 30.12.2021 г.: 

- за выполненные ООО «ТОПАЗ» и принятые работы на сумму 3 284 136,94 руб. согласно платежному поручению № 2398 от 08.04.2022 г.

- за выполненные ООО «ТОПАЗ» и принятые работы на сумму 1 959 950,00 руб. согласно платежному поручению № 2399 от 08.04.2022 г. 

- за выполненные ООО «ТОПАЗ» и принятые работы на сумму 3 766 680,69 руб. согласно платежному поручению № 2573 от 15.04.2022 г.

- напрямую поставщику ООО ПКФ СК по договору поставки № 013-ГК от 11.04.2022 г. аванс за материалы на сумму 3 937 500,00 руб. согласно платежному поручению № 2671 от 20.04.2022 г. 

- напрямую поставщику ООО КЫЗЫЛТАШ по договору поставки № 01-К от 13.04.2022 г. за поставленные материалы на сумму 326 080,00 руб. согласно платежному поручению № 3373 от 18.05.2022 г. 

- за выполненные ООО «ТОПАЗ» и принятые работы на сумму 3 098 421,32 руб. согласно платежному поручению № 3655 от 27.05.2022 г.

- напрямую поставщику ООО ТК ТЕПЛАЯ КЕРАМИКА по договору поставки № 02-К от 22.04.2022 г. за поставленные материалы на сумму 216 942,00 руб. согласно платежному поручению № 3653 от 27.05.2022 г. 

Итого сумма оплат по договору генерального подряда № 21-945 от 30.12.2021 г. составила 16 589 710,95 руб.

Общая сумма оплат 44 333 300,70 руб.

Таким образом, действия сторон направлены на установление сальдо взаимных предоставлений в рамках договоров генерального подряда № 21-942 от 30.12.2021 г., № 21-943 от 30.12.2021 г., № 21-944 от 30.12.2021 г., № 21-945 от 30.12.2021 г.

Факт перечисления денежных средств ООО «УСК «СТАНДАРТ» подтверждается представленными в материалах дела платежными поручениями.

В силу п. 6.6.1 договоров генерального подряда, платежи по договорам поставки засчитывались авансом, что автоматически влекло за собой уменьшение сумм, подлежащих оплате за выполненные работы. 

Отсутствие задолженности также подтверждается актами сверок взаимных расчетов, имеющихся в материалах дела. 

            Статьями 307 – 310 ГК РФ установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

            В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно положениям ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

   Истцом в материалы дела возражения на отзыв ответчика не представлены.

            Согласно ч. 1 ст. 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. 

            В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

            Согласно п. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Учитывая изложенное, требование истца о взыскании 21 131 460  рублей 02 коп. задолженности не может быть удовлетворено судом.

Расходы по уплате госпошлины согласно  ст.110 АПК РФ относятся на истца.

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л :

В иске отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ТОПАЗ", Камско-Устьинский район (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход бюджета 128 657 руб. 30 коп.  госпошлины.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Председательствующий судьяЮ.Н. Галеева