ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-239977/23-110-1927

26 июня 2024 года

город Москва

 

Резолютивная часть дополнительного решения оглашена 19 июня 2024 года

Дополнительное решение в полном объеме изготовлено 26 июня 2024 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В.  /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью  "СТРОЙЖЕЛДОРПРОЕКТ" (127018, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАРЬИНА РОЩА, 2-Я ЯМСКАЯ УЛ., Д. 4, ЭТАЖ 6, ПОМЕЩ. 22, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью    ИНСТИТУТ ИНЖПРОЕКТ (123022, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 11 874 230,11 руб., а также встречный иск ,

 

при участии:

по протоколу, 

 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной  ответственностью  "СТРОЙЖЕЛДОРПРОЕКТ" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью    ИНСТИТУТ ИНЖПРОЕКТ (с учетом принятых изменений в порядке ст.49 АПК РФ) о взыскании 11 005 568,72 руб. задолженности по Договору №14.20/ИИП/ММС/ПД/РД/АН/СУБ4 от 08.04.2022, 446 659,29 руб. процентов по договору по разработке  проектной документации, 1 479 615,91 руб. процентов по договору  по разработке рабочей документации, процентов на сумму 11 005 568,72 руб., исходя из ключевой ставки ЦБ РФ в соответствующие периоды, с 04.05.2024 по дату фактического исполнения обязательства, по встречному иску (с учетом принятых изменений в порядке ст.49 АПК РФ) о взыскании 1 186 684,99 руб. неустойки в соответствии с п.9.4. Договора №14.20/ИИП/ММС/ПД/РД/АН/СУБ4 от 08.04.2022, 360 000 руб. неустойки в соответствии с п.9.7. Договора №14.20/ИИП/ММС/ПД/РД/АН/СУБ4 от 08.04.2022.

Решением от 21 мая 2024 года судом первоначальный иск  удовлетворен в полном объеме. Встречный иск удовлетворен частично- в размере 212 824,62 руб.. В удовлетворении остальной части встречного иска отказано.

При принятии решения судом не был разрешен  вопрос  о взыскании 1 479 615,91 руб. процентов по договору  по разработке рабочей документации.

Согласно ст. 178 АПК РФ арбитражный суд, принявший решение, до вступления этого решения в законную силу по своей инициативе вправе принять дополнительное решение, в случае если судом по какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие в деле, представили доказательства, судом не было принято решение.

Заслушав представителей сторон,  исследовав и оценив доказательства,  суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, ООО «СтройЖелДорПроект» надлежащим образом осуществило выполнение работ в полном объеме, передав результат работ ООО «Институт Инжпроект» на общую сумму 11 005 568.72 рублей. Замечаний к работам Подрядчиком предъявлено не было. Стоимость работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком по Актам сдачи-приемки выполненных работ, соответствует Расчету стоимости проектных работ, являющемуся Приложением № 4 к Договору.

Ст. 395 ГК РФ установлена ответственность за неисполнение денежного обязательства в размере процентов на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

С учетом условий о сроке оплаты, предусмотренных п. 3.6.1. Договора, крайней датой оплаты выполненных работ по разработке Рабочей документации по Актам № 3, № 4 от 29.07.2022 г. является 19.08.2022 г. в связи с чем количество дней просрочки исполнения Подрядчиком обязательства по оплате составляет 623 дня.

Сумма задолженности по оплате работ, выполненных по Актам № 3, № 4 от 29.07.2022 г., составляет:

Задолженность

с

по

дней

Ставка   

Формула

Проценты

7 071392,72 р.

20.08.2022

18.09.2022

30

8,00

7 071 392,72 х 30 х 8% / 365

46 496,83 р.

7 071 392,72 р.

19.09.2022

23.07.2023

308

7,50

7 071 392,72 х 308 х 7.5% / 365

447 531,98 р.

7 071 392,72 р.

24.07.2023

14.08.2023

22

8,50

7 071 392,72 х 22 х 8.5% / 365

36 228,78 р.

7 071 392,72 р.

15.08.2023

17.09.2023

34

12,00

7 071 392,72 х 34 х 12% / 365

79 044,61 р.

7 071 392,72 р.

18.09.2023

29.10.2023

42

13,00

7 071 392,72 х 42 х 13% / 365

105 780,29 р.

7 071392,72 р.

30.10.2023

17.12.2023

49

15,00

7 071 392,72 х 49 х 15% / 365

142 396,54 р.

7 071392,72 р.

18.12.2023

31.12.2023

14

16,00

7 071 392,72 х 14 х 16% / 365

43 397,04 р.

7 071392, 72 р.

01.01.2024

03.05.2024

124

16,00

7 071 392,72 х 124 х 16% / 366

383 323, 58 р.

Сумма процентов: 1 284 199, 64 р.

С учетом условий о сроке оплаты, предусмотренных п. 3.6.1 Договора, крайней датой оплаты выполненных работ по разработке Рабочей документации по Акту № 6 от 16.12.2022 г. является 16.01.2023 г., в связи с чем количество дней просрочки исполнения Подрядчиком обязательства по оплате составило 473 дня.

Сумма задолженности по оплате работ, выполненных по Акту № 6 от 16.12.2022 г., составляет:

Задолженность

с

по

дней

Ставка   

Формула

Проценты

1 299 552,00 р.

17.01.2023

23.07.2023

188

7,50

1 299 552,00 х 188 х 7.5% / 365

50 201,87 р.

1 299 552,00 р.

24.07.2023

14.08.2023

22

8,50

1 299 552,00 х 22 х 8.5% / 365

6 657,98 р.

1 299 552,00 р.

15.08.2023

17.09.2023

34

12,00

1 299 552,00 х 34 х 12% / 365

14 526,50 р.

1 299 552,00 р.

18.09.2023

29.10.2023

42

13,00

1 299 552,00 х 42 х 13% / 365

19 439,87 р.

1 299 552,00 р.

30.10.2023

17.12.2023

49

15,00

1 299 552,00 х 49 х 15% / 365

26 169,06 р.

1 299 552,00 р.

18.12.2023

31.12.2023

14

16,00

1 299 552,00 х 14 х 16% / 365

7 975,33 р.

1 299 552,00 р.

01.01.2024

03.05.2024

124

16,00

1 299 552,00 х 124 х 16 % / 366

70 445, 66 р.

Сумма процентов: 195 416, 27 р

Итого: сумма процентов за неоплату выполненных работ по разработке Рабочей документации по Договору составила 1 479 615, 91 рублей.

При указанных обстоятельствах иск в этой  части также  подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156,169-171 АПК РФ, 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью    ИНСТИТУТ ИНЖПРОЕКТ (ОГРН: 

<

***>)  в пользу общества с ограниченной  ответственностью  "СТРОЙЖЕЛДОРПРОЕКТ" ( ОГРН: 

<

***>)  1 479 615 руб. 91 коп. процентов.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

Судья:                                                                                                  А.В. Мищенко