Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-90609/2020

12 января 2021 года

г.Санкт-Петербург

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Виноградова Л.В.,

рассмотрев дело по иску:

истец ООО "СК "СОНАР" 

ответчик  ООО "ПАРТНЕР ОТДЕЛКА" 

о взыскании 5 287 828,10 руб. 

установил:

Истец - ООО "СК "СОНАР" обратился в суд с иском к ответчику - ООО "ПАРТНЕР ОТДЕЛКА" о взыскании 4 928 078,38 руб. задолженности, 359 749,72 руб. неустойку, начисленную за период с 01.08.2020 года по 12.10.2020 года (включительно). 

Истец и ответчик надлежащим образом извещены о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, ответчик представил отзыв на иск.

В соответствии со статьями 227-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в порядке упрощенного производства по имеющимся в деле доказательствам.

Решение в виде резолютивной части вынесено 06.12.2020.

В связи с поступлением апелляционной жалобы изготовлено решение в полном объеме.

Изучив материалы дела, суд  установил следующее. 

Истец в исковом заявлении указывает, что между ООО «СК «Сонар» (Подрядчик) и ООО «Партнер Отделка» (Заказчик) были заключены договоры на выполнение работ на объекте ЖК «Дом на Блюхера», а именно:

Договор подряда №Б/6-01/03/2020 от 01.03.2020, предметом которого являлось выполнение отделочных работ МОП (в т.ч, при необходимости работы по монтажу деревянных дверей, укомплектованных необходимой для их эксплуатации фурнитурой, по устройству перегородок из ГКЛ) по адресу: Санкт-Петербург, МО Пискаревка, Кушелевская дорога, дом 6, корпус 1, строение 1 (Договор подряда № БК-01/03/2020 от 0.03.2020).

Договор подряда №Б/6-05/06/2019 от 05.06.2019, предметом которого являлось выполнение отделочных работ МОП (в т.ч. при необходимости работы по монтажу деревянных дверей, укомплектованных необходимой для их эксплуатации фурнитурой, по устройству перегородок из ГКЛ) по адресу: Санкт-Петербург, МО Пискаревка, Кушелевская дорога, дом 4, корпус З (Договор подряда № Б/6-05/06/2019 от 05.06.2019).

Договор подряда № Б/КВ/6-05/06/2019 от 05.06.2019 года, предметом которого являлось выполнение работ по отделке квартир класса «Комфорт» на объекте ЖК «Дом на Блюхера», секция 6 по адресу: Санкт-Петербург, МО Пискаревка, Кушелевская дорога, дом 4, корпус 3.

ООО «СК «Сонар» принятые на себя обязательства по вышеозначенным договорам подряда выполнило, что подтверждается подписанными обеими сторонами документами: справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-З), актами о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Общая стоимость выполненных ООО «СК «Сонар» на объекте ЖК «Дом на Блюхера» работ составляет 55 193 109,43 руб.

В свою очередь, ООО «Партнер Отделка» свои обязательства перед ООО «СК «Сонар» исполнило не в полном объеме, произведя расчеты (в том числе посредством зачета встречных обязательств) на общую сумму 44 982 026,1 1 руб.

Задолженность ООО «Партнер Отделка» перед ООО «СК «Сонар» по оплате выполненных работ на объекте ЖК «Дом на Блюхера» составляет 10 211 08332 руб.

Указанная задолженность не погашена.

Кроме того, нарушение сроков оплаты за выполненные работы является основанием для предъявления Подрядчиком имущественных претензий с учетом положений заключенного сторонами Договора и требований действующего законодательства Российской Федерации.

Порядок осуществления расчетов за выполненные работы был определен сторонами при заключении вышеозначенных договоров.

1) Договор подряда N2 Б/6-01/0З/2020 от 01.03.2020 года предусматривает (пункт 4.6.1. договора) обязанность Заказчика произвести расчеты с Подрядчиком в срок, не превышающий 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания документов по фактически выполненным работам (справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта о приемке выполненных работ (форма КС2), за исключением выплаты гарантийного удержания (в сумме 594 от стоимости выполненных работ), которое подлежит уплате в более поздние сроки.

При этом, пунктом 8.4. Договора установлена ответственность за нарушение Заказчиком сроков оплаты выполненных работ в размере 0,1% от просроченной суммы. Основанием для начисления и взыскания штрафа является предъявление письменной претензии со стороны Подрядчика.

2). Договор подряда № Б/6-05/06/2019 от 05.06.2019 года также предусматривает пункт 4.6.1 договора) обязанность Заказчика произвести расчеты с Подрядчиком в срок, не превышающий 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания документов по фактически выполненным работам

(справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), за исключением выплаты гарантийного удержания (в сумме 594 от стоимости выполненных работ), которое подлежит уплате в более поздние сроки.

Ответственность за нарушение Заказчиком сроков оплаты выполненных работ установлена пунктом 8.4. Договора, в размере 0,1% от просроченной суммы, Основанием для начисления и взыскания штрафа является предъявление письменной претензии со стороны Подрядчика.

З). Договором подряда № БЖВ/6-05/06/2019 от 05.06.2019 года предусмотрены аналогичные правила осуществления расчетов за выполненные работы и начисления штрафной неустойки за нарушение Заказчиком сроков осуществления расчетов за выполненные работы.

Сумму в размере 90% от сумм, указанных в ежемесячных справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Заказчик оплачивает в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания уполномоченными на представителями Сторон ежемесячных справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) (пункт 4.6.1. Договора).

Сумму в размере 4 % (четыре процента) от сумм, указанных в ежемесячных отчетах о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Заказчик оплачивает не позднее, чем через 8 (восемь) месяцев с момента передачи квартир собственникам (пункт 4.6.2. Договора).

Сумму в размере 6 % (шесть процентов) от сумм, указанных в ежемесячных отчетах о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Заказчик оплачивает не позднее 2-х (двух) календарных лет с момента передачи квартир собственникам, при условии надлежащего исполнения Субподрядчиком своих гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 5 Договора (пункт 4.63. Договора).

Общая стоимость фактически выполненных работ в рамках исполнения обязательств по Договорам подряда по состоянию на 31.08.2020 составляет 55 193 109,43 руб.

При этом, сумма фактически оплаченных (с учетом произведенных сторонами зачетов встречных однородных требований) по состоянию на 31.08.2020 составила 44 982 026,11 руб.

Сумма денежных, резервируемых в рамках гарантийных обязательств, составляет 5 133 004,94 руб.

Таким образом, сумма неисполненных Заказчиком перед Подрядчиком обязательств, срок исполнения которых наступил по состоянию на 31.08.2020, составляет  4 928 078,38 руб.

Кроме того, нарушение сроков оплаты за выполненные работы является основанием для предъявления Подрядчиком имущественных претензий с учетом положений заключенного сторонами Договора и требований действующего законодательства Российской Федерации.

Пунктами 8.4 каждого из вышеозначенных договоров предусмотрено право Подрядчика начислить и взыскать с Заказчика за нарушение сроков осуществления расчетов за выполненные работы неустойку из расчета 0,1% от просроченной суммы за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств.

Сумма неустойки, начисленной по каждому из указанных выше Договоров подряда, в совокупности за период с 01.08.2020 по 12.10.2020 составляет 359 749,72 руб.

ООО «СК «Сонар» была направлена в адрес ООО «Партнер Отделка» (ответчика) претензия, в которой Истец предлагал урегулировать сложившуюся ситуацию в досудебном порядке, погасив имеющуюся задолженность.

Каких-либо действий, направленных на урегулирование сложившейся ситуации (погашение задолженности) ООО «Партнер Отделка» предпринято не было, задолженность не погашена.

О каких-либо разногласиях Ответчиком не заявлено, ответа на претензию, содержащего контррасчет по указанным Истцом обязательствами, не направлено.

ООО «Партнер Отделка» не согласно с заявленными исковыми требованиями по следующим основаниям.

Работы, выполненные Истцом, частично не приняты Ответчиком, а частично приняты с замечаниями.

Согласно п. 1 ст. 721 ГК РФ, качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

В соответствии с п. 1 ст. 723 ГК РФ в случаях выполнения подрядчиком работ с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда.

Сумма исковых требований составила  5 287 828,10 руб. Ответчик не может признать указанную задолженность в связи с тем, что им не были приняты работы, выполненные Истцом, в том объеме, который указан в исковом заявлении.

К исковому заявлению приложены копии актов выполненных работ, а также копия акта сверки взаимных расчетов. По мнению Истца, указанные копии документов подтверждают обязанность Ответчика оплатить задолженность по договору подряда. При этом, оригиналы части актов выполненных работ, а также оригинал Акта сверки взаимных расчетов, отсутствуют в бухгалтерии Ответчика.

По мнению Ответчика, представленные Истцом документы сфальсифицированы.

Суд пришел к следующим выводам.

Ответчик представил отзыв на иск, в котором указал, что между ним и истцом имеется спор о качестве выполненных истцом работ.

Данный довод не может быть признан обоснованным, поскольку каких-либо доказательств: актов о выявлении дефектов, направленных истцу претензий, заключений специалистов/экспертов, – ответчик не представил. Напротив, в деле имеется гарантийное письмо от 01.06.2020, подписанное генеральным директором, в котором ответчик обязуется погасить всю задолженность четырьмя платежами в срок до 28.08.2020.

При таких обстоятельствах иск подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Ходатайство ответчика о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства оставить без удовлетворения.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР ОТДЕЛКА" (ОГРН 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК "СОНАР"  (ОГРН: 

<

***>) денежные средства (задолженность за выполненные работы) в размере 4 928 078,38 руб., неустойку, начисленную за период с 01.08.2020 года по 12.10.2020 года (включительно) в размере 359 749,72 руб., а также 49 439 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со дня принятия.

 

Судья                                                                            Виноградова Л.В.