Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-87999/2021

28 декабря 2021 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  08 декабря 2021 года.

Полный текст решения изготовлен  28 декабря 2021 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коросташова А.А.

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (адрес:  Россия 194044, Санкт-Петербург, НЕЙШЛОТСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 8, ОГРН: 

<

***>);

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МК-20СХ (адрес:  Россия 192012, Санкт-Петербург, ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПРОСПЕКТ, 112, 2 ЛИТЕР З, ОГРН: 

<

***>);

о взыскании,

при участии: 

- от истца: ФИО2 по доверенности от 17.12.2020,

- от ответчика: не явился, извещен,

установил:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "ДИРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «МК-20СХ» о понуждении к исполнению гарантийных обязательств.

В порядке ст. ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд рассматривает дело в отсутствие ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания.

Арбитражный суд, признав дело подготовленным к судебному разбирательству, завершил предварительное судебное заседание и продолжил рассмотрение дела в судебном заседании.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал в полном объёме. 

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителя истца, суд установил следующее. 

Между СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» (Дирекция, Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «МК-20СХ» (далее – ООО «МК-20СХ»», Подрядчик) заключен государственный контракт Санкт-Петербурга от 30.06.2015 № С-73 (далее – Контракт) на выполнение работ по объекту «Реконструкция трамвайных путей на Сердобольской ул. (с узлом № 106 у трамвайного парка № 5 и узлом № 108 у Студенческой ул.)» для нужд Санкт-Петербурга (далее – Объект).

В соответствии с п. 1.1 Контракта Подрядчик принял на себя обязательство собственными и привлеченными силами и средствами выполнить работы по Объекту, в соответствии с передаваемой Заказчиком утвержденной проектной документацией,  календарным планом выполнения работ по Объекту  и сведениями о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках объекта закупки, и сдать Объект Заказчику по акту приемочной комиссии в установленный Контрактом срок согласно условиям Контракта.

Пункт 5.2.15 Контракта устанавливает обязанность ООО «МК-20СХ» за свой счет и в кратчайшие сроки, определяемые Заказчиком и/или эксплуатирующей организацией, подведомственной Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга, Комитету по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга, Комитету по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга отвечающей и обеспечивающей качественную эксплуатацию объекта, устранять все дефекты объекта реконструкции, обнаруженные в течение действия Контракта и в течение гарантийного срока эксплуатации, установленного на:

- дорожное покрытие – 5 лет;

- трамвайные пути – 5 лет.

Сроки гарантийных обязательств вышеперечисленных конструкций по Объекту (участку/части Объекта) отсчитываются от даты утверждения акта приемочной комиссии (форма № КС-14).

В соответствии с п. 5.2.16 Контракта наличие дефектов по пункту 5.2.15 может быть обнаружено Заказчиком или эксплуатирующей организацией. В течение 2-х рабочих дней со дня письменного уведомления об обнаружении дефекта Подрядчик по согласованию с Заказчиком и/или эксплуатирующей организацией должен направить своего представителя для участия в составлении акта обнаружения дефектов. В течение разумного срока, указанного в акте Подрядчик должен устранить дефекты

В случае неприбытия представителя Подрядчика Заказчик/эксплуатирующая организация составляет односторонний акт, обязательный для Подрядчика.

В адрес Дирекции через портал «Наш Санкт-Петербург» поступило обращение о наличии дефекта асфальтобетонного покрытия проезжей части на Сердобольской ул., вследствие чего в адрес Подрядчика было направлено письмо от 06.05.2021 № 09-3782/21-0-0 с предложением направить полномочных представителей организации для проведения 10.06.2021 на Объекте комиссионного осмотра. 

В ходе комиссионного осмотра Объекта, состоявшегося 10.06.2021, без участия представителя Подрядчика выявлены дефекты асфальтобетонного покрытия,о чем составлен акт комиссионного осмотра Объекта от 10.06.2021 (далее – Акт), с указанием следующих дефектов: 

1. выбоина на асфальтобетонном покрытии проезжей части Сердобольской ул. в крайней левой полосе движения по направлению в сторону наб. Черной речки у дома № 11 по Сердобольской ул.

2. разрушение (выбоина, трещины, выкрашивание) асфальтобетонного покрытия проезжей части Сердобольской ул. вдоль трамвайных рельс на пересечении со Студенческой ул. и у дома № 22 по Студенческой ул.

Выявленные и зафиксированные в Акте дефекты Подрядчику предписано устранить в срок до 30.07.2021.

Приемка законченного строительством Объекта происходила 28.02.2017, о чем составлены соответствующие акты по форме № КС-14.

Дефекты, зафиксированные в Акте, обнаружены в пределах гарантийного срока эксплуатации. 

Письмом от 29.06.2021 № 09-5266/21-0-0 Дирекцией в адрес ООО «МК-20СХ» направлено уведомление о необходимости устранить выявленные на комиссионном осмотре дефекты в рамках исполнения гарантийных обязательств по Контракту.

По состоянию на 03.08.2021 выявленные в ходе комиссионного обследования дефекты не устранены, в связи с чем Дирекцией в адрес Подрядчика направлена претензия от 03.08.2021 № 09-6281/21-0-0 с повторным требованием в срок до 30.08.2021 исполнить гарантийные обязательства по устранению выявленных дефектов.

Согласно пункту 1 статьи 308.3, статье 396 Гражданского кодекса РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. 

С момента признания должника банкротом и открытия в отношении его конкурсного производства требования кредиторов по неденежным обязательствам имущественного характера трансформируются в денежные (абзац седьмой п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве, абзац второй п. 34 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2012 г. N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве"). 

Учитывая то факт, что ответчик находится в стадии конкурсного производства (решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.12.2018 по делу № А56-28370/2018) иск понуждении к исполнению обязательства в натуре не может быть удовлетворен. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Коросташов А.А.