12_36237544 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) 

Именем Российской Федерации

Дело № А40-31122/23-12-267

г. Москва

06 июля 2023 года

Арбитражный суд в составе:  

Председательствующего судьи Чадова А.С. протокол судебного заседания составлен секретарем ФИО1 

рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению:  АО «МКЖД» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к ответчику: ООО «СвязьИнжСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 3-е лицо: временный управляющий ООО «СвязьИнжСтрой» ФИО2 

о взыскании затрат в размере 2.135.816,34 рублей, неустойки в размере 1.322.431,55  рублей, штрафных санкций в размере 11.209.367.520 рублей, штрафа в размере  3.800.000 рублей, штрафных санкций в размере 17.964.798,17 рублей, суммы  возмещения оплаты административных штрафов в размере 735.000 рублей,  неотработанного аванса в размере 325.438.269,59 рублей, процентов за пользование  чужими денежными средствами в размере 2.006.126,32 рублей,  

в заседании приняли участие: согласно протоколу. 

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СвязьИнжСтрой»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Акционерного общества  «Московская кольцевая железная дорога» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  суммы компенсацию затрат, понесенных по договору об обеспечении технического  контроля и надзора за производством работ в размере 2.135.816 (два миллиона сто  тридцать пять тысяч восемьсот шестнадцать) руб. 34 коп., неустойку в связи с  несвоевременным перечислением компенсации затрат, понесенных по договору об  обеспечении технического контроля и надзора за производством работ в размере  1.322.431 (один миллион триста двадцать две тысячи четыреста тридцать один) руб. 55  коп., сумму штрафных санкций за нарушение сроков завершения этапов работ в  размере 50.000.000 (пятьдесят миллионов) руб., штраф за невыполнение/не устранение  замечаний в размере 3.800.000 (три миллиона восемьсот тысяч) руб., сумму штрафных  санкций за непредоставление обеспечения исполнения Договора в размере 17.964.798  

(семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот девяносто  восемь) руб. 17 коп., сумму возмещения оплаты административных штрафов в размере  735.000 (семьсот тридцать пять тысяч) руб., сумму неотработанного аванса в размере  325.438.269 (триста двадцать пять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч двести  шестьдесят девять) руб. 59 коп., сумму процентов за пользование чужими денежными  средствами в размере 2.006.126 (два миллиона шесть тысяч сто двадцать шесть) руб. 32  коп. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 200.000 (двести тысяч)  руб.  

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в  течении одного месяца со даты его принятия.  

Судья: А.С.Чадов