АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А63-9283/2020

г. Ставрополь

16 ноября 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 09 ноября 2020 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Волошиной Л.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

государственного бюджетного учреждения  Ставропольского края «Стававтодор», г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Домострой», г. Пятигорск,                         ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 

о взыскании 1 805 167 руб. 20 коп.  задолженности, 151 739 руб. 35 коп. неустойки (уточненные требования), 

при участии в судебном заседании представителя истца ФИО2 по доверенности от 05.09.2020 № 5, в отсутствие представителя ответчика, надлежащим образом извещенного,

УСТАНОВИЛ:

государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Стававтодор» обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Домострой», о взыскании задолженности по договору субподряда от 25 июня 2019 года № 37/04 на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское, км 104+000 – км 109+170 для обеспечения нужд Ставропольского края (уточнение от 23.09.2020),

В судебном заседании истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) уточнил исковые требования в части взыскания размера неустойки и просил взыскать с ответчика 151 889, руб. 78 коп.

Уточнение исковых требований принято судом к рассмотрению.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, выслушав доводы представителей истца и ответчика, суд установил следующие обстоятельства, касающиеся существа спора.

Из материалов дела установлено, что между ООО «Домострой» (далее – Генподрядчик) и Государственным унитарным предприятием Ставропольского края «Дорожно-эксплуатационно-строительное управление № 2» им. В.И. Демидова (далее – Субподрядчик, Предприятие) заключен договор субподряда от 25 июня 2019 года № 37/04 на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское, км 104+000 – км 109+170 для обеспечения нужд Ставропольского края. 

      На основании распоряжения Правительства Ставропольского края от 06.09.2019 №378-РП ГУП СК «Дорожно-эксплуатационно-строительное управление №2»                   им. В.И. Демидова прекратило деятельность путем реорганизации в форме слияния. 

Частью 1 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) при слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу.

Правопреемником стороны является ГБУ СК «Стававтодор» Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края.

По условиям договора Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское, км 104+000 – км 109+170 для обеспечения нужд Ставропольского края в соответствии с локальной сметой по устройству основания ресайклером с укреплением цементом и полимерными добавками после предварительного фрезерования и выравнивания профиля проектной документацией (далее-проект), а Генподрядчик принимает на себя обязательства обеспечить приёмку выполненных работ и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора. 

В соответствии с 3.1. Цена Договора составляет  1 805 167 руб. 20 коп. и включает в себя стоимость работ, материалов, компенсацию издержек Субподрядчика, уплату им налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 18 %.

Оплата выполненных Субподрядчиком работ производится в безналичной форме в течение 30 дней с даты подписания Подрядчиком актов о приёмке выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), предъявления счета и счета-фактуры (при наличии) путем перечисления денежных средств со счёта Генподрядчика на расчетный счет Субподрядчика.

Фактический объем выполненных Субподрядчиком работ по договору выполнен и принят подрядчиком 16.07.2019 года, о чем свидетельствуют подписанный сторонами  акт о приемке выполненных работ (КС-2) на сумму 1 805 167 руб. 20 коп., а также справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Главой 9 договора предусмотрена ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Так, согласно п.9.8.договора в случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения генподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генподрядчиком  обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (п.9.8).  

Претензия истца от   14.05.2020 года № 385  с требованием о погашении образовавшейся задолженности по договору до 14.05.2020 на сумму  1 805 167руб. 20 коп. ответчиком не удовлетворена.

Указанное обстоятельство послужило основанием для обращения предприятия с настоящим иском.

На момент разрешения настоящего спора оплата ответчиком не произведена.

Оценивая законность и обоснованность заявленных требований, суд руководствуется следующим.

При рассмотрении данного дела судом установлено, что при заключении между истцом и ответчиком договора №37/04 от 25.06.2019 возникли правоотношения, регулируемые главой 37  ГК РФ.

В соответствии со статьёй 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Статьей 709 ГК РФ установлено, что в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. Стоимость работ определена сторонами в договоре подряда №37/04 от 25.06.2019 в сумме 1 805 167 руб. 20 коп.

Как установлено договором, субподрядчик выполнил работы собственными силами и средствами в полном объеме, что подтверждается подписанным сторонами  актом о приемке выполненных работ (КС-2) на сумму 1 805 167 руб. 20 коп. и справкой об их  стоимости (КС-3).

По смыслу пункта 1 статьи 711 и пункта 1 статьи 746 ГК РФ по договору строи-тельного подряда оплате подлежит фактически выполненный (переданный заказчику)                результат работ (пункт 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда").

В соответствии с пунктом 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В силу правил статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

В соответствии с правилами статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ответчиком не представлено доказательств оплаты работ, выполненных истцом, задолженность в размере 1 805 167 руб. 20 коп. подлежит взысканию с общества.

На основании пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, подлежащая уплате должником кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Работы приняты заказчиком 16.07.2019, срок оплаты согласно пункту 3.3 договора истек 19.08.2019.

За просрочку исполнения денежного обязательства истцом начислена пеня за период с 20.08.2019 по 06.11.2020 в размере 151 739 руб. 35 коп.

При расчете пени истец исходит из того, что согласно пункту 9.8 договора в случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения генподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего  после истечения установленного Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Судом расчет пени проверен и признан правильным, период просрочки определен обществом верно, ставка рефинансирования применена в размере, соответствующем условиям договора на дату принятия решения по делу, арифметически расчет верен.

Таким образом, требования истца подлежат удовлетворению в уточненном размере, с ответчика подлежит взысканию 1 805 167 руб. 20 коп. задолженности по договору субподряда от 25.06.2019 № 37/04, 151 739 руб. 35 коп. неустойки, начисленной за просрочку исполнения денежного обязательства с 20.08.2019 по 06.11.2020.

Государственная пошлина в соответствии с правилами ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 49, 167, 168, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ставропольского края

РЕШИЛ:

уточненные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Домострой», г. Пятигорск, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, в пользу государственного бюджетного учреждения  Ставропольского края «Стававтодор», г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 1 805 167 руб. 20 коп. задолженности по договору субподряда от 25.06.2019 № 37/04, 151 739 руб. 35 коп. неустойки, начисленной за просрочку исполнения денежного обязательства с 20.08.2019 по 06.11.2020.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Домострой», г. Пятигорск, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, в доход федерального бюджета 32 569 руб. государственной пошлины.

Исполнительный лист на взыскание пошлины выдать после вступления решения в законную силу, на взыскание задолженности и неустойки -  после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя. 

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

СудьяЛ.Н. Волошина