АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

660049, 

<

...>, https://krasnoyarsk.arbitr.ru/

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Именем Российской Федерации

15 января 2026 года

Дело № А33-32505/2025

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

в удовлетворении ходатайств публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о переходе к рассмотрению настоящего дела по общим правилам искового производства, увеличении срока выполнения мероприятий до 6-ти месяцев и снижении размера договорной и судебной неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации - отказать.

Исковые требования удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.11866.24 от 23.10.2024 для электроснабжения объекта общества с ограниченной ответственностью «Атланта Красноярск» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) - «Нежилая застройка (хозяйственная постройка, нежилое здание)», расположенного по адресу: 

<

...>.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Атланта Красноярск» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку за неисполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.11866.24 от 23.10.2024 в сумме 33 356 руб. за период с 24.04.2025 по 27.10.2025 (71 734,21 руб. * 0,25% * 186 дня), а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 60 000 руб. и 150 руб. судебной неустойки за каждый день просрочки, начиная с 31-го дня после вступления решения суда в законную силу, по день его фактического исполнения.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.

Судья

О.И. Медведева