19/2019-87269(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А70-11230/2019

г. Тюмень

15 августа 2019 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Марковой Н.Л., при ведении протокола судебного  заседания помощником судьи Трилем С.А., рассмотрев в судебном заседании дело  

по иску 

Департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени (далее - Департамент)  к ООО «Капиталстройинвест» (далее - Общество)  

третье лицо – Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области (далее  – Комитет)  

о расторжении договора об обязании передать имущество о взыскании неустойки 

по встречному иску ООО «Капиталстройинвест» к Департаменту имущественных отношений Администрации города Тюмени 

третье лицо – Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области  об обязании заключить дополнительное соглашение к договору  

при участии: от Департамента: ФИО1, доверенность от 29.12.2018 № 180 от Общества: ФИО2, доверенность от 30.07.2019 № б/н от Комитета: ФИО3, доверенность от 25.01.2019 № б/н 

Руководствуясь ст.ст.110, 167-170, 176, 181 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Первоначальный иск оставить без удовлетворения. Встречный иск удовлетворить. 

Обязать Департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени заключить с ООО  «Капиталстройинвест» дополнительное соглашение к договору купли-продажи муниципального имущества на конкурс  от 06.10.2017 № 660, заключенному в отношении объекта культурного наследия регионального значения «Флигель жилой  из состава усадьбы Б-вых» с земельным участком, расположенного по адресу: 

<

...>, в  следующей редакции:  

«1. Изложить таблицу, приведенную в п.5.1.1 договора купли-продажи муниципального имущества на конкурс  от 06.10.2017 № 660 следующим образом:  

 № п/п  

Наименование научно-исследовательских, изыскательных,  

проектных, производственных работ  

Сроки выполнения 

Примечания  

1 

Комплексные научные исследования, проект реставрации, рабочую  проектную документацию  

2017-2018гг.  

2 

Выполнить реставрационные работы на основе разработанной  проектной документации  

2018-2019гг.  

2. Изложить п.5.1.3 договора купли-продажи муниципального имущества на конкурс от 06.10.2017 № 660 в  

следующей редакции: 

Промежуточные и окончательные сроки выполнения условий конкурса установлены в соответствии с актом  

технического состояния объекта культурного наследия от 17.10.2016 и составляют: 

Промежуточные: в соответствии с п.5.1.1 настоящего договора; Окончательный – по 31.12.2019г.». Выдать исполнительный лист в установленном порядке. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Восьмой арбитражный  

апелляционный суд. 

 Судья Маркова Н.Л.  

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департаментаДата 17.05.2019 7:57:29

 Кому выдана Маркова Наталья Леонидовна