АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (р е з о л ю т и в н а я ч а с т ь)

Дело № А13-5402/2024

город Вологда

30 января 2025 года

 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области  

р е ш и л :

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Домашний Уют» (ОГРН 

<

***>) удовлетворить в полном объеме.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью Специализированного застройщика «Домстрой» (ОГРН 

<

***>) в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу устранить следующие недостатки:  

- в первом подъезде многоквартирного дома № 63А по ул. Белинского в г. Череповце: восстановить штукатурный слой на 1 этаже около лифта; устранить растрескивание штукатурного слоя между плитами (русты) около квартир №№ 3, 4, 7, 8, 9, 10; устранить сколы на двух ступенях;  

- во втором подъезде многоквартирного дома № 63А по ул. Белинского в г. Череповце: восстановить штукатурный слой между плитами (русты) около квартир №№ 13 – 15, 28 – 30; устранить протечки в подъезде на стенах и потолке; устранить при входе в подъезд выпирание напольной плитки возле дверей входной группы; восстановить настенный плинтус из плитки; восстановить порог, выполненный из ЦПС, дверные откосы; устранить пустоты под напольными плитками около лифта;  

- в третьем подъезде многоквартирного дома № 63А по ул. Белинского в г. Череповце: устранить протечные пятна с кровли около квартиры № 50; устранить на 1 этаже по периметру окна трещины, на потолке протечные пятна;  

- в четвертом подъезде многоквартирного дома № 63А по ул. Белинского в г. Череповце: восстановить на 1 этаже на потолке отслоение штукатурного слоя; устранить между 5 и 4 этажами трещину в стыке у подоконника и откоса; устранить между 4 и 3 этажами пустоты под напольными плитками;  

восстановить на 3 этаже штукатурный слой между плитами (русты); устранить на потолке протечные пятна около квартиры 63 (6 этаж).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированного застройщика «Домстрой» (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Домашний Уют» (ОГРН 

<

***>) по истечении тридцатидневного срока со дня вступления в законную силу решения суда судебную неустойку в размере 1000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта до дня фактического исполнения решения суда.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированного застройщика «Домстрой» (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Домашний Уют» (ОГРН 

<

***>) 6000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента его принятия в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.  

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи (часть 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Судья Л.А. Соколова