АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-4442/2024  

от 11 марта 2025 года 

Руководствуясь статьями 106, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области  

РЕШИЛ:

Урегулировать разногласия, возникшие между обществом с ограниченной ответственностью "Автодороги" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) и публичным акционерным обществом "Россети Северо-Запад" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) при заключении дополнительного соглашения № 1 к соглашению о компенсации № ОЗУ-00057А/21 от 21.03.2022, изложив дополнительное соглашение № 1 в следующей редакции:  

Дополнительное соглашение № 1 к соглашению о компенсации № ОЗУ-00057А/21 от 21.03.2022. 

г. Архангельск  

Общество с ограниченной ответственностью «Автодороги» (ООО «Автодороги»), именуемое в дальнейшем «Заявитель», с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), именуемое в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Дополнительное соглашение № 1) к соглашению о компенсации № ОЗУ-00057А/21 от 21.03.2022 переустройства объектов электросетевого хозяйства, попадающих в зону производства работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск. Подъезд к международному аэропорту «Архангельск» (Талаги) на участке км 5+150 - км 14+500, Архангельская область», (далее — Соглашение) о нижеследующем:  

1. Стороны договорились внести следующие изменения в Соглашение: 

1.1. Пункт 3.1. Соглашения изложить в следующей редакции:  

«3.1. В целях осуществления предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий по переустройству Объекта Собственника, Собственник:  

3.1.1. В течение 24 (двадцати четырех) месяцев проводит комплекс проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации (в том числе, при необходимости, получение положительного заключения государственной экспертизы) по переустройству Объекта Собственника, с даты получения денежных средств в  

соответствии с пунктом 3.3.1 настоящего Соглашения.  

3.1.2. Проводит комплекс мероприятий по переустройству Объекта Собственника (строительно-монтажных, пуско-наладочных работ) в сроки, установленные дополнительным соглашением № 1, заключенным в соответствии с абзацем 2 пункта 3.2 настоящего Соглашения, с даты получения денежных средств в соответствии с подпунктом 3.3.2 настоящего Соглашения.».  

1.2. Пункт 3.2. Соглашения изложить в следующей редакции:  

«3.2. Размер предварительной денежной компенсации стоимости проводимых Собственником мероприятий по переустройству Объектов Собственника определен на основании предварительного расчета № 1, согласно Приложению № 5 к настоящему Соглашению, и составляет 16 378 450 (Шестнадцать миллионов триста семьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается).  

Размер денежной компенсации, определенный в настоящем пункте, является предварительным и подлежит корректировке по результатам разработки и прохождения государственной экспертизы проектной документации (далее - ПД) путем заключения Сторонами дополнительного соглашения № 1 к настоящему Соглашению.  

1.3. Пункт 3.3. Соглашения изложить в следующей редакции: «3.3. Заявитель:  

3.3.1. В срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Соглашения и предоставления счета на оплату, выставленного Собственником, осуществляет выплату части предварительной денежной компенсации Собственнику Объекта, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Собственника, в размере 16 804 289 (Шестнадцать миллионов восемьсот четыре тысячи двести восемьдесят девять) рублей 70 копеек (НДС не облагается).  

3.3.2. В срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения № 1 об утверждении окончательной стоимости денежной компенсации и предоставления счета на оплату, выставленного Собственником, осуществляет доплату Собственнику денежной компенсации на основании окончательного расчета, являющегося неотъемлемой частью дополнительного соглашения № 1, за вычетом ранее произведенного платежа в соответствии с п.3.3.1, настоящего Соглашения. В случае превышения выплаченных денежных средств суммы утвержденной окончательной стоимости переустройства производится возврат разницы Заявителю в течение 10 календарных дней со дня его обращения.».  

1.4. Пункт 4.1.2. Соглашения изложить в следующей редакции: «4.1.2. Выплатить платежи в объеме и в сроки, установленные пунктом 3.3  

настоящего Соглашения.». 

1.5. Пункт 4.1.4. Соглашения изложить в следующей редакции: «4.1.4. Подписать дополнительное соглашение № 1 к настоящему Соглашению,  

предусмотренное п. 3.2. настоящего Соглашения.». 1.6. Дополнить Соглашение пунктом 4.2.5 в следующей редакции: 

«4.2.5. Подписать дополнительное соглашение № 1 к настоящему Соглашению, предусмотренное п. 3.2. настоящего Соглашения.».  

1.7. Пункт 5.2. Соглашения исключить. 1.8. Приложение 4 к Соглашению исключить. 

1.9. Приложение 5 к Соглашению изложить в редакции приложения 1 к настоящему Дополнительному соглашению № 1.  

2. На основании разработанной проектно-сметной документации Стороны пришли к взаимному согласию утвердить размер окончательной денежной компенсации стоимости проводимых Собственником работ по переустройству Объектов Собственника, определенный в Приложении 2 к настоящему Дополнительному соглашению № 1, а именно в размере 45 885 722 (Сорок пять миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч семьсот двадцать два) рублей 73 копейки (НДС не облагается).  

3. Заявитель обязуется в соответствии с условиями пункта 3.3.2. Соглашения и с учетом ранее осуществленной выплаты в размере 16 804 289 (Шестнадцать миллионов восемьсот четыре тысячи двести восемьдесят девять) рублей 70 копеек (НДС не облагается), в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего Дополнительного соглашения № 1 и предоставления счета на оплату, выставленного Собственником, осуществить выплату Собственнику денежной компенсации в размере: 29 081 433 (Двадцать девять миллионов восемьдесят одна тысяча четыреста тридцать три) рубля 03 копейки (НДС не облагается).  

4. В соответствии с п. 3.1.2. и п. 4.2.2. Соглашения Собственник проводит комплекс мероприятий по переустройству Объекта Собственника (строительно- монтажных, пусконаладочных, демонтажных работ) в течение 6 (шести) месяцев с даты получения денежных средств в соответствии с подпунктом 3.3.2 Соглашения в размере, установленном пунктом 3 настоящего Дополнительного соглашения № 1.  

5. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 составлено в двух идентичных экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Соглашения.  

6. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в рамках срока действия Соглашения. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации редакция подпунктов 1.1-1.9 настоящего Дополнительного соглашения № 1 применяется к отношениям Сторон, возникшим с даты заключения Соглашения.  

7. Неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения № 1 являются приложения:  

Приложение 1 - Предварительный расчет стоимости Соглашения о компенсации в денежной форме № 1;  

Приложение 2 - Окончательный расчет стоимости Соглашения о компенсации в денежной форме № 2 (по результатам разработки проектно-сметной документации).  

Заявитель: Собственник: Генеральный директор ООО «Автодороги» 

 ___________________ ____________________________ 

« _ » ________________ 2025 г. « ___ » _______________ 2025 г. м.п. м.п.  

Приложение 1  

к Дополнительному 

соглашению № 1 к Соглашению 

о компенсации № ОЗУ- 00057А/21 от 21.03.2022 г.  

Предварительный расчет стоимости Соглашения о компенсации в денежной форме  

 №  

Наименование затрат 

 № С у1м ма, руб.  

п/п  

1. 

Проектно-изыскательские работы (в т. ч. межевые и кадастровые работы,  

778 310,00  

получение всех необходимых согласований, ТУ, экспертиз и пр.) (без НДС) 

2. 

СМР (в т. ч. оборудование, пуско-наладочные и прочие затраты) (без НДС) 

14 442 800,00  

3. 

Затраты на оформление/переоформление прав на объекты недвижимого 

1 157 340,00  

имущества и земельные участки, а также внесение изменений в описание  

местоположения границ охранных зон объектов ЭСХ (без НДС) 

4. 

ИТОГО затраты (без НДС) 

16 378 450,00  

ИТОГО 

16 378 450,00  

Заявитель: Собственник:  

Генеральный директор ООО «Автодороги» 

 ___________________ ____________________________ « _ » ________________ 2025 г. « ___ » _______________ 2025 г. м.п. м.п.  

1710/2025-25102(1) _ 

Приложение 2 к Дополнительному соглашению № 1 к 

Соглашению о компенсации № ОЗУ-00057А/21 от  

 21.03.2022 г. 

Окончательный расчет стоимости Соглашения о компенсации в денежной форме № 2  

(по результатам разработки проектно-сметной документации)  

 №  

Наименование затрат 

Сумма, руб.  

п/п  

1. 

Проектно-изыскательские работы (в т. ч. межевые и кадастровые работы,  

2 261 610 

получение всех необходимых согласований, ТУ, экспертиз и пр.)  

2. 

СМР (в т. ч. оборудование, пуско-наладочные и прочие затраты)  

42 590 180  

3. 

Затраты на оформление/переоформление прав на объекты недвижимого  

1 033 932,73  

имущества и земельные участки, а также внесение изменений в описание  

местоположения границ охранных зон объектов ЭСХ 

4. 

ИТОГО затраты (без НДС) 

45 885 722,73  

ИТОГО 

45 885 722,73 

Заявитель: Собственник:  

Генеральный директор ООО «Автодороги» 

 ___________________ ____________________________ 

« _ » ________________ 2025 г. « ___ » _______________ 2025 г. м.п. м.п.  

 В удовлетворении остальной части первоначального и встречного иска отказать.  

Взыскать с публичного акционерного общества "Россети Северо-Запад" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Автодороги" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 6000 руб. расходов по государственной пошлине, 250 000 руб. судебных издержек.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.  

Судья М.А. Козлова