Арбитражный суд Московской области

   107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А41-74821/18

14 ноября 2018 года

г. Москва

Резолютивная часть объявлена 06 ноября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 14 ноября 2018 года.

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Ю.А. Фаньян , при ведении протокола судебного заседания помощником судьи В. С. Желонкиным, рассмотрев дело по исковому заявлению АО "МОСОБЛЭНЕРГО" 

к САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "МАЛИНОВКА" 

об обязании и взыскании неустойки,

УСТАНОВИЛ:

АО "Мособлэнерго" обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением об обязании САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "МАЛИНОВКА" в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства по договору № 141921/ЦА от 10.11.2014 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых свыше 150 кВТ и менее 670 кВт (за исключением случаев, указанных в приложениях № 2 и 3, а так же осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту)) по 2 этапу на 356кВт, а именно:

-смонтировать ВРУ объекта в соответствии с максимальной мощностью II этапа (356кВт), уровнем напряжения и заявленной категорией надежности электроснабжения;

-от точки присоединения до ВРУ объекта смонтировать ЛЭП в соответствии с максимальной мощностью II этапа (356кВт), уровнем напряжения и категорией надежности электроснабжения;

-разработать проектную документацию в границах земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным ТУ. Проектом учесть требования приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 23.06.2015 № 380 в части соблюдения максимальных значений коэффициента реактивной мощности.

-в состав проекта включить раздел «Качество электрической энергии», в котором выполнить технические решения, в том числе расчет суммарной установленной мощности искажающих электроприемников, с целью обеспечения в процессе эксплуатации показателей качества электрической энергии согласно ГОСТ 32144-2013; 

-выполнить заземление электроустановок в границах участка Ответчика и защитные меры безопасности с учетом требований главы 1.7 Правил устройства электроустановок;

-для повышения электро- и пожаробезопасности объекта установить на вводе устройство защитного отключения (УЗО) с учетом требований главы 7.1 Правил устройства электроустановок;

-для обеспечения надежной работы электрооборудования, при присоединении от ВЛ, на вводе в помещение предусмотреть защиту от повышенных и импульсных напряжений с учетом требований главы 7.1 Правил устройства электроустановок. Присоединяемые энергопринимающие устройства должны обеспечивать электромагнитную совместимость присоединяемой установки с электрическими сетями согласно ГОСТ 32144-2013.

-в проекте предусмотреть необходимые мероприятия по обеспечению безопасности работы электроустановки и защиты жизни и здоровья людей от опасности поражения электрическим током в соответствии с действующими нормами и правилами;

-учет электрической энергии выполнить в соответствии с требованиями раздела X «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии».

Для учета электрической энергии установить электросчетчик класса точности 1.0 и выше, позволяющий измерять почасовые объемы потребления электрической энергии иобеспечивающий хранение этих данных за последние 90 дней и более или включенный в систему учета.

Рекомендуется установка приборов учета:

-с возможностью вести архивы тарифицированной учтенной активной и реактивной электроэнергии на начало суток с глубиной не менее 30 дней, на начало месяца с глубиной не менее 12 месяцев и от сброса;

-с возможностью хранить профиль мощности с периодом интегрирования 30 мин и глубиной хранения не менее 90 дней;

-с возможностью измерять мгновенные значения параметров сети (I, U, Р, соэф) по каждой фазе;

-с возможностью измерять и фиксировать в журнале событий показатели качества электрической энергии;

-имеющих два независимых равноприоритетных интерфейса связи (RS- 485/CAN/PLC) для удаленного сбора данных и один оптический интерфейс для чтения информации непосредственно с прибора учета при помощи ноутбука или аналогичного устройства.

На момент ввода в эксплуатацию на установленном электросчетчике должна быть пломба поверки с давностью, не превышающей срок, установленный эксплуатационной документацией.

Трансформаторы тока и напряжения для подключения электросчетчика применить класса точности 0,5 и выше. Типы устанавливаемых трансформаторов тока и напряжения должны соответствовать действительным параметрам схемы электроснабжения. Устанавливаемые трансформаторы тока и напряжения должны иметь действующие свидетельства о поверке (оттиски поверительных клейм). В измерительных цепях должна предусматриваться установка испытательной коробки (блока).

- защитить     средства     и     системы     учета     электрической     энергии     от несанкционированного доступа к измерительным цепям и программному обеспечению;

-уведомить АО «Мособлэнерго» о выполнении мероприятий по технологическому присоединению по 2 этапу на 356 кВт в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства СНТ «Малиновка»; 

-принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств;

-подписать Акт об осуществлении технологического присоединения по 2 этапу на 356 кВт., взыскать с СНТ "МАЛИНОВКА" в пользу АО «Мособлэнерго» неустойку в размере 30 131,18 руб.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, с учетом имеющихся в материалах дела доказательств извещения, применяя положения ст. ст. 121, 123 АПК РФ извещен надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.

Судом приняты все меры к надлежащему извещению лиц, участвующих в деле, с направлением по имеющимся в деле адресам судебных извещений. Информация о судебном заседании своевременно размещена судом в картотеке арбитражных дел на сайте http://kad.arbitr.ru в сети Интернет согласно отчету о публикации судебного акта.

Неявка лиц, участвующих в деле, в судебное заседание при надлежащем их извещении не препятствует в силу ч. 3 ст. 284 АПК РФ рассмотрению дела в настоящем судебном заседании.

Представитель истца в судебном заседании заявленные требования поддержал.

Как следует из материалов дела, 10.11.2014   между   Истцом,   акционерным   обществом   «Московская   областная энергосетевая компания» (далее АО «Мособлэнерго»), и Ответчиком, садоводческим некоммерческим товариществом «Малиновка» (далее СНТ «Малиновка») был заключен договор № 141921/ЦА об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых свыше 150кВТ и менее 670кВт (за исключением случаев, указанных в приложениях № 2 и № 3, а так же осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту)) (далее - Договор).

В соответствии с п. п. 1, 6, 8 Договора и приложения к нему, а именно, п. 10, п. 11 Технических условий для присоединения к электрическим сетям АО «Мособлэнерго» № 141921/Р/З/ЦА (далее - ТУ) сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора и выполнить возложенные на него мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с п. 8 Договора, Заявитель обязан:

-надлежащим образом исполнить обязательства по Договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

-после выполнения мероприятий по техническому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий;

- принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией;

- после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации.

В соответствии с п. 11 ТУ Заявитель обязан в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, выполнить мероприятия по технологическому присоединению, а именно:

1.Смонтировать ВРУ объекта в соответствии с максимальной мощностью I и II этапа, уровнем напряжения и заявленной категорией надежности электроснабжения.

2.От точки присоединения до ВРУ объекта смонтировать ЛЭП в соответствии с максимальной мощностью I и II этапа, уровнем напряжения и категорией надежности электроснабжения.

3.Разработать проектную документацию в границах земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным ТУ. Проектом учесть требования Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 23.06.2015 № 380 в части соблюдения максимальных значений коэффициента реактивной мощности.

4.В состав проекта включить раздел «Качество электрической энергии», в котором выполнить технические решения, в том числе расчет суммарной установленной мощности искажающих электроприемников, с целью обеспечения в процессе эксплуатации показателей качества электрической энергии согласно ГОСТ 32144-2013.

5.Заземление электроустановок в границах участка заявителя и защитные меры безопасности должны быть выполнены с учетом требований главы 1.7 Правил устройства электроустановок.

6.Для повышения электро- и пожаробезопасности объекта рекомендуется на вводе установить устройство защитного отключения (УЗО)с учетом требований главы 7.1 Правил устройства электроустановок.

7.Для обеспечения надежной работы электрооборудования, при присоединении от ВЛ, рекомендуется на вводе в помещение предусмотреть защиту от повышенных и импульсных напряжений с учетом требований главы 7.1 Правил устройства электроустановок. Присоединяемые энергопринимающие устройства должны обеспечивать электромагнитную совместимость присоединяемой установки с электрическими сетями согласно ГОСТ 32144-2013.

8.В проекте предусмотреть необходимые мероприятия по обеспечению безопасности работы электроустановки и защиты жизни и здоровья людей от опасности поражения электрическим током в соответствии с действующими нормами и правилами.

9.Учет электрической энергии выполнить в соответствии с требованиями раздела X «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии». Для учета электрической энергии установить электросчетчик класса точности 1.0 и выше, позволяющий измерять почасовые объемы потребления электрической энергии и обеспечивающий хранение этих данных за последние 90 дней и более или включенный в систему учета.

Рекомендуется установка приборов учета:

-с возможностью вести архивы тарифицированной учтенной активной и реактивной электроэнергии на начало суток с глубиной не менее 30 дней, на начало месяца с глубиной не менее 12 месяцев и от сброса;

-с возможностью хранить профиль мощности с периодом интегрирования 30 мин и глубиной хранения не менее 90 дней;

-с возможностью измерять мгновенные значения параметров сети (I, U, Р, соэф) по каждой фазе;

-с возможностью измерять и фиксировать в журнале событий показатели качества электрической энергии;

-имеющих два независимых равноприоритетных интерфейса связи (RS-485/CAN/PLC) для удаленного сбора данных и один оптический интерфейс для чтения информации непосредственно с прибора учета при помощи ноутбука или аналогичного устройства.

На момент ввода в эксплуатацию на установленном электросчетчике должна быть пломба поверки с давностью, не превышающей срок, установленный эксплуатационной документацией.

Трансформаторы тока и напряжения для подключения электросчетчика применить класса точности 0,5 и выше. Типы устанавливаемых трансформаторов тока и напряжения должны соответствовать действительным параметрам схемы электроснабжения. Устанавливаемые трансформаторы тока и напряжения должны иметь действующие свидетельства о поверке (оттиски поверительных клейм). В измерительных цепях должна предусматриваться установка испытательной коробки (блока).

 10. Средства и системы учета электрической энергии должны быть защищены от несанкционированного доступа к измерительным цепям и программному обеспечению.

Согласно п. 4 ТУ выполнение мероприятий осуществляется в два этапа: 1 этап - технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 150 кВт, 2 этап - технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 356 кВт.

Для выполнения своих обязательств по договору Истец заключил договор подряда   на   выполнение   строительно-монтажных   и   пусконаладочных   работ   от 11.10.2017№ 303/17-ДКС с ООО «Энергоперспектива», оплатив стоимость работ по данному договору, что подтверждается актами о приемке выполненных работ от 31.10.2017, оформленными в соответствии с унифицированной формой № КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100, и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 31.10.2017, оформленной в соответствии с унифицированной формой № КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100. Таким образом, Истец выполнил мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные п. 10 ТУ.

После направления претензии от 07.05.2018 № 646 Ответчиком направлено уведомление о выполнении технических условий и подписан Акт о технологическом присоединении на 150 кВт (первый этап). 

Однако мероприятия, предусмотренные техническими условиями, в целях технологического присоединения по 2 этапу на 356 кВт со стороны Ответчика не выполнены, в связи с чем, завершить процедуру технологического присоединения и подписать акт об осуществлении технологического присоединения по второму этапу на 356 кВт не представляется возможным.

Истцом  в адрес Ответчика была второй раз 10.07.2018 направлена претензия от 09.07.2018 № 1048/18 с требованием о выполнении мероприятий, предусмотренных п. 8 Договора, а так же п. 11 ТУ в целях технологического присоединения по 2 этапу на 356 кВт и оплате неустойки за нарушение сроков выполнения обязательств по договору. Данная претензия была получена Ответчиком 26.07.2018 и оставлена им без внимания.

Полагая, что невыполнение СНТ «МАЛИНОВКА» мероприятий, предусмотренными техническими условиями является незаконным, истец обратился  суд с настоящим исковым заявлением об обязании не чинить препятствия по присоединению к электрическим сетям ответчика.

Суд исследовал материалы дела, изучил представленные документы, заслушал представителей истца, считает требования подлежащими 

В свою очередь обязательства по технологическому присоединению, в том числе по строительству объектов электросетевого хозяйства, выполняются за счет платы за технологическое присоединение, оплачиваемой Заявителем.

Процедура технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям регламентируется следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила технологического присоединения);

- Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 (далее - Основы ценообразования);

- Методическимиуказаниямипо определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 23.10.2007 № 277-э/7;

- Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.

Сетевыми являются организации, владеющие на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям.

Процедура технологического присоединения выполняется при присоединении впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых увеличивается, а также в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

Технологическое присоединение осуществляется на возмездной основе на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом.

Технологическое присоединение представляет собой комплексную процедуру, этапами которой являются:

1) подача заявки на технологическое присоединение;

2) заключение договора на технологическое присоединение;

3) выполнениесторонамидоговорамероприятий,предусмотренных договором;

4) получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя;

5) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям;

6) фактический прием (подача) напряжения и мощности (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»);

7) составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил технологического присоединения.

По окончании процедуры технологического присоединения и исполнению мероприятий по технологическому присоединению сетевая организация и потребитель (заявитель) составляют и подписывают:

- акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей;

- акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон;

- акт об осуществлении технологического присоединения. Данный перечень документации является исчерпывающим.

Согласно ст. ст. 23 - 23.2 ФЗ от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон) плата за технологическое присоединение к электрическим сетям подлежит государственному регулированию. Размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. Размер платы за технологическое присоединение определяется исходя из расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения, включая строительство, реконструкцию объектов электросетевого хозяйства и т.д.

Согласно положениям ФЗ "Об электроэнергетике" от 26.03.2003 N 35-ФЗ, Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила), заключение такого вида Договора является обязательным для Сетевой организации и уклонение либо отказ от его исполнения Сетевой организацией не допускается.

Судом установлено, что 10.11.2014   между   Истцом,   акционерным   обществом   «Московская   областная энергосетевая компания», и Ответчиком, садоводческим некоммерческим товариществом «Малиновка» был заключен договор № 141921/ЦА об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых свыше 150кВТ и менее 670кВт (за исключением случаев, указанных в приложениях №2 и 3, а так же осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту)) (далее - Договор).

В соответствии с п. 1, 6, 8 Договора и приложения к нему, а именно, п.10, п.11 Технических условий для присоединения к электрическим сетям АО «Мособлэнерго» № 141921/Р/З/ЦА (далее - ТУ) сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора и выполнить возложенные на него мероприятия по технологическому присоединению.

Судом также установлено, что мероприятия, предусмотренные техническими условиями, в целях технологического присоединения по 2 этапу на 356 кВт со стороны Ответчика не выполнены, в связи с чем, завершить процедуру технологического присоединения и подписать акт об осуществлении технологического присоединения по второму этапу на 356 кВт не представляется возможным.

При указанных обстоятельствах, учитывая установленную законодательством обязанность сетевой организации осуществить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению, учитывая, что мероприятия, предусмотренные техническими условиями, в целях технологического присоединения по 2 этапу на 356 кВт со стороны Ответчика не выполнены,  суд находит необходимым исковые требования удовлетворить в полном объеме, обязав СНТ «Малиновка» в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства по договору № 141921/ЦА от 10.11.2014 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых свыше 150 кВТ и менее 670 кВт (за исключением случаев, указанных в приложениях № 2 и 3, а так же осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту)) по 2 этапу на 356кВт.

Кроме того, истцом заявлено требования о взыскании неустойки в размере 30 131,18 руб.

Из материалов дела следует, что Дополнительным соглашением от 20.12.2016 к Договору срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению установлен не позднее 20.02.2017.

В соответствии со ст. 309 и 310 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

П. 1 ст. 329 ГК РФ устанавливает, что одним из способов обеспечения исполнения обязательств является неустойка, которой, согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ, признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно п. 17 Договора, в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по договору, такая сторона в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения Договора, и общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки.

 Размер ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, с 14.09.2012 (указание Банка России от 13.09.2012 № 2873-У), то есть по состоянию на 10.11.2014, составляет 8,25 %.

Срок нарушения обязательств по Договору в период с 21.02.2017 по 13.08.2018 составляет 539 дней.

Размер платы за технологическое присоединение установлен п. 10.1 Договора и составляет 48 400 рублей 00 копеек.

Таким образом, размер неустойки, подлежащей уплате Ответчиком за нарушение сроков выполнения условий Договора, составляет 30 131 рубль 18 копеек (0,014*0,0825*48 400*539 =30 131,18), расчет неустойки судом проверен и признан правильным, в связи с чем, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований.

Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

С учётом результатов рассмотрения спора, расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 171 и статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд           

РЕШИЛ:

Обязать Ответчика, СНТ «Малиновка» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства по договору № 141921/ЦА от 10.11.2014 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых свыше 150 кВТ и менее 670 кВт (за исключением случаев, указанных в приложениях № 2 и 3, а так же осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту)) по 2 этапу на 356кВт, а именно:

-смонтировать ВРУ объекта в соответствии с максимальной мощностью II этапа (356кВт), уровнем напряжения и заявленной категорией надежности электроснабжения;

-от точки присоединения до ВРУ объекта смонтировать ЛЭП в соответствии с максимальной мощностью II этапа (356кВт), уровнем напряжения и категорией надежности электроснабжения;

-разработать проектную документацию в границах земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным ТУ. Проектом учесть требования приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 23.06.2015 № 380 в части соблюдения максимальных значений коэффициента реактивной мощности.

-в состав проекта включить раздел «Качество электрической энергии», в котором выполнить технические решения, в том числе расчет суммарной установленной мощности искажающих электроприемников, с целью обеспечения в процессе эксплуатации показателей качества электрической энергии согласно ГОСТ 32144-2013; 

-выполнить заземление электроустановок в границах участка Ответчика и защитные меры безопасности с учетом требований главы 1.7 Правил устройства электроустановок;

-для повышения электро- и пожаробезопасности объекта установить на вводе устройство защитного отключения (УЗО) с учетом требований главы 7.1 Правил устройства электроустановок;

-для обеспечения надежной работы электрооборудования, при присоединении от ВЛ, на вводе в помещение предусмотреть защиту от повышенных и импульсных напряжений с учетом требований главы 7.1 Правил устройства электроустановок. Присоединяемые энергопринимающие устройства должны обеспечивать электромагнитную совместимость присоединяемой установки с электрическими сетями согласно ГОСТ 32144-2013.

-в проекте предусмотреть необходимые мероприятия по обеспечению безопасности работы электроустановки и защиты жизни и здоровья людей от опасности поражения электрическим током в соответствии с действующими нормами и правилами;

-учет электрической энергии выполнить в соответствии с требованиями раздела X «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии».

Для учета электрической энергии установить электросчетчик класса точности 1.0 и выше, позволяющий измерять почасовые объемы потребления электрической энергии иобеспечивающий хранение этих данных за последние 90 дней и более или включенный в систему учета.

Рекомендуется установка приборов учета:

-с возможностью вести архивы тарифицированной учтенной активной и реактивной электроэнергии на начало суток с глубиной не менее 30 дней, на начало месяца с глубиной не менее 12 месяцев и от сброса;

-с возможностью хранить профиль мощности с периодом интегрирования 30 мин и глубиной хранения не менее 90 дней;

-с возможностью измерять мгновенные значения параметров сети (I, U, Р, соэф) по каждой фазе;

-с возможностью измерять и фиксировать в журнале событий показатели качества электрической энергии;

-имеющих два независимых равноприоритетных интерфейса связи (RS- 485/CAN/PLC) для удаленного сбора данных и один оптический интерфейс для чтения информации непосредственно с прибора учета при помощи ноутбука или аналогичного устройства.

На момент ввода в эксплуатацию на установленном электросчетчике должна быть пломба поверки с давностью, не превышающей срок, установленный эксплуатационной документацией.

Трансформаторы тока и напряжения для подключения электросчетчика применить класса точности 0,5 и выше. Типы устанавливаемых трансформаторов тока и напряжения должны соответствовать действительным параметрам схемы электроснабжения. Устанавливаемые трансформаторы тока и напряжения должны иметь действующие свидетельства о поверке (оттиски поверительных клейм). В измерительных цепях должна предусматриваться установка испытательной коробки (блока).

- защитить     средства     и     системы     учета     электрической     энергии     от несанкционированного доступа к измерительным цепям и программному обеспечению;

-уведомить АО «Мособлэнерго» о выполнении мероприятий по технологическому присоединению по 2 этапу на 356 кВт в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства СНТ «Малиновка»; 

-принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств;

-подписать Акт об осуществлении технологического присоединения по 2 этапу на 356 кВт.

Взыскать с САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "МАЛИНОВКА" в пользу АО "МОСОБЛЭНЕРГО" неустойку в размере 30 131,18 руб. и расходы по госпошлине в размере  8 000 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

Судья                                                                                                  Ю.А. Фаньян