АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-32248/2021

г. Уфа

02 июня 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 25.05.2022

Полный текст решения изготовлен 02.06.2022

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Исхаковой А. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрел дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные электрические сети» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; далее – общество «Башкирэнерго», истец) к обществу с ограниченной ответственностью «Капитал строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; далее – общество «Капитал строй», ответчик) 

об обязании общество с ограниченной ответственностью «Капитал строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в течение 30 календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда исполнить пункт 2.19 соглашения  №РЭС-3.10/С-00084 от 09.09.2020 г. о взаимоотношениях по переустройству линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от КТП 3497 ф. 

<

***> в пролетах опор №8-14 на кордоне Мурат-Тугай Бурзянского района в следующем порядке: передать ООО «Башкирэнерго» по акту приема-передачи отчет о рыночной стоимости переустроенного участка ВЛ и документы, подтверждающие внесение сведений о границах охранной зоны в Государственный кадастр недвижимости, Карта (план) границ объекта землеустройства (охранной зоны) в бумажном виде и на электронном носителе, результаты топографо-геодезических работ в электронном виде программного комплекса ГИС «InGEO» в формате, принятом в органах кадастрового учета,

об обязании общество с ограниченной ответственностью «Капитал строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда, исполнить пункт 2.1.11 соглашения №РЭС-3.10/С-00084 от 09.09.2020 г. о взаимоотношениях по переустройству линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от КТП 3497 ф. 

<

***> в пролетах опор №8-14 на кордоне Мурат-Тугай Бурзянского района в следующем порядке: определить исходя из рыночной стоимости на основании рыночной оценки в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 №135-ФЗ стоимость переустроенного участка ВЛ и возместить ООО «Башкирэнерго» накладные расходы на полную компенсацию расходов по уплате налога на прибыль, возникающих в отчетном периоде в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, в размере 24 % от стоимости, определяемой как разница между рыночной стоимостью переустроенного участка ВЛ и остаточной стоимостью списываемого участка переустроенной ВЛ, определяемой по данным налогового учета ООО «Башкирэнерго»,

о взыскании неустойки в размере 128 500 руб. (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уточнения исковых требований,

при участии в судебном заседании:

от истца (онлайн): ФИО2, по доверенности № 119-1/07-32 от 01.01.2022г., диплом, предъявлен паспорт;  

от ответчик: не явились, извещены; 

Общество «Башкирэнерго» обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к обществу «Капитал строй» об обязании исполнить п. 2.1.9, п. 2.1.11 соглашения № № РЭС - 3.10/С-00084, о взыскании 128 500 руб. неустойки.

Определением от 01.12.2021 указанное исковое заявление принято к производству Арбитражного суда Республики Башкортостан.

От истца поступили письменные пояснения, согласно которым обосновал дату начала начисления неустойки.

От ответчика поступил отзыв на иск, согласно которому в удовлетворении иска просит отказать. Ответчик указал на невозможность исполнения им обязательств по условиям п.2.1.9 и 2.1.11 по вине истца, выразившихся в нарушении истцом п.1.5 соглашения, а также по причине неполучения от истца необходимых документов.

От истца через правовую систему «Мой арбитр» поступило ходатайство об уточнении иска, согласно которому просил обязать общество с ограниченной ответственностью «Капитал строй» в течение 30 календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда исполнить пункт 2.19 соглашения  №РЭС-3.10/С-00084 от 09.09.2020 г. о взаимоотношениях по переустройству линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от КТП 3497 ф. 

<

***> в пролетах опор №8-14 на кордоне Мурат-Тугай Бурзянского района в следующем порядке: передать ООО «Башкирэнерго» по акту приема-передачи отчет о рыночной стоимости переустроенного участка ВЛ и документы, подтверждающие внесение сведений о границах охранной зоны в Государственный кадастр недвижимости, Карта (план) границ объекта землеустройства (охранной зоны) в бумажном виде и на электронном носителе, результаты топографо-геодезических работ в электронном виде программного комплекса ГИС «InGEO» в формате, принятом в органах кадастрового учета; обязать общество с ограниченной ответственностью «Капитал строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда, исполнить пункт 2.1.11 соглашения №РЭС-3.10/С-00084 от 09.09.2020 г. о взаимоотношениях по переустройству линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от КТП 3497 ф. 

<

***> в пролетах опор №8-14 на кордоне Мурат-Тугай Бурзянского района в следующем порядке: определить исходя из рыночной стоимости на основании рыночной оценки в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 №135-ФЗ стоимость переустроенного участка ВЛ и возместить ООО «Башкирэнерго» накладные расходы на полную компенсацию расходов по уплате налога на прибыль, возникающих в отчетном периоде в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, в размере 24 % от стоимости, определяемой как разница между рыночной стоимостью переустроенного участка ВЛ и остаточной стоимостью списываемого участка переустроенной ВЛ, определяемой по данным налогового учета ООО «Башкирэнерго»; взыскать 128 500 руб. неустойку.

В соответствии со статьей 49 АПК РФ уточнение истцом исковых требований судом принято.

Указанное ходатайство об уточнении исковых требований содержит возражения на отзыв.

Заслушан истец, уточненные исковые требования поддержал; пояснил, что возможности мирного урегулирования спора не имеется; настаивал на рассмотрении дела. 

Дело рассмотрено в отсутствие представителей истца и ответчика в соответствии со ст. 156 АПК РФ.

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителя истца, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Между обществом «Капитал строй» (заказчик) и обществом «Башкирэнерго» (исполнитель) 09.09.2020 заключен договор на оказание услуг №_РЭС-3.10/Д-03648, по условиям которого исполнитель обязуется оказать заказчику вынос ВЛ-0,4 кВ от КТП 3497 ф. 

<

***> на Кардоне Мурат-тугай Бурзянского района в пролетах опор № 8-14, а заказчик принять их и оплатить.

Кроме того, между обществом «Башкирэнерго» (собственник) и обществом «Капитал строй» (заказчик) заключено соглашение №_РЭС-3.10/С-00084 от 09.09.2020 (далее - соглашение) о взаимоотношениях по переустройству линии электропередачи.

Указанное соглашение регулирует взаимоотношения сторон, возникающие в процессе переустройства линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от КТП 3497 ф. 

<

***> на Кардоне Мурат-тугай Бурзянского района в пролетах опор № 8-14, при котором собственник разрешает переустроить ВЛ-0,4 кВ от КТП 3497 ф. 

<

***> на Кардоне Мурат-тугай Бурзянского района в пролетах опор №8-14 объекта, а заказчик обязуется осуществить за счет собственных средств переустройство участка ВЛ, в предварительно согласованное с собственником место.

Опоры принадлежат собственнику на праве собственности (п.1.2 договора).

Ответчиком 05.11.2020 в соответствии с п.п. 2.1.3, 2.1.8 соглашения были выполнены только работы по переустройству объекта с передачей истцу переустроенного участка воздушной линии, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 05.11.2020, подписанного обеими сторонами, счет – фактурой от 05.11.2020, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 05.11.2020 на сумму 272 401 руб. 67 коп.

При этом, условиями заключенного соглашения, на ответчика также возлагалось выполнение следующих обязательств:

В соответствии с п. 2.1.9 соглашения общество «Капитал строй» обязано после выполнения работ и подписания акта приема-передачи нового (переустроенного) Участка ВЛ:

-в течение 2 рабочих дней передать собственнику по акту приема-передачи (Приложение № 2 к настоящему соглашению) демонтированные материалы и оборудование с доставкой на склад по адресу, указанному собственником. Затраты по доставке осуществляются заказчиком за свой счет;

-в течение 5 рабочих дней передать собственнику по акту приема-передачи проектно-сметную и исполнительную документацию по переустроенному Участку ВЛ;

-в течение 180 календарных дней передать собственнику по акту приема-передачи документы, подтверждающие внесение сведений о границах охранной зоны в Государственный кадастр недвижимости, Карта (план) границ объекта землеустройства (охранной зоны) в бумажном виде и на электронном носителе, результаты топографо-геодезических работ в электронном виде программного комплекса ГИС «InGЕО» в формате, принятом в органах кадастрового учета;

-в течение 30 рабочих дней передать собственнику по акту приема-передачи отчет о рыночной стоимости переустроенного Участка ВЛ; подтверждающие внесение сведений о границах охранной зоны в Государственный кадастр недвижимости, Карта (план) границ объекта землеустройства (охранной зоны) в бумажном виде и на электронном носителе, результаты топографо-геодезических работ в электронном виде программного комплекса ГИС «InGЕО» в формате, принятом в органах кадастрового учета.

Истец указал, что поскольку ответчик завершил работы по переустройству линии с передачей переустроенного участка ВЛ собственнику 05.11.2020, соответственно отчет о рыночной стоимости переустроенного участка ВЛ должен был передан истцу не позднее 17.12.2020, а документы, подтверждающие внесение сведений о границах охранной зоны не позднее 05.05.2021.

В соответствии с п. 2.1.11 соглашения ответчик обязан определить исходя из рыночной стоимости на основании рыночной оценки в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 №135-Ф3 стоимость переустроенного участка ВЛ, подлежащего передаче собственнику. Выбор независимого оценщика и все затраты на услуги по оценке возлагаются на заказчика.

Возместить собственнику накладные расходы на полную компенсацию расходов по уплате налога на прибыль, возникающих в отчетном периоде в соответствии с Налоговым Кодексом РФ в размере 24 % от стоимости, определяемой как разница между рыночной стоимостью переустроенного Участка ВЛ и остаточной стоимостью списываемого участка переустроенной ВЛ, определяемой по данным налогового учета собственника. Указанные затраты заказчик обязуется возместить собственнику в течение 30 календарных дней с момента оформления отчета независимого оценщика, согласованного с собственником и предоставления информации о налоговой стоимости списываемого участка переустроенной ВЛ.

Истец указал, что указанные затраты ответчик обязался возместить истцу в течение 30 календарных дней с момента оформления отчета независимого оценщика, согласованного с истцом и предоставления информации о налоговой стоимости списываемого участка, переустроенной ВЛ.

Указанные обязательства со стороны ответчика в установленные сроки выполнены не были.

Истец направил в адрес ответчика обращение №БцЭС/3.10-3730 от 23.11.2020, которым предложил обществу «Капитал строй» исполнить данные обязательства. Обращение со стороны ответчика осталось без ответа, обязательства не исполнены.

Пунктом 3.9 соглашения установлено, что за невыполнения заказчиком в срок обязательств, указанных в пунктах 1.9., 2.1.8., 2.1.9., 2.1.11., 2.1.12 настоящего соглашения, заказчик уплачивает собственнику штрафную неустойку в размере 500 руб. за каждый день просрочки выполнения любого из обязательств со дня, следующего за днем исполнения соответствующего обязательства по день его исполнения включительно.

За неисполнение обязательств по п. 2.1.9 соглашения истец начислил ответчику штрафную неустойку в размере 4 900 руб. по состоянию на 25.03.2021 и предъявил ее путем направления соответствующей претензий №БцЭС/3.10-843 от 30.03.2021. Со стороны ответчика претензия также осталась без удовлетворения, штрафная неустойка не оплачена, обязательства по соглашению не исполнены.

Истцом повторно направлена ответчику претензия №БцЭС/3.10-2492 от 31.08.2021 с требованием об исполнении обязательств по соглашению, при этом, истцом произведен перерасчет штрафной неустойки по состоянию на 31.08.2021 и предъявлено требование об ее оплате в размере 128 500 руб. Указанная претензия ответчиком не удовлетворена.

Ссылаясь на неисполнение ответчиком обязательств по соглашению, истец обратился с рассматриваемым иском в суд.

Исследовав и оценив представленные доказательства в их совокупности и выслушав доводы сторон в порядке статьи 71 АПК, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В силу ст.ст. 64, 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств. 

В соответствии со ст. 8 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных названным кодексом. 

В соответствии со ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. 

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Между обществом «Башкирэнерго» (собственник) и обществом «Капитал строй» (заказчик) заключено соглашение №_РЭС-3.10/С-00084 от 09.09.2020 (далее - соглашение) о взаимоотношениях по переустройству линии электропередачи.

Указанное соглашение регулирует взаимоотношения сторон, возникающие в процессе переустройства линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от КТП 3497 ф. 

<

***> на Кардоне Мурат-тугай Бурзянского района в пролетах опор № 8-14, при котором собственник разрешает переустроить ВЛ-0,4 кВ от КТП 3497 ф. 

<

***> на Кардоне Мурат-тугай Бурзянского района в пролетах опор №8-14 объекта, а заказчик обязуется осуществить за счет собственных средств переустройство участка ВЛ, в предварительно согласованное с собственником место.

На основании пункта 1 статьи 425 ГК РФ с момента заключения договор становится обязательным для сторон.

В силу пунктов 1 и 4 статьи 421 ГК РФ  граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия соглашения при его подписании были известны обществу «Капитал строй», условия определены по свободному усмотрению сторон, соглашение подписано ответчиком без каких-либо замечаний и возражений.

Исследовав характер спорных правоотношений, исходя из содержания прав и обязанностей сторон, предусмотренных соглашением №_РЭС-3.10/С-00084 от 09.09.2020, суд квалифицирует их как правоотношения по договорам подряда, подпадающие под действие ст. ст. 702 - 729 ГК РФ.

На основании положений п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с п. 2.1.9 соглашения общество «Капитал строй» обязано после выполнения работ и подписания акта приема-передачи нового (переустроенного) участка ВЛ:

-в течение 2 рабочих дней передать собственнику по акту приема-передачи (Приложение № 2 к настоящему соглашению) демонтированные материалы и оборудование с доставкой на склад по адресу, указанному собственником. Затраты по доставке осуществляются заказчиком за свой счет;

-в течение 5 рабочих дней передать собственнику по акту приема-передачи проектно-сметную и исполнительную документацию по переустроенному Участку ВЛ;

-в течение 180 календарных дней передать собственнику по акту приема-передачи документы, подтверждающие внесение сведений о границах охранной зоны в Государственный кадастр недвижимости, Карта (план) границ объекта землеустройства (охранной зоны) в бумажном виде и на электронном носителе, результаты топографо-геодезических работ в электронном виде программного комплекса ГИС «InGЕО» в формате, принятом в органах кадастрового учета;

-в течение 30 рабочих дней передать собственнику по акту приема-передачи отчет о рыночной стоимости переустроенного Участка ВЛ; подтверждающие внесение сведений о границах охранной зоны в Государственный кадастр недвижимости, Карта (план) границ объекта землеустройства (охранной зоны) в бумажном виде и на электронном носителе, результаты топографо-геодезических работ в электронном виде программного комплекса ГИС «InGЕО» в формате, принятом в органах кадастрового учета.

Истец указал, что поскольку ответчик завершил работы по переустройству линии с передачей переустроенного участка ВЛ собственнику 05.11.2020, соответственно отчет о рыночной стоимости переустроенного участка ВЛ должен был передан истцу не позднее 17.12.2020, а документы, подтверждающие внесение сведений о границах охранной зоны не позднее 05.05.2021.

В соответствии с п. 2.1.11 соглашения ответчик обязан определить исходя из рыночной стоимости на основании рыночной оценки в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 №135-Ф3 стоимость переустроенного Участка ВЛ, подлежащего передаче собственнику. Выбор независимого оценщика и все затраты на услуги по оценке возлагаются на заказчика.

Возместить собственнику накладные расходы на полную компенсацию расходов по уплате налога на прибыль, возникающих в отчетном периоде в соответствии с Налоговым Кодексом РФ в размере 24 % от стоимости, определяемой как разница между рыночной стоимостью переустроенного Участка ВЛ и остаточной стоимостью списываемого участка переустроенной ВЛ, определяемой по данным налогового учета собственника. Указанные затраты заказчик обязуется возместить собственнику в течение 30 календарных дней с момента оформления отчета независимого оценщика, согласованного с собственником и предоставления информации о налоговой стоимости списываемого участка переустроенной ВЛ.

Ответчиком 05.11.2020 в соответствии с п.п. 2.1.3, 2.1.8 соглашения были выполнены только работы по переустройству объекта с передачей истцу переустроенного участка воздушной линии, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 05.11.2020, подписанного обеими сторонами, счет – фактурой от 05.11.2020, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 05.11.2020 на сумму 272 401 руб. 67 коп.

В соответствии с п. 2.1.9 соглашения общество «Капитал строй» обязано после выполнения работ и подписания акта приема-передачи нового (переустроенного) Участка ВЛ:

-в течение 2 рабочих дней передать собственнику по акту приема-передачи (Приложение № 2 к настоящему соглашению) демонтированные материалы и оборудование с доставкой на склад по адресу, указанному собственником. Затраты по доставке осуществляются заказчиком за свой счет;

-в течение 5 рабочих дней передать собственнику по акту приема-передачи проектно-сметную и исполнительную документацию по переустроенному Участку ВЛ;

-в течение 180 календарных дней передать собственнику по акту приема-передачи документы, подтверждающие внесение сведений о границах охранной зоны в Государственный кадастр недвижимости, Карта (план) границ объекта землеустройства (охранной зоны) в бумажном виде и на электронном носителе, результаты топографо-геодезических работ в электронном виде программного комплекса ГИС «InGЕО» в формате, принятом в органах кадастрового учета;

-в течение 30 рабочих дней передать собственнику по акту приема-передачи отчет о рыночной стоимости переустроенного Участка ВЛ; подтверждающие внесение сведений о границах охранной зоны в Государственный кадастр недвижимости, Карта (план) границ объекта землеустройства (охранной зоны) в бумажном виде и на электронном носителе, результаты топографо-геодезических работ в электронном виде программного комплекса ГИС «InGЕО» в формате, принятом в органах кадастрового учета.

Истец указал, что поскольку ответчик завершил работы по переустройству линии с передачей переустроенного участка ВЛ собственнику 05.11.2020, соответственно отчет о рыночной стоимости переустроенного участка ВЛ должен был передан истцу не позднее 17.12.2020, а документы, подтверждающие внесение сведений о границах охранной зоны не позднее 05.05.2021.

В соответствии с п. 2.1.11 соглашения ответчик обязан определить исходя из рыночной стоимости на основании рыночной оценки в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 №135-Ф3 стоимость переустроенного Участка ВЛ, подлежащего передаче собственнику. Выбор независимого оценщика и все затраты на услуги по оценке возлагаются на заказчика.

Возместить собственнику накладные расходы на полную компенсацию расходов по уплате налога на прибыль, возникающих в отчетном периоде в соответствии с Налоговым Кодексом РФ в размере 24 % от стоимости, определяемой как разница между рыночной стоимостью переустроенного Участка ВЛ и остаточной стоимостью списываемого участка переустроенной ВЛ, определяемой по данным налогового учета собственника. Указанные затраты заказчик обязуется возместить собственнику в течение 30 календарных дней с момента оформления отчета независимого оценщика, согласованного с собственником и предоставления информации о налоговой стоимости списываемого участка переустроенной ВЛ.

Факт исполнения ответчиком п.п. 2.1.9, 2.1.11 материалы дела не содержат.

В отзыве на иск ответчик указал на невозможность исполнения им обязательств по условиям п.2.1.9 и 2.1.11 по вине истца, выразившихся в нарушении истцом п.1.5 соглашения, а также по причине неполучения от истца необходимых документов.

Между тем, доводы ответчика противоречат представленным в материалы дела доказательствам.

Соглашение №_РЭС-3.10/С-00084 от 09.09.2020 о взаимоотношениях по переустройству линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от КТП 3497 ф. 

<

***> в пролетах опор №8-14 на кордоне Мурат-Туган Бурзянского района со стороны ответчика подписано без замечаний и разногласий.

Указанное соглашение предусматривало выполнение ответчиком работ по переустройству линии и выполнение необходимых организационно-финансовых мероприятий, в частности выполнение обязательств по п.п. 2.1.9, 2.1.11.

Выполнение работ по переустройству линии ответчик выполнил силами истца на основании заключенного договора, при этом, инициатором таких взаимоотношений выступил именно ответчик, что подтверждается письмом исх. № 043 от 16.03.2020 и ответом на него №БцЭС/3.10-1698 от 27.05.2020.

Материалы дела не содержат доказательств обращения ответчика к истцу о необходимости предоставления документов в целях выполнения п.п. 2.1.9 и 2.1.11.

Истцом напротив неоднократно направлялись в адрес ответчика письма и претензии с требованием выполнения условий соглашения, в частности исх. №БцЭС/3.10-3730 от 23.11.2020, №БцЭС/3.10-843 от 30.03.2021 и №БцЭС/10-2492 от 31.08.2021, между тем, ответчиком каких-либо ответов на них, уведомлений о невозможности выполнения соглашения в адрес истца в материалы дела не представлено.

Иных доказательств ответчиком в нарушение ст. 65 АПК не представлено.

С учетом изложенного, требования истца об обязании общество с ограниченной ответственностью «Капитал строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в течение 30 календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда исполнить пункт 2.19 соглашения  №РЭС-3.10/С-00084 от 09.09.2020 г. о взаимоотношениях по переустройству линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от КТП 3497 ф. 

<

***> в пролетах опор №8-14 на кордоне Мурат-Тугай Бурзянского района в следующем порядке: передать ООО «Башкирэнерго» по акту приема-передачи отчет о рыночной стоимости переустроенного участка ВЛ и документы, подтверждающие внесение сведений о границах охранной зоны в Государственный кадастр недвижимости, Карта (план) границ объекта землеустройства (охранной зоны) в бумажном виде и на электронном носителе, результаты топографо-геодезических работ в электронном виде программного комплекса ГИС «InGEO» в формате, принятом в органах кадастрового учета; об обязании общество с ограниченной ответственностью «Капитал строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда, исполнить пункт 2.1.11 соглашения №РЭС-3.10/С-00084 от 09.09.2020 г. о взаимоотношениях по переустройству линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от КТП 3497 ф. 

<

***> в пролетах опор №8-14 на кордоне Мурат-Тугай Бурзянского района в следующем порядке: определить исходя из рыночной стоимости на основании рыночной оценки в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 №135-ФЗ стоимость переустроенного участка ВЛ и возместить ООО «Башкирэнерго» накладные расходы на полную компенсацию расходов по уплате налога на прибыль, возникающих в отчетном периоде в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, в размере 24 % от стоимости, определяемой как разница между рыночной стоимостью переустроенного участка ВЛ и остаточной стоимостью списываемого участка переустроенной ВЛ, определяемой по данным налогового учета ООО «Башкирэнерго» подлежат удовлетворению в полном объеме.

Истцом также заявлено требование о взыскании 128 500 руб. неустойки за период с 18.12.2020 по 31.08.2012.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В силу статьи 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

Пунктом 3.9 соглашения установлено, что за невыполнения заказчиком в срок обязательств, указанных в пунктах 1.9., 2.1.8., 2.1.9., 2.1.11., 2.1.12 настоящего соглашения, заказчик уплачивает собственнику штрафную неустойку в размере 500 руб. за каждый день просрочки выполнения любого из обязательств со дня, следующего за днем исполнения соответствующего обязательства по день его исполнения включительно.

По расчету истца сумма пени за период с 18.12.2020 по 31.08.2012 составила 128 500 руб.

В письменных пояснениях относительно даты начисления неустойки истец указал,  что в соответствии с п. 2.1.9 соглашения заказчик был обязан после выполнения работ по переустройству объекта в течение 30 рабочих дней передать истцу по акту приема-передачи отчет о рыночной стоимости переустроенного участка ВЛ. Истец указал, что согласно акту выполненных работ к договору № РЭС-3.10/Д-03648 от 09.09.2020 работы по переустройству объекта завершены 05.11.2020. Соответственно обязательства по п. 2.1.9 ответчиком должны были выполнены с 05.11.2020 в течение 30 рабочих дней, т.е. не позднее 17.12.2020. Поскольку обязательства не выполнены ответчиком, истец расчет неустойки произвел с 18.12.2020 по 31.08.2021.

Представленный истцом расчет пени судом проверен, признан верным. Возражений относительно периода начисления пени, примененных ставок и арифметической верности произведенных вычислений ответчик не представил.

При указанных обстоятельства суд удовлетворяет требование истца о взыскании пени в сумме - 128 500 руб.

Оснований для снижения суммы пени в порядке статьи 333 ГК РФ суд не усмотрел с учетом отсутствия в материалах дела как заявления ответчика о ее несоразмерности последствиям нарушения обязательства, так и доказательств такой несоразмерности (пункты 71, 73 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Капитал строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в течение 30 календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда исполнить пункт 2.19 соглашения  №РЭС-3.10/С-00084 от 09.09.2020 г. о взаимоотношениях по переустройству линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от КТП 3497 ф. 

<

***> в пролетах опор №8-14 на кордоне Мурат-Тугай Бурзянского района в следующем порядке: передать ООО «Башкирэнерго» по акту приема-передачи отчет о рыночной стоимости переустроенного участка ВЛ и документы, подтверждающие внесение сведений о границах охранной зоны в Государственный кадастр недвижимости, Карта (план) границ объекта землеустройства (охранной зоны) в бумажном виде и на электронном носителе, результаты топографо-геодезических работ в электронном виде программного комплекса ГИС «InGEO» в формате, принятом в органах кадастрового учета;

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Капитал строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда, исполнить пункт 2.1.11 соглашения №РЭС-3.10/С-00084 от 09.09.2020 г. о взаимоотношениях по переустройству линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от КТП 3497 ф. 

<

***> в пролетах опор №8-14 на кордоне Мурат-Тугай Бурзянского района в следующем порядке: определить исходя из рыночной стоимости на основании рыночной оценки в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 №135-ФЗ стоимость переустроенного участка ВЛ и возместить ООО «Башкирэнерго» накладные расходы на полную компенсацию расходов по уплате налога на прибыль, возникающих в отчетном периоде в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, в размере 24 % от стоимости, определяемой как разница между рыночной стоимостью переустроенного участка ВЛ и остаточной стоимостью списываемого участка переустроенной ВЛ, определяемой по данным налогового учета ООО «Башкирэнерго».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Капитал строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные электрические сети» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку в размере 128 500 руб., 16 855 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

 Судья                                А.А. Исхакова