АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024

http: //www.Orenburg.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А47-1000/2023

г. Оренбург

12 апреля 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена       06 апреля 2023 года

В полном объеме решение изготовлено        12 апреля 2023 года

 

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Лебедянцевой Анны Александровны, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Бурение», ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, г. Самара, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Степное», ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, г. Оренбург, Оренбургская область, 

 о взыскании 417 958 125 руб. 11 коп.,

при участии:

от истца: ФИО2 по доверенности от09.01.2023 г., выдана сроком до 31.12.2023 г., паспорт, диплом,

от ответчика: ФИО3 по доверенности №Д-5/23 от 20.02.2023 г., выдана сроком на 1 год, паспорт.

 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Бурение» (далее – истец) обратилось в арбитражный суд к обществу с ограниченной ответственностью «Степное» (далее – ответчик) с требованием о взыскании задолженности по договору подряда № 38-Д/17 от 01.11.2017 в размере 417 958 125 руб. 11 коп., в том числе: 397 263 421 руб. 10 коп.- основной долг, 20 694 704 руб. 01 коп. – пени на основании п. 12.1 договора. 

До начала судебного заседания ответчик представил в материалы дела отзыв на иск, согласно которому он признал исковые требования в полном объеме, пояснил, что задолженность является следствием трудного финансового положения.

В ходе судебного заседания истец поддержал исковые требования, представил дополнительные документы, которые в порядке ст. 66 АПК РФ приобщены к материалам дела. 

Ответчик поддержал позицию, изложенную в отзыве на иск. 

Учитывая согласие сторон, дело рассмотрено в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции в порядке части 4 статьи 137 АПК РФ.

Истец и ответчик не заявили ходатайства о необходимости предоставления дополнительных доказательств. При таких обстоятельствах суд рассматривает дело, исходя из совокупности имеющихся в деле доказательств, с учетом положений статьи 65 АПК РФ.

При рассмотрении материалов дела, судом установлены следующие обстоятельства.

Между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен договор подряда № 38-Д/17 от 01.11.2017г. на выполнение работ по строительству скважин, согласно которому подрядчик обязуется выполнить работ в соответствии с Проектной документацией, и Графиками выполнения работ на соответствующий период, Работы, связанные с подготовительными работами, с вышкостроением, бурением и креплением скважин на месторождениях Заказчика, указанных к настоящему Договору, исключением работ по обустройству, и передать Результат работ Заказчику, а Заказчиков обязуется принять выполненные работы и оплатить их. Цикл Работ по строительству скважин выполняется в соответствии с Проектной Документацией и следующими этапами:

I этап - Мобилизация оборудования и бригадного хозяйства в район проведения Работ;

II этап - Подготовительные и вышкомонтажные Работы;

III этап - бурение и крепление направления и кондуктора скважины; 

IV этап - бурение и крепление технической колонны скважины;

V этап - бурение и крепление эксплуатационной колонны скважины;

VI этап -демонтаж буровой установки

VII этап - заключительные работы с использованием подъемного агрегата

VIII этап - перетаскивание БУ.

IX этап - демобилизация буровой установки и бригадного хозяйства.

Условия о стоимости работ сторонами согласованы в разделе 3 договора.

Согласно п. 3.1 договора стоимость работ определяется приложениями № 8-8.5. 

Расчет за выполненные работ производится заказчиком ежемесячно в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами документов, указанных в п. 5.4 договора (акты по форме КС-2, справки по форме КС-3, счет-фактура к форме КС-2) (п. 5.1 в редакции дополнительного соглашения).

Согласно п. .7.6 договора при отсутствии недостатков и/или дефектов в выполненных работах, заказчик обязан в течение 10 дней подписать акт приема – передачи скважины из бурения (форма КС-23н).

24.03.2020г. наступил срок оплаты по факту выполнения этапа работ по строительству эксплуатационной скважины № 283 Судьбадаровского месторождения.

В рамках исполнения условий договора сторонами были подписаны следующие первичные документы по данному факту:

-Акт о приемке выполненных работ (КС-2) №9/283 от 25.01.2020г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) №9/283 от 25.01.2020г. на сумму: 816 218 (Восемьсот шестнадцать тысяч двести восемнадцать) рублей 72 копейки: По данным объёмам работ оплат не производилось.

31.03.2020г. наступил срок оплаты по факту выполнения этапа работ по строительству эксплуатационной скважины № 34 Судьбадаровского месторождения.

В рамках исполнения условий договора сторонами были подписаны следующие первичные документы по данному факту:

-Акт о приемке выполненных работ (КС-2) №6/34 от 31.01.2020г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) №6/34 от 31.01.2020г. на сумму: 34 225 410 (Тридцать четыре миллиона двести двадцать пять тысяч четыреста десять) рублей 72 копейки. По данным объёмам работ оплат не производилось.

31.03.2020г. наступил срок оплаты по факту выполнения этапа работ по строительству эксплуатационной скважины № 32 Судьбадаровского месторождения:

В рамках исполнения условий договора сторонами были подписаны следующие первичные документы по данному факту:

-Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1/32 от 31.01.2020 г., Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 1/32 от 31.01.2020г. на сумму: 32 583 392 (Тридцать два миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи триста девяносто два) рубля 90 копеек. По данным объёмам работ оплат не производилось.

31.03.2020г. наступил срок оплаты по факту выполнения дополнительных работ при строительстве эксплуатационной скважины № 32 Судьбадаровского месторождения:

В рамках исполнения условий данного договора сторонами были подписаны следующие первичные документы по данному факту:

-Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 2/32 от 31.01.2020 г., Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 2/32 от 31.01.2020г. на сумму 598 844 (пять тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 80 копейки. По данным объёмам работ оплат не производилось.

29.04.2020г. наступил срок оплаты по факту выполнения этапа работ по строительству эксплуатационной скважины № 32 Судьбадаровского месторождения:

В рамках исполнения условий договора сторонами были подписаны следующие первичные документы по данному факту:

- Акт о приемке выполненных работ (КС-2) №3/32 от 29.02.2020 г., Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 3/32 от 29.02.2020г на сумму: 54 857 759 (Пятьдесят четыре миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 72 копейки. По данным объёмам работ оплат не производилось.

29.04.2020г. наступил срок оплаты по факту выполнения дополнительных работ при строительстве эксплуатационной скважины № 32 Судьбадаровского месторождения:

В рамках исполнения условий данного договора сторонами были подписаны следующие первичные документы по данному факту:

-Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 4/32 от 29.02.2020 г., Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 4/32 от 29.02.2020г. на сумму 5 783 778 (пять миллионов семьсот восемьдесят три тысячи семьсот семьдесят восемь) рублей 55 копеек. По данным объёмам работ оплат не производилось.

30.05.2020г. наступил срок оплаты по факту выполнения этапа работ по строительству эксплуатационной скважины № 32 Судьбадаровского месторождения:

В рамках исполнения условий договора сторонами были подписаны следующие первичные документы по данному факту:

-Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 5/32 от 31.03.2020 г., Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 5/32 от 31.03.2020г. на сумму: 41 854 310 (Сорок один миллион восемьсот пятьдесят четыре тысячи триста десять) рублей 70 копеек. По данным объёмам работ оплат не производилось

07.06.2020г. наступил срок оплаты по факту выполнения этапа работ по строительству эксплуатационной скважины № 32 Судьбадаровского месторождения:

В рамках исполнения условий договора сторонами были подписаны следующие первичные документы по данному факту:

-Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 6/32 от 08.04.2020 г., Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 6/32 от 08.04.2020г. на сумму: 2 896 737 (Два миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч семьсот тридцать семь) рублей 70 копеек. По данным объёмам работ оплат не производилось.

13.06.2020г. наступил срок оплаты по факту выполнения этапа работ по строительству эксплуатационной скважины № 32 Судьбадаровского месторождения:

В рамках исполнения условий договора сторонами были подписаны следующие первичные документы по данному факту:

-Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 7/32 от 14.04.2020г., Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 7/32 от 14.04.2020 г. на сумму: 5 855 453 (Пять миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 82 копейки. По данным объёмам работ оплат не производилось.

17.08.2020г. наступил срок оплаты по факту выполнения этапа работ по строительству эксплуатационной скважины № 32 Судьбадаровского месторождения:

В рамках исполнения условий договора сторонами были подписаны следующие первичные документы по данному факту:

-Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 8/32 от 18.06.2020 г., Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 8/32 от 18.06.2020г на сумму: 816 218 (Восемьсот шестнадцать тысяч двести восемнадцать) рублей 72 копейки. По данным объёмам работ оплат не производилось.

17.08.2020г. наступил срок оплаты по факту выполнения этапа работ по строительству эксплуатационной скважины № 34 Судьбадаровского месторождения:

В рамках исполнения условий договора сторонами были подписаны следующие первичные документы по данному факту:

-Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 7/34 от 18.06.2020 г., Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 7/34 от 18.06.2020г. на сумму: 816 218 (Восемьсот шестнадцать тысяч двести восемнадцать) рублей 72 копейки. По данным объёмам работ оплат не производилось.

28.09.2020г. наступил срок оплаты по факту выполнения этапа работ по строительству эксплуатационной скважины № 32 Судьбадаровского месторождения:

В рамках исполнения условий договора сторонами были подписаны следующие первичные документы по данному факту:

-Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 9/32 от 29.07.2020 г., Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 9/32 от 29.07.2020г. на сумму: 8 056 806 (Восемь миллионов пятьдесят шесть тысяч восемьсот шесть) рублей 91 копейка. По данным объёмам работ оплат не производилось.

29.01.2021г. наступил срок оплаты по факту выполнения этапа работ по строительству эксплуатационной скважины № 124 Судьбадаровского месторождения:

В рамках исполнения условий договора сторонами были подписаны следующие первичные документы по данному факту:

-Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1/124 от 30.11.2020 г., Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 1/124 от 30.11.2020г. на сумму: 69 019 244 (Шестьдесят девять миллионов девятнадцать тысяч двести сорок четыре) рубля 27 копеек. По данным объёмам работ оплат не производилось.

29.01.2021г. наступил срок оплаты по факту выполнения этапа работ по строительству эксплуатационной скважины № 124 Судьбадаровского месторождения:

В рамках исполнения условий договора сторонами были подписаны следующие первичные документы по данному факту:

-Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 2/124 от 30.11.2020 г., Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 2/124 от 30.11.2020г. на сумму: 10 026 505 (Десять миллионов двадцать шесть тысяч пятьсот пять) рублей 75 копеек. По данным объёмам работ оплат не производилось.

28.02.2021г. наступил срок оплаты по факту выполнения этапа работ по строительству эксплуатационной скважины № 124 Судьбадаровского месторождения:

В рамках исполнения условий договора сторонами были подписаны следующие первичные документы по данному факту:

-Акт о приемке выполненных работ (КС-2) №3/124 от 31.12.2020 г., Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 3/124 от 31.12.2020г. на сумму: 28 629 180 (Двадцать восемь миллионов шестьсот двадцать девять тысяч сто восемьдесят) рублей 43 копейки. По данным объёмам работ оплат не производилось.

28.02.2021г. наступил срок оплаты по факту выполнения этапа работ по строительству эксплуатационной скважины № 124 Судьбадаровского месторождения:

В рамках исполнения условий договора сторонами были подписаны следующие первичные документы по данному факту:

-Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 4/124 от 31.12.2020 г., Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 4/124 от 31.12.2020г. на сумму: 3 344 480 (Три миллиона триста сорок четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей 34 копейки. По данным объёмам работ оплат не производилось.

30.03.2021г. наступил срок оплаты по факту выполнения этапа работ по строительству эксплуатационной скважины № 124 Судьбадаровского месторождения:

В рамках исполнения условий договора сторонами были подписаны следующие первичные документы по данному факту:

-Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 5/124 от 31.01.2021 г., Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 5/124 от 31.01.2021г. на сумму: 12 283 146 (Двенадцать миллионов сто восемьдесят три тысячи сто сорок шесть) рублей 72 копейки. По данным объёмам работ оплат не производилось.

30.03.2021г. наступил срок оплаты по факту выполнения этапа работ по строительству эксплуатационной скважины № 124 Судьбадаровского месторождения:

В рамках исполнения условий договора сторонами были подписаны следующие первичные документы по данному факту:

-Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 6/124 от 31.01.2021 г., Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) №6/124 от 31.01.2021г. на сумму: 22 318 108 (Двадцать два миллиона триста восемнадцать тысяч сто восемь) рублей 39 копеек. По данным объёмам работ оплат не производилось.

27.04.2021г. наступил срок оплаты по факту выполнения этапа работ по строительству эксплуатационной скважины № 124 Судьбадаровского месторождения:

В рамках исполнения условий договора сторонами были подписаны следующие первичные документы по данному факту:

-Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 7/124 от 28.02.2021 г., Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 7/124 от 28.02.2021г. на сумму: 6 644 709 (Шесть миллионов шестьсот сорок четыре тысячи семьсот девять) рублей 95 копеек. По данным объёмам работ оплат не производилось.

27.04.2021г. наступил срок оплаты по факту выполнения этапа работ по строительству эксплуатационной скважины № 124 Судьбадаровского месторождения:

В рамках исполнения условий договора сторонами были подписаны следующие первичные документы по данному факту:

-Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 8/124 от 28.02.2021 г., Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 8/124 от 28.02.2021г. на сумму: 22 411 284 (Двадцать два миллиона четыреста одиннадцать тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 66 копеек. По данным объёмам работ оплат не производилось.

29.05.2021г. наступил срок оплаты по факту выполнения этапа работ по строительству эксплуатационной скважины № 124 Судьбадаровского месторождения:

В рамках исполнения условий договора сторонами были подписаны следующие первичные документы по данному факту:

-Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 9/124 от 30.03.2021 г., Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 9/124 от 30.03.2021г. на сумму: 49 097 674 (Сорок девять миллионов девяносто семь тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля 39 копеек. По данным объёмам работ оплат не производилось.

29.05.2021г. наступил срок оплаты по факту выполнения этапа работ по строительству эксплуатационной скважины № 124 Судьбадаровского месторождения:

В рамках исполнения условий договора сторонами были подписаны следующие первичные документы по данному факту:

-Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 10/124 от 30.03.2021 г., Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 10/124 от 30.03.2021г. на сумму: 876 970 (Восемьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят) рублей 63 копейки. По данным объёмам работ оплат не производилось.

30.07.2021 г. наступил срок оплаты по факту выполнения этапа работ по строительству эксплуатационной скважины № 124 Судьбадаровского месторождения:

В рамках исполнения условий договора сторонами были подписаны следующие первичные документы по данному факту:

-Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 11/124 от 31.05.2021 г., Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 11/124 от 31.05.2021г. на сумму: 897 970 (Восемьсот девяносто семь тысяч девятьсот семьдесят) рублей 63 копейки. По данным объёмам работ оплат не производилось.

Общая сумма просроченной задолженности по вышеуказанным объемам работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком по договору подряда № 38-Д/17 от 01.11.2017г. по состоянию на 09.01.2023г. составляет 397 263 421 (Триста девяносто семь миллионов двести шестьдесят три тысячи четыреста двадцать один) руб. 10 коп., что подтверждается подписанными Сторонами без разногласий актами сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал 2022г., 2 квартал 2022г., 9 месяцев 2022г.

О данном факте ООО «НПП «Бурение» уведомляло ООО «Степное» в своей претензии (исх. 7355 от 01.12.2022г.), которая, оставлена без ответа.

Вышеуказанная сумма задолженности по оплате выполненных работ, образовалась по объемам работ, подлежащим к оплате, в период с марта 2020г.- по июль 2021г.

Между ООО «НПП «Бурение» и ООО «Степное» были заключены Соглашения о погашении задолженности, в рамках вышеуказанного договора подряда, действующие в период с января 2021г.- по октябрь 2022г.

Обязательства ООО «Степное» по оплате, в рамках вышеуказанных Соглашений, надлежащим образом, в указанные в Соглашениях сроки, исполнены не были.

Согласно п. 12.1. договора подряда № 38-Д/17 от 01.11.2017г., за задержку оплату выполненных работ по акцептованным Заказчиком платежным документам Подрядчик имеет право взыскать пени в размере 0,2 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от неоплаченной суммы.

В рамках заключенного сторонами Соглашения о погашении задолженности от 11 января 2021 г., ООО «Степное» признало сумму пени по договору подряда № 38-Д/17 от 01.11.2017г в размере 8 985 022 (восемь миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч двадцать два) рубля 00 коп.

В рамках заключенного сторонами Соглашения о погашении задолженности от 14 марта 2022г. ООО «Степное» признало сумму пени по договору подряда № 38-Д/17 от 01.11.2017г в размере 11 709 681 (одиннадцать миллионов семьсот девять тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 54 коп.

Таким образом, общий размер пени по состоянию на 09.01.2023г. составляет 20 694 704 (Двадцать миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи семьсот четыре) руб. 01 коп.

Поскольку ответчиком долг в полном объеме не погашен, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

В ходе рассмотрения дела, судом установлено, что в материалах дела имеется отзыв, в котором ответчик задолженность признает в полном объеме.

В соответствии с п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» к документам, подтверждающим задолженность по договору, относятся документы, которые содержат письменное подтверждение ответчиком наличия у него задолженности перед истцом (например, расписка, подписанная ответчиком, ответ на претензию, подписанный сторонами акт сверки расчетов).

В силу статьи 70 АПК РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Факт признания сторонами обстоятельств заносится арбитражным судом в протокол судебного заседания и удостоверяется подписями сторон. Признание, изложенное в письменной форме, приобщается к материалам дела.

В соответствии с ч. 3 ст. 49 АПК РФ ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.

Учитывая, что признание ответчиком исковых требований не противоречит закону и не нарушает права других лиц, суд принимает признание иска ответчиком на основании ч.ч. 3, 5 ст. 49 АПК РФ.

В силу абз. 3 п. 3 ч. 4 ст. 170 АПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом.

Согласно ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Поскольку материалы дела указывают на признание ответчиком исковых требований в полном объеме, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме, с ответчика в пользу истца взыскивается задолженность договору подряда № 38-Д/17 от 01.11.2017 в размере 417 958 125 руб. 11 коп., в том числе основной долг в размере 397 263 421 руб. 10 коп., пени в размере 20 694 704 руб.

Согласно статье 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Истцом при подаче искового заявления в суд по платежным поручениям № 152 от 11.01.2023 уплачена государственная пошлина в сумме 200 000 руб.  

В соответствии с п. 3 п. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при признании ответчиком иска до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.

В связи с признанием ответчиком иска в полном объеме, на основании абзаца 2 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, государственная пошлина в сумме 140 000 руб., подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Расходы по уплате государственной пошлине в размере 60 000 руб. (30%) относятся на ответчика и взыскиваются в пользу истца.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Степное» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Бурение» 417 958 125 руб. 11 коп., в том числе основной долг в размере 397 263 421 руб. 10 коп., пени в размере 20 694 704 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 60 000 руб.

Возвратить общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Бурение» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 140 000 руб., выдав справку на возврат.

Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке ст.ст. 319, 320 АПК РФ.

 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Оренбургской области. 

 

Судья                                                                      А.А. Лебедянцева