АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-784/2019

г. Тюмень

03 апреля 2019 года

Решение путем подписания резолютивной части решения принято 25 марта 2019 года.Мотивированное решение на основании заявления ответчика, поступившего в суд 27 марта 2019 года, составлено 03 апреля 2019  года.

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Михалевой Е.В., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску Государственного бюджетного учреждения Тюменской области «Дирекция коммунально-хозяйственного строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации: 15.02.2008, место нахождения: 625019, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью «ПроектГрупп» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 19.01.2016, место нахождения: 625003, 

<

...>) о взыскании неустойки в размере 86 489,15 рублей, 

установил:

Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Дирекция коммунально-хозяйственного строительства» (далее – истец, ГБУ ТО «ДКХС»)  обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с иском к обществу с ограниченной ответственность «ПроектГрупп» (далее – ответчик, ООО «ПроектГрупп») о взыскании 86 489,15 рублей неустойки за просрочку исполнения обязательств по контрактам №2-ПИР-18 от 31.10.2018, №3- ПИР-18 от 07.11.2018, № 4-ПИР-18 от 07.11.2018, № 5-ПИР-18 от 07.11.2018.

Требования истца  со ссылкой на статьи  309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации мотивированы нарушением ответчиком сроков выполнения работ по контрактам №2-ПИР-18 от 31.10.2018, №3- ПИР-18 от 07.11.2018, № 4-ПИР-18 от 07.11.2018, № 5-ПИР-18 от 07.11.2018.

Определением суда от 28.01.2019 исковое заявление принято к производству и назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Сторонам  предоставлено время для направления доказательств и отзыва на исковое заявление в соответствии с частью 2 статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьями 226, 227, 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства без вызова сторон.

Решением от 25.03.2019, вынесенным в виде резолютивной части, в удовлетворении иска отказано.

В суд поступило заявление истца об изготовлении мотивированного решения.

Учитывая соблюдение ГБУ ТО «ДКХС» установленного частью 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации срока на подачу соответствующего заявления, суд считает его подлежащим удовлетворению.

Изучив материалы дела, всесторонне исследовав и оценив в совокупности доказательства по делу, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, 31.10.2018 между ГБУ ТО «ДКХС» (заказчик) и ООО «ПроектГрупп» (подрядчик) на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в  электронном аукционе №АЭ-4358/18 от 18.10.2018 заключен контракт №2-ПИР-18 на выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту: «Вагайский район, с. Вагай. Строительство канализации и КОС» (далее – контракт), согласно которому подрядчик обязуется выполнить работы по корректировке проектной документации по объекту «Вагайский район. с. Вагай. Строительство канализации и КОС» на условиях, предусмотренных контрактом, в соответствии с описанием объекта закупки (в том числе инженерные изыскания и проектные работы, получение необходимых согласований и разрешений, а также сопровождение инженерных изысканий и проектных работ при проведении государственной экспертизы с получением положительного заключения, сопровождение проверки достоверности определения сметной стоимости, а заказчик обязуется принять их результат и оплатить.

Цена контракта составляет 2 444 473 рубля. Цена контракта включает в себя налоги и сборы, установленные действующим законодательством РФ; стоимость оказываемых услуг, а также прочие услуги и затраты, связанные с оказанием услуг в соответствии с Описанием объекта закупки и предусмотренные контрактом (пункт 2.1 контракта).

Оплата оказанных подрядчиком услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 8 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке  (акта приема-передачи проектной продукции). Расчеты осуществляются в пределах предоставленной субсидии текущего года. 

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема, качества услуг и иных условий исполнения контракта. 

Сроки выполнения работ по контракту определены в пункте 3.1 контракта: с даты заключения контракта по 20.12.2018.

07.11.2018 между ГБУ ТО «ДКХС» (заказчик) и ООО «ПроектГрупп» (подрядчик) на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в  электронном аукционе №АЭ-4375/18 от 23.10.2018 был заключен контракт № 3-ПИР-18 на выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту: «Аромашевский район. с. Аромашево. Строительство канализации и КОС» (далее – контракт), согласно которому подрядчик обязуется выполнить работы но корректировке проектной документации но объекту: «Аромашевский район. с. Аромашево. Строительство канализации и КОС» на условиях, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с Описанием объекта (в том числе инженерные изыскания и проектные работы, получение необходимых согласований и разрешений, а также сопровождение инженерных изысканий и проектных работ при проведении государственной экспертизы с получением положительного заключения, сопровождение проверки достоверности определения сметной стоимости), а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить..

Цена контракта составляет 2 397 894, 28 рублей. Цена контракта включает в себя налоги и сборы, установленные действующим законодательством РФ; стоимость оказываемых услуг, а также прочие услуги и затраты, связанные с оказанием услуг в соответствии с Описанием объекта закупки и предусмотренные контрактом (пункт 2.1 контракта).

Оплата оказанных подрядчиком услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 8 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке (акта приема-передачи проектной продукции). Расчеты осуществляются в пределах предоставленной субсидии текущего года. 

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема, качества услуг и иных условий исполнения контракта. 

Сроки выполнения работ по контракту определены в пункте 3.1 контракта: с даты заключения контракта по 20.12.2018.

07.11.2018 между ГБУ ТО «ДКХС» (заказчик) и ООО «ПроектГрупп» (подрядчик) на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в  электронном аукционе №АЭ-4374/18 от 24.10.2018 был заключен контракт № 4-ПИР-18 на выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту: «с. Армизонское. Строительство канализации и КОС, Армизонский район» (далее – контракт), согласно которому подрядчик обязуемся выполнить работы но корректировке проектной документации по объекту: «с. Армизонское. Строительство канализации и КОС, Армизонский район» на условиях, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с Описанием объекта закупки  (в том числе инженерные изыскания и проектные работы, получение необходимых согласований и разрешений, а также сопровождение инженерных изысканий и проектных работ при проведении государственной экспертизы с получением положительного заключения, сопровождение проверки достоверности определения сметной стоимости), а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить.

Цена контракта составляет 2 891 420 рублей. Цена контракта включает в себя налоги и сборы, установленные действующим законодательством РФ; стоимость оказываемых услуг, а также прочие услуги и затраты, связанные с оказанием услуг в соответствии с Описанием объекта закупки и предусмотренные контрактом (пункт 2.1 контракта).

Оплата оказанных подрядчиком услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 8 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке  (акта приема-передачи проектной продукции). Расчеты осуществляются в пределах предоставленной субсидии текущего года. 

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема, качества услуг и иных условий исполнения контракта. 

Сроки выполнения работ по контракту определены в пункте 3.1 контракта с даты заключения контракта по 20.12.2018.

07.11.2018 между ГБУ ТО «ДКХС» (заказчик) и ООО «ПроектГрупп» (подрядчик) на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в  электронном аукционе №АЭ-4454/18 от 24.10.2018 был заключен контракт № 5-ПИР-18 на выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту: «Сорокинский район, с. Сорокино. Строительство канализационных и очистных сооружений» (далее – контракт), согласно которому подрядчик обязуется выполнить работы по корректировке проектной документации по объекту: «Сорокинский район, с. Сорокнно. Строительство канализационных очистных сооружений» на условиях, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с Описанием объекта закупки  (в том числе инженерные изыскания и проектные работы, получение необходимых согласований и разрешений, а также сопровождение инженерных изысканий и проектных работ при проведении государственной экспертизы с получением положительного заключения, сопровождение проверки достоверности определения сметной стоимости), а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить.

Цена контракта составляет 2 411 566 рублей. Цена контракта включает в себя налоги и сборы, установленные действующим законодательством РФ; стоимость оказываемых услуг, а также прочие услуги и затраты, связанные с оказанием услуг в соответствии с Описанием объекта закупки и предусмотренные контрактом (пункт 2.1 контракта).

Оплата оказанных подрядчиком услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 8 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке  (акта приема-передачи проектной продукции). Расчеты осуществляются в пределах предоставленной субсидии текущего года. 

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема, качества услуг и иных условий исполнения контракта. 

Сроки выполнения работ по контракту определены в пункте 3.1 контракта: с даты заключения контракта по 20.12.2018.

В силу пунктов 4.1.1, 4.1.2 контрактов заказчик обязан в течение 2 рабочих дней с даты предоставления рассмотреть подготовленное подрядчиком задание на проектирование и при отсутствии замечаний утвердить и направить его подрядчику, при наличии замечаний - направить подрядчику для внесения изменений.

 В срок не позднее 2 рабочих дней с момента утверждения задания на проектирование предоставить подрядчику исходную документацию, необходимую для выполнения работ, в том числе в соответствии с Приложением №1 к настоящему контракту.

 Подрядчик обязан в соответствии с пунктами 5.1.1 и  5.1.3 контрактов  подготовить и представить на согласование заказчику задание на проектирование в срок не более 3 рабочих дней со дня заключения настоящего контракта, в случае наличия замечаний у заказчика, в течение 3 рабочих дней внести изменения в задание на проектирование и направить заказчику откорректированное задание па проектирование для утверждения; в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Заказчика исходной документации, необходимой для выполнения работ, выполним, проверку исходной документации и уведомить заказчика о наличии замечаний и недостатков исходной документации, способных повлиять на результаты выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок, установленный настоящим контрактом.

 В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня. следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации – пункт 8.2 контрактов.

В обоснование требований истец указывает, что на 22.01.2019 результаты инженерных изысканий и проектных работ, сопровождаемые положительным заключением государственной экспертизы и заключением достоверности сметной стоимости строительства по контрактам в адрес заказчика не поступили.

В связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ заказчиком произведено начисление неустойки за период с 21.12.2018 по 22.01.2019 в сумме 86 489,15 рублей.

Истец направил в адрес ответчика претензию от 21.12.2018 №2534 с требованием произвести оплату неустойки. 

Отказ ответчика от оплаты неустойки в заявленном размере, послужил основанием для обращения истца в суд с настоящими требованиями.

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей указаны основания, предусмотренные законом и иными правовыми актами, а также действия граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Исходя из условий контрактов, суд считает, что между сторонами сложились гражданские правоотношения, регулируемые нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (часть 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Согласно пункту 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

В соответствии со статьей 758 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работ. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность как за нарушение начального и конечного срока выполнения работ, так и за нарушение промежуточных сроков выполнения работ (пункт 2 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

По правилам статьей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации  неустойкой признается определенная договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Согласно пункту 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ), в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пени). 

Пунктом 7 статьи 34 Закона №44-ФЗ предусмотрено, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Ссылаясь на нарушение подрядчиком срока выполнения работ по контрактам истцом заявлено требование о взыскании с ответчика суммы неустойки исчисленной за период с 21.12.2018 по 22.01.2019 в размере 86 489,15 рублей, в том числе: по контракту № 2ПИР-18 от 31.10.2018 в размере 20 839,13 рублей; по контракту № 3-ПИР-18 от 07.11.2018 в размере 20 442,05 рублей; по контракту № 4-ПИР-18 от 17.11.2018 в размере 24 649,36 рублей; по контракту № 5ПИР-18 от 07.11.2018 в размере 20 558,61 рубль.

Ответчик, возражая против указанных требований, ссылается на несвоевременное рассмотрение заказчиком задания на проектирование, а также несвоевременное предоставление истцом исходной документации.

Рассмотрев указанные доводы подрядчика, суд признает их состоятельными, по следующим основаниям.  

Согласно статье 759 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком.

Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика (пункт 2 статьи 759 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 1 статьи 718 Гражданского кодекса Российской Федерации, заказчик обязан оказывать подрядчику содействие в выполнении работы, при неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать перенесения сроков исполнения работы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации, подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредставление технической документации, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328 ГК РФ).

Между тем, как следует из материалов дела, работы по контрактам не приостанавливались подрядчиком, дополнительных соглашений об изменении сроков исполнения контракта между сторонами не заключено, ответчик от исполнения контракта не отказывался. Вместе с тем продолжение работ исполнителем при наличии оснований для их приостановления в силу статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации само по себе не исключает возможности применения судом положений статей 405 Кодекса для определения размера ответственности при наличии вины кредитора. 

В силу пункта 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Согласно пункту 3 статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

В соответствии с пунктом 1 статьи 406 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства. Кредитор считается просрочившим также в случаях, указанных в пункте 2 статьи 408 данного Кодекса.

Предполагается, что в случае возникновения обстоятельств, находящихся вне контроля должника и препятствующих исполнению им обязательства, он освобождается от ответственности, если у него отсутствует возможность принять разумные меры для устранения таких обстоятельств.

Таким образом, должник не может быть привлечен к ответственности кредитором за просрочку исполнения, обусловленную просрочкой самого кредитора.

Как следует из пункта 4.1.1 контрактов, заказчик обязан в течение 2 рабочих дней с даты предоставления рассмотреть подготовленное подрядчиком задание на проектирование и при отсутствии замечаний утвердить и направить его подрядчику, при наличии замечаний – направить подрядчику для внесения изменений. 

В срок не позднее 2 рабочих дней с момента утверждения задания на проектирование предоставить подрядчику исходную документацию, необходимую для выполнения работ, в том числе в соответствии с приложением №1 (пункт 4.1.2 контрактов).

Материалами дела установлено, что ответчик а рамках исполнения обязательств по контрактам направил в адрес истца для рассмотрения проект задания на проектирование исх. №76 от 02.11.2018.

Заказчик согласовал  задания на проектирование 19.11.2018 года (исх. № № 2179, 2180, 2181, 2182), так же направил исходные данные.

Как указывает ответчик, исходные данные направлены заказчиком не в полном объеме, заказчик дополнительно также направлял исходные данные:

- по контракту № 2-ПИР-18 от 30.10.2018 письмом исх.№ 2264 от 28.11.2018;

- по контракту № 3-ПИР-18 от 07.11.2018 письмом исх.№ 2293 от 30.11.2018;

- по контракту № 4-ПИР-18 от 07.11.2018 письмом исх.№ 2276 от 29.11.2018;

- по контракту № 5-ПИР-18 от 07.11.2018 письмом исх.№ 2265 от 28.11.2018. 

Кроме того градостроительные планы по контрактам предоставлены подрядчику с нарушением срока установленного пунктом 4.1.2 контрактов:  

- по контракту № 2-ПИР-18 от 30.10.2018 - 07.12.2018 года (исх.№ 2360);

- по контракту № 3-ПИР-18 от 07.11.2018 - 03.12.2018 года (исх.№ 2312);

- по контракту № 4-ПИР-18 от 07.11.2018 - 30.11.2018 года (исх.№ 2294);

- по контракту № 5-ПИР-18 от 07.11.2018 - 10.12.2018 года (исх.№ 2379). 

Подрядчик в письме от 25.02.2019 исх. № 12 сообщил заказчику о необходимости предоставления  технической документации и условий присоединения по контрактам, указав, что не имеет возможности выполнить работы по корректировке проектной документации.

Письмами от 10.01.2019, от 19.02.2019, от 20.02.2019, от 28.12.2018 заказчик направил уточненные технические условия по контрактам.

Таким образом, исходные данные, а так же технические условия на присоединение к сетям водоснабжения, необходимые ответчику для производства проектных работ, в полном объеме подрядчику в установленные договором сроки не представлены, а уточненные технические условия представлены за пределами срока выполнения работ по контрактам.

Доказательств обратного истцом в материалы дела не представлено. 

С учетом изложенного, судом принимаются доводы ответчика об отсутствии необходимых данных для производства работ по разработке проектной документации по контрактам №2-ПИР-18 от 31.10.2018, №3- ПИР-18 от 07.11.2018, № 4-ПИР-18 от 07.11.2018, № 5-ПИР-18 от 07.11.2018, что повлекло объективное увеличение сроков выполнения проектных работ. 

Указанные факты истцом не опровергнуты, доказательства надлежащего исполнения обязанностей по контракту со стороны заказчика не представлены.

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу о том, что своими действиями по непредставлению в полном объеме исходных данных заказчик способствовал затягиванию сроков выполнения подрядчиком проектных работ, что свидетельствует об отсутствии оснований для вывода суда о просрочке исполнения обязательств со стороны ответчика и возникновения у истца права требовать взыскание неустойки за период с 21.12.2018 по 22.01.2019 по контрактам №2-ПИР-18 от 31.10.2018 в размере 20 839,13 рублей, №3- ПИР-18 от 07.11.2018 в размере 20 442,05 рублей, № 4-ПИР-18 от 07.11.2018 в размере 24 649,36 рублей , № 5-ПИР-18 от 07.11.2018 в размере 20 558,61 рубль, поскольку период просрочки исполнения обязательств заказчиком поглощает период заявленных истцом требований. 

Учитывая изложенное, принимая во внимание невозможность выполнения работ в силу объективных причин, не зависящих от подрядчика, а также положения статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания неустойки.

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Отказать в удовлетворении иска.

По заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение. 

Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Мотивированное решение изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

Решение может быть обжаловано в течение пятнадцати дней со дня принятия резолютивной части решения в Восьмой арбитражный апелляционный суд, а в случае составления мотивированного решения - со дня принятия решения в полном объеме.

          Судья

                             Михалева Е.В.