Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-223723/22-80-1647

г. Москва

09 июня 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 05 апреля 2023 года

Полный текст решения изготовлен 09 июня 2023 года

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Председательствующего судьи Пронина А.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Петерс М.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

истец ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТЕЛЬ" (121351, ГОРОД МОСКВА, БОБРУЙСКАЯ УЛИЦА, 10, 1, ОГРН: 1077746155211, Дата присвоения ОГРН: 23.01.2007, ИНН: 7731559654)

ответчик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТОРИЯ" (125438, ГОРОД МОСКВА, МИХАЛКОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 63 "Б", СТРОЕНИЕ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 23/4 XXI КОМНАТА 13, ОГРН: 1137746526433, Дата присвоения ОГРН: 20.06.2013, ИНН: 7743892530)

о взыскании 813 369 руб. 19 коп.

в заседании приняли участие:

от истца: Заболотная А.В. по доверенности  10.11.2022 г.

от ответчика: Микаелян Э.К. по доверенности от 11.11.2022 г. 

 

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТЕЛЬ" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТОРИЯ" о взыскании штрафных санкций в размере 813 369 руб. 19 коп.

Истец поддержал исковые требования  в полном объеме.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, по доводам, изложенным в отзыве на иск.

Суд, рассмотрев исковые требования, выслушав доводы сторон, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 18 декабря 2020 года между Обществом с ограниченной ответственностью «КАПИТЕЛЬ» (генподрядчик, истец) и Обществом с ограниченной ответственностью «АКТОРИЯ» (подрядчик, ответчик) был заключен договор № 1812/ЖД СЕР-4-3/ДДв от 18 декабря 2020 года, в соответствии с условиями которого, подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по изготовлению и монтажу дверей МОП 1 этажа по дизайн-проекту на объекте «Жилой дом по адресу: ЦАО, Таганский район, Серебрянический пер., вл. 4/3, стр. 2,3, вл. 6/5,стр.2» в соответствии с проектной, рабочей документацией за цену и в сроки, установленные настоящим договором, соблюдая промежуточные сроки и общий срок строительства объекта, установленные графиком производства работ, а генподрядчик - принять и оплатить работы, выполненные подрядчиком в соответствии с требованиями договора.

Договор заключен во исполнение договора № СМР-СЕР-4-3 от 27 июня 2018 года, заключенного между АО «Центр-Инвест» (застройщик) и ООО «КАПИТЕЛЬ» подрядных работ по строительству Жилого дома по адресу: ЦАО, Таганский район, Серебрянический пер., вл. 4/3, стр. 2, 3, вл. 6/5, стр. 2».

Согласно п. 2.4 договора, результатом выполненных работ по договору является законченный строительством объект, который введен в эксплуатацию и в отношении, которого получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы, подписан итоговый акт исполнения обязательств между сторонами к договору.

В соответствии с п. 3.1 договора подрядчик обязуется выполнить работы (оказать услуги) в сроки, установленные графиком производства работ, а именно:

·                    комплекс работ по изготовлению и монтажу дверей МОП 1 этажа по дизайн-проекту (1-я очередь. ЖДЗ. ЖД4) - не позднее 25 февраля 2021 г.

·                    комплекс работ по изготовлению и мои гажу дверей МОП 1 этажа по дизайн-проекту (2-я очередь. ЖД1, ЖД2) - не позднее 25 марта 2021 г.

Согласно п. 4.1.1 цена договора в соответствии с протоколом договорной цены составляет 4 517 136 руб. 83 коп., в том числе НДС 20% 752 856 руб. 14 коп., формируется из расходов, возникающих в связи с выполнением подрядчиком функций в соответствии с настоящим договором.

Согласно п. 4.2.1 договора, ценой договора является стоимость всего фактически выполненного подрядчиком объема работ, в том числе, но не ограничиваясь: стоимость всех работ согласно проектной и рабочей документации; стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для строительства и эксплуатации объекта изделий, конструкций и материалов, поставляемого подрядчиком в соответствии с протоколом договорной цены; затраты, связанные с обеспечением строительства рабочими, в том числе иностранными, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание: таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию Российской Федерации в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления; транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых подрядчиком и привлекаемыми им подрядчиками которые включают также расходы на получение, разгрузку, хранение и последующее использование материалов в соответствии с настоящим договором; накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, сборы любого характера в соответствии с законодательством Российской федерации; стоимость понесенных подрядчиком затрат, в том числе сезонного характера, необходимые для производства работ до сдачи объекта, эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи); все расходы подрядчика связанные с внесением любых изменений и прочие расценки, указанные в настоящем договоре, включают все затраты, издержки подрядчика за выполнение работ в полном объеме; включают расходы на получение, разгрузку, хранение и последующее использование материалов в соответствии с настоящим договором, а также погрузку, транспортировку и удаление излишних материалов; все расходы подрядчика возникающие в связи с осуществлением работ в соответствии со всеми применимыми требованиями государственных органов в области техники безопасности, а также требованиями генподрядчика, касающимися техники безопасности, охраны и безопасности объекта и правил пожарной защиты, включая непредвиденные.

Цена договора установлена в российских рублях и не подлежат изменению в случае колебаний обменного курса какой-либо валюты по отношению к российскому рублю.

Превышение подрядчиком объемов и стоимости работ (оказания услуг), не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, оплачивается подрядчиком за свой счет.

В соответствии с п. 4.3.2 договора оплата выполненных строительно-монтажных работ осуществляется генподрядчиком в течение 22 (двадцати двух) рабочих дней с даты подписания генподрядчиком акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за отчетный месяц, при условии подтверждения работ застройщиком и генподрядчиком (пп. 6.1.1 - 6.1.2 договора) размере 97 % от стоимости работ, указанной в акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). В случае перечисления авансового платежа согласно условиям настоящего договора, оплата выполненных работ производится с учетом удержания авансового платежа, перечисленного подрядчику.

При этом денежная сумма в размере 3% от стоимости работ, указанной в акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) удерживается генподрядчиком в качестве обеспечения выполнения подрядчиком принятых на себя обязательств (сумма гарантийного удержания).

Сумма гарантийного удержания на период гарантийных обязательств (эксплуатации) в размере З (трех) % от стоимости работ, выплачивается подрядчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента окончания гарантийного (эксплуатационного) периода, на основании выставленного счета.

При этом согласно п. 4.3.6 договора оплата работ, выполненных подрядчиком, будет осуществлена при условии предоставления подрядчиком в полном объеме следующих документов: подписанных генподрядчиком актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), при этом акты приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и любые иные аналогичные документы, используемые сторонами, никоим образом не ограничивают, не уменьшают или не отменяют обязательства или ответственность подрядчика по настоящему договору (пп. 4.3.6.1 договора); исполнительной документации на выполненный в отчетном периоде объем работ (пп. 4.3.6.2 договора); технических паспортов и сертификатов на материалы, использованные при выполнении работ в отчетном периоде (пп. 4.3.6.3 договора); отчетов по входному контролю качества за отчетный период (пп. 4.3.6.4 договора): отчетов по лабораторному контролю. (Согласно требованиям Гост. СНиП и иных нормативных документов регулирующие качество строительства) (пп. 4.3.6.5 договора); заполненных за отчетный период в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы, общих и специальных журналов работ, а также журнала учета выполненных работ (КС-ба) (пп. 4.3.6.6 договора); документов, подтверждающих оплату выставленных генподрядчиком штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором (пп. 4.3.6.7. договора)

Генподрядчик вправе запросить у подрядчика и любые иные документы, необходимые с целью соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации.

Согласно п. 4.3.7 договора, генподрядчик оставляет за собой право удерживать причитающиеся подрядчику суммы платежей по настоящему договору до тех пор, пока не будет получена вся относящаяся к работам необходимая документация, которая должна соответствовать условиям договора, и не является основанием для каких-либо штрафных санкций, взысканий или иных сборов и начислений. Суммы платежей, удержанные по причине несвоевременной подачи необходимой документации, выплачиваются в следующем месяце.

Порядок сдачи-приемки работ установлен разделом 6 договора.

В соответствии с п. 15.2 договора гарантийный срок на результат выполненных работ, материалов, конструкций и изделий смонтированного на объекте устанавливается с даты подписания итогового акта исполнения своих обязательств сторонами, а в случае досрочного расторжения - с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных до даты расторжения договора работ (п.6.2.9 договора) и составляет: на строительно-монтажные и общестроительные работы - 60 (шестьдесят) месяцев; на материалы - срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего материала, но не менее гарантийного срока, указанного в п. 15.2.1 договора; на мягкие кровли - 10 лет.

Из материалов дела следует, что по состоянию на дату подачи настоящего искового заявления генподрядчиком произведено авансирование подрядчика в рамках договора на сумму в размере 6 876 045 руб. 17 коп., в т.ч. НДС, подрядчиком выполнены работы по договору на сумму 7 011 559 руб. 27 коп., в т.ч. НДС и с учетом суммы гарантийного удержания в размере 135 514 руб. 10 коп., в т.ч. НДС, что подтверждается платежными поручениями № № 23 от 12.01.2021 г. на сумму 3 613 708 руб. 80 коп., 328 от 10.02.2021 г. на сумму 2 000 000 руб., 1043 от 16.03.2021 г. на сумму 500 000 руб., 2184 от 14.05.2021 г. на сумму 300 000 руб., актом зачета взаимных требований от 30.09.2021 г. на сумму 462 336 руб. 37 коп. и актами о приемке выполненных работ № 1 и 2 (форма КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат № 1 и 2 (форма КС-3) за следующие периоды: с 18.12.2020 г. по 30.04.2021 г., с 01.05.2021 г. по 31.08.2021 г., при этом подрядчиком не производилась оплата генподрядчику штрафных санкции по договору в размере 813 369 руб. 19 коп., без НДС, исходя из следующих обстоятельств.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 16.2 договора установлено, что за нарушение срока завершения работ в полном объеме, указанного в п. 3.3 договора, генподрядчик вправе требовать с подрядчика неустойку в размере 0,1 %, от цены договора за каждый день просрочки.

Согласно расчету истца, проверенному судом и не оспоренному ответчиком, сумма неустойки за нарушение срока завершения работ по договору составила 813 084 руб. 63 коп. за период с 26.03.2021 г. по 21.09.2021 г.

Предоставленный контррасчет ответчика является необоснованным, так как дата возникновения задолженности 26.05.2021 г. на которую указывает ответчик не подтверждена, нигде не фигурирует в условиях договора, ввиду чего невозможно установить на основании чего возникла данная дата.

Пунктом 16.6 договора установлено, что в случае нарушения срока предоставления генподрядчику исполнительной документации генподрядчик вправе требовать с подрядчика неустойку в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

В соответствии с п. 6.1.1 договора, подрядчик обязан до 20 (Двадцатого) числа текущего месяца, предоставить генподрядчику: Журнал учета выполненных работ (форма № КС-ба); в 3 (трех) экземплярах Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), подписанные со стороны подрядчика; в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, один на электронном носителе, подписанную техническим надзором, авторским надзором, генеральным подрядчиком, техническим заказчиком, эксплуатирующей организацией исполнительную документацию (оригинала), с предоставлением паспортов и сертификатов, испытаний, лабораторных и иных заключений на фактически выполненные работы в отчетном периоде с предоставлением реестра.

В случае не предоставления исполнительной документации на объем работ, предъявляемый подрядчиком к приемке генподрядчиком за отчетный период, подрядчик обязуется предоставить совместно с общим журналом работ (Форма № КС-ба). актом сдачи-приемки работ (Форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) гарантийное письмо, согласованное с генподрядчиком, на предоставление исполнительной документации по предъявленным к приемке работам с указанием сроков предоставления настоящей исполнительной документации.

Из служебной записки начальника участка ООО «КАПИТЕЛЬ» от 09 сентября 2021 года следует, что подрядчиком трижды допущено нарушение сроков выполнения обязательств, установленных протоколом рабочего совещания от 01 сентября 2021 года, а именно п. 2 (предоставить гарантийное письмо на предоставление ИД на все виды работ, указанные в приложении к протоколу рабочего совещания) и п. 3 (предоставить подписанную ИД на все виды работ).

Крайний установленный срок выполнения указанных обязательств - до 16 августа 2021 года.

О нарушении сроков выполнения обязательств ответчиком свидетельствует п. 2 протокола рабочего совещания от 01.09.2021 г. по которому ответчик обязан был в срок до 19.07.2021 г., потом в срок до 28.07.2021г., а в последующем до 16.08.2021 г. «Предоставить гарантийное письмо на предоставление исполнительной документации (ИД) на все виды работ, указанные в приложении № 1 к протоколу» и аналогично в соответствии с п. 3 протокола рабочего совещания ответчик обязан был в срок до 22.07.2021 г., 28.07.2021 г., 16.08.2021 г. «Предоставить ИД на все виды работ, указанные в приложение №1 к Договору». Однако все вышеуказанные сроки выполнения обязательств подрядчиком были нарушены.

Согласно п. 1.34 договора «Протокол рабочего совещания» - Протокол, отражающий суть (итоги) рабочего совещания.

Настоящий протокол оформляется генподрядчиком и предоставляется в адрес подрядчика, путем его направления на адрес электронной почты подрядчика, указанный в разделе 24 настоящего договора.

При этом подрядчик, получивший настоящий протокол, обязуется в течение 1 (одного) дня направить в адрес генподрядчика (на адрес электронной почты, указанный в разделе 24 настоящего договора) подписанный протокол (скан версия) либо дать мотивированные замечания к настоящему протоколу. В случае не направления подрядчиком в адрес генподрядчика в срок, подписанного со своей стороны протокола, протокол считается подписанным подрядчиком без замечаний.

Относительно протоколов рабочих совещаний, направленных в адрес подрядчика замечаний не было, следовательно протокол рабочего совещания считается подписанным подрядчиком без замечаний.

Протоколы рабочих совещаний свидетельствуют о неоднократном нарушении стороной ответчика сроков производства/выполнения работ по договору.

Согласно расчету истца, проверенному судом и не оспоренному ответчиком, сумма неустойки за нарушение срока предоставления генподрядчику исполнительной документации по договору составила 162 616 руб. 93 коп. за период с 26.03.2021 г. по 21.09.2021 г.

Пунктом 16.17 договора установлено, что за нарушение сроков выполнения обязательств подрядчиком, установленных протоколом рабочего совещания, генподрядчик оставляет за собой право выставить штрафные санкции в размере 10 000 тысяч руб. за каждое выявленное нарушение. За неоднократное нарушение (3-х и более раз) подрядчик уплачивает генподрядчику штраф в размере 300 000 руб.

Согласно расчету истца, проверенному судом и не оспоренному ответчиком, сумма штрафа за нарушение срока выполнения обязательств, установленных протоколом рабочего совещания составила 300 000 руб.

В соответствии с п. 16.20 договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств по уплате неустойки (штрафа), предусмотренных договором, генподрядчик имеет право производить оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа) или удерживать оплату по договору до исполнения обязательств подрядчиком по уплате неустойки (штрафа).

Согласно ст. 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

30 сентября 2021 года ООО «КАПИТЕЛЬ» был произведен зачет взаимных требований на сумму 462 336 руб. 37 коп., в рамках исполнения сторонами обязательств по договору.

С учетом произведенного зачета сумма штрафных санкций составила 813 369 руб. 19 коп. Доказательств чрезмерности заявленной ко взысканию суммы неустойки, ответчик суду не представил. Само по себе ходатайство о применении ст. 333 ГК РФ в отсутствии доказательств чрезмерности, не является основанием для снижения суммы неустойки.

Доводы отзыва ответчика признаны судом необоснованными и не состоятельными и отклонены ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела, представленным в дело доказательствам.

В соответствии со статьями 102 и 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на ответчика.

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 307, 309, 310, 330 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТОРИЯ" в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТЕЛЬ" штрафные санкции в размере 813 369 (Восемьсот тринадцать тысяч триста шестьдесят девять) руб. 19 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 19 267 (Девятнадцать тысяч двести шестьдесят семь) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

 

Судья                                                                                                                   Пронин А.П.