Арбитражный суд Пензенской области

Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000,

тел.: +78412-52-99-97, факс: +78412-55-36-96,

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ, 

рассмотренного в порядке упрощенного производства

Дело № А49-14745/2018

г. Пенза

11 февраля 2019 г.

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи М.Н. Холькиной, рассмотрев в порядке упрощенного производства без вызова сторон дело по иску 

государственного казенного учреждения "Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области" (440000, 

<

...>; ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Запад-Уралдорпроект" (614051, 

<

...>; ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 

о взыскании неустойки, начисленной за период с 31.03.2018 по 01.10.2018 за нарушение сроков выполнения обязательств по государственному контракту № 0855200000518000022-0234940-01 от 26.02.2018 в сумме 27 730 руб. 44 коп., начисленной по условиям пункта 7.11. госконтракта, 

руководствуясь ст. ст. 309, 310, 330, 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.5 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 110, 167-170, 228-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая отсутствие оснований для применения положений 10, 179, 719 Гражданского кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, 

 

Р Е Ш И Л :

Исковые требования государственного казенного учреждения "Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области" удовлетворить полностью, расходы по уплате государственной пошлины отнести на ответчика.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Запад-Уралдорпроект" в пользу государственного казенного учреждения "Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области" неустойку в сумме 27 730 руб. 44 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2 000 руб. 00 коп.

 

Решение

 подлежит немедленному исполнению.

 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия резолютивной части решения, а в случае составления мотивированного решения по заявлению стороны - со дня принятия решения в полном объеме.

 

             Судья                                                      М.Н. Холькина