Арбитражный суд Хабаровского края 

<

...>, www.khabarovsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-7752/2025

г. Хабаровск

28 августа 2025 года

Резолютивная часть судебного акта объявлена «14» августа 2025 г. Арбитражный суд Хабаровского края  

в составе судьи Трещевой В.Н. при ведении протокола судебного заседания секретарем Яровым Е.Р., 

рассмотрев в заседании суда дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680000, 

<

...>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Вентсантехстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680051, 

<

...>)  

о взыскании 1 575 594 руб. 34 коп. при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО1, представитель по доверенности б/н от 18.04.2024, диплом о высшем образовании;  

от ответчика – не явились. 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект» (далее – «истец») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Вентсантехстрой» (далее – «ответчик») о взыскании неосновательного обогащения по договору № В140324 от 14.03.2024 в размере 1 021 565 руб. 74 коп., по договору № К180324 от 18.03.2024 в размере 554 028 рублей 60 коп., всего 1 575 594 руб. 34 коп., а так же судебных расходов в виде уплаченной государственной пошлины.  

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 19.05.2025 исковое заявление принято к производству, назначено предварительное судебное заседание на «14» августа 2025 г. на 14 час. 30 мин.  

Представитель истца в предварительном судебном заседании настаивал на заявленных требованиях в полном объёме.  

Ответчик, извещенный надлежащим образом в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о времени и месте судебного разбирательства, явку своего представителя в предварительное судебное заседание не обеспечил, мотивированный отзыв на исковое заявление не представил.  

В соответствии с частью 1 статьи 156 АПК РФ непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.  

В силу части 3 статьи 156 АПК РФ при неявке в судебное заседание ответчика, извещенным надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, суд полагает возможным рассмотреть дело в его отсутствие по имеющимся в деле доказательствам.  

Зафиксированным в протоколе судебного заседания определением, при отсутствии возражений представителя истца, на основании части 4 статьи 137 АПК РФ с учетом разъяснений, изложенных в пункте 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству», суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание первой инстанции.  

В ходе судебного разбирательства суд, рассмотрев материалы дела, установил следующие обстоятельства.  

1) Как следует из материалов дела, между Обществом с ограниченной ответственностью «Стройкомплект» (далее - «заказчик») и Обществом с ограниченной ответственностью «Вентсантехстрой» (далее - «подрядчик») заключен договор № В140324 от 14.03.2024, согласно пункту 1.1 которого подрядчик обязуется по заданию заказчика поставить, демонтировать и смонтировать систему вентиляции на объекте: Банк ВТБ в Амурской области, расположенный по адресу: 

<

...> Октября, д. 63 (далее - Работы, Объект), а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.  

Пунктом 2.1 договора установлено, что цена договора составляет 7 697 413,82 (семь миллионов шестьсот девяносто семь тысяч четыреста тринадцать) рублей 82 копейки, в т.ч. НДС 20% 1 282 902,30 (один миллион двести восемьдесят две тысячи девятьсот два) рубля 30 коп.  

Согласно пункту 2.2 договора, цена договора включает в себя стоимость Работ, поставки Оборудования и поставки материалов в полном объеме с учетом затрат на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также затраты на транспортировку рабочих, доставку и разгрузку необходимого оборудования и материалов, и прочие затраты, взимаемые с подрядчика, в связи с исполнением договора.  

Пунктом 3.1 договора установлено, что заказчик обязуется в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания настоящего Договора перечислить Подрядчику аванс на основании счета в размере 50 % (пятидесяти процентов) от стоимости оборудования, а также перечислить аванс на основании счета в размере 50 % (пятидесяти процентов) от стоимости материалов, указанной в Локально-сметном расчёте (Приложение № 1).  

- заказчик обязуется в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания настоящего Договора перечислить Подрядчику денежные средства в размере 20 % (двадцати процентов) от монтажных работ, указанной в Локально-сметном расчёте (Приложение № 1).  

- заказчик обязуется в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня поступления аванса, согласно п. 3.2. настоящего Договора, перечислить Подрядчику аванс на основании счёта в размере 20 % (двадцати процентов) от монтажных работ, а также перечислить аванс на основании счета в размере 50 % (пятидесяти процентов) от стоимости материалов, указанной в Локально-сметном расчёте (Приложение № 1).  

- заказчик обязуется в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня поступления аванса, согласно п. 3.2. настоящего Договора, перечислить Подрядчику денежные средства на основании счета в размере 50 % (пятидесяти процентов) от стоимости оборудования, указанной в Локально-сметном расчёте (Приложение № 1).  

- окончательный расчет производится по факту выполнения работ, предусмотренных Договором, на основании счета в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.  

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что срок выполнения (завершения) работ: в течение 110 (сто десять) календарных дней с даты подписания настоящего договора.  

Как следует из пункта 6.1 договора, проверка выполненных работ осуществляется совместно представителями заказчика и подрядчика с выездом на место производства работ. Объемы выполненных работ определяются в физическом выражении с учетом их качества, предусмотренного Локально-сметным расчётом (приложение № 1). По итогам совместной проверки подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней передает заказчику отчетную документацию:  

- форма КС-2 - Акт приемки выполненных работ в 2-х экземплярах; - форма КС-3 - Справка о стоимости выполненных работ; 

- формы М-29 - Отчет о расходе материалов Заказчика (при наличии да паль чес ко го сырья):  

- акты освидетельствования скрытых работ (при наличии таковых работ);  

- документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность материалов, оборудования, которые были применены в ходе выполнения Работ по договору;  

- счет; - счет-фактура; 

- документы, подтверждающие стоимость накладных расходов.  

Пунктом 11.2 договора установлено, что заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:  

- в случае просрочки выполнения работ более чем на 10 (десять) календарных дней. 

- в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.  

Согласно пункту 1, 2, 3, 4 дополнительного соглашения № 1 от 21.03.2024 к договору, в процессе выполнения работ по договору № В140324 от 14 марта 2024 г. были выявлены дополнительные (неучтенные проектом) работы.  

1. По настоящему дополнительному соглашению, Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по поставке материалов и монтажу системы вентиляции на объекте: Банк ВТБ в 

<

...> Октября, д. 63, утвержденные Заказчиком и приведенные в Приложении № 1,2 к настоящему дополнительному соглашению и сдать результаты работы Заказчику. Последний обязуется принять результаты работ и оплатить их.  

2. Стоимость работ по дополнительному соглашению 1 229 979 (один миллион двести двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 72 копейки, в том числе НДС 20% в сумме 204 996 (двести четыре тысячи девятьсот девяносто шесть) рублей 62 копейки, и определяется локальным сметным расчетом № 1,2 (Приложение № 1,2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения.  

3. Заказчик производит авансирование оплаты выполняемых работ размере 100% от общей стоимости материалов и оборудования и 40% за монтажные работы по настоящему дополнительному соглашению, в течении 3 (трех) дней после подписания дополнительного соглашения.  

4. Окончательный расчет производится после сдачи работ и подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ КС-2 и КС-3. Подрядчик в течение 3 календарных дней после подписания акта приёмки выполненных работ выставляет Заказчику счет. Заказчик оплачивает счет в течение 5 календарных дней с момента получения счёта.  

2) Кроме того, между Обществом с ограниченной ответственностью «Стройкомплект» (далее - «заказчик») и Обществом с ограниченной ответственностью «Вентсантехстрой» (далее - «подрядчик») заключен договор № К180324 от 18.03.2024, согласно пункту 1.1  

которого подрядчик обязуется по заданию Заказчика поставить и смонтировать систему кондиционирования на объекте: Банк ВТБ в Амурской области, расположенный по адресу: 

<

...> Октября, д. 63 (далее - Работы, Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.  

Согласно пункту 2.1 договора, цена договора составляет 10 440 361,26 (десять миллионов четыреста сорок тысяч триста шестьдесят один рубль двадцать шесть копеек), в т.ч. НДС (20%) 1 740 060,21 руб. (один миллион семьсот сорок тысяч шестьдесят рублей двадцать одна копейка).  

Согласно пункту 2.2 договора, цена договора включает в себя стоимость работ, поставки Оборудования и поставки материалов в полном объеме с учетом затрат на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также затраты на транспортировку рабочих, доставку и разгрузку необходимого оборудования и материалов, и прочие затраты, взимаемые с подрядчика, в связи с исполнением договора.  

Пунктом 3.1 договора установлено, что заказчик обязуется в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания настоящего Договора перечислить Подрядчику аванс на основании счета в размере 100 % (ста процентов) от стоимости оборудования, а также перечислить аванс на основании счета в размере 50 % (пятидесяти процентов) от стоимости материалов, указанной в Локально-сметном расчёте (Приложение № 1).  

- заказчик обязуется в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня поступления аванса, согласно п. 3.2. настоящего Договора, перечислить Подрядчику аванс на основании счёта в размере 20 % (двадцати процентов) от монтажных работ, указанной в Локально-сметном расчёте (Приложение № 1).  

- заказчик обязуется в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания настоящего Договора перечислить Подрядчику денежные средства в размере 20 % (двадцати процентов) от монтажных работ, а также перечислить денежные средства на основании счета в размере 50 % (пятидесяти процентов) от стоимости материалов, указанной в Локально-сметном расчёте (Приложение № 1).  

- окончательный расчет производится по факту выполнения работ, предусмотренных Договором, на основании счета в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.  

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что срок выполнения (завершения) работ: в течение 110 (сто десять) календарных дней с даты подписания настоящего договора.  

Как следует из пункта 6.1 договора, проверка выполненных работ осуществляется совместно представителями заказчика и подрядчика с выездом на место производства работ. Объемы выполненных работ определяются в физическом выражении с учетом их качества, предусмотренного Локально-сметным расчётом (приложение № 1). По итогам совместной проверки подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней передает заказчику отчетную документацию:  

- форма КС-2 - Акт приемки выполненных работ в 2-х экземплярах; - форма КС-3 - Справка о стоимости выполненных работ; 

- формы М-29 - Отчет о расходе материалов Заказчика (при наличии да паль чес ко го сырья):  

- акты освидетельствования скрытых работ (при наличии таковых работ);  

- документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность материалов, оборудования, которые были применены в ходе выполнения Работ по договору;  

- счет; - счет-фактура; - документы, подтверждающие стоимость накладных расходов. 

Пунктом 11.2 договора установлено, что заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:  

- в случае просрочки выполнения работ более чем на 10 (десять) календарных дней.  

- в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.  

Во исполнение условий спорных договоров, истец перечислил на расчётный счёт ответчика авансовые платежи на общую сумму 17 474 257 руб. 01 коп.:  

- по договору № В140324 от 14.03.2024 года на сумму 7 763 273 руб. 80 коп. (платежное поручение от 12.04.24 № 573 от 12.04.2024 г. на сумму 51 284,00 руб.% платежное поручение от 14.03.24 № 580 от 14.03.2024 г. на сумму 548 616,83 руб.; платежное поручение от 29.03.24 № 737 от 29.03.2024 г. на сумму 2 966 000,35 руб.; платежное поручение от 10.04.24 № 547 от 10.04.2024 г. на сумму 436 559,33 руб.; платежное поручение от 12.04.24 № 574 от 12.04.2024 г. на сумму 436 559,33 руб.; платежное поручение от 25.04.24 № 707 от 25.04.2024 г. на сумму 1 008 253,96 руб.; платежное поручение от 24.05.24 № 911 от 24.05.2024 г. на сумму 316 000,00 руб.)  

- по договору № К180324 от 18.03.2024 на сумму 9 710 983 руб. 21 коп. (платежное поручение от 22.03.2024 г. № 658 от 22.03.2024 г. на сумму 884 417,79 руб.; платежное поручение от 22.03.24 № 660 от 22.03.2024 г. на сумму 6 796 616,49 руб.; платежное поручение от 05.04.24 № 512 от 05.04.2024 г. на сумму 884 417,79 руб.; платежное поручение от 10.04.24 № 546 от 10.04.2024 г. на сумму 377 981,84 руб.; платежное поручение от 12.04.24 № 575 от 12.04.2024 г. на сумму 377 981,84 руб.; платежное поручение от 08.05.24 № 785 от 08.05.2024 г. на сумму 165 567,46 руб.; Платежное поручение от 24.05.24 № 912 от 24.05.2024 г. на сумму 224 000,00 руб.  

По факту выполнения работ с нарушением сроков в январе 2025 года между сторонами были подписаны акты о приемке выполненных работ по форме КС2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС 3 на общую сумму 15 898 662 руб. 67 коп., в том числе:  

- 6 741 708 рублей 06 коп. по договору № В140324 от 14.03.2024, что подтверждается подписанными сторонами актами выполненных работ № 6, № 8, КС3, КС2 от 09.01.2025.  

- 9 156 954 рублей 61 коп. по договору № К180324 от 18.03.2024, что подтверждается подписанными сторонами актом выполненных работ № 7, КС3, КС2 от 09.01.2025.  

Таким образом, переплата по двум спорным договорам составила 1 575 594 руб.34 коп. 

19.03.2025 истец направил в адрес ответчика уведомление о расторжении спорных договоров, а так же требование возвратить неотработанный аванс в течении 10 рабочих дней с момента получения претензии.  

Поскольку вышеуказанное требование оставлено без удовлетворения, истец обратился с настоящим иском в Арбитражный суд Хабаровского края.  

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд признал заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.  

Федерации (далее - ГК РФ) лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.  

В силу пункта 2 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.  

Пунктом 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора.  

Из материалов дела следует, что истец 19.03.2025 направил в адрес ответчика уведомление о расторжении спорных договоров в одностороннем порядке с требованием возвратить неотработанный аванс в размере 1 575 594 руб. 34 коп.  

Как установлено статьей 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, заявления, уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.  

Уведомление о расторжении договоров получено ответчиком 12.05.2025, следовательно со следующего для указанной даты договоры подряда следует считать расторгнутыми, а именно с 13.05.2025.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства.  

В пункте 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора» указано, что по смыслу пункта 2 статьи 453 Кодекса при расторжении договора прекращается обязанность должника совершать в будущем действия, которые являются предметом договора.  

Вместе с тем, условия договора, которые в силу своей природы предполагают их применение и после расторжения договора (например, гарантийные обязательства в отношении товаров или работ по расторгнутому впоследствии договору; условие о рассмотрении споров по договору в третейском суде, соглашения о подсудности, о применимом праве и т.п.) либо имеют целью регулирование отношений сторон в период после расторжения (например, об условиях возврата предмета аренды после расторжения договора, о порядке возврата уплаченного аванса и т.п.), сохраняют свое действие и после расторжения договора.  

Судом установлен факт перечисления истцом денежных средств в качестве аванса в счет оплаты по спорным договорам на общую сумму 17 474 257 руб. 01 коп.  

Представленными в материалы дела актами по форме КС-2 и КС-3 подтверждается факт выполнения подрядчиком работ по спорным договорам на общую сумму 15 898 662 руб. 67 коп.  

Доказательств выполнения работ по договорам подряда на остаток суммы в размере 1 575 594 руб. 34 коп., а так же, что данные денежные средства возвращены истцу, не представлено.  

Таким образом, требование истца о взыскании неосновательного обогащения в размере 1 575 594 руб. 34 коп. подлежит удовлетворению.  

Судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску в соответствии с частью 1 статьи 110 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской относятся на ответчика в размере 72 268 руб. 00 коп., учитывая, что истцом уплачена государственная пошлина в размере 72 270 (платёжное поручение № 1448 от 07.05.2025), а излишне уплаченная подлежит возврату из федерального бюджета в соответствии со статьёй 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.  

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Вентсантехстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неосновательное обогащение в размере 1 575 594 руб. 34 коп.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Вентсантехстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) судебные расходы в виде уплаченной госпошлины в размере 72 268 руб. 00 коп.  

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Стройкомплект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета уплаченную госпошлину в размере 2 руб. 00 коп.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья В.Н. Трещева