АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-202266/2022-63-1543

г. Москва

20 марта 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 16 марта 2023 года 

Полный текст решения изготовлен 20 марта 2023 года  

Арбитражный суд г. Москвы  

в составе судьи Ликшикова Э.Б. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании суда дело по иску ООО "КРОНОС",  432071, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛЬЯНОВСК ГОРОД, ФЕДЕРАЦИИ 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 26.05.2017, ИНН:  

<

***>  

к ООО "ПИЛИГРИМ", 125315, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  АЭРОПОРТ, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д. 66, ПОМЕЩ. 1Н, КОМ./ОФИС 18/127,  ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 24.09.2019, ИНН: 

<

***>  

о взыскании 1169384 руб. 48 коп. 

по встречному иску ООО "ПИЛИГРИМ", 125315, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЭРОПОРТ, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д. 66,  ПОМЕЩ. 1Н, КОМ./ОФИС 18/127, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  24.09.2019, ИНН: 

<

***>  

к ООО "КРОНОС", 432071, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛЬЯНОВСК ГОРОД,  ФЕДЕРАЦИИ 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения  ОГРН: 26.05.2017, ИНН: 

<

***>  

о взыскании 4196834 руб. 84 коп. при участии: 

от истца – ФИО2 по дов. от 28.05.2017 № б/н, ФИО3 по дов. от  28.05.2017 № б/н;  

от ответчика – ФИО4 по дов. от 18.10.2022 № б/н; 

УСТАНОВИЛ:

ООО "КРОНОС", 432071, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛЬЯНОВСК ГОРОД,  ФЕДЕРАЦИИ 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения  ОГРН: 26.05.2017, ИНН: 

<

***> обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском  к ООО "ПИЛИГРИМ", 125315, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  АЭРОПОРТ, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д. 66, ПОМЕЩ. 1Н, КОМ./ОФИС 18/127,  ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 24.09.2019, ИНН: 

<

***> о  

взыскании 1169384 руб. 48 коп., в том числе: неосновательного обогащения в размере  996890 руб. 11 руб. 00 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в  размере 172494 руб. 37 коп. за период с 06.11.2019 по 12.09.2022, за период с 13.09.2022  по день вынесения судом решения – исчисленные исходя из размера ключевой ставки,  установленной Банка России, за период со дня, следующего за днем вынесения судом  решения, по день фактической уплаты долга истцу, исчисленные из расчета ключевой  ставки, установленной Банком России на этот период.  

Представитель истца в судебном заседании настаивал на удовлетворении  первоначальных исковых требований в полном объеме, встречные исковые требования  не признал, по доводам, изложенным в письменном отзыве.  

Представитель ответчика в судебном заседании первоначальные исковые  требования не признал, по доводам, изложенным в письменном отзыве, настаивал на  удовлетворении встречных исковых требований.  

Суд, рассмотрев заявление представителя истца о фальсификации,  оспариваемого истцом доказательства, пришел к выводу о необоснованности данного  заявления.  

При этом суд исходил из следующего. 

Под фальсификацией доказательств по рассматриваемому арбитражному делу  понимается подделка либо фабрикация вещественных доказательств и (или)  письменных доказательств (документов).  

Статья 303 УК РФ установила уголовную ответственность за фальсификацию  доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, или его  представителем, а, следовательно, субъектом данного преступления может быть лицо,  участвующее в деле, или его представитель. С субъективной стороны фальсификация  доказательств по гражданскому делу может быть совершена только при наличии  прямого умысла.  

Таким образом, заявление о фальсификации, сделанное по арбитражному делу,  должно иметь отношение непосредственно к лицу, участвующему в деле или его  представителю и в данном случае достоверность такого заявления должна проверяться  судом, рассматривающим дело.  

Однако, представитель истца, заявив о фальсификации доказательств, не заявил  о том, что оспариваемым им документ сфальсифицирован непосредственно истцом или  его представителем, а указал только на то, что оспариваемые им документы не  подписывались истцом и его представителем.  

Учитывая, что представитель истца не указал на то, что оспариваемые им  документы сфальсифицированы ответчиком или его представителем, у суда не имеется  оснований, для проверки достоверности данного заявления, в отношении указанных  лиц, в связи с чем, заявления представителя истца о фальсификации подлежит  отклонению.  

Кроме того, истец для проверки заявления о фальсификации доказательств,  ходатайство о проведении судебной экспертизы в порядке ст. 82 АПК РФ не заявлял.  

Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав представителей сторон, оценив  представленные документы, приходит к выводу, что первоначальные исковые  требования подлежат удовлетворению в части, тогда как встречные исковые  требования не подлежат удовлетворению.  

Как усматривается из материалов дела, 06.11.2019 ООО «Кронос» платежным  поручением № 363952 перечислило на расчетный счет ООО «Пилигрим» 24975 руб. 00  коп. При этом в графе Назначение платежа было указано: «Оплата по дог. подряда №  1/09 от 03.09.2019 (аванс 30%), за работы по монтажу ограждений лест. клетки. В том  числе НДС 20%, 4162.50 руб.».  

25.02.2019 года ООО «Кронос» платежным поручением № 34 перечислило на  расчетный счет ООО «Пилигрим» 350000 руб. 00 коп. При этом в графе Назначение  

платежа было указано: «Оплата по дог.подряда № 2/10 от 03.09.2019 (аванс), за работы  по обшивке стен лестничной клетки. В том числе НДС 20%, 58333 руб. 33 коп.».  

01.06.2020 года ООО «Кронос» платежным поручением № 114 перечислило на  расчетный счет ООО «Пилигрим» 58275 руб. 00 коп. При этом в графе Назначение  платежа было указано: «Оплата по дог.подряда № 1/09 от 03.09.2019, за работы по  монтажу ограждений лест. клетки. В том числе НДС 20%, 9712.50 руб.».  

01.06.2020 года ООО «Кронос» платежным поручением № 115 перечислило на  расчетный счет ООО «Пилигрим» 563640 руб. 11 коп. При этом в графе Назначение  платежа было указано: «Оплата по счету № 12с от 15.11.2019 за строительно-монтажные работы по договору № 3/04 от 22.04.2019. В том числе НДС 20%, 93940 руб.  02 коп.».  

Всего ООО «Кронос» перечислило на расчетный счет ООО «Пилигрим» 996 890  руб. 11 коп.  

Как указывает истец, какие либо договоры между ООО «Кронос» и ООО  «Пилигрим» не заключались, какие либо работы ответчиком не производились.  Указанные выше денежные средства были перечислены истцом ООО «Пилигрим» по  устной договоренности с гр. ФИО5 (аффилированным  лицом ООО «Пилигрим») с условием возврата всех перечисленных выше средств в  ООО «Кронос» в срок не позднее 31.12.2020 года.  

Истец указывает, что перечисленные на расчетный счет ООО «Пилигрим»  денежные средства в размере 996890 руб. 11 коп. не были возвращены на расчетный  счет ООО «Кронос».  

Истцом в адрес ответчика направлена претензия, которая оставлена ответчиком  без удовлетворения.  

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик предъявил  встречное исковое заявление о взыскании 4196834 руб. 84 коп., в том числе:  задолженность в размере 2021308 руб. 93 коп., неустойка в размере 2175525 руб. 81  коп. за период с 30.11.2019 по 04.10.2022, неустойка, начисленная на сумму основного  долга за период с 05.10.2022 по день фактического исполнения обязательства по оплате  задолженности из расчета 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки, в котором  ссылается на следующие обстоятельства.  

03.10.2019 года между ООО «КРОНОС» (далее по тексту - заказчик) и ООО  «ПИЛИГРИМ» (далее по тексту - подрядчик) был заключен договор подряда № 1/09 от  03.10.2019 (далее по тексту - договор) на монтаж ограждения лестничной клетки.  

Согласно п. 1.1 договора подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить  своими силами и средствами работы по монтажу ограждений лестничной клетки:  монтаж секции перил лестничного марша, в соответствии со Схемой монтажа  конструкции перил.  

Согласно п. 2.1. цена договора определена по соглашению сторон и составляет:  83250 руб. 00 коп., в т.ч. НДС (20%) 13875 руб.  

Порядок оплаты: заказчик оплачивает подрядчику выполненные работы:  авансовый платеж в размере 30% размера сумы оплаты работ осуществляется в течение  10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего договора. Окончательный  расчет осуществляется в течении 30 (тридцати) дней с момента подписания сторонами  окончательного акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о  стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  

Согласно п. 4.1 договора не позднее дня, следующего за днем фактического  окончания работ, подрядчик направляет заказчику соответствующее уведомление, а  также предоставляет на согласование акты о приемке выполненных работ по форме  КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (составленные  по фактически выполненным объемам работ по этапу).  

Как указывает истец по встречному иску, 06.11.2019 года были выполнены все  работы и подписаны со стороны ООО «Пилигрим» акты КС-2, КС-3 и переданы в  приемную офиса ООО «Кронос» по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерация д. 25, 3 этаж.  

По данному договору была произведена оплата в следующие сроки: 06.11.2019  года с назначением платежа: "оплата по дог. подряда № 1/09 от 03.09.2019 (аванс 30%),  за работы по монтажу ограждений лест. клетки. В том числе НДС 20%, 4162.50 руб.  было оплачено 24975 руб., что подтверждается платежным поручением № 363952 года  с назначением платежа: Оплата по дог.подряда № 1/09 от 03.09.2019, за работы по  монтажу ограждений лест. клетки. В том числе НДС 20%, 9712 руб. 50 коп. было  оплачено 58275 руб.  

Истец по встречному иску указывает, что таким образом, все работы были  выполнены и оплачены со стороны ООО «Кронос» в полном объеме.  

03.10.2019 между ООО «КРОНОС» (далее по тексту - заказчик) и ООО  «ПИЛИГРИМ» (далее по тексту - Подрядчик) был заключен договор подряда № 2/10 от  03.10.2019 (далее по тексту - договор).  

Согласно п. 1.1 договора подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить  следующие строительно-монтажные работы на объекте «Многоквартирный жилой дом  с магазином», расположенный по адресу: 

<

...>.  

Согласно п. 2.1. цена договора определена по соглашению сторон и составляет:  2934949 руб. 04 коп., в т.ч. НДС (20%) 489158 руб. 17 коп.  

Порядок оплаты: заказчик оплачивает подрядчику выполненные работы в  течение 10 рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма  КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).  

Согласно п.3.1. договора, срок выполнения работ - до 31.12.2019.  

Как указывает истец по встречному иску, работы по договору выполнены в  полном объеме, в установленный договором срок.  

15.11.2019 года ООО «ПИЛИГРИМ» выполнило работы на 1563640 руб. 11 коп.  по установке конструкций ПВХ.  

Истец по встречному иску указывает, 20.12.2019 года ООО «ПИЛИГРИМ»  выполнило работы на сумму 1371308 руб. 93 коп. 25.02.2020 года ООО «Кронос»  произвело оплату аванса в размере 350000 руб., в том числе НДС 20% 58333 руб. 33  коп. руб. по договору № 2/10 от 03.10.2019 года за работы по обшивке стен лестничной  клетки.  

01.06.2020 года ООО «Кронос» произвело оплату по счету № 12с от 15.11.2019 за  строительно-монтажные работы по договору № 3/04 от 22.04.2019 в размере 563640 руб.  11 коп. в том числе НДС 20%, 93940 руб. 02 коп. В назначении платежа была допущена  техническая ошибка со стороны ФИО6, так как в данный период  организации не существовало и в счете № 12с от 15.11.2019 года содержится  информация с правильными реквизитами даты и номером договора.  

Истец по встречному иску указывает, что выполненные работ ООО "КРОНОС"  не оплачены.  

Задолженность ООО «КРОНОС» перед ООО «ПИЛИГРИМ» составляет 2021308  руб. 93 коп., включая НДС 20% 336884 руб. 82 коп.  

Истцом по встречному иску, в адрес ответчика направлена претензия, которая  оставлена ответчиком без удовлетворения.  

Удовлетворяя в части первоначальные исковые требования и отказывая в  удовлетворении встречных исковых требований, суд исходил из следующим  обстоятельств.  

Согласно ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться в срок  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и законом.  Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.  

При рассмотрении спора по настоящему делу, суд руководствуется ст. 421  Гражданского кодекса Российской Федерации, из которой следует, что граждане и  

юридические лица свободны в заключении договора, условия договора определяются  по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия  предписано законом или иными правовыми актами (статья 422), и ст. 431 ГК РФ,  согласно которой при толковании условий договора судом принимается во внимание  буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение  условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с  другими условиями и смыслом договора в целом.  

Возражая против удовлетворения первоначальных исковых требований,  ответчик указывал что между сторонами подписаны договор № 1/09 от 03.10.2019 и  договор № 2/10 от 03.10.2019, во исполнение которого ответчиком выполнены работы.  

В обоснование доводов ответчик представил копию договора № 1/09 от  03.10.2019 и договор № 2/10 от 03.10.2019, подписанные сторонами.  

Оценив доводы ответчика, суд отмечает, что в нарушение требований статьи 68  АПК РФ в материалы дела не представлены подлинник договора № 1/09 от 03.10.2019, а  также оригинал доверенности на представителя истца, подписавшего договор № 2/10 от  03.10.2019, истец отрицает факт заключения и исполнения указанных договоров, как и  оспаривает факт выдачи доверенности на представителя истца (ФИО7),  подписавшего договор № 2/10 от 03.10.2019.  

Истец по встречному иску пояснил, что подлинник договора № 1/09 от  03.10.2019 у него не имеется. По вышеуказанным договорам, доказательств  направления в адрес ответчика по встречному иску актов по форме КС-2, справок по  форме КС-3 также не имеется.  

В нарушение ст.ст. 65, 68 АПК РФ, ответчик не представил надлежащих и  допустимых доказательств, подтверждающих как заключение указанных договоров, так  и исполнение их и предъявления результатов выполненных работ истцу, в связи с чем,  доводы ответчика отзыва и встречного искового заявления судом отклоняются.  

Согласно п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными  правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество  (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему  неосновательно приобретенное или сбереженное имущество  (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей  1109 настоящего Кодекса.  

Доказательства возврата спорной денежной суммы суду ответчиком не  представлено, в связи с чем, требование истца по первоначальном иску о взыскании  996890 руб. 11 руб. неосновательного обогащения, признается обоснованным,  документально подтвержденным и подлежащим удовлетворению, в то время как  встречные исковые требования о взыскании задолженности в размере 2021308 руб. 93  коп., не обоснованными и не подлежащими удовлетворению.  

Требование истца по встречному иску о взыскании неустойки в размере 2175525  руб. 81 коп. за период с 30.11.2019 по 04.10.2022 и неустойки, начисленной на сумму  основного долга за период с 05.10.2022 по день фактического исполнения  обязательства по оплате задолженности из расчета 0,1 % от суммы долга за  каждый день просрочки, суд признает не подлежащим удовлетворению, поскольку оно  является акцессорным по отношению к требованию о взыскании неосновательного  обогащения, в удовлетворении которого отказано.  

Истцом по встречному иску, также заявлено требование о взыскании с  ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 172494  руб. 37 коп. за период с 06.11.2019 по 12.09.2022.  

В соответствии со ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами  вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в  их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица  подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется  ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти  

правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или  договором. Проценты за пользование чужими денежными средствами взимаются по  день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами  или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.  

В силу п. 2 ст. 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения  подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того  времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности  получения или сбережения денежных средств.  

Проверив расчет истца, суд признает его, составленным не верно, поскольку  истцом не учтен период действия моратория, веденный постановлением правительства  РФ от 28.03.2022 № 497 «О ведении моратория на возбуждении дел о банкротстве по  заявлениям, подаваемыми кредиторами».  

Суд считает требование истца о взыскании процентов за пользование чужими  денежными средствами по состоянию на 31.03.2022 в размере 120587 руб. 81 коп.  правомерным и подлежащим удовлетворению.  

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика проценты за пользование  чужими денежными средствами, начисленные на сумму му неосновательного  обогащения в размере 996890 (Девятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот девяносто)  руб. 11 руб. за период с 13.09.2022 по день фактической оплаты суммы основного  долга, рассчитанные исходя из ключевой ставки, установленной Банком России  и действовавшей в соответствующие периоды времени, которые суд также признает  обоснованными и подлежащими удовлетворению на основании п. 3 ст. 395 ГК РФ.  

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно  доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований  и возражений.  

Учитывая изложенные обстоятельства, суд, оценив все имеющиеся  доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения,  содержащиеся в части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации и другие положения Кодекса, признает обоснованными исковые  требования, заявленные ООО "КРОНОС", 432071, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,  УЛЬЯНОВСК ГОРОД, ФЕДЕРАЦИИ 

<

...>, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 26.05.2017, ИНН: 

<

***> к ООО  "ПИЛИГРИМ", 125315, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  АЭРОПОРТ, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д. 66, ПОМЕЩ. 1Н, КОМ./ОФИС 18/127,  ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 24.09.2019, ИНН: 

<

***>.  

Кроме того, суд отмечает, что при изготовлении резолютивной части решения от  16 марта 2023г. по делу № А40-202266/2022-63-1543 судом была допущена опечатка,  указано: «В удовлетворении заявленного истцом ходатайства о фальсификации  доказательств, отказать.  

Первоначальный иск удовлетворить частично. Взыскать с ООО "ПИЛИГРИМ",  125315, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЭРОПОРТ,  ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д. 66, ПОМЕЩ. 1Н, КОМ./ОФИС 18/127, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 24.09.2019, ИНН: 

<

***> в пользу ООО  "КРОНОС", 432071, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛЬЯНОВСК ГОРОД,  ФЕДЕРАЦИИ 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения  ОГРН: 26.05.2017, ИНН: 

<

***> сумму неосновательного обогащения в размере  996890 (Девятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот девяносто) руб. 11 руб. 00 коп.,  проценты за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 31.03.2022 в  размере 120587 (Сто двадцать тысяч пятьсот восемьдесят семь) руб. 81 коп., проценты  за пользование чужими денежными средствами, начисленных в порядке ст. 395 ГК РФ  на взысканную по решению суда общую сумму в размере ключевой ставки Банка  России, действовавшей в соответствующие периоды, с момента вступления в законную  силу решения суда и до полной уплаты взысканной суммы, за исключением периода  

действия моратория, веденного постановлением правительства РФ от 28.03.2022 № 497  «О ведении моратория на возбуждении дел о банкротстве по заявлениям, подаваемыми  кредиторами».  

Взыскать с ООО "ПИЛИГРИМ", 125315, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЭРОПОРТ, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д. 66,  ПОМЕЩ. 1Н, КОМ./ОФИС 18/127, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  24.09.2019, ИНН: 

<

***> в доход федерального бюджета расходы по госпошлине в  размере 24175 (Двадцать четыре тысячи сто семьдесят пять) руб. 00 коп.  

В удовлетворении остальной части первоначального иска, отказать.  В удовлетворении встречного иска, отказать.»,  

а должно быть: «В удовлетворении заявленного истцом ходатайства о  фальсификации доказательств, отказать.  

Первоначальный иск удовлетворить частично. Взыскать с ООО "ПИЛИГРИМ",  125315, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЭРОПОРТ,  ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д. 66, ПОМЕЩ. 1Н, КОМ./ОФИС 18/127, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 24.09.2019, ИНН: 

<

***> в пользу ООО  "КРОНОС", 432071, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛЬЯНОВСК ГОРОД,  ФЕДЕРАЦИИ 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения  ОГРН: 26.05.2017, ИНН: 

<

***> сумму неосновательного обогащения в размере  996890 (Девятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот девяносто) руб. 11 коп., проценты  за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 31.03.2022 в размере  120587 (Сто двадцать тысяч пятьсот восемьдесят семь) руб. 81 коп., проценты за  пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму неосновательного  обогащения в размере 996890 руб. 11 коп, за период со 02.10.2022 по день фактической  оплаты суммы основного долга, рассчитанные исходя из ключевой ставки,  установленной Банком России и действовавшей в соответствующие периоды времени.  

Взыскать с ООО "ПИЛИГРИМ", 125315, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЭРОПОРТ, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д. 66,  ПОМЕЩ. 1Н, КОМ./ОФИС 18/127, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  24.09.2019, ИНН: 

<

***> в доход федерального бюджета расходы по госпошлине в  размере 24175 (Двадцать четыре тысячи сто семьдесят пять) руб. 00 коп.  

В удовлетворении остальной части первоначального иска, отказать.  В удовлетворении встречного иска, отказать.».  

В соответствии с ч. 3 ст. 179 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации арбитражный суд, принявший судебный акт вправе по своей  инициативе исправить допущенные в судебном акте опечатки без изменения его  содержания.  

Допущенная опечатка подлежит исправлению в порядке, установленном ч. 3  ст. 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

АПК РФ не установлено требования о назначении судебного заседания по  вопросу о разъяснении решения, исправлении описок, опечаток и арифметических  ошибок.  

Учитывая изложенное, суд в соответствии со ст. 179 АПК РФ исправляет  допущенную опечатку в резолютивной части решения суда от 16 марта 2023г. по делу   № А40-202266/2022-63-1543.  

Расходы по госпошлине подлежат распределению в соответствии со ст. 110 АПК  РФ.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 9, 11, 309, 310, 395, 1102,  1107 ГК РФ, ст.ст. 65, 67, 68, 110, 132, 167-171, 176, 179 АПК РФ, суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленного истцом ходатайства о фальсификации  доказательств, отказать.  

Первоначальный иск удовлетворить частично. Взыскать с ООО "ПИЛИГРИМ",  125315, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЭРОПОРТ,  ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д. 66, ПОМЕЩ. 1Н, КОМ./ОФИС 18/127, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 24.09.2019, ИНН: 

<

***> в пользу ООО  "КРОНОС", 432071, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛЬЯНОВСК ГОРОД,  ФЕДЕРАЦИИ 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения  ОГРН: 26.05.2017, ИНН: 

<

***> сумму неосновательного обогащения в размере  996890 (Девятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот девяносто) руб. 11 коп., проценты  за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 31.03.2022 в размере  120587 (Сто двадцать тысяч пятьсот восемьдесят семь) руб. 81 коп., проценты за  пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму неосновательного  обогащения в размере 996890 руб. 11 коп, за период с 02.10.2022 по день фактической  оплаты суммы основного долга, рассчитанные исходя из ключевой ставки,  установленной Банком России и действовавшей в соответствующие периоды времени.  

Взыскать с ООО "ПИЛИГРИМ", 125315, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЭРОПОРТ, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д. 66,  ПОМЕЩ. 1Н, КОМ./ОФИС 18/127, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  24.09.2019, ИНН: 

<

***> в доход федерального бюджета расходы по госпошлине в  размере 24175 (Двадцать четыре тысячи сто семьдесят пять) руб. 00 коп.  

В удовлетворении остальной части первоначального иска, отказать. В удовлетворении встречного иска, отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок с момента его изготовления в полном объеме.  

СУДЬЯ Э.Б. Ликшиков