Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть Решения

 

г. Краснодар Дело № А32-6859/2019  «27» ноября 2019г.  

Руководствуясь статьями 27, 102, 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Обязать ООО «Донской» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  безвозмездно в месячный срок со дня вступления в законную силу решения  арбитражного суда Краснодарского края выполнить комплекс работ в соответствии  с требованиями проекта, строительных норм и правил, на объекте  «Проектирование и строительство пристройки к ДДУ № 233 по ул. Бульварное  кольцо, 20», устранив следующие недостатки:  

- выполнить комплекс работ по восстановлению трещин при входе в  группу № 17 первого этажа, а так же над оконными проемами, под подоконниками  и по углам помещения;  

- выполнить комплекс работ по восстановлению трещин при выходе из  здания над верными проемами первого этажа;  

- выполнить комплекс работ по восстановлению трещин на втором  этаже, рядом с кабинетами психолога и музыкально-спортивного зала;  

- выполнить комплекс работ по восстановлению шпатлевки над  дверным проемом музыкально-спортивного зала;  

- выполнить комплекс работ по заземлению калитки согласно проектно- сметной документации;  

- выполнить комплекс работ по восстановлению пола игрового навеса  группы № 16.  

Взыскать с ООО «Донской» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу МКУ МО г.Краснодара «Единая служба заказчика» судебные издержки в  виде понесенных затрат на проведение судебной экспертизы в размере 80 000  рублей.  

Взыскать с ООО «Донской» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  доход бюджета 6 000 рублей госпошлины.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд  Краснодарского края.  

Судья А.Г. Пристяжнюк