Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-109875/2019

25 февраля 2020 года

г.Санкт-Петербург

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кассиным В.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БИК" (192281, Санкт-Петербург город, улица Ярослава Гашека, дом 4, корпус 1, помещение 66-Н, ОГРН: 

<

***>)

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "АСК КОНЦЕПЦИЯ" (191123, Санкт-Петербург город, улица Чайковского, дом 34, литера А, помещение 7Н, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании 

при участии

- от истца: ФИО1 по доверенности от 02.09.2019, ФИО2, ген. директор, паспорт

- от ответчика: не явился (извещен)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БИК" (далее – Компания) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "АСК Концепция" (далее – Общество) о взыскании 3 349 887,84 руб. задолженности, в том числе:

– 585 213,35 руб. по договору от 16.03.2016 № 2МПК60 (далее - Договор 1);

– 365 181,90 руб. по договору от 06.06.2016 № 3МПК60 (далее – Договор 2);

– 1 266 250,81руб. по договору от 04.08.2016 № 7/4-/МПК60 (далее – Договор 3);

– 1 046 633,50 руб. по договору от 16.03.2017 № 4МПК60 (далее – Договор 4);

– 1,78 руб. по договору от 30.12.2016 № 1617187737653209094200000/Ч/4-5/ВКА-1 (далее – Договор 5);

– 86 606,50 руб. по договору от 30.12.2016 № 1617187737653209094200000/Ч/4-5/ВКА (далее – Договор 6), 

а также 96 550,19 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 27.03.2019 по 11.08.2019.  

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание своего представителя не направил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Отзыв на иск ответчик не представил.

Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между Компанией (подрядчиком) и Обществом (заказчиком) заключен Договор 1, по условиям которого заказчик осуществляет финансирование, оказывает необходимое содействие подрядчику и контроль за выполнением работ, а подрядчик осуществляет строительно-монтажные работы в соответствии с проектной, рабочей документацией и условиями Договора 1, в том числе техническим заданием, необходимые для ввода в эксплуатацию объекта в соответствии с условиями Договора 1. 

Согласно п. 3.1. Договора 1 цена Договора 1 составляет 8 107 500 руб.

В силу п. 4.4. Договора 1 оплата выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ производится заказчиком в течение 30 календарных дней после подписания заказчиком оформленных подрядчиком актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акта о приемке выполненных работ (приложение № 3 к Договору 1), оригиналов счета и счета-фактуры.

По пункту 4.6. Договора 1 оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в порядке, установленном Договором 1 до предела, не превышающего 95% от цены Договора 1. Оставшаяся часть цены Договора 1 выплачивается подрядчику при отдельном расчете.

Согласно п. 4.7. Договора 1 окончательный расчет производится в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами итогового акта приемки выполненных работ по форме, установленной в приложении 2 к Договору 1.  

В соответствии с п. 5.1. Договора 1 дата начала работ – дата с даты получения подрядчиком от заказчика аванса в размере 1 000 000 руб.

Сроки выполнения работ: выполнение строительно-монтажных работ - 15.04.2016, подписание итогового акта приемки выполненных работ – 30.04.2016 (п. 5.2. Договора 1).

В силу п. 12.1.1. Договора 1 сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за текущий (отчетный) месяц осуществляется по журналу учета выполненных работ (форма КС-6а), акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Стороны подписали Договор 2, по условиям которого заказчик осуществляет финансирование, оказывает необходимое содействие подрядчику и контроль за выполнением работ, а подрядчик осуществляет строительно-монтажные работы, необходимые для ввода в эксплуатацию объекта в соответствии с условиями Договора 2. 

Согласно п. 3.1. Договора цена Договора 2 составляет 3 136 597,42 руб. 

В силу п. 4.4. Договора 2 оплата выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ производится заказчиком в течение 30 календарных дней после подписания заказчиком оформленных подрядчиком актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акта о приемке выполненных работ (приложение № 3 к Договору 2), оригиналов счета и счета-фактуры.

В соответствии с п. 4.6. Договора 2 оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в порядке, установленном раздело Договора 2 до предела, не превышающего 95% от цены Договора 2. Оставшаяся часть цены Договора 2 выплачивается подрядчику при отдельном расчете.

Согласно п. 5.1. Договора 2 дата начала работ – дата подписания сторонами Договора 2.

По пункту 5.2. Договора 2 сроки выполнения работ: выполнение работ по черновой отделке – 20.06.2016; подписание итогового акта приемки выполненных работ – 25.08.2016.  

В силу п. 12.1.1. Договора 2 сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за текущий (отчетный) месяц осуществляется по журналу учета выполненных работ (форма КС-6а), акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Стороны подписали Договор 3, по условиям которого заказчик осуществляет финансирование, оказывает необходимое содействие подрядчику и контроль за выполнением работ, а подрядчик осуществляет строительно-монтажные работы в соответствии с проектной, рабочей документацией и условиями Договора 3, в том числе техническим заданием, необходимые для ввода в эксплуатацию объекта в соответствии с условиями Договора 3. 

В соответствии с п. 3.1. Договора 3 цена Договора 3 составляет 3 682 433,31 руб.

Согласно п. 5.1. Договора 3 дата начала работ – дата подписания сторонами Договора 3.

По пункту 5.2. Договора 3 сроки выполнения работ: выполнения строительно-монтажных работ – 20.09.2016, подписание итогового акта приемки выполненных работ – 25.11.2016. 

В силу п. 12.1.1. Договора 3 сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за текущий (отчетный) месяц осуществляется по журналу учета выполненных работ (форма КС-6а), акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Между сторонами заключен Договор 4, по условиям которого заказчик осуществляет финансирование работ и контроль за их исполнением, оказывает необходимое содействие подрядчику, а подрядчик осуществляет строительно-монтажные работы в соответствии с условиями Договора 4 и техническим заданием.

Согласно п. 3.1. Договора 4 цена Договора 4 составляет 10 494 544,97 руб. 

По пункту 4.5. Договора 4 оплата выполненных подрядчиком этапов работ производится заказчиком в порядке, установленном Договором 4 до предела, не превышающего 95% от цены Договора 4. Оставшаяся часть цены Договора 4 выплачивается подрядчику при окончательном расчете на основании сводной исполнительной сметы и подписанного в случае необходимости дополнительного соглашения об утверждении цены Договора 4 в порядке, предусмотренном п. 3.4. Договора 4. 

В силу п. 4.6. Договора 4 окончательный расчет производится в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами итогового акта приемки выполненных работ по форме, установленной в приложении 2 к Договору 4.  

Согласно п. 5.1. Договора 4 дата начала работ – дата подписания сторонами Договора 4.

В соответствии с п. 5.2. Договора 4 выполнение работ производится в следующие сроки: выполнение строительно-монтажных работ – не позднее 26.04.2017; подписание итогового акта приемки – 31.12.2017. 

Между сторонами заключен Договор 5, по условиям которого заказчик осуществляет финансирование, оказывает необходимое содействие подрядчику и контроль за выполнением работ, а подрядчик осуществляет строительно-монтажные работы в соответствии с проектной, рабочей документацией и условиями Договора 5, в том числе техническим заданием, необходимые для ввода в эксплуатацию объекта в соответствии с условиями Договора 5. 

Согласно п. 3.1. Договора 5 цена работ составляет 2 435 988,35 руб.

В силу п. 4.4. Договора 5 оплата выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ производится заказчиком в течение 30 календарных дней после подписания заказчиком оформленных подрядчиком актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акта о приемке выполненных работ (приложение № 3 к Договору 5), оригиналов счета и счета-фактуры.

Согласно п. 5.1. Договора 5 дата начала работ – дата подписания сторонами Договора 5.

По пункту 5.2. Договора 5 сроки выполнения работ: выполнение строительно-монтажных работ – не более 30 календарных дней с даты заключения Договора 5; подписание итогового акта приемки выполненных работ – 30 календарных дней с даты завершения строительно-монтажных работ.

В силу п. 12.1.1. Договора 5 сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за текущий (отчетный) месяц осуществляется по журналу учета выполненных работ (форма КС-6а), акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Стороны подписали Договор 6, по условиям которого заказчик осуществляет финансирование, оказывает необходимое содействие подрядчику и контроль за выполнением работ, а подрядчик осуществляет строительно-монтажные работы в соответствии с проектной, рабочей документацией и условиями Договора 5, в том числе техническим заданием, необходимые для ввода в эксплуатацию объекта в соответствии с условиями Договора 6. 

Согласно п. 3.1. Договора 6 цена Договора 6 составляет 3 491 188,24 руб. 

В силу п. 4.4. Договора 6 оплата выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ производится заказчиком в течение 30 календарных дней после подписания заказчиком оформленных подрядчиком актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акта о приемке выполненных работ (приложение № 3 к Договору 6), оригиналов счета и счета-фактуры.

По пункту 5.1. Договора 6 дата начала работ – дата подписания сторонами Договора 6.

В соответствии с п. 5.2. Договора 6 сроки выполнения работ: выполнение строительно-монтажных работ по внутренней отделке помещений – не позднее 31.10.2016; подписание итогового акта приемки выполненных работ – 30.11.2016.

Подрядчик, ссылаясь на выполнение работ по спорным Договорам и неоплату их Заказчиком, направил претензию от 27.03.2019 № 2/03 с требованием об уплате задолженности в общем размере 3 349 887,84 руб. 

Указанное требование Общество не удовлетворило, в связи с чем Компания обратилась в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Пунктом 1 статьи 702 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (статья 711 ГК РФ). 

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований.

Факт выполнения работ по Договора подтверждается:

– по Договору 1 актами о приемке выполненных работ от 10.12.2018 № 2 на сумму 2 617 959,09 руб., от 25.08.2016 № 1 на сумму 1 928 211,51 руб.; справками о стоимости выполненных работ и затрат от 10.12.2018 № 2 на сумму 2 617 965,09 руб., от 25.08.2016 № 1 на сумму 1 928 211,51 руб.;

– по Договору 2 актом о приемке выполненных работ от 27.07.2107 № 1на сумму 7 303 638,09 руб. и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 27.07.2017 № 2 на сумму 7 303 638,09 руб.; 

– по Договору 3 актом о приемке выполненных работ от 10.12.2018 № 1 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 10.12.2018 № 1 на сумму 3 682 433,31 руб.

– по Договору 4 актами о приемке выполненных работ от 10.12.2018 № 3 на сумму 140 511,80 руб., от 10.12.2108 № 2 на сумму 3 311 011,44 руб., от 09.01.2018 № 1 на сумму 3 247 500 руб.; справками о стоимости выполненных работ и затрат от 10.12.2018 № 4 на сумму 3 451 563,24 руб., от 09.01.2018 № 1 на сумму 3 247 500 руб.;

– по Договору 5 актами о приемке выполненных работ от 06.02.2017 № 1 на сумму 1 732 129,74 руб., от 15.08.2017 № 2 на сумму 603 856,46 руб., от 06.02.2017 № 1 на сумму 2 000 001,78 руб. и справками о стоимости выполненных работ и затрат от 15.08.2017 № 2 на сумму 603 856,84 руб., от 06.02.2017 № 1 на сумму 2 000 001,78 руб.; 

– по Договору 6 актом о приемке выполненных работ ль 27.07.2017 № 1 на сумму 7 303 638,09 руб. и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 27.07.2017 № 2 на сумму 7 303 638,09 руб. 

Названные акты и справки подписаны заказчиком без возражений по объему и качеству.

Доказательств полной оплаты работ по спорным договорам ответчик не представил, в связи с чет требование о взыскании 3 349 887,84 руб. задолженности подлежит удовлетворению в полном объеме.

Компания начислила 96 550,19 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 27.03.2019 по 11.08.2019.  

В соответствии с ч. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами проверен судом, признан верным.

На основании изложенного требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами подлежит удовлетворению в полном объеме, а именно, на сумму 96 550,19 руб.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АСК КОНЦЕПЦИЯ" в пользу общества с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БИК" 3 349 887,84 руб. задолженности, 96 550,19 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, 40 232 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БИК" из федерального бюджета 19 коп. государственной пошлины, перечисленной по платежному поручению от 12.08.2019 № 1.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Косенко Т.А.