Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-125836/2018

15 марта 2019 года

г.Санкт-Петербург

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: :АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОПРОЕКТ" в лице генерального директора Бондаренко Л.С. (адрес:  Россия 196191, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пл КОНСТИТУЦИИ 7/А/184Н, ОГРН:  1037811057459);

ответчик: :ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСК-ИНВЕСТ" (адрес:  Россия 198152, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул АВТОВСКАЯ 31, ОГРН:  1137847304077);

при участии

- от истца: ФИО3 (доверенность от 31.05.2018) 

- от ответчика: не явился, извещен 

установил:

Акционерное общество «ПЕТРОПРОЕКТ» (далее - АО «ПЕТРОПРОЕКТ») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ДСК-ИНВЕСТ" (далее - ООО «ДСК-ИНВЕСТ») о взыскании 476 157,53 руб. задолженности по генеральному договору от 02.09.2014 № 2ПЭ/2014 и 104 037,62руб. задолженности по договору от 25.06.2016 № 4ВЭ/2016.

Истец поддержал заявленные исковые требования. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание своих представителей не направил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие. Отзыв с возражениями по заявленным требованиям ответчик не представил.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов, АО «ПЕТРОПРОЕКТ» (подрядчик) и ООО «ДСК-ИНВЕСТ» (заказчик) заключили генеральный договор от 02.09.2014 № 2ПЭ/2014, по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить выполнение комплекса следующих работ по двум этапам:

• I этап - разработка и согласование, в соответствии с Техническими условиями ОАО «СПбЭС» (Приложение № 5) и действующим порядком согласования проектно-сметной документации в г. Санкт-Петербурге, рабочего проекта постоянного электроснабжения объекта: «Царскосельские холмы, участок 434» Жилые дома, корпус 1, корпус 2, пристроенная газовая котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Пулковское, участок 434, далее по тексту проектно-сметная документация;

• II этап - выполнение комплекса строительно-монтажных работ в соответствии с разработанным проектом и сдача рабочей комиссии Заказчика.

Технические, экономические и другие требования к проектной документации (I этап) содержатся в Задании на проектирование (техническом задании), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).

Срок производства работ по I этапу согласно план-графику производства работ - (Приложение № 2 к настоящему Договору) - 90 календарных дней от даты перечисления аванса (пункт 3.4.1 договора № 2ПЭ/2014) Заказчиком на расчетный счет Подрядчика (пункт 2.1 договора № 2ПЭ/2014).

Дата начала работ по II этапу — на следующий день после подписания Акта приемки-сдачи I работ по 1-этапу. Срок производства работ по II этапу в соответствии с план-графиком I производства работ Ц (Приложение № 2 к настоящему Договору) - 90 календарных дней от I даты перечисления аванса Заказчиком на расчетный счет Подрядчика (пункт 3.4.2 договора № 2ПЭ/2014). По договоренности с Заказчиком, Подрядчик имеет право приступить к выполнению работ по II этапу досрочно, до подписания Акта приемки-сдачи работ по I этапу, что оговаривается сторонами при заключении Дополнительного соглашения к настоящему договору.

По пункту 3.1 договора № 2ПЭ/2014 (в редакции дополнительного соглашения от 24.07.2015 № 1) общая стоимость работ по настоящему договору составляет 17 888 680 руб. и включает в себя стоимость работ по I и II этапу.

Согласно пункту 3.2 договора № 2ПЭ/2014 стоимость выполнения работ по I этапу является твердой и неизменной, составляет 2 131 605,57 руб. и определена на основании сметы на проектно-изыскательские работы, которая является Приложением №3 к настоящему договору.

Согласно пункту 3.3 договора № 2ПЭ/2014 (в редакции дополнительного соглашения от 24.07.2015 № 1) стоимость работ по II этапу составляет 15 757 074,43 руб. и определена в соответствии с Приложением № 4 к настоящему договору и является твердой и неизменной.

В пункте 3.4 договора № 2ПЭ/2014 предусмотрен порядок перечисления денежных средств по настоящему договору следующим образом:

– по I этапу работ: заказчик в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора перечисляет Подрядчику аванс - 40% (сорок процентов) от общей стоимости работ по I этапу. Остаток от общей стоимости работ по I этапу Заказчик перечисляет Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Акта приемки-сдачи работ по I этапу, на основании представленного Подрядчиком счёта-фактуры.

– по II этапу работ (в редакции дополнительного соглашения от 24.07.2015 № 1): Заказчик после утверждения в производство работ проектно-сметной документации перечисляет Подрядчику:

• аванс в размере 9 096 984 руб. в срок до 30.07.2015 на приобретение БКТП- 120/0,4 кВ с двумя трансформаторами по 1000 кВА каждый;

• аванс в размере 2 433 932,90 руб. в срок до 20.09.2015 на приобретение кабельной продукции и сопутствующих материалов.

Окончательный расчет за выполненные работы по II этапу производится в следующем порядке: 3976157,53 руб. заказчик перечисляет в течение 10 рабочих дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ; 250 000 руб. заказчик перечисляет после ввода объекта в эксплуатацию и подачи напряжения  на ТП № 6.

В случае если Подрядчик по II этапу в отчетный период выполнил работы в объеме, меньшем предусмотренным календарным графиком производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), Заказчик осуществляет перечисление денежных средств по следующему платежу Подрядчику в объеме, уменьшенном на сумму отставания.

В случае если Подрядчик по II этапу в отчетный период выполнил работы в объеме, большем предусмотренным календарным графиком производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), Заказчик осуществляет перечисление денежных средств по следующему платежу Подрядчику в объеме, увеличенном на сумму опережения.

Стороны подписали также договор от 25.06.2016 № 4ВЭ/2016, по условиям которого заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить выполнение комплекса строительно-монтажных работ в соответствии с техническим заданием Заказчика по временному электроснабжению КНС, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, Пулковское, участок 434.

По пункту 1.2 договора № 4ВЭ/2016 состав и объемы выполняемых работ содержатся в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).

В пункте 2.1 договора № 4ВЭ/2016 определено, что подрядчик приступает к выполнению работ после получения аванса по пункту 3.2.1 договора № 4ВЭ/2016. Общий срок производства работ по настоящему договору составляет 10 рабочих дней.

Согласно пункту 3.1 договора № 4ВЭ/2016 стоимость работ по договору является договорной и составляет 304 037,62 руб. и включает в себя стоимость всех работ оборудования и материалов, которые содержатся в Техническом задании (Приложение № 1).

Заказчик за 3 рабочих дня до проведения работ по настоящему договору перечисляет на основании выставленного счета аванс в сумме 200 000 руб. (пункт 2.1 договора № 4ВЭ/2016), остаток от общей стоимости работ заказчик перечисляет подрядчику в течение 10 рабочих дней после подписания сторонами Акта приемки-сдачи выполненных работ (пункт 2.2 договора № 4ВЭ/2016). 

АО «ПЕТРОПРОЕКТ», ссылаясь на выполнение работ по спорным договорам в полном объеме, однако ООО «ДСК-ИНВЕСТ» частично их оплатило, обратилось в арбитражный суд с настоящим иском. 

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно статье 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 ГК РФ).

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

Выполнение подрядчиком работ по договору № 2ПЭ/2014 подтверждается по I этапу Актом формы КС-2 № 1 от 28.08.2015 на сумму 2 131 605,57 руб.; по II этапу и дополнительному соглашению № 1 Справкой формы КС-3 № 1 от 18.12.2015, актами формы КС-2 № 1 от 189.12.2015, № 2 от 18.12.2015, № 3 от 18.12.2015, № 4 от 18.12.2015, № 5 от 18.12.2015, № 6 от 18.12.2015,. № 7 от 18.12.2015, № 8 от 18.12.2015, № 9 от 18.12.2015 на сумму 15 757 074,43 руб.; по договору № 4ВЭ/2016 – Актом формы КС-2 от 09.08.2016 № 1 на сумму 304 037,62 руб.

По акту от 2016 года спорный объект введен в эксплуатацию. 

В материалы дела представлен акт сверки взаимных расчетов за 2017 год, подписанный ООО «ДСК-ИНВЕСТ», исходя из которого задолженность по договорам составила 580 195,15 руб.

В письме от 04.05.2017 № 25 ООО «ДСК-ИНВЕСТ» подтвердило указанную задолженность и представило график ее погашения до 31.08.2017.

Доказательств оплаты выполненных работ в полном объеме ООО «ДСК-ИНВЕСТ» не представило, в связи с чем требование истца о взыскании 580 195,15 руб. задолженности подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

р е ш и л :

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДСК-ИНВЕСТ» в пользу акционерного общества «ПЕТРОПРОЕКТ» 580 195,15 руб. задолженности и 14 604 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Косенко Т.А.