330/2023-193228(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 

Тел/факс (8512) 48-23-23, E-mail: astrahan.info@arbitr.ru  

http://astrahan.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А06-2485/2023

г. Астрахань

26 октября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 20 октября 2023 года. Полный текст решения изготовлен 26 октября 2023 года. 

Арбитражный суд Астраханской области в составе судьи Абдуллина Р.Р.,  

при ведении протокола судебного заседания до перерыва секретарем с/з ФИО1, после  перерыва помощником судьи Кубжасаровой Д.С.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью «АСАД» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  Астраханской области» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании  задолженности по договору от 10.12.2020 № 59-СМР-2020 в размере 230 707 руб. 20 коп.  

Третье лицо: Управление Федерального казначейства по Астраханской области (414056,  

<

...>).  

при участии до перерыва (19.10.2023): 

от общества с ограниченной ответственностью «АСАД»: ФИО2, представитель по  доверенности от 09.01.2023, диплом ВСА № 1066954, паспорт,  

от некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  Астраханской области: не явился, извещен  

от Управления Федерального казначейства по Астраханской области»: не явился, извещен,  при участии после перерыва (19.10.2023):  

от общества с ограниченной ответственностью «АСАД»: ФИО2, представитель по  доверенности от 09.01.2023, диплом ВСА № 1066954, паспорт,  

от некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  Астраханской области: ФИО3, представитель по доверенности от 08.06.2023,  диплом ДВС № 1285431, паспорт,  

от Управления Федерального казначейства по Астраханской области»: не явился, извещен,  

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «АСАД» (далее – ООО «АСАД», истец)  обратилось в Арбитражный суд Астраханской области с исковым заявлением  к некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  Астраханской области» (далее – НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  Астраханской области», ответчик) о взыскании задолженности по договору от 10.12.2020   № 59-СМР-2020 в размере 230 707 руб. 20 коп.  

Представители ответчика и третьего лица, участвующих в деле, в предварительное  судебное заседание не явились, извещены в соответствии со статьей 123 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).  

Информация о назначении судебного заседания размещена на официальном интернет-сайте Арбитражного суда Астраханской области (http://astrahan.arbitr.ru).  

На основании части 3 статьи 156 АПК РФ судебное заседание проводится  в отсутствие не явившегося представителя ответчика и третьего лица, надлежащим образом  извещенного о времени и месте судебного заседания.  

 В судебном заседании, открытом 19.10.2023 в порядке статьи 163 АПК РФ судом  объявлен перерыв до 20.10.2023 до 14 час. 00 мин.  

После перерыва судебное заседание продолжено с участием представителей истца и  ответчика.  

Представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме. Представитель  ответчика возражал против удовлетворения исковых требований по основаниям,  изложенным в отзыве на исковое заявление.  

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд считает, что  заявленные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, 10.12.2020 между ФКР МКД (Заказчик)  и ООО «АСАД» (Подрядчик) заключен договор № 50-СМР-2020 (далее - договор),  по условиям которого «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства  своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных  организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов,  конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по  капитальному ремонту общего имущества многоквартирного (-ых) дома (-ов)  (далее по тексту - Работы), включая выполнение строительно-монтажных работ  на Объекте (ах), сооружение и демонтаж временных объектов и сооружений,  поставку материалов, изделий, конструкций, оборудования, своевременное  устранение недостатков (дефектов), сдачу Объекта (-ов) по Акту приемки  выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах  на каждом Объекте, выполнение обязательств в течение гарантийного срока, выполнение  иных, неразрывно связанных работ и возмещение ущерба третьим лицам, в соответствии с  проектно-сметной (рабочей) документацией, прилагаемой к настоящему Договору, в  соответствии с Техническим заданием Приложение № 1 к настоящему Договору,  являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.  

Согласно пункту 1.2 договора место выполнения работ: - г. Астрахань, Советский район, ул. 2-я Степная, дом 15; 

- г. Астрахань, Советский район, ул. 5-я Котельная, дом 7 корп.3;  - г. Астрахань, Советский район, ул. Адмирала ФИО4, дом 48;  - г. Астрахань, Советский район, ул. Б.Хмельницкого, дом 21 корп.1;  

- г. Астрахань, Советский район, ул. Бежецкая, дом 12; - г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, дом 52. 

Пунктом 1.3 договора предусмотрено, что сроки выполнения Работ по настоящему  Договору определяются Сторонами в Графике выполнения работ Приложение № 2 к  настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

Срок окончания работ установлен графиком выполнения работ (Приложение № 2 к  договору) 01.09.2021.  

В соответствии с пунктом 2.2.1 договора, выполнить предусмотренные настоящим  договором работы по объекту в соответствии с документацией об электронном аукционе,  Техническим заданием (Приложение 1), проектно-сметной (рабочей) документацией,  строительными и иными нормами и правилами, обеспечив их надлежащее качество, в сроки,  установленные настоящим договором.  

Согласно пунктам 3.2.1, 3.2.2. договора, по завершении работ по каждому объекту,  подрядчик письменно извещает заказчика и исполнителя о готовности сдачи выполненных  работ.  

Заказчик и исполнитель, получивший сообщение подрядчика, в срок не позднее 10  (десяти) рабочих дней организует приемку выполненных работ по объекту приемочной  комиссией.  

Пунктом 3.2.6. договора предусмотрено, что датой сдачи работ по объекту считается  дата подписания Акта приемки оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному  ремонту в многоквартирного дома.  

В соответствии с пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена Договора составляет:  21 951 156 руб., включая НДС, в том числе по каждому из Объектов и видов работ, согласно  цены договора в соответствии с аукционом Приложение № 3 к настоящему Договору.  

Согласно Приложению № 3 к договору стоимость работ по адресам: 

- г. Астрахань, Советский район, ул. 2-я Степная, дом 15 составляет 973 368 руб.  (ремонт крыши);  

- г. Астрахань, Советский район, ул. 2-я Степная, дом 15 составляет 912 852 руб.  (ремонт фасада);  

- г. Астрахань, Советский район, ул. 2-я Степная, дом 15 составляет 224 352 руб.  (ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения);  

- г. Астрахань, Советский район, ул. 5-я Котельная, дом 7 корп.3 составляет 1 501 572  руб. (ремонт крыши);  

- г. Астрахань, Советский район, ул. 5-я Котельная, дом 7 корп.3 составляет 4 614 132  руб. (ремонт фасада);  

- г. Астрахань, Советский район, ул. 5-я Котельная, дом 7 корп.3 составляет 1 316 292  руб. (ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения);  

- г. Астрахань, Советский район, ул. Адмирала ФИО4, дом 48 составляет 2 505 132  руб. (ремонт крыши);  

- г. Астрахань, Советский район, ул. Адмирала ФИО4, дом 48 составляет 1 883 040  руб. (ремонт фасада);  

- г. Астрахань, Советский район, ул. Адмирала ФИО4, дом 48 составляет 477 696  руб. (ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения);  

- г. Астрахань, Советский район, ул. Адмирала ФИО4, дом 48 составляет 819 960  руб. (ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения);  

- г. Астрахань, Советский район, ул. Адмирала ФИО4, дом 48 составляет 573 432  руб. (ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения);  

- г. Астрахань, Советский район, ул. Б.Хмельницкого, дом 21 корп.1 составляет  1 245 180 руб. (ремонт фасада);  

- г. Астрахань, Советский район, ул. Б.Хмельницкого, дом 21 корп.1 составляет 348  072 руб. (ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения);  

- г. Астрахань, Советский район, ул. Б.Хмельницкого, дом 21 корп.1 составляет 685  332 руб. (ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения);  

- г. Астрахань, Советский район, ул. Бежецкая, дом 12 составляет 1 018 500 руб.  (ремонт крыши);  

- г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, дом 52 составляет 2 852 244 руб. (ремонт  крыши).  

В силу пункта 5.5 договора Оплата по настоящему Договору осуществляется за  фактически выполненные работы по Объектам по безналичному расчету путем  перечисления денежных средств, в пределах средств, с расчетного счета Заказчика,  открытого в российской кредитной организации для аккумуляции взносов на капитальный  ремонт уплачиваемых собственниками помещения в многоквартирных домах формирующих  фонд капитального ремонта на счете Заказчика, но при условии отсутствия Акта  неисполнения обязательств по настоящему Договору, после предоставления полного пакета  документов, указанного в п.3.2.8, и подписания Заказчиком Акта приемки выполненных  работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, согласованного  представителями ОМС, лицом, уполномоченным собственниками помещений и всеми  членами комиссии, утвержденными приказом заказчика, Акта о приемке выполненных работ  по форме КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,  

подписанных Подрядчиком, при наличии выставленных Подрядчиком счета и счета- фактуры, в течение 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты составления  Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных  работ и затрат по форме КС-3.  

ООО «Асад» произвело в отношении фасада объекта, расположенного  ул. Адм. ФИО4, д.48, необходимые работы согласно условиям договора в полном объеме.  Претензий по объему и качеству выполненных работ от ответчика не поступило.  

Как установлено 25.01.2022 гкомиссионно, в том числе и представителем НО «Фонд  капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» ФИО5,  подписаны акты приемки выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ по  капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по договору 59-СМР-2020  от 10.12.2020 на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по  адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Адм. ФИО4, д. 48, без учета устройства новой  отмостки.  

Платёжным поручением от 26.01.2022 № 405 ответчик оплатил выполненные работы  по капитальному ремонту фасада дома по ул. Адм. ФИО4, д.48 без учета  

Письмом от 31.012023 № 13А истцом в адрес ответчика направлены акты  выполненных работ №№ 1,2, справка о стоимости выполненных работ и затрат, касающиеся  устройства новой отмостки многоквартирного дома по ул. Адм. ФИО4, 48 с просьбой  принять данные работы и произвести оплату на сумму 230 707, 2 рублей.  

Письмом от 13.02.2023 № 02-1326 года ответчик отказался от принятия и оплаты  работ по капитальному ремонту фасада, включающие в себя работы по устройству отмостки,  многоквартирного дома по ул. Адм. ФИО4, д. 48 в Советском районе.  

В обоснование отказа от принятия выполненных работ и их оплаты, ответчик сослался  на акт выездной проверки УФК Астраханской области и представление прокуратуры  Астраханской области от 10.11.2021 № 7-11-2021/168, согласно которым работы по  устройству отмостки относятся к текущему ремонту многоквартирных домов и,  соответственно, во избежание допущения нецелевого использования средств  сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, у регионального оператора  отсутствуют правовые основания для принятия и оплаты работ по капитальному ремонту  фундамента, включающие в себя работы по устройству отмостки.  

Таким образом, до настоящего времени ответчиком акты о приемке выполненных  работ по устройству отмостки на сумму 230 707, 20 рублей не подписаны и, соответственно,  данные работы не оплачены.  

Между тем, работы по капитальному ремонту фундамента многоквартирного жилого  дома № 48 по ул. Адм. ФИО4 в Советском районе г. Астрахани выполнены ООО «Асад»  строго в соответствии с условиями договора, техническим заданием и проектной  документацией, включающей в себя сводный сметный расчет стоимости работ и локальный  сметный расчет.  

Таким образом, законных оснований для отказа в оплате выполненных и по сути  принятых работ у НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской  области» не имеется.  

Истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием оплатить  задолженность.  

Письмом от 16.03.2023 № 02-04-2451 ответчик отказался оплатить долг. 

Полагая, что фактически выполненные Подрядчиком работы подлежат оплате  Заказчиком, истец направил в адрес ответчика претензию с требованием оплатить  выполненные работы. Ответа на претензии не поступило.  

Письмом от 12.01.2022 № 02-76 ответчик сообщил, что работы по устройству  отмостки относятся к текущему ремонту многоквартирных домов и не подлежат  выполнению в рамках капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.  

Неисполнение в полном объеме требований, изложенных в претензии,  послужило основанием для обращения истца в Арбитражный суд Астраханской области с  настоящим исковым заявлением.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации  (далее – ГК РФ) Гражданские права и обязанности возникают из оснований,  предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и  юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу  общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и  обязанности.  

Статья 307 ГК РФ предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник)  обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то:  передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от  определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его  обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных  оснований, указанных в настоящем Кодексе.  

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим  образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых  актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового  оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

В силу положений статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения  обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением  случаев, предусмотренных законом.  

Заключенный сторонами договор является договором строительного подряда и  регулируется, как общими положениями гражданского законодательства, так и нормами для  отдельных видов обязательств, содержащихся в параграфах 1, 3, 5 главы 37 «Подряд» ГК  РФ, а также положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).  

Договор не признан недействительным или незаключенным в установленном законом  порядке.  

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию  другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик  обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 ГК РФ).  

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором  срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные  строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для  выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740  ГК РФ).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются  начальный и конечный сроки выполнения работы.  

По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также  сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не  установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором,  подрядчик несет ответственность за нарушение, как начального и конечного, так и  промежуточных сроков выполнения работы (пункт 2 статьи 708 ГК РФ).  

На основании пункта 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке,  которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять  выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора,  ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом  подрядчику.  

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом,  подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем  делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи  или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае,  

если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (пункт 4 статьи  753 ГК РФ).  

Согласно статье 166 Жилищного кодекса Российской Федерации перечень услуг и  (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание  и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта,  который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт,  установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, включает в  себя:  

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения,  

 водоотведения; 

2) ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и  блочных помещений;  

3) ремонт крыши; 

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в  многоквартирном доме  

5)ремонт фасада; 

6) ремонт фундамента многоквартирного дома. 

Статьей 9 Закона Астраханской области от 02.10.2013 № 55/2013-03 «Об отдельных  вопросах правового регулирования организации проведения капитального ремонта общего  имущества в многоквартирных домах на территории Астраханской области» предусмотрен  дополнительный перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, выполнение  которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, который включает в  себя:  

- разработку проектной документации для капитального ремонта и проведение  государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством  Российской Федерации о градостроительной деятельности;  

- усиление несущих и ненесущих строительных конструкций, включая несущие и  ненесущие стены, плиты перекрытий, несущие колонны, промежуточные и поэтажные  лестничные площадки, лестничные марши, ступени, косоуры;  

- утепление фасада; 

- переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; - устройство выходов на кровлю; 

- установку автоматизированных информационно-измерительных систем учета  потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг;  

- услуги по строительному контролю; 

- услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома; 

- восстановление антенн коллективных систем приема телевидения; 

- ремонт подъездов. 

Таким образом, по мнению ответчика работы по устройству отмостки не входят в  перечень работ по капитальному ремонту, выполнение которых финансируются за счет  средств фонда капитального ремонта.  

Вместе с тем постановлением Государственного комитета Российской Федерации по  строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 утверждены  Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (далее -Правила).  

Данным документом определены правила по эксплуатации, капитальному ремонту и  реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечению сохранности и  содержанию жилищного фонда, технической инвентаризации. Правила являются  обязательными для исполнения органами исполнительной власти субъектов Российской  Федерации, органами государственного контроля и надзора, органами местного  самоуправления.  

Согласно пункту 2.3.3 Правил примерный перечень работ, относящихся к текущему  ремонту, приведен в приложении № 7 к Правилам.  

В силу пункта 17 приложения № 7 к Правилам, к работам по текущему ремонту  относятся, в числе прочего, ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров,  

проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных  площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников.  

По смыслу данной нормы, ремонт отмостки относится к текущему ремонту в том  случае, если работы связаны с ремонтом и восстановлением разрушенных участков  отмостки.  

Организация и планирование капитального ремонта жилищного фонда  регламентированы разделом 2.4 Правил.  

В соответствии с пунктом 2.4.2 Правил при капитальном ремонте следует  производить, комплексное устранение неисправностей всех изношенных элементов здания и  оборудования, смену, восстановление или замену их на более долговечные и экономичны,  улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществление технически  возможной и экономически целесообразной модернизации жилых зданий с установкой  приборов учета тепла, воды, газа, электроэнергии и обеспечения рационального  энергопотребления.  

Примерный перечень работ, проводящихся за счет средств, предназначенных на  капитальный ремонт жилищного фонда, приведен в приложении № 8.  

Согласно пунктам 2 и 3 приложения № 8 к Правилам к работам, производимым при  капитальном ремонте жилищного фонда, относятся ремонтно-строительные работы по  смене, восстановлению или замене элементов жилых зданий (кроме полной замены  каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов); благоустройство дворовых  территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, и т.д.).  

Строительство отмосток осуществляется в соответствии с СП 82.13330.2016 «СНи11  III-10-75 Благоустройство территорий», утвержденного приказом Минстроя России от 16  декабря 2016 г. № 972/пр.  

Требования, предъявляемые к устройству отмосток, изложены в пункте 6.26 СП  82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий».  

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от  25.11.2017 № 1582/Пр утвержден «Свод правил. Здания жилые. Правила проектирования  капитального ремонта» (СП 368.1325800.2017).  

Согласно пункту 1.1 Свода Правил устанавливает требования на проектирование  капитального ремонта многоквартирных жилых зданий высотой до 75 м, в том числе  общежитий квартирного типа.  

Пунктом 5.3 Свода Правил предусмотрено, что при определении перечня работ,  проводимых при капитальном ремонте, следует руководствоваться приложением Б к Своду  Правил.  

В таблице Б.1 приложения Б среди перечня работ, проводимых при капитальном  ремонте жилых зданий, значится ремонт отмостки.  

В соответствии с пунктом 5.6 Свода Правил, примеры основных технологических  процессов при выполнении капитального ремонта приведены в приложении В.  

Перечень возможных дефектов элементов здания, подлежащих капитальному  ремонту, приведен в приложении Г.  

В приложении В к Своду Правил, в перечне процессов при капремонте фундаментов  указан процесс - В. 1.8 «Восстановление просевшего фундамента или устройство новой  отмостки вокруг здания с целью защиты почвы под фундаментами от размывания или  намачивания».  

В пункте «г» 1.1 приложения Г к Своду Правил, в перечне возможных дефектов  элементов здания, подлежащих капитальному ремонту указано: «Характерными дефектами  фундаментов, подвалов и технических подполий являются следующие недостатки:  

- неудовлетворительное состояние водоотводящих лотков и отмостки, трещины в  плоскости примыкания отмостки к наружным стенам.  

Работы при выполнении капитального ремонта фундаментов должны включать  необходимые технологические процессы, выполняющиеся в определенной  последовательности. Учитывая, что фундаменты являются подземной конструкцией, то  при их ремонте и усилении устраиваются траншеи и котлован, т.е. производят выемку  

грунта вокруг фундаментов. В свою о чередь выемка грунта не возможна без  нарушения целостности прилегающей к фундаменты отмостки.  

Таким образом, в соответствии с СП 368.1325800.2017 «Свод правил. Здания жилые.  Правила проектирования капитального ремонта» работы по устройству новой отмостки  относятся к видам работ, проводимым при капитальном ремонте многоквартирных жилых  зданий.  

По общему правилу, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений  (часть 1 статьи 65 АПК РФ). Однако такая обязанность не является безграничной. Если истец  в подтверждение своих доводов приводит убедительные доказательства, а ответчик с ними  не соглашается, не представляя документы, подтверждающие его позицию, то возложение на  истца дополнительного бремени опровержения документально неподтвержденной позиции  процессуального оппонента будет противоречить состязательному характеру  судопроизводства (статьи 8, 9 АПК РФ).  

Непредставление доказательств должно квалифицироваться исключительно как отказ  от опровержения того факта, на наличие которого аргументированного со ссылкой на  конкретные документы указывает процессуальный оппонент, участвующее в деле лицо, не  совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего  поведения (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 06.03.2012 № 12505/11).  

На основании пункта 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается  сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой  стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не  вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения  относительно существа заявленных требований.  

Доказательств надлежащего исполнения ответчиком обязательств, отсутствия долга, а  равно его наличия в ином (меньшем) размере, чем заявлено истцом, ответчиком не  представлено.  

В силу части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле несут риск наступления  последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.  

Согласно расчету истца задолженность по спорным работам составляет  230 707,20 руб.  

Ответчик факт выполнения истцом работ на указанную сумму не оспаривает, оплату  данных работ не осуществлял.  

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу том, что с ответчика в пользу истца  подлежат взысканию основной долг в размере 230 707,20 руб.  

В силу статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в  деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны,  в связи с чем расходы по уплате государственной пошлины в размере 7614 руб. возложены  на ответчика.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

взыскать с некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Астраханской области» (ИНН: 

<

***>, ОГРН:

<

***>)  в пользу общества с ограниченной ответственностью «АСАД» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН:

<

***>) основной долг по договору от 10.12.2020 № 59-СМР-2020 в размере  230 707 руб. 20 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 614 руб.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного  суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства  в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия,  через Арбитражный суд Астраханской области.  

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте  Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»  

Судья Р.Р. Абдуллин