АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ул. Ленина, д. 60, г. Сыктывкар, 167000

8(8212) 300-800, 300-810, http://komi.arbitr.ru, е-mail: info@komi.arbitr.ru   

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А29-7696/2022

26 октября 2022 года

г. Сыктывкар

 

Резолютивная часть решения объявлена 19 октября 2022 года, полный текст решения изготовлен 26 октября 2022 года.

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи  Онопрейчук И.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в  судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «Автодор»

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Модуль»

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании долга

при участии в судебном заседании:

от истца: представитель ФИО2 – по доверенности от 18.04.2022 № 16 (до и после  первого перерыва в судебном заседании),

от ответчика: представитель ФИО3 – по доверенности от 07.07.2022 (до и после первого перерыва в судебном заседании),

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее – ООО «Автодор», истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью    «Модуль»    (далее –    ООО    «Модуль»,    ответчик)    о      взыскании 

3 800 000 руб. долга по договору агентирования от 01.04.2011.

Определением Арбитражного суда Республики Коми от 22.06.2022 исковое заявление принято к производству, назначено к рассмотрению в предварительном судебном заседании на 01.08.2022 с указанием на возможность перехода в судебное заседание 01.08.2022 (при отсутствии возражений сторон).

В отзыве на исковое заявление ООО «Модуль» возражало против удовлетворения исковых требований, указав, что  истцом в рассматриваемом случае не представлено доказательств несения заявленных к взысканию расходов, так как в отчетах агента речь идет только о выполненных агентом работах и отсутствует указание на несение каких – либо расходов, которые принимает принципал.

Определением от 01.08.2022 рассмотрение дела назначено в судебном заседании на 26.08.2022.

От истца в материалы дела поступили  возражения на отзыв ответчика от 17.08.2022 № 629, а также дополнительные документы в обоснование исковых требований, в том числе договоры подряда на выполнение спорных работ,  платежные поручения  об оплате стоимости работ в рамках договоров подряда.

Протокольным определением от 26.08.2022 рассмотрение дела в судебном заседании отложено на 07.09.2022.

В дополнительных письменных возражениях от 07.09.2022 ответчик отразил, что  при детальном изучении документов, представленных истцом в обоснование исковых требований, установлено, что вся первичная документация составлена и подписана обществом с ограниченной ответственностью «Дорстройиндустрия», а также лицами, непосредственно выполнявшими работы и услуги, в связи с чем истцом  документально не доказан факт несения предъявленных расходов, не представлено соглашение о переуступке прав требований или иных соглашений, подтверждающих перевод обязательств от общества с ограниченной ответственностью «Дорстройиндустрия» к  обществу с ограниченной ответственностью «Комисбытресурс».

В материалы дела не представлены ни платежные поручения, ни иные документы, позволяющие  подтвердить несение расходов агентом.

Определением арбитражного суда от 07.09.2022 рассмотрение дела в судебном заседании отложено на 12.10.2022.

Представитель истца в судебном заседании на исковых требованиях настаивал; представил в материалы дела отзыв на дополнительные письменные возражения ответчика от 12.10.2022 № 715, в котором  отразил перечень  отчетов агента,  стоимость  работ по которым заявлена в рамках настоящего дела.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований, представил дополнительные письменные возражения от 19.10.2022, суть которых фактически свелась к тому, что со стороны истца в материалы дела не предоставлены документы в подтверждение исковых требований.

Кроме того, со стороны ответчика заявлено ходатайство об отложении рассмотрения дела в судебном заседании.

В судебном заседании в соответствии с нормами статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялись перерывы с 12.10.2022 до 09 часов 15 минут  19.10.2022 и до 15 часов 00 минут 19.10.2022, после окончания второго перерыва судебное заседание продолжено в отсутствие представителей сторон.

Рассмотрев ходатайство ответчика об отложении судебного разбирательства по делу, арбитражный суд отказал в его удовлетворении в соответствии с нормами статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, так как в целях ознакомления  ответчика с дополнительными документами, представленными истцом в материалы дела, судом объявлялся перерыв в судебном заседании, представитель ответчика с документами ознакомился, предоставил дополнительные письменные возражения на иск.

Заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

01 апреля 2011 года между ООО «Модуль» (принципал» и  обществом с ограниченной ответственностью «Комисбытресурс» (агент) заключен договор агентирования, в соответствии с пунктом 1.1. которого агент обязуется по поручению принципала от своего имени оказать услуги и выполнять работы, предусмотренные пунктом 1.2. договора, а принципал обязуется принимать выполненные работы  и оказанные услуги и оплачивать агенту вознаграждение и понесенные последним расходы в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Согласно пункту 1.2. договора от 01.04.2011 агент обязуется по поручению самостоятельно либо путем привлечения третьих лиц  оказывать принципалу следующие услуги и выполнять следующие работы:

- проводить поиск и разведку месторождений общераспространенных полезных ископаемых на участках, указанных принципалом в поручении к договору (конкретные месторождения и иные условия оказания услуг и выполнения работ, не указанные в договоре, определяются сторонами в таком поручении);

- оформлять всю документацию, необходимую для рассмотрения и регистрации  запасов полезных ископаемых в отношении указанного в поручении месторождения в органе, уполномоченном проводить государственную регистрацию экспертизу запасов полезных ископаемых;

- подготовить проект разработки указанного в поручении месторождения и согласовать его  в уполномоченных органах государственной власти и органах местного самоуправления;

- составлять и производить согласование планов горных работ в уполномоченных органах и организациях, обеспечивать получение горноотводных актов в отношении указанного в поручении месторождения;

- проводить  инженерно – геологические и инженерно – геодезические работы на месторождениях, указанных принципалом в поручении к договору;

- оказывать иные услуги и выполнять иные работы, связанные с геологическими изысканиями и проектированием в отношении указанных в поручении месторождений.

В силу пункта 1.3. договора  от 01.04.2011 в случае необходимости привлечения к выполнению работ и оказанию услуг  по договору третьих лиц, агент самостоятельно осуществляет подбор таких лиц и заключает с ними необходимые договоры. При этом, ответственность за надлежащее выполнение таких работ и оказание услуг перед принципалом несет агент.

В пункте 1.5 договора от 01.04.2011 отражено, что срок выполнения  конкретных видов работ в отношении конкретных месторождений устанавливается сторонами в поручениях в отношении этих месторождений.

В соответствии с разделом 3 договора от 01.04.2011 после окончания выполнения агентом работ и оказания услуг по поручению в отношении указанного в поручении месторождения, агент в сроки, указанные в таком поручении, предоставляет принципалу отчет о выполненной работе и оказанных услугах с приложением подтверждения понесенных расходов агента, а принципал в сроки, указанные в поручении, возмещает агенту все понесенные последним расходы по выполнению поручения.

Датой получения принципалом результата оказанных услуг и выполненных работ по каждому поручению является дата подписания сторонами отчета агента и услуг по поручению.

Подписание принципалом отчета агента и услуг по поручению свидетельствует о качественном выполнении  работы и оказании услуг агентом в отношении указанного в соответствующем поручении  месторождения.

Предъявление претензий принципалом к качеству оказанных услуг и выполненных  работ в отношении конкретного месторождения возможно только до подписания сторонами отчета агента и услуг по поручению в отношении указанного в соответствующем поручении месторождения.

В силу пунктов 4.1. – 4.3. договора от 01.04.2011 вознаграждение агента за оказываемые услуги и выполняемые по договору работы  устанавливается в размере 1% от суммы понесенных (без учета НДС) расходов по выполнению поручений в соответствии с договором (вознаграждение устанавливается по выполнению каждого поручения). На оплату суммы вознаграждения  агент  выставляет принципалу счет – фактуру (счет).

Сумма вознаграждения уплачивается принципалом по каждому поручению в указанные в таком поручении сроки.

После предоставления агентом отчета о выполненных работах и оказанных услугах по каждому поручению, а также всех документов, подтверждающих понесенные агентом расходы на выполнение такого поручения, принципал возмещает агенту подтвержденные надлежащим образом и принятые принципалом расходы, понесенные агентом по выполнению соответствующего поручения в порядке и сроки, установленные в таком поручении.

Пунктом 6.2. договора  от 01.04.2011 предусмотрено, что данный договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Дополнительным соглашением от 01.04.2011 № 1 в договор от 01.04.2011 сторонами внесены изменения.

Кроме того, истцом в материалы дела представлены  следующие поручения:

1) поручение от 01.04.2011 № 1, согласно пункту 1 которого  принципал поручает, а агент обязуется от своего имени  оказать услуги и выполнить следующие работы: по составлению рабочего проекта «Разработка месторождения строительного песка «Придорожный-2» в Печорском районе Республики Коми»; по разработке рабочего проекта  месторождения строительного песка «раздольное-1» на территории МО МР «Княжпогостский» Республики Коми; определение перспективности участка на месторождении «Печорское» на выявление залежи песчаного материала; составление планов развития горных работ по разработке месторождения песка «Лунвож – 5» на 2012 год; выполнение поисково – разведочных работ на песок и ПГС, с подсчетом и утверждением запасов на участке «Раздольное-1» на территории МО МР «Княжпогостский» Республики Коми; выполнение работ по подготовке пакета документов геологической информации по участку геологических работ на  общераспространенные полезные ископаемые «Гряда»; выполнение работ по подготовке материалов для расчета платы за земли лесного фонда, рассмотрение и согласование месторождения песка «Раздольное -1» на территории МО МР «Княжпогостский» Республики Коми; выполнение работ по разработке  плана развития горных работ на 2011 по разработке месторождения песка «Раздольное-1» на территории МО МР «Княжпогостский» Республики Коми.

В пунктах 2, 3, 4 поручения  от 01.04.2011 № 1 отражено, что  срок выполнения работ и оказания услуг по данному поручению устанавливается с 01.04.2011 по 31.12.2011.

Датой получения принципалом результата  оказанных услуг и выполненных работ по поручению  является дата подписания сторонами отчета агента. При подписании отчета агента агент передает принципалу всю документацию в отношении выполненной работы и оказанных услуг по поручению.

После окончания выполнения агентом работ и оказания услуг по поручению агент одновременно с направлением принципалу письменного уведомления о таком окончании предоставляет принципалу отчет о выполненной работе и оказанных услугах с приложением документального подтверждения понесенных расходов агента в связи с выполнением этого поручения. Принципал рассматривает предоставленный отчет в течение десяти дней, после чего возмещает агенту подтвержденные надлежащим образом и принятые принципалом расходы, понесенные агентом по выполнению поручения. Возмещение расходов агента осуществляется путем перечисления  принятых принципалом сумм на расчетный счет агента.

2) поручение от 01.01.2012 № 2,  согласно пункту 1 которого  принципал поручает, а агент обязуется от своего имени  оказать услуги и выполнить следующие работы: выполнение работ по разработке плана развития горных работ на 2013 год по разработке месторождения строительного песка «Раздольное-1» на территории МО МР «Княжпогостский» Республики Коми;  выполнение работ по разработке плана развития горных работ на 2012 год по разработке месторождения строительного песка «Раздольное-1» на территории  МО МР «Княжпогостский» Республики Коми; по разработке проекта освоения лесов на участке с целью подготовки площадки для разработки месторождения песка «Раздольное-1» на территории ГКУ РК «Железнодорожное лесничество»; определение географических координат угловых точек Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Территориальный фонд информации по природным ресурсам  и охране окружающей среды Республики Коми»; составление планов развития горных работ по разработке месторождений песка на участке «Акимское» на 2013 год; выполнение работ по выносу и закреплению границ лесного участка для разработки песка  месторождения «Раздольное-1»; выполнение работ по расчистке площади от леса и лесорастительности под разработку месторождения  песка «Раздольное-1»; песок на участке «Марьель» Печорского района для определения перспективности участка на месторождении «Печорские» на выявление залежи песчаного материала; выполнение работ по оформлению прав на земельный участок для разработки месторождения песка «Раздольное-1» с подъездной автодорогой, расположенного на территории Княжпогостского района, на землях ГУ РК «Железнодорожное лесничество».

В пунктах 2, 3, 4 поручения  от 01.01.2012 № 2 отражено, что  срок выполнения работ и оказания услуг по данному поручению устанавливается с 01.01.2012 по 31.12.2012.

Датой получения принципалом результата  оказанных услуг и выполненных работ по поручению  является дата подписания сторонами отчета агента. При подписании отчета агента агент передает принципалу всю документацию в отношении выполненной работы и оказанных услуг по поручению.

После окончания выполнения агентом работ и оказания услуг по поручению агент одновременно с направлением принципалу письменного уведомления о таком окончании предоставляет принципалу отчет о выполненной работе и оказанных услугах с приложением документального подтверждения понесенных расходов агента в связи с выполнением этого поручения. Принципал рассматривает предоставленный отчет в течение десяти дней, после чего возмещает агенту подтвержденные надлежащим образом и принятые принципалом расходы, понесенные агентом по выполнению поручения. Возмещение расходов агента осуществляется путем перечисления  принятых принципалом сумм на расчетный счет агента.

3) поручение от 01.10.2013 № 3,  согласно пункту 1 которого  принципал поручает, а агент обязуется от своего имени  оказать услуги и выполнить работы, предусмотренные в приложении № 1  к поручению, а принципал обязуется принять выполненные работы и оказанные услуги и возместить понесенные агентом расходы в порядке и на условиях, предусмотренных поручением.

В пунктах 4 и 5 вышеуказанного поручения отражено, что  приемка – передача результата оказанных услуг и выполненных работ по поручению оформляется актом приема – передачи работ и услуг по поручению, который подписывается сторонами в течение десяти дней со дня окончания  выполнения агентом работ и оказания услуг по поручению. Об окончании выполнения работ и оказания услуг агент письменно информирует принципала  с приложением подтверждающих документов. Датой получения принципалом результата оказанных услуг и выполненных работ по поручению является дата подписания сторонами акта приемки – передачи работ и услуг по поручению. При подписании акта приемки – передачи агент передает принципалу всю документацию в отношении выполненной работы и оказанных услуг по поручению

 После окончания выполнения агентом работ и оказания услуг  по поручению агент одновременно с направлением принципалу письменного уведомления о таком окончании предоставляет принципалу отчет о выполненной работе и оказанных услугах с приложением документального подтверждения понесенных расходов агента в связи с выполнением этого поручения. Принципал рассматривает предоставленный отчет в течение десяти дней после чего возмещает агенту подтвержденные надлежащим образом и принятые принципалом расходы, понесенные агентом по выполнению поручения. Возмещение расходов агента осуществляется путем перечисления принятых принципалом сумм на расчетный счет агента.

В приложении № 1 к поручению от 01.10.2013 № 3 отражены следующие виды работ: подготовка плана развития горных работ на 2014 год, месторождение «Раздольное-1»; подготовка плана – развития горных работ на 2014 год, месторождение «Акимское»; проведение топографической съемки, месторождение песка «Раздольное-1», с указанием сроков выполнения данных работ.

4) поручение от 01.09.2014 № 4, согласно пункту 1 которого  принципал поручает, а агент обязуется от своего имени  оказать услуги и выполнить работы, предусмотренные в приложении № 1  к поручению, а принципал обязуется принять выполненные работы и оказанные услуги и возместить понесенные агентом расходы в порядке и на условиях, предусмотренных поручением.

В пунктах 4 и 5 вышеуказанного поручения отражено, что  приемка – передача результата оказанных услуг и выполненных работ по поручению оформляется актом приема – передачи работ и услуг по поручению, который подписывается сторонами в течение десяти дней со дня окончания  выполнения агентом работ и оказания услуг по поручению. Об окончании выполнения работ и оказания услуг агент письменно информирует принципала  с приложением подтверждающих документов. Датой получения принципалом результата оказанных услуг и выполненных работ по поручению является дата подписания сторонами акта приемки – передачи работ и услуг по поручению. При подписании акта приемки – передачи агент передает принципалу всю документацию в отношении выполненной работы и оказанных услуг по поручению

 После окончания выполнения агентом работ и оказания услуг  по поручению агент одновременно с направлением принципалу письменного уведомления о таком окончании предоставляет принципалу отчет о выполненной работе и оказанных услугах с приложением документального подтверждения понесенных расходов агента в связи с выполнением этого поручения. Принципал рассматривает предоставленный отчет в течение десяти дней после чего возмещает агенту подтвержденные надлежащим образом и принятые принципалом расходы, понесенные агентом по выполнению поручения. Возмещение расходов агента осуществляется путем перечисления принятых принципалом сумм на расчетный счет агента.

В приложении № 1 к поручению от 01.09.2014 № 4 отражены следующие виды работ: подготовка плана развития горных работ на 2015 год, месторождение «Раздольное-1»; подготовка плана  развития горных работ на 2015 год, месторождение «Акимское»; выполнение маркшейдерской съемки выработанного пространства, месторождение «Раздольное-1»; выполнение маркшейдерской съемки выработанного пространства, месторождение «Акимское», с указанием сроков выполнения данных работ.

В обоснование исковых требований истцом в материалы дела представлены (с учетом письменных пояснений  от 12.10.2022 № 715)  отчеты агента  от 25.10.2012 на сумму 1 680 000 руб., от 30.10.2021 на сумму 68 500 руб., от 26.11.2012 на сумму 45 000 руб., от 25.10.2013 на сумму 175 000 руб., от 14.11.2013  на сумму 65 600 руб., от 16.12.2013 на сумму 162 894 руб., от 27.02.2014 на сумму 80 000 руб., от 16.04.2014 на сумму 285 106 руб., от 16.09.2014  на сумму 649 800 руб., от 24.09.2014 на сумму 661 694 руб. 18 коп., от 30.09.2014 на сумму 40 000 руб., от 30.09.2014  на сумму 40 000 руб., от 30.09.2014 на сумму 40 000 руб., от 30.09.2014 на сумму 40 000 руб., от 01.12.2014 на сумму    40 000 руб.,    от    02.12.2014    на     сумму    157 018 руб.,    подписанные   между 

ООО «Модуль» и  обществом с ограниченной ответственностью «Комисбытресурс»  без возражений и скрепленные печатями сторон.

Все вышеуказанные отчеты агента содержат в себе ссылку на договор агентирования от 01.04.2011.

По расчету истца, на стороне ответчика образовался долг по оплате выполненных работ (оказанных услуг)  в рамках договора от 01.04.2011 по вышеуказанным отчетам агента в размере 3 800 000 руб. (с учетом остатка долга по отчету агента от 25.10.2012 в размере 1 249 387 руб. 82 коп.).

Кроме того, со стороны истца в материалы дела представлено соглашение от 25.03.2019, заключенное между ООО «Модуль» и обществом с ограниченной ответственностью «Комисбытресурс», в пункте 1 которого отражено, что при заключении данного соглашения стороны исходили из намерения принципала добровольно и в кратчайшие сроки погасить всю имеющуюся задолженность по договору агентирования от 01.04.2011 в сумме 4 852 113 руб. 87 коп.; кратчайший срок – 31.01.2020.

В пункте 2 соглашения от 25.03.2019 приведен график платежей задолженности в размере 4 852 113 руб. 87 коп. 

В акте сверки  взаимных расчетов  за 2020 год, подписанном между ООО «Модуль» и обществом с ограниченной ответственностью «Комисбытресурс» отражено на наличие долга на стороне ООО «Модуль» в рамках договора  агентирования от 01.04.2011 в размере 3 800 000 руб.

26 октября 2021 года общество с ограниченной ответственностью «Комисбытресурс»  прекратило деятельность юридического лица путем реорганизации в форме присоединения; правопреемником общества является ООО «Автодор».

Абзацем вторым пункта 4 статьи 57 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Статья 8 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе, из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно пункту 1 статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.  

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела документы, арбитражный суд удовлетворяет исковые требования ООО «Автодор», так как заявленные исковые требований документально подтверждены истцом; доводы ответчика, изложенные в отзыве на исковое заявление и дополнениях к нему, опровергаются  представленными доказательствами.

При этом, арбитражный суд отмечает, что в ответе на претензию истца  от 01.06.2022 № 52-О ООО «Модуль»  не заявило каких – либо возражений относительно наличия на его стороне долга в рамках договора агентирования от 01.04.2011 в размере 3 800 000 руб.; напротив, ответчик просил истца рассмотреть возможность отсрочки  платежей.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины возлагаются на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Модуль» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Автодор» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 3 800 000 руб. долга,  42 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г.Киров) с подачей жалобы (в том числе в электронном виде)  через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объеме.

Судья                                             И.С. Онопрейчук