АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

дело № А84-1575/2021

23 июня 2021 года

город Севастополь

Резолютивная часть решения оглашена 17.06.2021.

Решение в полном объёме составлено 23.06.2021.

Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Погребняка А.С., при ведении протокола секретарем ФИО1, рассмотрев дело

по иску общества с ограниченной ответственностью "Факел-Юг" (Краснодарский край, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к Федеральному государственному унитарному предприятию "102 предприятие электрических сетей" Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 9204549910г. Севастополь)

при участии в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора – Общества с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго»

о взыскании денежных средств в размере 7 428 100 рублей

при участии:

от истца: ФИО2, доверенность;

от ответчика: ФИО3, доверенность;

от третьего лица: ФИО4, доверенность;         

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Факел-Юг" обратилось в Арбитражный суд города Севастополя с иском к федеральному государственному унитарному предприятию "102 предприятие электрических сетей" Министерства обороны Российской Федерации о взыскании денежных  средств 7428100 руб.

Определением суда от 05.04.2021 исковое заявление принято судом к производству, назначено предварительное судебное заседание. 

Ответчик представил отзыв на иск, просил в иске отказать в полном объеме, исходя из того, что условия договора им не нарушены.

Третье лицо представило письменные пояснения по сути спора.

18.05.2021 суд перешел на стадию судебного разбирательства.

В судебном заседании 17.06.2021 представители сторон огласили заявленные правовые позиции, представитель истца просил иск удовлетворить; представитель ответчика возражал относительно удовлетворения иска.

Изучив материалы дела, суд пришел к следующим выводам по делу.

19.08.2019 между ООО «Севастопольэнерго» и Федеральным государственным унитарным предприятием "102 предприятие электрических сетей" Министерства обороны Российской Федерации был заключен договор № 2.5019-1646 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Порядок технологического присоединения ЭПУ потребителей электрической энергии к электрическим сетям сетевых организаций определен и регулируется Правилами технологического присоединения ЭПУ потребителей электрической энергии, (далее - Правила), утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г.

Предметом Договора № 25019-1646 является технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства по линиям 6кВ №52 №57 ПС-110/6кВ №12 в сторону ТРп-48: дополнительных (новых) КТП-6/0,4 кВ (13 шт.), нового ЦРП-бкв, нового РП-бкВ и КЛ-бкВ, для присоединения ЭПУ потребителей в районе аэродрома «Бельбек», расположенных по адресу : 

<

...> (кад. № 91:04x003005:759) п.2 Договора).

Срок выполнения мероприятия по технологическому присоединению составляет 2 года со дня заключения настоящего договора (п.5 Договора).

В рамках указанного договора Сетевая организация была обязана осуществить технологическое присоединение электроустановок, расположенных по адресу: 

<

...>.

ООО «Севастопольэнерго» были выполнены работы в рамках Договора № 25019-1646 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Выполненные работы подтверждаются:

Актом о выполнении технических условий № 1646/19 эт 17.03.2021;

Актом об осуществлении технологического присоединения № 1646/19 от 12.042021;

Актами технической проверки прибора учета от 12.04.2021.

Указанные выше документы (комплект документов) были направлен в адрес ФГУП «102 предприятие энергетических сетей» МО РФ письмом ООО «Севастопольэнерго» от 14.04.2021 № ИТП-19/03525 в 2 экземплярах для подписания.

10.03.2020 года между ФГУП 102 ПЭС Минобороны России (Заказчик по договору) и ООО «ФАКЕЛ-ЮГ» (Подрядчик по договору) был заключен договор № 1921187978832554164000000/3 от 10 марта 2020 года на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство ЦРП-6 кВ в районе пересечения ул. Братская-ул. ФИО5, строительство КТП (БКТП)-6/0,4 кВ 2X1250 кВА, строительство кабельных линий 6 кВ для подключения КТП (БКТП)-6/0,4 кВ (проектируемой) для технологического присоединения специализированного комплексного здания на аэродроме «Бельбек», г. Севастополь (далее - Договор).

Договор был заключен в целях реализации Государственного контракта, заключенного между Заказчиком и Государственным заказчиком от 11.12.2019 г. №1921187978832554164000000 на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям (шифр объекта К-41/18-60), в целях выполнения государственного оборонного заказа (далее-«Государственный контракт»), Идентификационный код государственного оборонного заказа ИГК № 1921187978832554164000000 (пункт 2.4. раздела 2. «Предмет договора» Договора).

Согласно условиям Договора Подрядчик выполняет проектные и изыскательские работы по объекту: «Строительство ЦРП-6 кВ в районе пересечения ул. Братская-ул. ФИО5, строительство КТП (БКТП)-6/0,4 кВ 2X1250 кВА, строительство кабельных линий 6 кВ для подключения КТП (БКТП)-6/0,4 кВ (проектируемой) для технологического присоединения специализированного комплексного здания на аэродроме «Бельбек», г. Севастополь (шифр объекта Ю-41/18-60), расположенного по адресу: г. Севастополь, Нахимовский р-н, с. Любимовка (далее-Работы, Работа) в соответствии с условиями Договора, в том числе, Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), и другими Исходными данными, необходимыми для выполнения Подрядчиком Работ на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик, обязуется обеспечить приемку и оплату выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с условиями настоящего Договора (пункты 2.1. и 2.2. раздела 2. «Предмет договора» Договора).

Цена Работ составляет 5 900 000 рублей.

Оплата стоимости выполненных подрядчиком работ производится заказчиком на основании подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ (Этапа работ) в течение 60 календарных дней с даты подписания акта об осуществлении технологического присоединения проектируемого объекта (п. 5.2 Договора).

В соответствии с пунктом 8.1. договора, сдача Подрядчиком разработанной Документации осуществляется по Этапам работ, состав и сроки которых определяются Графиком выполнения работ (приложение №2 к Договору) и оформляется Актами о приемке выполненных работ (Этапа работ). Датой сдачи Подрядчиком каждого Этапа работ является подписание Акта о приемке выполненных работ (Этапа работ).

Истец ссылается на то, что результат выполненных Работ в рамках Договора и в соответствии с разделом 8. «Порядок сдачи и приемки работ» Договора передан ответчику 30.04.2020 вместе с документацией для осуществления оплаты выполненных работ. 

Работы были приняты без замечаний, использованы Заказчиком для проведения конкурсной процедуры на выполнение работ по строительству 2-х кабельных линий 6 кВ ЦРП-6 кВ - КТП(БКТП)-6/0,4кВ 2х1250кВА (проектируемых) по объекту: «Строительство ЦРП-6 кВ в районе пересечения ул. ФИО6, строительство КТП (БКТП)-6/0,4 кВ 2х1250кВА, строительство кабельных линий 6кВ для подключения КТП (БКТП)-6/0,4 кВ (проектируемой)» для технологического присоединения специализированного комплексного здания на аэродроме «Бельбек» г. Севастополь, расположенного по адресу: г. Севастополь, Нахимовский р-н, с. Любимовка.

08.05.2020 на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок размещено извещение о проведении закупки № 32009139159 на выполнение строительно-монтажных работ по проектной документации, разработанной ООО «ФАКЕЛ- ЮГ».

14.05.2020 составлен и подписан итоговый протокол № 32009139159-01 по результатам закупки № 32009139159. Указанный протокол размещен на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 15.05.2020.

По результатам закупки № 32009139159 был определен Поставщик на выполнение строительно-монтажных работ и уже 04.06.2020 на основании указанной закупки Заказчиком заключен договор № 1921187978832554164000000/8 на выполнение работ по строительству 2-х кабельных линий 6 кВ ЦРП-6 кВ – КТП (БКТП)-6/0,4кВ 2х1250кВА (проектируемых) по объекту: «Строительство ЦРП-6 кВ в районе пересечения ул. ФИО6, строительство КТП (БКТП)-6/0,4кВ 2х1250кВА, строительство кабельных линий 6кВ для подключения КТП (БКТП)-6/0,4кВ (проектируемой)» для технологического присоединения специализированного комплексного здания на аэродроме «Бельбек» г. Севастополь, расположенного по адресу: г. Севастополь, Нахимовский р-н, с. Любимовка. Указанный договор размещен на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 09.06.2020.

Истец ссылается на то, что несмотря на фактическое принятие работ и использование результата выполненных работ, Заказчик уклонился от подписания Акта выполненных работ.

23.11.2020 истец повторно передал Заказчику по накладной приема-передачи документации № 1 от 23.11.2020 проектную документацию, результаты инженерных изысканий по объекту: «Строительство ЦРП-6 кВ в районе пересечения ул. Братская-ул. ФИО5, строительство КТП (БКТП)-6/0,4 кВ 2X1250 кВА, строительство кабельных линий 6 кВ для подключения КТП (БКТП)-6/0,4 кВ (проектируемой) для технологического присоединения специализированного комплексного здания на аэродроме «Бельбек», г. Севастополь, Акт выполненных работ № 63 от 23.11.2020 в 2-х экземплярах и Счет на оплату № 63 от 23.11.2020 в 1-м экземпляре. Однако, указанные документы (Акт выполненных работ № 63 от 23.11.2020 и Счет на оплату № 63 от 23.11.2020) Заказчиком не были подписаны и не были оплачены.

В рамках досудебного урегулирования спора в адрес Ответчика направлена претензия Исх. № 2020-26 от 25.12.2020.

Неоплата задолженности стала причиной обращения истца в суд с требованиями о взыскании с ответчика задолженности в размере 5 900 000 рублей, неустойки за период с 08.07.2020 по 23.03.2021 в размере 1 528 100 рублей.

Ответчик исковые требования по делу не признал, в отзыве сослался на положения п. 5.2 Договора, в соответствии с которым, оплата стоимости выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ Этапа работ) в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта об осуществлении технологического присоединения проектируемого объекта.

При этом пояснил, что настоящий договор был заключен во исполнение договора №1921187978832554164000000 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 11.12.2019г., где Заявителем выступает Министерство обороны Российской Федерации; до настоящего времени технологическое присоединение не осуществлено, акт технологического присоединения проектируемого объекта не подписан, Заявителю направлено письмо Сетевой организацией от 11.12.2020г. исх.№5776 об устранении замечаний по выполнению технических условий; подписание Акта технологического присоединения не зависит от воли ответчика по причине выполнения технических условий Заявителем с замечаниями.

С учётом изложенного, по мнению ответчика, основания для начисления неустойки в соответствии с условиями договора, отсутствуют.

Третье лицо представило письменные пояснения по сути спора, указав, что ООО «Севастопольэнерго» были выполнены работы в рамках Договора № 25019-1646 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Выполненные работы подтверждаются:

Актом о выполнении технических условий № 1646/19 эт 17.03.2021;

Актом об осуществлении технологического присоединения № 1646/19 от 12.042021;

Актами технической проверки прибора учета от 12.04.2021.

В дополнительных пояснениях по делу истец указывает на то, что Договор №25019-1646 от 19.08.2019 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между ФГУП 102 ПЭС Минобороны России и ООО "Севастопольэнерго" па объекты электросетевого хозяйства по линиям 6кВ №52 №57 ПС-110/6кВ №12 в сторону ТРн-48, дополнительных (новых) КТП-6/0,4 кВ (13 шт.) нового ЦРП-бка, нового PI 1- 6кВ и КЛ-бкВ, для присоединения ЭПУ потребителей в районе аэродрома "Бельбек", расположенных по адресу: 

<

...>, был заключен на промежуточном этапе выполнения технических условий по договору технологического присоединения с Министерством обороны с целью получения мощности на два объекта: аэродром "Бельбек" и специализированное комплексное здание на аэродроме "Бельбек". Акт технологического присоединения №1646/19 от 12.04.2021 не подписан со стороны ФГУП 102 ПЭС Минобороны России, возвращен в адрес ООО "Севастопольэнерго" с замечаниями.

Изучив материалы по делу, заслушав пояснения представителей участников по делу, суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения иска, согласно следующего.

В силу статьи 758 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

По смыслу пункта 1 статьи 720 ГК РФ, заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно пункту 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Обязанность оплаты полученных заказчиком результатов работ зависит от самого факта их принятия этим лицом. Принятие работ свидетельствует о потребительской ценности произведенных работ и возможности воспользоваться результатом работ.

Судом установлено, что истцом обязательства исполнены надлежащим образом, результаты выполненных работ переданы заказчику, который фактически использовал полученный результат работ, впоследствии заключив договор № 1921187978832554164000000/8 на выполнение работ по строительству 2-х кабельных линий 6 кВ ЦРП-6 кВ - КТП(БКТП)-6/0,4кВ 2х1250кВА (проектируемых) по объекту: «Строительство ЦРП-6 кВ в районе пересечения ул. ФИО6, строительство КТП(БКТП)-6/0,4кВ 2х1250кВА, строительство кабельных линий 6кВ для подключения КТП(БКТП)-6/0,4кВ (проектируемой)» для технологического присоединения специализированного комплексного здания на аэродроме «Бельбек» г. Севастополь, расположенного по адресу: г. Севастополь, Нахимовский р-н, с. Любимовка.

При этом, оплата работ по договору № 1921187978832554164000000/3 от 10.03.2020 поставлена в зависимость от наступления следующего условия – подписания акта об осуществлении технологического присоединения проектируемого объекта (п. 5.2 Договора) и должна быть осуществлена в течение 60 дней.

Материалами по делу подтверждается, что Акт об осуществлении технологического присоединения № 1646/19 от 12.04.2021 с приложениями направлен ООО «Севастопольэнерго» в адрес ФГУП «102 предприятие энергетических сетей» МО РФ письмом ООО «Севастопольэнерго» 14.04.2021 № ИТП-19/03525.

Таким образом, основания для оплаты суммы задолженности за выполненные работы в размере суммы основного долга 5 900 000 рублей по договору № 1921187978832554164000000/3 от 10.03.2020 года наступили (в связи с истечением срока 60 дней).

Наличие задолженности в указанном размере подтверждается условиями договора, представленными истцом первичными документами по делу, в связи с чем, указанное требование подлежит удовлетворению, а сумма в размере 5 900 000 рублей – взысканию с ответчика в пользу истца.

Истцом начислена пеня в соответствии с положениями п. 9.3 договора за период с 08.07.2020 по 23.03.2021 в сумме 1 528 100 руб, в соответствии с представленным расчетом.

Согласно статье 12 ГК РФ взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.

На основании пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу статьи 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

При этом, учитывая положения п. 5.2 Договора, согласно которого оплата стоимости выполненных работ производится заказчиком в течение 60 календарных дней с даты подписания акта об осуществлении технологического присоединения проектируемого объекта (14.04.2021), у суда отсутствуют основания для взыскания с ответчика пени, исходя из представленного истцом расчета за период с 08.07.2020 по 23.03.2021, поскольку в указанный период основания для оплаты работ не наступили.

Исходя из указанного, суд считает необоснованными требования истца в части взыскания суммы неустойки.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия "102 предприятие электрических сетей" Министерства обороны Российской Федерации (г.Севастополь; ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Факел-Юг» (Краснодарский край, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) задолженность в размере 5 900 000 рублей, а также расходы на оплату госпошлины в размере 47 770 рублей. 

В остальной части иск оставить без удовлетворения.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не будет подана апелляционная жалоба.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд города Севастополя. 

Судья                                                                                           А.С. Погребняк