Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-9081/2017

г. Хабаровск

25 августа 2017 года

Арбитражный суд в составе судьи Л.А. Збарацкой

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в заседании суда дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Наш город» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>, место нахождения: 682800, 

<

...> погибших партизан, д. 63А, квартира 11) 

к администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>, место нахождения: 682800, 

<

...>) 

о взыскании 1 023 719 руб. 60 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2, действующего по доверенности от 01.06.2017 б/н, 

от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом.

 

Общество с ограниченной ответственностью «Наш город» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края о взыскании 1 023 719 руб. 60 коп.. составляющих по муниципальному контракту от 09.01.2017 № 8 основной долг в размере 953 661 руб. 80 коп., неустойку в размере 22 649 руб. 47 коп. за периоды с 30.04.2017 по 28.06.2017, по договору от 01.03.2017 № 8 основной долг в размере 46 308 руб. 50 коп., неустойку в размере 1 099 руб. 83 коп. за периоды с 30.04.2017 по 28.06.2017.

В соответствии со статьей 49 АПК РФ  представитель истца заявил отказ от искового требования о взыскании основного долга по муниципальному контракту от 09.01.2017 № 8 в размере 953 661 руб. 80 коп., основного долга по договору от 01.03.2017 № 8 в размере 46 308 руб. 50 коп., заявил об уточнении исковых требований, просил взыскать неустойку в размере 32 090 руб. 72 коп. по муниципальному контракту от 09.01.2017 № 8 за период с 30.04.2017 по 31.07.2017, неустойку в размере 1 516 руб. 60 коп. по договору от 01.03.2017 № 8 за период с 30.04.2017 по  28.07.2017.

Частичный отказ от иска, уточнение исковых требований судом приняты, так как данные распорядительные действия закону не противоречат, прав других лиц не нарушают. 

В соответствии со статьей 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Производство по требованию о взыскании основного долга в размере 999 970 руб. 30 коп.   подлежит прекращению.

Представитель истца заявил ходатайство об изменении место нахождения истца на  682800, 

<

...> погибших партизан, д. 63А, квартира 11.

Судом изменение место нахождения истца принято. 

Истец, как следует из искового заявления, объяснений представителя в судебном заседании, просил исковые требования удовлетворить,  в качестве обстоятельств, на которых основаны исковые требования, указал на наличие между сторонами обязательственных отношений, возникших из муниципального контракта от 09.01.2017 № 8,  договора от 01.03.2017 № 8,ненадлежащее исполнение ответчиком обязанности по оплате выполненных работ, возникновение права на начисление неустойки в размере 32 090 руб. 72 коп. по муниципальному контракту от 09.01.2017 № 8 за периоды с 30.04.2017 по 31.07.2017, неустойки в размере 1 516 руб. 60 коп. по договору от 01.03.2017 № 8 за периоды с 30.04.2017 по  28.07.2017.

Ответчик в отзыве на исковое заявление указал на то, что произведена оплата основного долга по муниципальному контракту от 09.01.2017 № 8, по договору от 01.03.2017 № 8. 

Заявил ходатайство о снижении размера неустойки, поскольку вина Администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края в несвоевременной оплате отсутствует.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, суд 

УСТАНОВИЛ:

09.01.2017 между Администрацией городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края (далее – заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Наш город» (далее - подрядчик) заключен муниципальный контракт № 8 (далее – контракт), в соответствии с которым подрядчик обязуется по  заданию заказчика выполнить работы по устройству сетей наружного освещения на объекте « Участок улицы Пионерская от ул. Ленина до ул.Гончарова» в г.Советская Гавань (далее – объект), а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

В соответствии с пунктом 2.1. цена контракта составляет 1 362 374 руб. в соответствии с локально-сметным расчетом (Приложение № 1 к контракту).

В соответствии с пунктом 2.6.  муниципального контракта оплата производится заказчиком за фактически выполненные  подрядчиком объемы работ, что подтверждается оформленным должным образом и подписанными сторонами актом о приемке выполненных работ формы КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. Оплата производится в течение тридцати дней с даты представления подрядчиком сопроводительным письмом счета на оплату (с указанием номера и даты контракта, отчетного периода и наименования выполненных работ). 

Пунктом 7.2. муниципального контракта предусмотрено, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств по оплате фактически выполненных работ в отчетном периоде подрядчик вправе потребовать от заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате фактически выполненных работ в отчетном периоде, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств по оплате фактически выполненных работ в отчетном периоде. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой, действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день уплаты неустойки от неуплаченной в срок суммы.

Подрядчиком были выполнены работы  на сумму 1 362 374 руб., что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 15.02.2017 № 1, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 15.02.2017 № 1.

Обществом с ограниченной ответственностью «Наш города»  в адрес администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края письмом от 10.03.217 № 55 была направлена счет-фактура от 15.02.2017 № 45 на сумму 1 362 374 руб.

Заказчиком подрядчику оплачены выполненные работы на основании платежных поручений от 08.06.2017 № 828 на сумму 408 712 руб. 20 коп., от 31.07.2017 № 745178 на сумму 953 661 руб. 80 коп.

01.03.2017 между Администрацией городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края (далее – заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Наш город» (далее - подрядчик) заключен договор № 8 (далее – договор № 8), в соответствии с которым подрядчик обязуется  выполнить работы по  демонтажу опор уличного освещения на объекте: «Участок улицы Пионерской от улицы Ленина до ул. Гончарова» в г.Советская Гавань и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В силу пункта 3.1. договора № 8 цена работы определяется  Приложением № 1 к договору (локальный сметный расчет) и составляет 66 155 руб.

Пунктом 3.4. договора № 8 предусмотрено, что оплата выполненных работ производится  в течение 30 дней с момента предоставления заказчику справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и счета-фактуры.

Неустойка уплачивается заказчиком подрядчику за задержку расчетов за выполненные работы в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы соответствующего платежа за каждый день просрочки, начиная с окончания срока, указанного в разделе 4 договора после предъявления счета (пункт 6.4. договора № 8).

Письмом от 13.03.2017 № 57 подрядчик направил в адрес заказчика акт о приемке выполненных работ от 13.03.2017 № 1 на сумму 66 155 руб., справку о стоимости выполненных работ и затрат от 13.03.2017 № 1 и счет-фактуру от 13.03.2017  № 46 на сумму 66 155 руб.

Администрацией городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края оплачены выполненные работы по договору № 8 платежными поручениями от 08.06.2017 № 829 на сумму 19 846 руб. 50 коп., от 28.07.2017 № 727688 на сумму 46 308 руб. 50 коп.

Подрядчиком заказчику направлена претензия от 26.04.2017 № 117 с требованием оплаты основного долга по муниципальному контракту от 09.01.2017 № 8 в размере 1 362 374 руб. и по договору от 01.03.2017 № 8 на сумму 66 155 руб.

Администрацией городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края в адрес подрядчика было направлено письмо от 03.05.2017 № 1-12-2092 о предоставлении отсрочки платежа до 01.07.2017 в связи с невозвратом краевой субсидии на реализацию данных мероприятий.

Рассматриваемые отношения основаны на обязательствах подряда.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 

В соответствии со ст.702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять ее результат и оплатить его.

В соответствии с п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу ст.401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательство, либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

 Статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации под неустойкой понимает определенную законом или договором денежную сумму, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Расчет неустойки  по муниципальному контракту от 09.01.2017 № 8 произведен истцом, исходя из количества дней просрочки (начисление  за период с 30.04.2017 по 31.07.2017), в размере одной трехсотой, действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, неоплаченной в срок суммы  основного долга и составляет  32 090 руб. 72 коп.

Ответчиком заявлено о применении статьи 333 ГК РФ и снижении неустойки в связи с ее чрезмерным размером. 

Статья 333 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает право суда уменьшить подлежащую уплате неустойку в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства.

В пункте 73 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7) разъяснено, что бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика.

Размер неустойки в виде одной трехсотой, действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, не является чрезмерным.

Суд не находит оснований для применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Исковое требование о взыскании неустойки по муниципальному контракту от 09.01.2017 № 8 обосновано и подлежит удовлетворению в сумме 32 090 руб. 72 коп.

Истцом заявлено исковое требование о взыскании неустойки в размере 1 516 руб. 60 коп. по договору от 01.03.2017 № 8 за период с 30.04.2017 по  28.07.2017.

Расчет неустойки  по договору № 8 произведен истцом, исходя из количества дней просрочки (начисление  за период с 30.04.2017 по 28.07.2017), в размере одной трехсотой, действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, несвоевременно оплаченной  суммы основного долга, составляет  1 516 руб. 60 коп.

Исковое требование о взыскании неустойки по договору от 01.03.2017 № 8 обосновано и подлежит удовлетворению в сумме 1 516 руб. 60 коп.

Суд не находит оснований для применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку размер неустойки в виде одной трехсотой, действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, не является чрезмерным.

Судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 23 237 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ,  арбитражный суд 

Р Е Ш И Л

 Иск удовлетворить.

     Взыскать с администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>, место нахождения: 682800, 

<

...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Наш город» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>, место нахождения: 682800, 

<

...> погибших партизан, д. 63А, квартира 11) неустойку в размере 33 607 руб. 32 коп.

     Производство по требованию о взыскании основного долга в размере 999 970 руб. 30 коп. прекратить.

     Взыскать с администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>, место нахождения: 682800, 

<

...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Наш город» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>, место нахождения: 682800, 

<

...> погибших партизан, д. 63А, квартира 11) судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 23 237 руб. 

     Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

    Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

     Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья                                                                                           Л.А. Збарацкая