114/2023-117493(1) 

Арбитражный суд Республики Карелия  ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625  

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А26-5062/2023

г. Петрозаводск

21 сентября 2023 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия  

РЕШИЛ:

1. Исковое заявление удовлетворить частично. 

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Промышленное  проектирование» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Фонда  капитального ремонта Республики Карелия (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) 250 000 руб., в том числе: 100 000 руб. – неустойка за период с  15.05.2020 по 31.03.2022 и с 01.10.2022 по 30.01.2023 по договору №  67/2019-п, 50 000 руб. – неустойка за период с 15.05.2020 по 17.09.2021 по  договору № 59/2019-п, 30 000 руб. – неустойка за период с 15.05.2020 по  17.09.2021 по договору № 103/2019-п, 30 000 руб. – неустойка за период с  15.05.2020 по 24.12.2021 по договору № 76/2019-п, 20 000 руб. – неустойка  за период с 15.05.2020 по 31.03.2022 по договору № 70/2019-п, 20 000 руб. –  неустойка за период с 15.05.2020 по 31.03.2022 по договору № 44/2019-п, а  также расходы по оплате государственной пошлины в размере 16 784 руб.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

3. Взыскать с Фонда капитального ремонта Республики Карелия (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Промышленное проектирование» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) 89 руб. 27 коп. неустойки, в том числе:  25 руб. 02 коп. – неустойка по договору № 70/2019-п за 02.10.2022 и 64 руб.  25 коп. – неустойка по договору № 44/2019-п за период с 01.10.2020 по  03.10.2020.  

В результате взаимозачета взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «Промышленное проектирование» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Фонда капитального ремонта  Республики Карелия (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 249 910 руб.  73 коп., в том числе: в том числе: 100 000 руб. – неустойка за период с  15.05.2020 по 31.03.2022 и с 01.10.2022 по 30.01.2023 по договору №  67/2019-п, 50 000 руб. – неустойка за период с 15.05.2020 по 17.09.2021 по  договору № 59/2019-п, 30 000 руб. – неустойка за период с 15.05.2020 по  

17.09.2021 по договору № 103/2019-п, 30 000 руб. – неустойка за период с  15.05.2020 по 24.12.2021 по договору № 76/2019-п, 19 974 руб. 98 коп. –  неустойка за период с 15.05.2020 по 31.03.2022 по договору № 70/2019-п, 19  935 руб. 75 коп. – неустойка за период с 15.05.2020 по 31.03.2022 по  договору № 44/2019-п, а также расходы по уплате госпошлины в сумме 16  784 руб.  

4. Возвратить Фонду капитального ремонта Республики Карелия из  федерального бюджета государственную пошлину в размере 359 руб.,  уплаченную по платежному поручению № 617 от 11.05.2023.  

5. Решение может быть обжаловано: 

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления  полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд  (191015, 

<

...>);  

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000,  

<

...>) при условии, что данное решение было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд  апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд  Республики Карелия.  

 Судья Моисеенко А.Б.