Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-7948/2024

г. Хабаровск

21 июня 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 17 июня 2024

Арбитражный суд в составе судьи Л.А. Збарацкой

при ведении протокола судебного заседания секретарем  О.Г. Лисичкиной

рассмотрев в заседании суда дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Изыскания и проектирование» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680000, 

<

...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дальвостокстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680028, 

<

...> стр. 10, к. 1)

о взыскании 18 111 247 руб. 

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, действующей по доверенности от 11.01.2024 б/н, 

от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом.

Общество с ограниченной ответственностью «Изыскания и проектирование» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дальвостокстрой» о взыскании 18 111 247 руб., составляющих по договорам от 23.07.2019 № 2019/078, от 29.08.2019 № 2019/094, от 09.09.2019 № 2019/099, от 29.08.2019 № 2019/093 основной долг в размере 2 929 000 руб., пени в размере 15 182 247 руб. за периоды с 20.09.2019 по 15.04.2024.

В соответствии со статьей 49 АПК РФ представитель истца заявил обуменьшении размера иска до 14 610 958 руб., составляющих основной долг в размере 2 929 000 руб. по договорам от 29.08.2019 № 2019/094, от 09.09.2019 № 2019/099, от 29.08.2019 № 2019/093, неустойку в размере 11 681 958 руб. с 30.10.2019 по 15.04.2024 с учетом моратория по договорам от 29.08.2019 № 2019/094, от 09.09.2019 № 2019/099, от 29.08.2019 № 2019/093.

Уменьшение размера иска судом принимается, так как данное распорядительное действие закону не противоречит, прав других лиц не нарушает.

Истец, как следует из искового заявления, объяснений представителя в судебном заседании, просил исковые требования удовлетворить, в качестве обстоятельств, на которых они основаны, указал на наличие между сторонами обязательственных отношений, возникших из договоров от 23.07.2019 № 2019/078, от 29.08.2019 № 2019/094, от 09.09.2019 № 2019/099, от 29.08.2019 № 2019/093, нарушение ответчиком обязательств по оплате выполненных работ, наличие основного долга в размере 2 929 000 руб., право на взыскание неустойки в размере 11 681 958 руб. с 20.09.2019 по 15.04.2024.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыва и возражений на иск не представил.

На основании пункта 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ, с учетом пункта 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 65, суд завершил предварительное заседание и перешел к судебному разбирательству дела.

Дело подлежит рассмотрению в порядке ч.3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ:

29.08.2019 между обществом с ограниченной ответственностью «Изыскания и проектирование», подрядчик и обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дальвостокстрой», заказчик заключен договор №2019/094, в соответствии с которым подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить инженерно-экологические изыскания на объекте: «Многоквартирный жилой дом, переменной этажности с встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по ул. Дикопольцева в г. Хабаровске» и сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с пунктом 3.1. договора с учетом протокола разногласий срок выполнения инженерных изысканий – 45 рабочих дней с момента подписания сторона договора.

Стоимость поручаемых подрядчику по договору работ составляет 450 000 руб. (пункт 4.1. договора).

В соответствии с пунктом 4.3. договора с учетом протокола разногласий, оплата по договору производится в следующем порядке: заказчик производит оплату за выполненные подрядчиком и принятые заказчиком работы, в размере 100% от стоимости работ, указанной в пункте 4.1. договора, в срок до 28 февраля 2020.

При невыполнении подрядчиком работ (или в случае мотивированного отказа заказчика от принятия работ) до указанного срока, оплата работ производится после устранения подрядчиком всех недостатков работ, в течение 10 рабочих дней с момента принятия заказчиком работ.

09.09.2019 между обществом с ограниченной ответственностью «Изыскания и проектирование», подрядчик и обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дальвостокстрой», заказчик заключен договор №2019/099, в соответствии с которым подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить инженерно-геодезические изыскания на объекте: «Многоквартирный жилой дом, переменной этажности с встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по ул. Дикопольцева, в г. Хабаровске». Инженерные сети и сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с пунктом 3.1. договора срок выполнения инженерных изысканий – 45 рабочих дней с момента получения: 

- разрешения на использование земельного участка, государтсвенная собственность на который не разграничена, выданного Департаментом архитекруты, строительства и  землепользования администрации города Хабаровска;

- выписки координат и высот пунктов геодезических сетей из Управления Россреестра (Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии) Хабаровского края).

Стоимость поручаемых подрядчику по договору работ составляет 130 000 руб. (пункт 4.1. договора).

В соответствии с пунктом 4.3. договора, заказчик обязуется в течение 3 банковских дней со дня подписания договора уплатить подрядчику в порядке предварительной оплаты аванс в размере 30% от стоимости работ, указанной в п. 4.1. договора. Неоплата заказчиком аванса, предусмотренного настоящим пунктом, в обозначенный срок не свидетельствует об одностороннем отказе заказчика от исполнения договора и не влечет прекращения его действия для сторон.

Пунктом 4.4. договора предусмотрено, что окончательный расчет за выполненные работы производится заказчиком в течение 5 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ. Неявка заказчика на приемку результата работ, равно как уклонение от подписания акта выполненных работ не освобождает его от оплаты работ.

29.08.2019 между обществом с ограниченной ответственностью «Изыскания и проектирование», подрядчик и обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дальвостокстрой», заказчик заключен договор №2019/093, в соответствии с которым подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить инженерно-геологические изыскания на объекте: «Многоквартирный жилой дом, переменной этажности с встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по ул. Дикопольцева в г. Хабаровске» и сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с пунктом 3.1. договора с учетом протокола разногласий срок выполнения инженерных изысканий – 45 рабочих дней с момента подписания сторона договора.

Стоимость поручаемых подрядчику по договору работ составляет 2 349 000 руб. (пункт 4.1. договора).

В соответствии с пунктом 4.3. договора с учетом протокола разногласий, оплата по договору производится в следующем порядке: заказчик производит оплату за выполненные подрядчиком и принятые заказчиком работы, в размере 100% от стоимости работ, указанной в пункте 4.1. договора, в срок до 28 февраля 2020.

При невыполнении подрядчиком работ (или в случае мотивированного отказа заказчика от принятия работ) до указанного срока, оплата работ производится после устранения подрядчиком всех недостатков работ, в течение 10 рабочих дней с момента принятия заказчиком работ.

Пунктом 6.3. договоров предусмотрено, что при нарушении сроков оплаты, указанных в п. 4.2. и 4.4. договора, заказчик несет ответственность в виде неустойки в размере 0,3% от договорной стоимости работ за каждый день просрочки. 

Истцом выполнены работы по договорам, что подтверждается от 16.12.2019 №99/1 на сумму 450 000 руб., от 22.10.2019 №81/1 на сумму 130 000 руб., от 09.01.2020 №1/1  на сумму 2 349 000 руб., всего на сумму 2 929 000 руб.

Из акта сверки взаимных расчетов за периоды 01.01.2019 по 04.12.2023, подписанного сторонами следует, что на 04.12.2023 задолженность в пользу ООО «Изыскания и проектирование» составляет 2 929 000 руб.

Истцом в адрес ответчика направлены претензии от 21.08.2023 №324/ю-ИП, от 24.08.2023 №330/ю-ИП, от 24.08.2023 №331/ю-ИП с требованием оплаты основного долга по договорам. 

В ответе на претензию от 08.11.2023 б/н ответчик указал на причины образования задолженности и обязался оплатить задолженность до 29.12.2023.

Ввиду отсутствия оплат истцом направлена претензия от 29.01.2024 №07/ю-ИП с требованием оплаты долга по договорам в размере 2 929 000 руб.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском. 

Рассматриваемые отношения основаны на обязательствах подряда.

В силу статьи 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

В соответствии с абзацем 2 статьи 762 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ.

     В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. Результат работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ, пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» (далее - Информационное письмо № 51)).

Наличие акта приемки работ, подписанного заказчиком, не лишает заказчика права представить суду возражения по объему, стоимости работ и качеству (пункты 12, 13 Информационного письма №51).

В силу статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Вопрос оценки доказательств в силу части 1 статьи 71 АПК РФ является компетенцией суда, рассматривающего дело.

Истцом в материалы дела представлены акты 13.09.2019 №70/1 на сумму 300 000 руб., от 16.12.2019 №99/1 на сумму 450 000 руб., от 22.10.2019 №81/1 на сумму 130 000 руб., от 09.01.2020 №1/1  на сумму 2 349 000 руб., акты сверки взаимных расчетов, технические отчеты по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной и рабочей документации, технические отчеты по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации, технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий.

Оценив и исследовав в совокупности представленные доказательства, суд установил, что истцом выполнены работы по договорам от 29.08.2019 № 2019/094, от 09.09.2019 № 2019/099, от 29.08.2019 № 2019/093.

Доказательств оплаты основного долга на сумму 2 929 000 руб., ответчиком не представлено.

Исковое требование истца о взыскании основного долга в 2 929 000 руб. подлежит удовлетворению.

Истцом заявлено требование о взыскании пени в размере 11 681 958 руб. с 30.10.2019 по 15.04.2024.

В пункте 1 статьи 330 ГК РФ под неустойкой (штрафом, пеней) понимается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 6.3. договоров предусмотрено, что при нарушении сроков оплаты, указанных в п. 4.2. и 4.4. договора, заказчик несет ответственность в виде неустойки в размере 0,3% от договорной стоимости работ за каждый день просрочки.  

Расчет неустойки произведен судом, исходя из количества дней просрочки (по договору от 09.09.2019 № 2019/099 начисление за периоды с 30.10.2019 по 15.04.2024, 1447  дней,  по договорам от 29.08.2019 № 2019/094, от 29.08.2019 № 2019/093 с 01.03.2020 по 15.04.2024, 1324 дня соответственно, с учетом моратория за периоды с 01.04.2022 по 30.09.2022, установленного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлением, подаваемым кредиторами»), в размере 0,3% от основного долга за каждый день просрочки, составляет 11 681 958 руб. (1 787 400 руб.+564 330 руб.+9 330 228 руб.).

Ответчиком возражений о чрезмерном размере неустойки не заявлено.

Исковое требование о взыскании неустойки подлежит удовлетворению в размере 11 681 958 руб.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд                                            

                                                                    Р Е Ш И Л

     Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дальвостокстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680028, 

<

...> стр. 10, к. 1) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Изыскания и проектирование» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680000, 

<

...>) 14 610 958 руб., составляющих основной долг в размере 2 929 000 руб., неустойку в размере 11 681 958 руб., а также судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 96 055 руб.

     Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Изыскания и проектирование» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680000, 

<

...>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 17 501 руб., перечисленную платежным поручением от 06.05.2024 № 155.

    Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

    Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

    Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

    Судья                                                                                                                Л.А. Збарацкая