АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

город Омск № дела  

13 ноября 2024 года А46-11006/2024  

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Чекурды Е.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Токаревой К.И., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «МСК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Руско Групп» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании передать исполнительную документацию,  

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, акционерного общества «Омское монтажное управление специализированное № 1» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>), публичного акционерного общества «Орскнефтеоргсинтез» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

в судебном заседании приняли участие:  

от истца – ФИО1 по доверенности от 11.03.2024 (паспорт гражданина РФ, диплом), онлайн,  

от ответчика – ФИО2 по доверенности от 23.08.2024 (паспорт гражданина РФ, диплом), онлайн,  

от акционерного общества «Омское монтажное управление специализированное № 1» – ФИО3 по доверенности от 04.07.2024 (паспорт гражданина РФ, диплом),  

от иных третьих лиц – не явились, извещены; 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Руско Групп» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) передать обществу с ограниченной ответственностью «МСК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу следующую исполнительную документацию по договору от 27.03.2023 № 107/03-23:  

 № 

 № , дата КС-2  

Наименование документа 

1 

По всем КС-2  

Общий журнал работ 

2 

КС-2 № 1-1 от 30.06.2023  

Исполнительная документация (ИД) по разделу ТМ, в том числе:  

2.1. 

Реестр ИД 

2.2. 

Документы осуществления входного контроля (акты входного контроля или журнал входного контроля)  

2.3. 

Сертификаты, технические паспорта, документы о качестве и другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов, конструкций, деталей  

2.4. 

Свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03  

2.5. 

Свидетельство о монтаже трубопровода 

2.6. 

Исполнительная схема трубопровода 

2.7. 

Спецификация изделий, примененных при монтаже участка трубопровода  

2.8. 

Список сварщиков, операторов-термистов и дефектоскопистов 

2.9. 

Акт проверки внутренней очистки трубопровода 

2.10.  

Акт промывки и продувки трубопроводов 

2.11.  

Акт испытания трубопровода на прочность и плотность  

2.12.  

Заключение о результатах контроля качества сварных соединений неразрушающим методом  

2.13.  

Акт визуального и измерительного контроля сварных соединений  

2.14.  

Журнал сварочных работ 

3 

КС-2 № 1-2 от 30.06.2023 

Исполнительная документация по разделу КМ, в том числе: 

3.1. 

Реестр ИД 

3.2. 

Документы осуществления входного контроля (акты входного контроля или журнал входного контроля)  

3.3. 

Сертификаты, технические паспорта, документы о качестве и другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов, конструкций, деталей  

3.4. 

Исполнительные геодезические схемы 

3.5. 

Акты освидетельствования скрытых работ 

3.6. 

Акты освидетельствования ответственных конструкций  

3.7. 

Документ о качестве стальных строительных конструкций  

3.8. 

Акт визуального и измерительного контроля сварных соединений  

3.9. 

Протокол (заключение) контроля качества сварных соединений металлоконструкций физическими методами  

3.10.  

Журнал сварочных работ 

Исполнительная документация на монтаж резервуара, в том числе:  

3.11.  

Реестр ИД 

3.12.  

Документы осуществления входного контроля (акты входного контроля или журнал входного контроля)  

3.13.  

Сертификаты, технические паспорта, документы о качестве и другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов, конструкций, деталей  

3.14.  

Акт на приемку основания и фундаментов 

3.15.  

Акт приёмки металлоконструкций резервуара в монтаж  

3.16.  

Акт освидетельствования скрытых работ 

3.17.  

Исполнительная геодезическая схема 

3.18.  

Методика выполнения фактических контрольных замеров  

3.19.  

Акт контроля герметичности сварных соединений методом вакуумирования  

3.20.  

Акт контроля герметичности сварных соединений избыточным давлением  

3.21.  

Заключение о качестве сварных соединений по результатам радиографического контроля  

3.22.  

Акт контроля качества смонтированных (собранных) конструкций резервуара  

3.23.  

Акт гидравлического испытания резервуара 

3.24.  

Акт завершения монтажа конструкций 

3.25.  

Акт приемки смонтированного на резервуаре оборудования  

3.26.  

Журнал сварочных работ 

4 

КС-2 № 3-1 от 31.08.2023  

Исполнительная документация по разделу ТМ, в том числе:  

4.1. 

Реестр ИД 

4.2. 

Документы осуществления входного контроля (акты входного контроля или журнал входного контроля)  

4.3. 

Сертификаты, технические паспорта, документы о качестве и другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов, конструкций, деталей  

4.4. 

Свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03  

4.5. 

Свидетельство о монтаже трубопровода 

4.6. 

Исполнительная схема трубопровода 

4.7. 

Спецификация изделий, примененных при монтаже участка трубопровода  

4.8. 

Список сварщиков, операторов-термистов и дефектоскопистов 

4.9. 

Акт проверки внутренней очистки трубопровода 

4.10.  

Акт промывки и продувки трубопроводов 

4.11.  

Акт испытания трубопровода на прочность и плотность 

4.12.  

Акт испытания трубопровода на герметичность 

4.13.  

Заключение о результатах контроля качества сварных соединений неразрушающим методом  

4.14.  

Акт визуального и измерительного контроля сварных соединений  

4.15.  

Диаграммы термической обработки сварных соединений 

4.16.  

Протокол замера твердости металла 

4.17.  

Журнал сварочных работ 

5 

КС-2 № 3-2 от 31.08.2023  

Исполнительная документация по разделу ТМ, в том числе:  

5.1. 

Реестр ИД 

5.2. 

Документы осуществления входного контроля (акты входного контроля или журнал входного контроля)  

5.3. 

Сертификаты, технические паспорта, документы о качестве и другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов, конструкций, деталей  

5.4. 

Свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03  

5.5. 

Свидетельство о монтаже трубопровода 

5.6. 

Исполнительная схема трубопровода 

5.7. 

Спецификация изделий, примененных при монтаже участка  

трубопровода 

5.8. 

Список сварщиков, операторов-термистов и дефектоскопистов  

5.9. 

Акт проверки внутренней очистки трубопровода  

5.10.  

Акт промывки и продувки трубопроводов 

5.11.  

Акт испытания трубопровода на прочность и плотность  

5.12.  

Акт испытания трубопровода на герметичность  

5.13.  

Акт на предварительную растяжку (сжатие) компенсаторов  

5.14.  

Заключение о результатах контроля качества сварных соединений неразрушающим методом  

5.15.  

Акт визуального и измерительного контроля сварных соединений  

5.16.  

Диаграммы термической обработки сварных соединений  

5.17.  

Протокол замера твердости металла 

5.18.  

Журнал сварочных работ 

6 

КС-2 № 3-3 от 31.08.2023  

Исполнительная документация по разделу ТМ, в том числе:  

6.1. 

Реестр ИД 

6.2. 

Документы осуществления входного контроля (акты входного контроля или журнал входного контроля)  

6.3. 

Сертификаты, технические паспорта, документы о качестве и другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов, конструкций, деталей  

6.4. 

Свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03  

6.5. 

Свидетельство о монтаже трубопровода 

6.6. 

Исполнительная схема трубопровода 

6.7. 

Спецификация изделий, примененных при монтаже участка трубопровода  

6.8. 

Список сварщиков, операторов-термистов и дефектоскопистов  

6.9. 

Акт проверки внутренней очистки трубопровода  

6.10.  

Акт промывки и продувки трубопроводов 

6.11.  

Акт испытания трубопровода на прочность и плотность  

6.12.  

Акт испытания трубопровода на герметичность  

6.13.  

Акт на предварительную растяжку (сжатие) компенсаторов  

6.14.  

Заключение о результатах контроля качества сварных соединений неразрушающим методом  

6.15.  

Акт визуального и измерительного контроля сварных соединений  

6.16.  

Диаграммы термической обработки сварных соединений  

6.17.  

Протокол замера твердости металла 

6.18.  

Журнал сварочных работ 

7 

КС-2 № 3-4 от 31.08.2023  

Исполнительная документация по разделу КМ, в том числе:  

7.1. 

Реестр ИД 

7.2. 

Документы осуществления входного контроля (акты входного контроля или журнал входного контроля)  

7.3. 

Сертификаты, технические паспорта, документы о качестве и  

другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов, конструкций, деталей  

7.4. 

Исполнительные геодезические схемы 

7.5. 

Акты освидетельствования скрытых работ 

7.6. 

Акты освидетельствования ответственных конструкций 

7.7. 

Документ о качестве стальных строительных конструкций  

7.8. 

Акт визуального и измерительного контроля сварных соединений  

7.9. 

Протокол (заключение) контроля качества сварных соединений металлоконструкций физическими методами  

7.10.  

Журнал сварочных работ 

Исполнительная документация на монтаж резервуара, в том числе:  

7.11.  

Реестр ИД 

7.12.  

Документы осуществления входного контроля (акты входного контроля или журнал входного контроля)  

7.13.  

Сертификаты, технические паспорта, документы о качестве и другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов, конструкций, деталей  

7.14.  

Акт на приемку основания и фундаментов 

7.15.  

Акт приемки металлоконструкций резервуара для монтажа  

7.16.  

Акт освидетельствования скрытых работ 

7.17.  

Исполнительная геодезическая схема 

7.18.  

Методика выполнения фактических контрольных замеров  

7.19.  

Акт контроля герметичности сварных соединений методом вакуумирования  

7.20.  

Акт контроля герметичности сварных соединений избыточным давлением  

7.21.  

Заключение о качестве сварных соединений по результатам радиографического контроля  

7.22.  

Акт контроля качества смонтированных (собранных) конструкций резервуара  

7.23.  

Акт гидравлического испытания резервуара 

7.24.  

Акт завершения монтажа конструкций 

7.25.  

Акт приемки смонтированного на резервуаре оборудования  

7.26.  

Журнал сварочных работ 

8 

КС-2 № 3-5 от 31.08.2023 

Исполнительная документация по разделу ТМ, в том числе:  

8.1. 

Реестр ИД 

8.2. 

Документы осуществления входного контроля (акты входного контроля или журнал входного контроля)  

8.3. 

Сертификаты, технические паспорта, документы о качестве и другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов, конструкций, деталей  

8.4. 

Свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03  

8.5. 

Свидетельство о монтаже трубопровода 

8.6. 

Исполнительная схема трубопровода 

8.7. 

Спецификация изделий, примененных при монтаже участка трубопровода  

8.8. 

Список сварщиков, операторов-термистов и дефектоскопистов  

8.9. 

Акт проверки внутренней очистки трубопровода  

8.10.  

Акт промывки и продувки трубопроводов 

8.11.  

Акт испытания трубопровода на прочность и плотность  

8.12.  

Акт испытания трубопровода на герметичность  

8.13.  

Акт на предварительную растяжку (сжатие) компенсаторов  

8.14.  

Заключение о результатах контроля качества сварных соединений неразрушающим методом  

8.15.  

Акт визуального и измерительного контроля сварных соединений  

8.16.  

Диаграммы термической обработки сварных соединений  

8.17.  

Протокол замера твердости металла 

8.18.  

Журнал сварочных работ 

9 

КС-2 № 3-6 от 31.08.2023  

Исполнительная документация по разделу ТМ, в том числе:  

9.1. 

Реестр ИД 

9.2. 

Документы осуществления входного контроля (акты входного контроля или журнал входного контроля)  

9.3. 

Сертификаты, технические паспорта, документы о качестве и другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов, конструкций, деталей  

9.4. 

Свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03  

9.5. 

Свидетельство о монтаже трубопровода 

9.6. 

Исполнительная схема трубопровода 

9.7. 

Спецификация изделий, примененных при монтаже участка трубопровода  

9.8. 

Список сварщиков, операторов-термистов и дефектоскопистов  

9.9. 

Акт проверки внутренней очистки трубопровода  

9.10.  

Акт промывки и продувки трубопроводов 

9.11.  

Акт испытания трубопровода на прочность и плотность  

9.12.  

Акт испытания трубопровода на герметичность  

9.13.  

Акт на предварительную растяжку (сжатие) компенсаторов  

9.14.  

Заключение о результатах контроля качества сварных соединений неразрушающим методом  

9.15.  

Акт визуального и измерительного контроля сварных соединений  

9.16.  

Диаграммы термической обработки сварных соединений  

9.17.  

Протокол замера твердости металла 

9.18.  

Журнал сварочных работ 

10. 

КС-2 № 3-7 от  

Исполнительная документация по разделу ТМ, в том числе:  

10.1.  

31.08.2023  

Реестр ИД 

10.2.  

Документы осуществления входного контроля (акты входного контроля или журнал входного контроля)  

10.3.  

Сертификаты, технические паспорта, документы о качестве и другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов, конструкций, деталей  

10.4.  

Свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03  

10.5.  

Свидетельство о монтаже трубопровода 

10.6.  

Исполнительная схема трубопровода 

10.7.  

Спецификация изделий, примененных при монтаже участка трубопровода  

10.8.  

Список сварщиков, операторов-термистов и дефектоскопистов  

10.9.  

Акт проверки внутренней очистки трубопровода  

10.10.  

Акт промывки и продувки трубопроводов 

10.11.  

Акт испытания трубопровода на прочность и плотность  

10.12.  

Акт испытания трубопровода на герметичность  

10.13.  

Акт на предварительную растяжку (сжатие) компенсаторов  

10.14.  

Заключение о результатах контроля качества сварных соединений неразрушающим методом  

10.15.  

Акт визуального и измерительного контроля сварных соединений  

10.16.  

Диаграммы термической обработки сварных соединений 

10.17.  

Протокол замера твердости металла 

10.18.  

Журнал сварочных работ 

11 

КС-2 № 3-8 от 

31.08.2023  

Исполнительная документация по разделу ТМ, в том числе:  

11.1.  

Реестр ИД 

11.2.  

Документы осуществления входного контроля (акты входного контроля или журнал входного контроля)  

11.3.  

Сертификаты, технические паспорта, документы о качестве и другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов, конструкций, деталей  

11.4.  

Свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03  

11.5.  

Свидетельство о монтаже трубопровода 

11.6.  

Исполнительная схема трубопровода 

11.7.  

Спецификация изделий, примененных при монтаже участка трубопровода  

11.8.  

Список сварщиков, операторов-термистов и дефектоскопистов  

11.9.  

Акт проверки внутренней очистки трубопровода  

11.10.  

Акт промывки и продувки трубопроводов 

11.11.  

Акт испытания трубопровода на прочность и плотность  

11.12.  

Акт испытания трубопровода на герметичность  

11.13.  

Акт на предварительную растяжку (сжатие) компенсаторов  

11.14.  

Заключение о результатах контроля качества сварных соединений неразрушающим методом  

11.15.  

Акт визуального и измерительного контроля сварных соединений  

11.16.  

Журнал сварочных работ 

12 

КС-2 № 3-9 от 31.08.2023  

Исполнительная документация по разделу ТМ, в том числе:  

12.1.  

Реестр ИД 

12.2.  

Документы осуществления входного контроля (акты входного контроля или журнал входного контроля)  

12.3.  

Сертификаты, технические паспорта, документы о качестве и другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов, конструкций, деталей  

12.4.  

Свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03  

12.5.  

Свидетельство о монтаже трубопровода 

12.6.  

Исполнительная схема трубопровода 

12.7.  

Спецификация изделий, примененных при монтаже участка трубопровода  

12.8.  

Список сварщиков, операторов-термистов и дефектоскопистов 

12.9.  

Акт проверки внутренней очистки трубопровода 

12.10.  

Акт промывки и продувки трубопроводов 

12.11.  

Акт испытания трубопровода на прочность и плотность 

12.12.  

Акт испытания трубопровода на герметичность 

12.13.  

Акт на предварительную растяжку (сжатие) компенсаторов  

12.14.  

Заключение о результатах контроля качества сварных соединений неразрушающим методом  

12.15.  

Акт визуального и измерительного контроля сварных соединений  

12.16.  

Журнал сварочных работ 

13 

КС-2 № 3-10 от 31.08.2023  

Исполнительная документация на монтаж технологического оборудования, в том числе:  

13.1.  

Реестр ИД 

13.2.  

Документы осуществления входного контроля (акты входного контроля или журнал входного контроля)  

13.3.  

Сертификаты, технические паспорта, документы о качестве и другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов, конструкций, деталей  

13.4.  

Исполнительная схема монтажа оборудования 

13.5.  

Акт проверки правильности установки оборудования на фундамент  

13.6.  

Удостоверение о качестве монтажа сосуда 

13.7.  

Акт испытаний сосудов и аппаратов 

13.8.  

Акт испытаний машин и механизмов 

14 

КС-2 № 3-11  

Исполнительная документация по разделу ТМ, в том числе:  

14.1.  

от 31.08.2023 

Реестр ИД 

14.2.  

Документы осуществления входного контроля (акты входного контроля или журнал входного контроля)  

14.3.  

Сертификаты, технические паспорта, документы о качестве и другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов, конструкций, деталей  

14.4.  

Свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03  

14.5.  

Свидетельство о монтаже трубопровода 

14.6.  

Исполнительная схема трубопровода 

14.7.  

Спецификация изделий, примененных при монтаже участка трубопровода  

14.8.  

Список сварщиков, операторов-термистов и дефектоскопистов 

14.9.  

Акт проверки внутренней очистки трубопровода 

14.10.  

Акт промывки и продувки трубопроводов 

14.11.  

Акт испытания трубопровода на прочность и плотность 

14.12.  

Акт испытания трубопровода на герметичность 

14.13.  

Акт на предварительную растяжку (сжатие) компенсаторов  

14.14.  

Заключение о результатах контроля качества сварных соединений неразрушающим методом  

14.15.  

Акт визуального и измерительного контроля сварных соединений  

14.16.  

Диаграммы термической обработки сварных соединений 

14.17.  

Протокол замера твердости металла 

14.18.  

Журнал сварочных работ 

15 

КС-2 № 13 от 30.11.2023  

Исполнительная документация на монтаж технологического оборудования, в том числе:  

15.1.  

Реестр ИД 

15.2.  

Документы осуществления входного контроля (акты входного контроля или журнал входного контроля)  

15.3.  

Сертификаты, технические паспорта, документы о качестве и другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов, конструкций, деталей  

15.4.  

Исполнительная схема монтажа оборудования 

15.5.  

Акт проверки правильности установки оборудования на фундамент  

15.6.  

Удостоверение о качестве монтажа сосуда 

16. 

КС-2 № 14 от 30.11.2023  

Исполнительная документация по разделу ТМ, в том числе:  

16.1.  

Реестр ИД 

16.2.  

Документы осуществления входного контроля (акты входного контроля или журнал входного контроля)  

16.3.  

Сертификаты, технические паспорта, документы о качестве и другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов, конструкций, деталей  

16.4.  

Свидетельство о готовности организации-заявителя к  

использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03  

16.5.  

Свидетельство о монтаже трубопровода 

16.6.  

Исполнительная схема трубопровода 

16.7.  

Спецификация изделий, примененных при монтаже участка трубопровода  

16.8.  

Список сварщиков, операторов-термистов и дефектоскопистов  

16.9.  

Акт проверки внутренней очистки трубопровода  

16.10.  

Акт промывки и продувки трубопроводов 

16.11.  

Акт испытания трубопровода на прочность и плотность  

16.12.  

Акт испытания трубопровода на герметичность  

16.13.  

Заключение о результатах контроля качества сварных соединений неразрушающим методом  

16.14.  

Акт визуального и измерительного контроля сварных соединений  

16.15.  

Диаграммы термической обработки сварных соединений 

16.16.  

Протокол замера твердости металла 

16.17.  

Журнал сварочных работ 

17 

КС-2 № 15 от 30.11.2023  

Исполнительная документация по разделу ТМ, в том числе:  

17.1.  

Реестр ИД 

17.2.  

Документы осуществления входного контроля (акты входного контроля или журнал входного контроля)  

17.3.  

Сертификаты, технические паспорта, документы о качестве и другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов, конструкций, деталей  

17.4.  

Свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03  

17.5.  

Свидетельство о монтаже трубопровода 

17.6.  

Исполнительная схема трубопровода 

17.7.  

Спецификация изделий, примененных при монтаже участка трубопровода  

17.8.  

Список сварщиков, операторов-термистов и дефектоскопистов  

17.9.  

Акт проверки внутренней очистки трубопровода  

17.10.  

Акт промывки и продувки трубопроводов 

17.11.  

Акт испытания трубопровода на прочность и плотность  

17.12.  

Акт испытания трубопровода на герметичность  

17.13.  

Акт на предварительную растяжку (сжатие) компенсаторов  

17.14.  

Заключение о результатах контроля качества сварных соединений неразрушающим методом  

17.15.  

Акт визуального и измерительного контроля сварных соединений  

17.16.  

Журнал сварочных работ 

18 

КС-2 № 16 от 30.11.2023  

Исполнительная документация по разделу ТМ, в том числе:  

18.1.  

Реестр ИД 

18.2.  

Документы осуществления входного контроля (акты входного контроля или журнал входного контроля)  

18.3.  

Сертификаты, технические паспорта, документы о качестве и другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов, конструкций, деталей  

18.4.  

Свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03  

18.5.  

Свидетельство о монтаже трубопровода 

18.6.  

Исполнительная схема трубопровода 

18.7.  

Спецификация изделий, примененных при монтаже участка трубопровода  

18.8.  

Список сварщиков, операторов-термистов и дефектоскопистов  

18.9.  

Акт проверки внутренней очистки трубопровода  

18.10.  

Акт промывки и продувки трубопроводов 

18.11.  

Акт испытания трубопровода на прочность и плотность  

18.12.  

Акт испытания трубопровода на герметичность  

18.13.  

Акт на предварительную растяжку (сжатие) компенсаторов  

18.14.  

Заключение о результатах контроля качества сварных соединений неразрушающим методом  

18.15.  

Акт визуального и измерительного контроля сварных соединений  

18.16.  

Журнал сварочных работ 

19 

КС-2 № 17 от 30.11.2023 

Исполнительная документация по разделу ТМ, в том числе:  

19.1.  

Реестр ИД 

19.2.  

Документы осуществления входного контроля (акты входного контроля или журнал входного контроля)  

19.3.  

Сертификаты, технические паспорта, документы о качестве и другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов, конструкций, деталей  

19.4.  

Свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03  

19.5.  

Свидетельство о монтаже трубопровода 

19.6.  

Исполнительная схема трубопровода 

19.7.  

Спецификация изделий, примененных при монтаже участка трубопровода  

19.8.  

Список сварщиков, операторов-термистов и дефектоскопистов  

19.9.  

Акт проверки внутренней очистки трубопровода  

19.10.  

Акт промывки и продувки трубопроводов 

19.11.  

Акт испытания трубопровода на прочность и плотность  

19.12.  

Акт испытания трубопровода на герметичность  

19.13.  

Акт на предварительную растяжку (сжатие) компенсаторов  

19.14.  

Заключение о результатах контроля качества сварных соединений неразрушающим методом  

19.15.  

Акт визуального и измерительного контроля сварных соединений 

19.16.  

Журнал сварочных работ 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Руско Групп» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «МСК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебную неустойку в размере 3 000 руб. за каждый день просрочки исполнения ООО «Руско Групп» решения суда по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу и по день исполнения обязательства в натуре.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Руско Групп» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «МСК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, 

<

...> Октября, д. 42) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а после проверки законности решения в апелляционном порядке также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (625010, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайтах Восьмого арбитражного апелляционного суда: http://8aas.arbitr.ru и Арбитражного суда Западно-Сибирского округа: http://faszso.arbitr.ru.  

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья Е.А. Чекурда