1187_2129615  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5 

http://www.udmurtiya.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть решения

Дело № А71- 6272/2023

г. Ижевск

12 декабря 2023 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Удмуртской Республики  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

 Обязать автономное учреждение культуры Удмуртской Республики  «Национальная библиотека Удмуртской Республики» исполнить  обязательства в области сохранения, использования, популяризации и  государственной охраны объектов культурного наследия в натуре в  отношении объекта культурного наследия федерального значения «Казенный  дом», расположенного по адресу: 

<

...>, а именно:  

 в течение 10 рабочих дней со дня вступления решения суда в законную  силу получить в Агентстве по государственной охране объектов культурного  наследия Удмуртской Республики задание на проведение работ по  сохранению (реставрации) объекта культурного наследия и согласовать его,  

 в течение 8 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу  обеспечить разработку проектной документации на проведение работ по  сохранению (реставрации) объекта культурного наследия организацией или  индивидуальным предпринимателем, имеющими лицензию на  осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия  (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,  

 в течение 10 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу;  

обеспечить проведение государственной историко-культурной экспертизы  проектной документации и получение положительного заключения  государственной историко-культурной экспертизы о соответствии  (положительное заключение) требованиям законодательства Российской  Федерации в области государственной охраны объектов культурного  наследия проектной документации на проведение работ по сохранению  (реставрации) объекта культурного наследия,  

 в течение 11 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу  

представить проектную документацию на проведение работ по сохранению  (реставрации) объекта культурного наследия вместе с актом государственной  историко-культурной экспертизы в Агентство на согласование,  

 в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу;  заключить договор с подрядной организацией на производство работ по  сохранению (реставрации) объекта культурного наследия в соответствии с  проектной документацией на проведение работ по сохранению (реставрации)  объекта культурного наследия, согласованной Агентством,  

в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу  заключить договор на осуществление авторского надзора и научного  руководства за проведением работ по сохранению (реставрации) объекта  культурного наследия с проектной организацией,  

 в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу;  заключить договор на осуществление технического надзора за проведением  работ по сохранению (реставрации) объекта культурного наследия,  

 в течение 30 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу  организовать приемку работ с участием Агентства по государственной  охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики.  

Взыскать с автономное учреждение культуры Удмуртской Республики  «Национальная библиотека Удмуртской Республики» в доход федерального  бюджета 6 000 руб. 00 коп. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через  Арбитражный суд Удмуртской Республики.  

Судья М.В.Мельникова