29/2017-129189(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 08 июня 2017 года 

по делу А33-5372/2017 Красноярск 

08 июня 2017 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Внести изменения в пункт 3.1 муниципального контракта от 16.08.2016 № 16 на  

выполнение работ по разработке проекта для объекта «Реконструкция котельной № 34  

п.Таежный Богучанский район Красноярского края», изложив в следующей редакции: 

«3.1. Подрядчик выполняет работы по Контракту в соответствии с календарным планом  

(Приложение № 3), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта. Срок выполнения работ Подрядчиком: 

- начало выполнения работ: с даты заключения контракта;  - окончание работ: по 27 мая 2017г. включительно.».  

Внести изменения в пункт 11.1 муниципального контракта от 16.08.2016г. № 16,  

изложив в следующей редакции: 

«11.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «27»  

августа 2017 года.». 

Внести изменения в пункт 5 Приложения № 3 «Календарный план» к муниципальному  

контракту, изложив в следующей редакции: 

5 

Окончание выполнения работ: 

По 27 мая 2017 года. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд  Красноярского края.  

Судья М.В. Лапина