АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край 

http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А78-13736/2022

г.Чита

17 августа 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 10 августа 2023 года Решение изготовлено в полном объёме 17 августа 2023 года 

Арбитражный суд Забайкальского края  

в составе судьи Е.А. Фадеева при ведении протокола судебного заседания помощником судьи М.С.Алексеевой 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью "ДорСтрой" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  государственному казенному учреждению "Служба единого заказчика" Забайкальского  края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании заключить дополнительное  соглашение об изменении (увеличении) цены государственного контракта и сроков  выполнения работ  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора,  Министерство финансов Забайкальского края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  

при участии: 

от истца – ФИО1, представителя по доверенности от 27.02.2023;  от ответчика: не явился;  

от третьего лица 1: не явился; от третьего лица 2- не явился; установил: 

Общество с ограниченной ответственностью "ДорСтрой" обратилось в  арбитражный суд с исковым заявлением, уточненным в порядке ст.49 АПК РФ, к  государственному казенному учреждению "Служба единого заказчика" Забайкальского  края об обязании заключить дополнительное соглашение об изменении (увеличении) цены  государственного контракта № Ф.2020.12496 от 11.01.2021 (Капитальный ремонт  автомобильной дороги Дарасун-Солнцево на участке км 126+000 – км 136 + 000 в  Шилкинском районе Забайкальского края) на сумму 101822728,51 руб., об обязании  заключить дополнительное соглашение об изменении срока окончания работ по  государственному контракту № Ф.2020.12496 от 11.01.2021, изложив п.5.1 контракта в  следующей редакции:  

«п.5.1 Начало выполнения работ: дата заключения настоящего контракта,  Окончание работ: 31.12.2022 г.».  

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования в  полном объеме.  

По правилам ст.156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие ответчика и третьих  лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.  

Рассмотрев заявленные требования, суд установил следующие обстоятельства.  

В своем заявлении истец указал, что между Забайкальским краем, от имени  которого действует Государственное казенное учреждение «Служба единого заказчика»  Забайкальского края (далее по тексту - Ответчик, Заказчик), и Обществом с ограниченной  ответственностью «ДорСтрой» (далее по тексту -Истец, Подрядчик) заключен  Государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту №  Ф.2020.12496 ИКЗ: 202753605002075360100104280014211243, Наименование объекта:  «Капитальный ремонт автомобильной дороги Дарасун-Солнцево на участке км 126 + 000 -  км 136 + 000 в Шилкинском районе Забайкальского края» (далее по тексту - Контракт).  

В соответствии с п. 1.1. Контракта (извлечение): В целях реализации программы  дорожных работ Подрядчик, в качестве генерального Подрядчика, принимает на себя  обязательства по выполнению работ по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной  дороги Дарасун-Солнцево на участке км 126+000 - км 136+000 в Шилкинском районе  Забайкальского края» (далее по тексту - Объект), в соответствии с проектной  документацией, утвержденной приказом ГКУ «Служба единого заказчика»  Забайкальского края № 219 от 12.05.2020г., (далее - Проект), а Заказчик берет на себя  обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего  Контракта.  

В соответствии с п.3.1. Контракта (извлечение): Цена настоящего контракта  составляет - 378 903 892,34 (Триста семьдесят восемь миллионов девятьсот три тысячи  восемьсот девяносто два рубля 34 копейки), в том числе налог на добавленную стоимость  (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (Двадцать) процентов.  

В соответствии с п. 3.3. Контракта (извлечение): Цена Контракта не может  изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных  законодательством РФ (ч.1 ст. 95 44-ФЗ).  

В соответствии с п. 5.1. Контракта: Календарные сроки выполнения работ по  Объекту и сроки завершения отдельных видов работ определяются Календарным  графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту).  

Начало выполнения работ: дата заключения настоящего Контракта. Окончание работ: 15.08.2021 г. 

В соответствии с п. 20.10. Контракта: Срок действия настоящего Контракта:  действие настоящего Контракта начинается с момента его подписания обеими сторонами  и истекает при полном исполнении обязательств сторонами 31.12.2021 г.  

23.07.2021 г., в связи с уменьшением ранее доведенных до Заказчика как  получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, между Сторонами  заключено дополнительное соглашение № 3 к Контракту, где Стороны договорились  внести изменения в Контракт и определили читать его в новой редакции:  

- п.5.1. Начало выполнения работ: дата заключения настоящего Контракта  Окончание работ: 15.08.2022г.  

- п.20.10 срок действия настоящего контракта: 

Действие настоящего Контракта начинается с момента его подписания обеими  Сторонами и истекает при полном исполнении обязательств Сторонами 31.12.2022 г.  

02.12.2021 г. между Сторонами заключено дополнительное соглашение № 4 о  внесении изменений в Контракт в части календарного графика производства работ .  

С целью поддержки заказчиков и подрядных организаций в сложившихся  экономических условиях в связи с ростом стоимости строительных ресурсов в 2021 году  

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 N 1315 "О внесении  изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (в редакции  постановлений Правительства Российской Федерации от 22.10.2021 N 1812 и от  31.12.2021 N 2594) (далее - Постановление N 1315) установлена возможность изменять  цену действующего контракта (не более чем на 30%) стоимостью более 1 млн. руб.,  заключенного в соответствии с Законом N 44-ФЗ для обеспечения федеральных нужд до  01.01.2022, предметом которых является выполнение работ по строительству,  реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства,  проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, в связи с ростом цен на  строительные ресурсы, в том числе в рамках исполнения государственного оборонного  заказа.  

09.03.2022г. Истец направил в адрес Ответчика письмо № 36/22 о необходимости  заключения дополнительного соглашения в части увеличении цены контракта в связи с  существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы. Приложением к  данному письму были представлены расчеты (обоснование) удорожания в соответствии с  Приказом Минстроя РФ от 21.07.2021 N 500ПР «О внесении изменений в методику  составления сметы» (далее по тексту - Расчет).  

В соответствии с п.2 Постановления Правительства Забайкальского края № 363 от  17.09.2021г. (далее по тексту - ПП ЗК № 363): При поступлении к заказчику в письменной  форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных  условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы,  подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта, заказчик,  указанный в пункте 1 настоящего постановления, обязан рассмотреть предложение  поставщика в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты его получения.  

18.03.2022г. в адрес Истца поступил ответ № 18/1545-22 о том, что в связи с  отсутствием лимитов бюджетных обязательств, не представляется рассмотреть  возможность изменения существенных условий контракта в связи с существенным  увеличением цен на строительные ресурсы.  

22.04.2022г. в адрес Ответчика направлена претензия № 2Д/С от 15.04.2022г. о  необходимости утвердить представленный Расчет и направить его на повторную  государственную экспертизу проектной документации, проводимой в части проверки  достоверности определения сметной стоимости строительства.  

Претензия осталась без ответа. 

Не согласившись с отказом Ответчика в согласовании Расчетов Истец обратился в  Арбитражный суд Забайкальского края с требованием обязать Ответчика утвердить  представленный Истцом Расчет и направить его на повторную государственную  экспертизу проектной документации, проводимой в части проверки достоверности  определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта,  сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов  культурного наследия (Исковое заявление № 3/Д-С от 16.05.2022 г.).  

Ввиду последующего согласования Ответчиком Расчетов (Письмо № 12/5197-22 от  04.08.2022 г.) Истцом заявлено ходатайство на возвращение искового заявления.  Определением Арбитражного суда Забайкальского края от 09.08.2022 по делу № А787808/2022 исковое заявление ООО «ДорСтрой» возвращено истцу.  

Дополнительное соглашение об увеличении цены контракта сторонами подписано  не было.  

Полагая, что существенное удорожание строительных ресурсов в ходе выполнения  работ, представление необходимых расчетов удорожания и наличие в связи с этим  оснований для обязания ответчика заключить дополнительное соглашение к контракту в  части увеличения цены контракта и сроков его выполнения, истец обратился в суд с  настоящим иском.  

Требования истца удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.  

Возникшие между сторонами обязательства подлежат регулированию нормами  главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и условиями заключенного  контракта с учетом норм Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ).  

В соответствии с подп. 8 п. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ государственный контракт,  муниципальный контракт - гражданско-правовой договор, предметом которого являются  поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение  недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен от имени  Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт),  муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или  муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд,  муниципальных нужд;  

В силу статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и  обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми  актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не  предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла  гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В  соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают из договоров.  

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору  подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны  (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется  принять результат работы и оплатить его.  

На основании п. 1 ст. 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить  заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:  непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала,  оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки)  вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний  о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые  грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают  невозможность ее завершения в срок.  

Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 1 ст.  716 ГК РФ, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре  срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря  на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении  к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные  обстоятельства (п. 2 ст. 716 ГК РФ).  

В соответствии со ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а  начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих  обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала,  оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке)  вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии  обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных  обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).  

В соответствии со ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик  обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика  определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется  создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и  уплатить обусловленную цену.  

В силу п. 1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится  заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые  установлены законом или договором строительного подряда.  

Согласно ст. 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья 740), проектные и  изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения  государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного  или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или  муниципальных нужд. По государственному или муниципальному контракту на  выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее -  государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить  строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов  производственного и непроизводственного характера работы и передать их  государственному или муниципальному заказчику, а государственный или  муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или  обеспечить их оплату.  

В силу ст. 766 ГК РФ государственный или муниципальный контракт должен  содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее  начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах  обеспечения исполнения обязательств сторон.  

В соответствии со ст. 767 ГК РФ изменения условий государственного или  муниципального контракта, не связанные с обстоятельствами, указанными в пункте 1  настоящей статьи, в одностороннем порядке или по соглашению сторон допускаются в  случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.  

На основании статьи 768 ГК РФ к отношениям по государственным или  муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или  муниципальных нужд, применяется Закон № 44-ФЗ.  

В соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ при заключении контракта  указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения  контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его существенных  условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим  Федеральным законом.  

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 95 и ч. 70 ст. 112 Закона № 44-ФЗ изменение  существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их  изменения по соглашению сторон в случаях и порядке, которые установлены  Правительством Российской Федерации, в 2021 - 2023 годах. Положения п. 8 ч. 1 ст. 95  настоящего Федерального закона также применяются к контрактам, которые заключены  на срок менее одного года и предметом которых является выполнение работ по  строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального  строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия.  

В связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные  ресурсы Правительством Российской Федерации было принято постановление от  09.08.2021 № 1315.  

Согласно подп. а п. 2 постановления Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315 при  исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству,  реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства,  проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в  соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения  федеральных нужд (далее - контракт) допускается в соответствии с пунктом 8 части 1  статьи 95 и частью 70 статьи 112 Федерального закона "О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  изменение существенных условий контракта, стороной которого является заказчик,  указанный в приложении к настоящему постановлению, в том числе изменение  (увеличение) цены контракта, при совокупности следующих условий:  

- изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов  бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств федерального бюджета и  бюджетов государственных внебюджетных фондов в соответствии с бюджетным  законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к  увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30  процентов;  

- предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта  капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим  заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций,  систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического  обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов,  и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от  содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;  

- размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке,  установленном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального  хозяйства Российской Федерации, а цены контракта, размер которой составляет или  превышает 100 млн. рублей, - по результатам повторной государственной экспертизы  проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения  сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта  капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного  наследия в соответствии с пунктом 45(14) Положения об организации и проведении  государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных  изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5  марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы  проектной документации и результатов инженерных изысканий" (в редакции настоящего  постановления);  

- изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения  заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении  условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме  предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных  условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы,  подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с  приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;  

- контракт заключен до 31 декабря 2022 г. и обязательства по нему на дату  заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены.  

Постановлением Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315 высшим исполнительным  органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано  принять меры, обеспечивающие возможность изменения (увеличения) цены контракта,  предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции,  капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по  сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с  Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд субъекта  Российской Федерации или муниципальных нужд соответственно, в связи с увеличением  цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при  исполнении такого контракта, с учетом положений настоящего постановления.  

17.09.2021 Правительством Забайкальского края принято постановление № 363 "Об  изменении (увеличении) цены контракта, предметом которого является выполнение работ  по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального  строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и  который заключен в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ  

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Забайкальского края".  

Согласно подп. 1 п. 1 постановления Правительства Забайкальского края от  17.09.2021 № 363 при исполнении контракта, предметом которого является выполнение  работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта  капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного  наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013  года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной  системе) для обеспечения нужд Забайкальского края (далее - контракт) допускается в  соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 и частью 70 статьи 112 Закона о контрактной  системе изменение существенных условий контракта, стороной которого является  заказчик, указанный в перечне, являющемся приложением к настоящему постановлению,  в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности следующих  условий:  

а) изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов  бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета Забайкальского  края и бюджетов государственных внебюджетных фондов в соответствии с бюджетным  законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к  увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30  процентов;  

б) предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта  капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим  заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций,  систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического  обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов,  и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от  содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;  

в) размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке,  установленном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального  хозяйства Российской Федерации от 21 июля 2021 года N 500/пр "О внесении изменений в  Методику составления сметы контракта, предметом которого являются строительство,  реконструкция объектов капитального строительства, утвержденную приказом  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской  Федерации от 23 декабря 2019 г. N 841/пр", а цены контракта, размер, которой составляет  или превышает 100 млн. рублей, - по результатам повторной государственной экспертизы  проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения  сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта  капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного  наследия в соответствии с пунктом 45(14) Положения об организации и проведении  государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных  изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5  марта 2007 года N 145;  

г) изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения  заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении  условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме  предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных  условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы,  подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с  приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;  

д) контракт заключен до 31 декабря 2022 года, и обязательства по нему на дату  заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены.  

В перечень заказчиков в постановлении Правительства Забайкальского края от  17.09.2021 № 363 указаны, в том числе Министерство строительства, дорожного хозяйства  и транспорта Забайкальского края, а также находящиеся в ведении данного Министерства  организации.  

Приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр утвержден порядок  определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с  единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы  товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной  деятельности (за исключением территориального планирования) и методика составления  сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов  капитального строительства (далее - Методика).  

Расчет удорожания цены контракта производится по правилам, установленным п.  14 Методики.  

Из постановления Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315 и постановления  Правительства Забайкальского края от 17.09.2021 № 363 следует, что увеличение цены  контракта может быть осуществлено только при наличии указанной в данных  постановлениях совокупности условий, а само увеличение цены контракта должно иметь  объективный характер, обусловленный существенным удорожанием строительных  ресурсов в ходе выполнения работ, что должно быть подтверждено подрядчиком путем  представления подтверждающих документов.  

В обоснование увеличения цены контракта истец ссылается на положительное  заключение повторной государственной экспертизы от 05.10.2022.  

Пунктом 2 статьи 451 ГК РФ определено, что, если стороны не достигли  соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися  обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по  основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по  требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:  

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения  обстоятельств не произойдет;  

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная  сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и  осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;  

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы  соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы  для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы  того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;  

4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск  изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.  

При этом по пункту 4 статьи 451 ГК РФ изменение договора в связи с  существенным изменением обстоятельств по требованию одной из сторон возможно лишь  в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным  интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты,  необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.  

В отсутствие согласованного сторонами изменения цены государственного  контракта истец продолжил выполнение работ на объекте.  

Доказательств того, что приостановление выполнения работ, расторжение договора  противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно  превышающий затраты, необходимые для исполнения договора материалы дела не  содержат.  

В материалы дела не представлены доказательства того, что внесение заявленных  истцом изменений в контракт связано с невозможностью исполнения контракта и  обусловлено исключительно обстоятельствами, не зависящими от сторон контракта;  кроме того, отсутствует решение Администрации об изменении твердой цены контракта в  пределах тридцати процентов (пунктом 8 части 1 статьи 95 и частью 70 статьи 112  Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд").  

Одним из условий для изменения цены контракта является не исполнение  обязательств на дату заключения соглашения об изменении условий контракта.  

В настоящем споре, 27.12.2022 сторонами подписан акт приемки в эксплуатацию  завершенного ремонтом объекта и фактически принятых затрат подрядчика в размере  361458035,16 руб. согласно приложению № 7.  

К п.18 указанного документа, содержащего иные сведения, суд относится  критически.  

Правовой интерес подрядчика, принявшего на себя обязательства выполнения  работ и столкнувшегося с необходимостью увеличения цены контракта, заключается в  затруднениях продолжить и (или) завершить исполнение контракта в части своих  обязательств без дополнительного финансирования возросших расходов.  

Фактическое выполнение подрядчиком данных работ при необходимости  увеличения цены контракта само по себе образует юридический факт, исключающий  возможность применения положений постановления N 1315 в связи с отсутствием  предусмотренных данным постановлением условий его реализации - контракт и  обязательства по нему исполнены.  

Работы, в нарушение ст.716, ст.719 ГК РФ приостановлены не были до внесения  изменений в контракт.  

Принимая во внимание принцип равенства участников правоотношений и свободе  договора, изменение экономической ситуации в части увеличения роста цен строительные  ресурсы является естественным следствием экономических процессов и не относится к  числу обстоятельств, возникновение которых нельзя было предвидеть.  

Стороны, вступая в договорные отношения, должны прогнозировать  экономическую ситуацию, в связи с чем не могли исключать вероятность роста цен  строительные ресурсы в период исполнения сделки.  

Осуществление предпринимательской деятельности на свой страх и риск  подразумевает, в числе прочего, и то, что возможные экономические потери не могут  перекладываться на контрагентов. Вступая в коммерческие отношения, субъект  самостоятельно принимает экономически значимые решения и, как правило, действует в  ситуации неочевидности.  

В соответствии с частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе изменение  существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их  изменения по соглашению сторон в случае, если возможность изменения условий  контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом.  

В отсутствие объективных доказательств, подтверждающих удорожание  материалов (а не их сметное значение), а также причинной связи между повышением цен  и необходимостью увеличения сроков работ при их фактической сдаче заказчику,  оснований для увеличения таких сроков также не имеется.  

Указанный правовой подход также соответствует сложившейся судебной практике  при рассмотрении схожих дел (А57-5041/2022, А40-198172/22).  

Оснований для внесения изменений в контракт суд не усматривает. В иске следует отказать. 

По правилам ст. 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины  относятся на истца по правилам ст.110 АПК РФ.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

В иске отказать. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный  апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия.  

Судья Е.А. Фадеев 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 11.01.2023 5:09:00

Кому выдана Фадеев Евгений Алексеевич