Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-133389/2018

08 апреля 2019 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  29 марта 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  08 апреля 2019 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коросташова А.А.

 

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-строительная компания "Челси"

ответчик: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр физкультура и здоровье" 

о взыскании, 

 

при участии: 

- от истца: ФИО2 (доверенность от 20.02.2018),

- от ответчика: ФИО3 (доверенность от 16.04.2018),  

 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-строительная компания "Челси" (далее - Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании с Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр физкультура и здоровье" (далее - Учреждение) 381 841 руб. 54 коп. долга, 48 151 руб. 06 коп. неустойки с последующим её начислением по день оплаты долга.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал в полном объёме, представитель ответчика возражала против удовлетворения иска.

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, арбитражный суд установил следующее.

27.07.2017 между Учреждением (заказчик) и Обществом (подрядчик) заключен контракт № УМСП, согласно которому Общество обязалось выполнить работы по устройству многофункциональных спортивных площадок для ГБОУ ДОД «Центр «Физкультура и Здоровье» для нужд Санкт-Петербурга в 2017 года.

В соответствии с п. 2.6 контракта местом выполнения работ является: Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, уч. 45 (юго-западнее д. 13 лит. А по пр. Пискаревскому); пр. Индустриальный, уч. 67 (у д. 26-24 лит. А по пр. Индустриальному); ул. Синявинская, уч. 3 (южнее д. 5 лит. А по ул. Синявенская) (далее - объект).

Сроки (периоды) выполнения работ: 20 календарных дней с момента передачи объекта подрядчику в соответствии с календарным планом (Приложение № 3 к контракту). Передача объекта подрядчику в течение 3 календарных дней с момента заключения контракта сторонам (п. 2.7 контракта).   

Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (п. 2.8 контракта).

Согласно п. 3.1 контракта стоимость работ составляет 2 541 447 руб. 98 коп., в том числе НДС 18 % - 387 678 руб. 51 коп. 

31.07.2017 сторонами подписан акт передачи объекта в работу, следовательно, работы подлежали выполнению в срок до 20.08.2017.

Работы приняты по актам о приемке выполненных работ от 20.10.2017 №№ 1,2, 3. 

Согласно пункту 3.5 контракта оплата за выполненные работы производится Заказчиком единовременно в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта (-ов) приемки выполненных работ (КС-2) по Контракту на основании предоставленных Подрядчиком Заказчику справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета, счета-фактуры и иных документов, связанных с исполнением Контракта, а также возмещения Подрядчиком коммунальных и эксплуатационных расходов Заказчика, понесенных в связи с предоставлением Подрядчику коммунальных и эксплуатационных услуг. Днем исполнения обязательств Заказчиком по оплате считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

Платежным поручением от 28.11.2017 № 771932 Заказчик произвел оплату выполненных Подрядчиком работ в размере 2 064 956 руб. 75 коп.

Документы, связанные с исполнением Контракта: счет на оплату результатов выполненных Подрядчиком работ предоставлен 08.11.2017, соответственно оплата Заказчиком была произведена в срок, предусмотренный Контрактом: после получения всех документов в течение 15 рабочих дней.

Пунктом 8.4.3.1 контракта установлена ответственность Подрядчика за просрочку исполнения обязательства в виде пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определяемом Заказчиком в соответствии с порядком, установленном п. 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта; С - размер ставки).

20.10.2017 Заказчик предъявил Истцу претензию № 1 об уплате неустойки (пени) в размере 381841 руб. 54 коп. в добровольном порядке.

Поскольку Общество в установленный в претензии срок добровольно не исполнил требование об уплате пени, Ответчик, воспользовался правом, предусмотренным пунктом 3.8 Контракта: в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств оплата принятых Заказчиком Работ может производиться Заказчиком за вычетом суммы неустойки, рассчитанной в соответствии с условиями настоящего Контракта, если оплата осуществляется за счет средств бюджета того же финансового года, - то есть вычел сумму неустойки из оплаты фактически выполненных работ на общую сумму 2 446 807,29 руб.

Доводы истца о фактическом выполнении работ 21.08.2018 опровергаются актами о приемке выполненных работ (п. 2.8 контракта). 

С учётом изложенного оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

решил:

В иске отказать. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Коросташов А.А.