61/2018-3241(1) 

Арбитражный суд Чукотского автономного округа улица Ленина, дом 9а, Анадырь, 689000, www.chukotka.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А80-187/2018

г. Анадырь

27 июля 2018 года

Арбитражный суд Чукотского автономного округа в составе судьи  Кольцюка М.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску федерального  казенного предприятия «Аэропорты Чукотки» (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>) к открытому акционерному обществу «Проектно- изыскательный институт воздушного транспорта «Дальаэропроект» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании пени за нарушение сроков  выполнения работ по государственному контракту в сумме 4171050 рублей,  

в отсутствие сторон, 

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования федерального казенного предприятия «Аэропорты  

Чукотки» удовлетворить частично. 

Взыскать с открытого акционерного общества «Проектно- 

изыскательский институт воздушного транспорта «Дальаэропроект» (адрес  

(место нахождения): 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ким Ю  Чена, д. 45, ОГРН 1082721005168, дата государственной регистрации в  качестве юридического лица 30 мая 2008 года, ИНН 2721159217) в пользу  федерального казенного предприятия «Аэропорты Чукотки» (адрес (место  нахождения): 689506, Чукотский автономный округ, Анадырский район,  

п. Угольные Копи - 6, ОГРН 

<

***>, дата государственной  регистрации в качестве юридического лица 22 октября 2010 года,  

ИНН 

<

***>) неустойку в размере 2544750 (два миллиона пятьсот сорок  четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей и судебные расходы по уплате  государственной пошлины в размере 26756 (двадцать шесть тысяч семьсот  пятьдесят шесть) рублей, а всего 2571506 (два миллиона пятьсот семьдесят  одна тысяча пятьсот шесть) рублей.  

В удовлетворении требований в остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Шестой  арбитражный апелляционный суд в порядке главы 34 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, а также в Арбитражный суд  Дальневосточного округа в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 181,  статьей 276, частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.  

Судья М.А. Кольцюк