2 1 

216/2019-19529(2) 

 м а 

 р 

 т а 

Арбитражный суд Рязанской области   2 

ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108; 

http://ryazan.arbitr.ru; e-mail: info@ryazan.arbitr.ru 0 

 1 

Именем Российской Федерации 9

г 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 о 

 д

а

Дело № А54-1184/2016

г. Рязань

21 марта 2019 года

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи Медведевой  О.М., руководствуясь статьями 110, 167-170, 174, 176 Арбитражного про- цессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования ООО "Полиграфия" удовлетворить. 

Обязать администрацию города Рязани (ОГРН 

<

***>; 390000,  

<

...>) в течение 6 месяцев со дня вступления реше- ния в законную силу выполнить следующие работы, указанные в эксперт- ном заключении № 37-18-СЭ от 11.02.2019, согласно перечню работ по ре- конструкции здания на ул. Горького д. 102А:  

6. Демонтаж наружных стен из керамического и силикатного кирпи- чей 1-ого этажа здания  

20 м² и 51,3 м³ 

7. Демонтаж оконных блоков 1-ого этажа 

8,7 м³ и 7 шт 

8. Демонтаж металлических и деревянных перемычек оконных прое- мов 1-ого этажа  

14 шт 

9. Демонтаж дверных блоков 1-ого этажа 

18 м² и 9 шт 

10. Демонтаж металлических перемычек дверных проемов 1-ого эта- жа  

12 шт 

11. Демонтаж чугунных радиаторов 1-ого этажа  

7 шт 

12. Демонтаж деревянного перекрытия 1-ого этажа  

75,4 м² и 17,3 м³ 

13. Демонтаж лестничных маршей 

10 м² и 0,1 м³ 

14. Демонтаж лестничных площадок 

6,2 м² и 0,6 м³ 

15. Демонтаж наружных стен из керамического и силикатного кирпи- чей 2-ого этажа здания  

20 м² и 60,8 м³ 

16. Демонтаж оконных блоков 2-ого этажа 

8,7 м3 и 7 шт 

17. Демонтаж металлических и деревянных перемычек оконных про- емов 2-ого этажа  

14 шт 

18. Демонтаж дверных блоков 2-ого этажа 

8 м² 4 шт 

19. Демонтаж металлических перемычек дверных проемов 2-ого эта- жа  

4 шт 

20. Демонтаж чугунных радиаторов 2-ого этажа  

7 шт 

21. Демонтаж деревянных перекрытий 2-ого 

75,4 м² и 17,3 м³ 

22. Демонтаж кирпичной кладки чердачной части 

5,8 м² и 2,9 м³ 

23. Демонтаж стальных тяжей 1-ого и 2-ого этажей  

63 п.м. 

24. Демонтаж стропильной системы (стропила 150х50 мм, шаг 1 м)  

Количество деревянного бруса:  

L= 3,6 м - 7 шт; L= 7 м - 11 шт; 

L= 1,6 м - 18 шт;  L= 2,3 м - 14 шт;  L= 4,2 м - 22 шт.  

Общий объём древесины - 1,9 м³ 

25. Демонтаж обрешетки (доски 100x25 мм, шаг 0,25 м) 

91,8 м² и 22,9 м³ 

26. Демонтаж кровельного покрытия из асбестоцементных волнистых  листов  

130,3 м² 

и согласно перечню работ, указанных в разделе "Демонтажные рабо-

ты" в Локальной смете: 

Сметная стоимость 5 349,53 тыс.руб Нормативная трудоемкость 5103,95 чел.-ч Сметная заработная плата 51,73 тыс.руб В смете применены коэф. 

к-1,15 к з/пл и м/м МДС 81.35-2004 пр. № 1 таб.1 п.п.7 (стесненные условия снаружи здания)  к-1,15 к з/пл и 1,25 м/м МДС 81.35-2004 п.4.7 (кроме ФЭР46)  

 № п/п 

Наименование 

Шифр и №  позиции  

норматива  

Единица изме-рения 

Коли-

чество  

Цена базовая 

Стои-мость 

ОЗП 

ОЗП 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1. 

Разборка надземной части без со- хранения годных материалов кир- пичных зданий 1,2-этажных  

46-06-001-5  

10 м³ строи- тельного объема  

91,1 

273,53  122,12  

24918,58  11125,13  

2. 

Разборка санитарно-технических  систем водопровода  

46-06-003-1  

10 м³ строи- тельного объема  

91,1 

23,11  13,78  

2105,33  1255,36  

3. 

Разборка санитарно-технических  систем центрального отопления  

46-06-003-2  

10 м³ строи- тельного объема  

91,1 

106,98 65,45 

9745,89  5962,50  

4. 

Разборка санитарно-технических  систем канализации  

46-06-003-3  

10 м³ строи- тельного объема  

91,1 

116,68 77,88 

10629,55  7094,87  

5. 

Разборка полов с основанием под- земной части жилых зданий  

46-06-006-1  

10 м² 

10,64 

125,67 74,49 

1337,13  792,57  

6. 

Разборка стен из кирпича подземной  части зданий (объ- 

ем:35,1+32,3+5,4)=72,8 

46-06-007-1  

10 м³ строи- тельного объема  

7,28 

361,23  246,36  

2629,75  1793,50  

7. 

Погрузка при автомобильных пере- возках мусора строительного с по- грузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5 м³  

т01-01-01-043  

1 т груза 

393,51  

3,28  0,00  

1090,53  0,00  

8. 

Перевозка грузов I класса автомоби- 

лями-самосвалами грузоподъемно- стью 10 т работающих вне карьера  на расстояние до 15 км  

т03-21-01-015  

1 т груза 

393,51  

13,38 0,00 

5265,16  0,00  

2. Перечислить обществу с ограниченной ответственностью "Центр  

исследований строительных конструкций и материалов" (390023, 

<

...>, помещение Н1) с депозитного счета Арбитражного суда Рязанской области денежные средства в сумме 70000 руб. по  счету на оплату № 37-18-СЭ от 14.02.2019 в счет оплаты проведенной экс- пертизы.  

3. Взыскать с администрации города Рязани (ОГРН 

<

***>;  390000, 

<

...>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Полиграфия" (ОГРН 

<

***>; 390000, 

<

...>) судебные расходы по оплате судебной экспертизы в  сумме 50000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в сумме  6000 руб.  

4. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Полиграфия" (ОГРН 

<

***>; 390000, 

<

...>) с де- позитного счета Арбитражного суда Рязанской области денежные средства  

в сумме 4000 руб., перечисленные по платежному поручению № 215 от  24.05.2018.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия  в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской области.  

На решение, вступившее в законную силу, через Арбитражный суд Рязанской области может быть подана кассационная жалоба в случаях, по- рядке и сроки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации.  

Судья О.М. Медведева