АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Большая Московская улица, дом 73, Великий Новгород, 173020

http://novgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

Великий Новгород

Дело № А44-1003/2024

10 апреля 2024 года

Резолютивная часть решения оглашена в судебном заседании 09 апреля 2024 года, полный текст изготовлен 10 апреля 2024 года.

 

В заседании объявлялся перерыв с 08 до 09 апреля 2024 года в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Арбитражный суд Новгородской области в составе:

судьи  Куземы А.Н.,

при ведении протокола судебного заседания

помощником судьи Барташевич Э.Д.,        

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Лесопильный и деревообрабатывающий комбинат № 3» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о признании незаконным решения и недействительным приказа,

третье лицо: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),

при  участии: 

от заявителя – представитель ФИО1,

                     – представитель ФИО2;

от заинтересованного лица – представитель ФИО3;

от третьего лица – не явился, 

 

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Лесопильный и деревообрабатывающий комбинат № 3» (далее по тексту - Общество) обратилось в Арбитражный суд Новгородской области с заявлением к министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области (далее по тексту - Министерство) о признании:

- незаконным решения, выраженного в письме от 14.12.2023 № ПР-12496-И об отказе в установлении максимально допустимого срока исполнения предписания;

- недействительным приказа от 17.01.2024 № 26 об исключении приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация деревообрабатывающих мощностей и организация производства элементов деревянного домостроения на ООО «Хасслахерлес» из перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, 

возложении обязанности на Министерство устранить допущенные нарушения прав и законных интересов Общества, при этом новый срок предписания не должен включать период обжалования решения Министерства, выраженного в письме от 14.12.2023 № ПР-12496-И, в судебном порядке, а именно, с 26.02.2024 (дата поступления заявления в суд) по дату вступления в силу решения суда, вынесенного по существу дела (с учетом уточнения от 08.04.2024).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Министерство промышленности и торговли Российской Федерации  (далее по тексту – Минпромторг России).

В судебном заседании представители Общества поддержали заявленные требования, с учетом их уточнения.

Представитель Министерства в судебном заседании заявленные требования не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Минпромторг России в судебное заседание своего представителя не направило, заявило ходатайство о рассмотрении дела без его участия. Из представленных письменных пояснений следует, что третье лицо возражает против удовлетворения заявленных требований.

На основании статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту - АПК РФ) арбитражный суд считает третье лицо надлежащим образом извещенным о времени и месте рассмотрения дела и согласно статье 156, части 2 статьи 200 АПК РФ возможным рассмотрение дела в отсутствие неявившегося представителя Минпромторга России по имеющимся в деле материалам.

Заслушав пояснения представителей заявителя и заинтересованного лица, исследовав материалы дела, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Как видно из материалов дела, приказом Министерства от 30.11.2020 № 1255 утверждена заявка общества с ограниченной ответственностью «Хасслахерлес» (далее по тексту – ООО «Хасслахерлес», Компания), согласованная письмом Федерального агентства лесного хозяйства (далее по тексту -  Рослесхоз) от 28.07.2020 № 01-01-27/14225, на реализацию приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов «Модернизация деревообрабатывающих мощностей и организация производства элементов деревянного домостроения на ООО «Хасслахерлес» (далее по тексту - инвестиционный проект, т. 4 л.д. 116-132).

Инвестиционный проект Компании приказом Минпромторга России от 23.12.2020 № 4602 включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (т. 1 л.д. 22).

Данный инвестиционный проект предусматривает модернизацию лесопильного и пеллетного производств и организацию производства элементов деревянного домостроения на ООО «Хасслахерлес»; объем производства при выходе на проектную мощность (2024 год): элементы деревянного домостроения - 50 тыс. куб. м в год, пиломатериалы - 34,286 тыс. куб. м в год, пеллеты - 34,071 куб. м в год.

Согласно Концепции инвестиционного проекта реализация инвестиционного проекта планируется в несколько этапов:

подготовка проектной документации: поэтапно до 2 квартала 2023 г.;

реализация инвестиционного проекта, инвестиционная фаза: 2018-2024 гг;

прогнозный период: 2018-2027 гг.

Сроки реализации инвестиционного проекта (с начала реализации инвестиционной фазы до выхода на проектную мощность) - 2018-2024 гг.

Размер расчетной лесосеки составляет 671,7 тыс. куб.м. Объем заявленных инвестиций, необходимых для реализации инвестиционного проекта, составляет 2 021,734 млн. руб. (т. 1 л.д. 27-140).

График заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, выделенных для реализации инвестиционного проекта, представлен в таблице 9.1 Концепции инвестиционного проекта: по Маловишерскому и Чудовскому лесничествам - 3 квартал 2020 года, по Крестецкому лесничеству - 2 квартал 2021 года, по Демянскому лесничеству - 2 квартал 2022 года, по Маревскому лесничеству - 2 квартал 2023 года (т. 1 л.д. 131-133).

05 марта 2022 года Компания подала заявку за № 534 о внесении изменений в инвестиционный проект в части увеличения общей площади лесных участков, ежегодного допустимого объема изъятия древесины и арендной платы по годам (за счет появления свободных от аренды лесных участков в Новгородской области), увеличения объема инвестиций и мощности по производству выпускаемой продукции, а также изменения графика заключения договоров аренды лесных участков (т. 4 л.д. 136-144). 

Приказом Министерства от 10.03.2022 № 181 внесены изменения в приказ от 30.11.2020 № 1255 (т. 4 л.д. 145-158).

Рослесхоз письмом от 04.04.2022 № АП-06-27/7874 отказал в согласовании заявки ООО «Хасслахерлес» об изменении инвестиционного проекта в связи с несоответствием заявки требованиям Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.2018 № 190 (в редакции, действующей в период спорных правоотношений, далее по тексту – Положение № 190), и Методических указаний по разработке концепции инвестиционного проекта в области освоения лесов, претендующего на включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденных приказом Минпромторга России от 15.05.2018 №1870 (т. 5 л.д. 1-2).

08 апреля 2022 года Министерство вынесло приказ № 278 об отклонении заявки Компании от 05.03.2022 № 534 о внесении изменений в инвестиционный проект (т. 5 л.д. 3-5).

Согласно отчетам ООО «Хасслахерлес» об использовании поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов за 4 квартал 2020 год, 1-4 кварталы 2021 года, 1 квартал 2022 года договоры аренды лесных участков не заключены (т. 5 л.д. 11-32, 41-44).

В соответствии с приказом от 25.04.2022 № 339 «О проведении выездной проверки» Министерством 27.04.2022 на основании пункта 27 Положения № 190, проведена выездная проверка реализации Компанией приоритетного инвестиционного проекта, по результатам которой заинтересованным лицом составлен акт от 27.04.2022 о результатах проверки реализации приоритетного инвестиционного проекта за 1 квартал 2022 года (т. 5 л.д. 33-37).

В ходе проверки Министерством в том числе установлено не заключение договоров аренды лесных участков, запланированное в 3 квартале 2020 года.

Министерство, на основании пунктов 27, 32 Положения № 190, в целях устранения выявленных нарушений согласовало с Минпромторгом России (письмо от 01.06.2022 №51763/08, т. 5 л.д. 55) и выдало Компании предписание от 09.06.2022 № ПР-5600-И, которым ООО «Хасслахерлес» предписывалось устранить отставание от поквартального графика реализации инвестиционного проекта более 1 года и заключить с Министерством договоры аренды лесных участков (по Маловишерскому и Чудовскому лесничествам срок заключения в соответствии с инвестиционным проектом - 3 квартал 2020 года). Срок исполнения предписания - 08.12.2022 (т. 1 л.д. 24).

На основании пункта 8 постановления Правительства Российской Федерации от 23.02.2018 № 190, в связи с ограничениями, введенными со стороны иностранных государств, продлен срок выполнения обязательств инвестора по созданию объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, предусмотренный в период с 2 сентября 2022 г. по 1 сентября 2024 г. поквартальным графиком реализации инвестиционного проекта и (или) предписанием о необходимости устранения нарушений, на 12 месяцев со дня его наступления.

В связи с этим срок исполнения ООО «Хасслахерлес» предписания от 09.06.2022 №ПР-5600-И, продлен на 12 месяцев, то есть до 08.12.2023 (письмо Минпромторга России от 22.12.2022 № 133124/08, т. 5 л.д. 64-65).

14 апреля 2023 года 100 % долей в уставном капитале ООО «Хасслахерлес» приобретено обществом с ограниченной ответственностью «УК ВЛП», о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись регистрации от 24.04.2023 №2235300037707.  В дальнейшем зявитель переименован в общество с ограниченной ответственностью «Лесопильный и деревообрабатывающий комбинат № 3», запись регистрации от 16.05.2023 № 2235300042657 (т. 2 л.д. 21, 27).

06 мая 2023 года функции единоличного исполнительного органа заявителя переданы акционерному обществу «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники», что подтверждается записью в Едином государственном реестре юридических лиц от 16.05.2023 № 2235300042657 (т. 2 л.д. 22-26, 29).

В адрес Общества Министерство письмами от 18.08.2023 № ПР-8163-И, от 20.09.2023 № ПР-9255-И, от 24.10.2023 № ПР-10532-И, от 02.11.2023 № ПР-10880-И были направлены напоминания о необходимости исполнения предписания и заключения договоров аренды лесных участков (т. 5 л.д. 90-92, 101-103).

Согласно отчетам Общества об использовании поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов за 2-4 кварталы 2022 года, 1-4 кварталы 2023 года договоры аренды лесных участков не заключены.

07 декабря 2023 года в адрес Министерства заявитель направил письмо № 1117 с просьбой установить максимальный срок исполнения предписания от 09.06.2022 № ПР-5600-И продолжительностью 12 месяцев (вместо установленных 6 месяцев), то есть до 08.06.2023, что с учетом пункта 8 постановления Правительства Российской Федерации от 23.02.2018 № 190 составило бы период до 08.06.2024 (т. 1 л.д. 141).

14 декабря 2023 года заинтересованное лицо в ответ на письмо от 07.12.2023 сообщило, что Правилами утверждения перечня приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса, включения в данный перечень и исключения из него таких инвестиционных проектов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.2018 № 190 (в редакции постановления Правительства РФ от 15.06.2023 № 987, далее по тексту – Правила) не предусмотрена возможность изменения истекшего срока действия предписания (письмо № ПР-12496-И, т. 1 л.д. 19).

17 января 2024 года Министерством на основании пунктов 19, 32 Правил издан приказ № 26 «Об исключении приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация деревообрабатывающих мощностей и организация производства элементов деревянного домостроения на ООО «Хасслахерлес» из перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов» (т. 1 л.д. 20).

Данный приказ направлен заинтересованным лицом письмом от 19.01.2024 № ПР-504-И в Минпромторг России для принятия решения об исключении инвестиционного проекта из перечня приоритетных инвестиционных проектов (т. 5 л.д. 110-111).

Не согласившись с приказом Министерства от 17.01.2024 № 26 и решением об отказе в установлении максимально допустимого срока исполнения предписания, Общество обратилось в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением.

В соответствии со статьей 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно пункту 6 постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» для признания ненормативного акта недействительным, решения и действия (бездействия) незаконными необходимо наличие одновременно двух условий: несоответствие их закону или иному нормативному правовому акту и нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности.

Отсутствие предусмотренной статьей 198 АПК РФ совокупности условий, необходимой для оспаривания ненормативного правового акта, решения, действия (бездействия), влечет в силу части 3 статьи 201 АПК РФ отказ в удовлетворении заявленных требований.

Частью 1 статьи 65 АПК РФ установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу части 5 статьи 200 АПК РФ обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

При этом, исходя из правил распределения бремени доказывания, установленных статьями 65, 198 и 200 АПК РФ, обязанность доказывания факта нарушения своих прав и законных интересов возлагается на заявителя.

Статьей 71 АПК РФ регламентировано, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1). Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (часть 2).

Оценив доводы лиц, участвующих в деле, в совокупности и взаимной связи с имеющимися в деле доказательствами, суд полагает требования Общества неподлежащими удовлетворению в силу следующего.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (далее по тексту - Закон № 39-ФЗ) приоритетный инвестиционный проект - инвестиционный проект, суммарный объем капитальных вложений, который соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, включенный в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации.

Согласно статье 22 Лесного кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ЛК РФ) инвестиционная деятельность в целях развития лесного комплекса осуществляется в форме капитальных вложений в соответствии с Законом № 39-ФЗ и настоящим Кодексом.

Под объектами капитальных вложений в целях настоящей статьи понимаются объекты создаваемой и (или) модернизируемой лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры.

Порядок утверждения перечня приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса, включения в данный перечень и исключения из него таких инвестиционных проектов устанавливается Правительством Российской Федерации в утвержденных им Правилах.

В силу пункта 2 Правил  к инвестиционным проектам относятся инвестиционные проекты по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, включая переработку древесных отходов, и по созданию объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры, включая переработку древесных отходов.

Согласно пункту 4 Правил ведение перечня, в том числе включение в него инвестиционных проектов и внесение изменений, осуществляется Минпромторгом России.

Основанием для включения приоритетного инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса является решение Минпромторга России, принятое на основании решения заинтересованного органа об утверждении заявки инвестора на реализацию приоритетного инвестиционного проекта. Заинтересованными органами в отношении инвестиционных проектов, реализуемых на лесных участках в границах земель лесного фонда, являются органы государственной власти субъектов Российской Федерации (пункт 5 Правил).

В соответствии с положением о министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 21.12.2017 № 466, Министерство является органом исполнительной власти Новгородской области, исполняющим полномочия в области лесных отношений и лесопромышленного комплекса.

В силу подпункта «д» пункта 7 Правил заявка инвестора должна содержать поквартальный график реализации инвестиционного проекта, содержащий наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания и (или) модернизации, сроки ввода в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины.

Подпунктом «д» пункта 19 Правил установлено, что нарушение инвестором исполнения поквартального графика более чем на 1 год является основанием для исключения инвестиционного проекта из перечня инвестиционных проектов с досрочным расторжением договора аренды лесного участка по инициативе арендодателя.

Объектом контроля, осуществляемого заинтересованным органом, согласно пункту 27 Правил, является выполнение обязательств инвестора по созданию объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, предусмотренных поквартальным графиком.

Отклонение от утвержденного поквартального графика является нарушением, влекущим выдачу предписания об устранении нарушений.

Инвестиционный проект Общества в области освоения лесов в таблице 9.1 содержит график заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, выделенных для реализации инвестиционного проекта, так по Маловишерскому и Чудовскому лесничествам - 3 квартал 2020 года, по Крестецкому лесничеству - 2 квартал 2021 года, по Демянскому лесничеству - 2 квартал 2022 года, по Маревскому лесничеству - 2 квартал 2023 года.

В рассматриваемом случае нарушение Обществом поквартального графика реализации инвестиционного проекта послужило основанием для проведения проверки и выдачи предписания от 09.06.2022 № ПР-5600-И в соответствии с пунктами 27, 32 Правил.

Согласно пункту 32 Правил, в случае если возникли основания для исключения инвестиционного проекта из перечня инвестиционных проектов, предусмотренные подпунктом «д» пункта 19 настоящих Привил, заинтересованный орган в течение 14 рабочих дней подготавливает предписание с указанием срока их устранения, при этом срок устранения нарушений по предписанию должен быть не менее 3 месяцев, но не более одного года, и в течение 5 рабочих дней направляет предписание в министерство на согласование. Министерство при поступлении предписания в течение 14 рабочих дней принимает решение о согласовании предписания либо об отказе в согласовании предписания с обоснованием причин отказа и направляет соответствующее решение в заинтересованный орган.

Заинтересованный орган при поступлении согласованного предписания в течение 5 рабочих дней направляет его инвестору. Одновременно с этим копия предписания направляется заинтересованным органом в Минпромторг России. В случае если нарушения были устранены в указанный в предписании срок, заинтересованный орган информирует об этом Минпромторг России в течение 10 рабочих дней со дня получения такой информации.

В случае если нарушения не были устранены в указанный в предписании срок, заинтересованный орган в течение 14 рабочих дней со дня истечения указанного срока устранения нарушений принимает решение об исключении инвестиционного проекта из перечня инвестиционных проектов и направляет его в Минпромторг России.

Таким образом, применительно к приведенным нормам выдача предписания направлена на предоставление инвестору возможности исполнить мероприятия, предусмотренные поквартальным графиком, по созданию объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, в течение соответствующего срока, который указан в предписании.

Из материалов дела видно, что согласно отчетам инвестора об использовании поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов за 2-4 кварталы 2022 года, 1-4 кварталы 2023 года договоры аренды лесных участков не заключены.

В данном случае Общество не оспаривает наличие отставаний от реализации инвестиционного проекта более чем на один год. Вместе с тем заявитель указывает на то, что предписание от 09.06.2022 № ПР-5600-И не реально для исполнения в установленный шестимесячный срок в силу выявленных фактов пересечения границ земель лесного фонда (лесных участков) с границами земель иных категорий. В связи с чем, полагает решение Министерства об отказе в установлении срока исполнения указанного предписания продолжительностью один год и, как следствие этого отказа, приказ Министерства об исключении инвестиционного проекта из перечня приоритетных нарушают его права и законные интересы в сфере экономической деятельности.

Как следует из материалов дела, конкретные основания, послужившие принятию Министерством оспариваемого приказа, были указаны в предписании от 09.06.2022 № ПР-5600-И, которое получила Компания.

Законность выданного Министерством предписания и, соответственно, срок его исполнения ни Компанией, ни Обществом в судебном порядке не оспаривалась, выявленные в ходе проверки нарушения заявителем не отрицались.

В рассматриваемом случае Министерство при издании оспариваемого приказа исходило из истечения срока, указанного в предписании – шесть месяцев.

При этом заинтересованным лицом учтено, что в соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации от 23.02.2018 № 190, срок выполнения обязательств инвестора по созданию объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, предусмотренный в период с 2 сентября 2022 г. по 1 сентября 2024 г. поквартальным графиком реализации инвестиционного проекта и (или) предписанием о необходимости устранения нарушений, продлен на 12 месяцев со дня его наступления.

Исходя из этого, срок исполнения ООО «Хасслахерлес» предписания от 09.06.2022 № ПР-5600-И, был продлен на 12 месяцев, то есть до 08.12.2023.

По смыслу Правил обязательным условием для принятия решения об исключении инвестиционного проекта из перечня инвестиционных проектов является истечение установленного срока на исполнение предписания об устранении нарушений, предусмотренных подпунктом «д» пункта 19 Правил.

Поскольку на момент принятия оспариваемого приказа срок исполнения предписания от 09.06.2022 № ПР-5600-И, продленный на 12 месяцев в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.2018 № 190, истек, у Министерства имелись основания для проведения проверки исполнения предписания и принятия соответствующего приказа. 

Следует отметить, что фактически заявителю был продлен срок для заключения договоров аренды лесных участков по Маловишерскому и Чудовскому лесничествам с 3 квартала 2020 года по 08.12.2023, что составляет более трех лет.

Таким образом, при принятии решения от 14.12.2023 у Министерства отсутствовали правовые и фактические основания для продления срока исполнения предписания еще на шесть месяцев. 

Учитывая, что указанное предписание не признано судом недействительным, суд приходит к выводу о том, что у Министерства применительно к пункту 32 Правил имелись законные основания для принятия 17.01.2024 приказа № 26 об исключении инвестиционного проекта из перечня приоритетных инвестиционных проектов.

При таких обстоятельствах суд полагает, что заявленные Обществом требования неправомерны и не могут быть удовлетворены судом.

Согласно статье 110 АПК РФ судебные расходы по оплате госпошлины суд относит на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 200-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

1. Отказать в удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью «Лесопильный и деревообрабатывающий комбинат № 3» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

2. Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Вологда) через Арбитражный суд Новгородской области в течение месяца со дня его принятия.

 

 

Судья                                                                                                                           А.Н. Кузема