АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-4183/2019

10 июня 2021 года

город  Симферополь

Резолютивная часть решения оглашена  03.06.2021

Полный текст решения изготовлен  10.06.2021

             Арбитражный  суд Республики Крым в составе судьи Гайворонского В.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление ГУП РК «Крымэнерго» к ООО «Инженерная компания Сибири» о взыскании  

при участии:

от истца – ФИО2, представитель по доверенности № 435-Д от 26.03.2021;

от ответчика –  ФИО3, представитель по доверенности от 11.01.2021

Обстоятельства дела:  Истец обратился в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением о взыскании пени в сумме 47 400,50 руб., в связи с просрочкой исполнения работ. 

Ответчик иск не признает, ссылается на просрочку кредитора.    

Рассмотрев материалы дела, суд 

                                                      УСТАНОВИЛ:

Между ГУП РК «Крымэнерго» (далее – Заказчик) и ООО «Инженерная компания Сибири» (далее – Подрядчик) 11 марта 2016 г. заключен договор № 193/410 (далее – Договор), в соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить комплекс проектно-изыскательских и землеустроительных работ  по титулу «Электроснабжение военных городков №№ 26 и 27 в Симферопольском районе, с.Перевальное, со строительством ПМ 110/10 кВ Перевальное-2».

Согласно пункту 17.1 договора № 193/410 настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31 августа 2016 года. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, и от ответственности а его нарушение, которое имело место во время действия договора. Датой подписания договора считается дата, указанная на первом листе договора (в правом верхнем углу).

В соответствии с п.п.3.2, 3.4 договора работы, предусмотренные договором, выполняются поэтапно, сроки выполнения работ устанавливаются Графиком выполнения работ (Приложение    № 2 к договору).

В соответствии с п.3.3 договора № 193/410 работы должны быть завершены в полном объеме, указанном в сводной таблице стоимости договора (приложение № 1), но не позже чем за 12 месяцев от даты подписания договора. По итогам выполнения работ стороны подписывают «Акт сдачи-приемки выполненных работ».

26 сентября 2016 г. стороны заключили Дополнительное соглашение № 1-193/410 к договору от 11.03.2016 г. № 193/410.

Данным Дополнительным соглашением Стороны договорили внести следующие изменения в Договор: 

Пункт 2.3 договора изложен в следующей редакции:

«Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются в объеме согласно Заданию на проектирование (Приложение № 9 к договору) изменений к заданию на проектирование «Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1) Сводной таблице стоимости Договора (Приложение № 2 к настоящему Дополнительному Соглашению) и в сроки согласно Графику выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему договору)».

Пункт 11.4 договора изложен в следующей редакции:

«За нарушение сроков начала и/или окончания выполнения работ, предусмотренных статьей 3 настоящего договора, заказчик имеет право начислить подрядчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования от стоимости просроченного обязательства. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств».

Решением Арбитражного суда Республики Крым по делу № А83-4022/2016 от 26.06.2017г., оставленным  без изменений постановлением 21 арбитражного апелляционного суда от 16.08.2017г,  по иску ГУП РК «Крымэнерго»  к ООО «Инженерная Компания Сибири» о взыскании неустойки по договору № 193/410 установлено, что  в соответствии с пунктами 3.2 и 3.4 договора работы, предусмотренные договором, выполняются поэтапно, сроки выполнения работ устанавливаются Графиком выполнения работ. 

Соответственно, сроки выполнения работ по договору с учетом количества дней, установленных в Приложении № 2 договора для каждого вида работ, следующие:

- землеустроительные работы (165 дней) – с 26.09.2016г. по 10.03.2017г. включительно;

- изыскательские работы (61 день) – с 26.09.2016г. по 28.11.2016г. включительно;

- проектные работы (92 дня) – с 26.09.2016г. по 27.12.2016г. включительно;

- экспертиза проекта (61 день) – с 26.09.2016г. по 28.11.2017г. включительно;

- разработка технической части закупочной документации (61 день) – с 26.09.2016г. по 28.11.2016г. включительно;

- разработка рабочей документации (62 дня) – с 26.09.2016г. по 28.11.2016г. включительно.

Всего 184 дня с 26.09.2016г. по 28.03.2017г.

При рассмотрении дела № А83-4022/2017 по спору между теми же сторонами судом установлен факт, что ООО «ИК Сибири» обязано в рамках договора № 193/410 от 11.03.2016г. выполнить работы и сдать их ГУП РК «Крымэнерго» в срок до 28.03.2017г.

Соответственно, данное обстоятельство не подлежит доказыванию в силу части 2 ст.69 АПК РФ.

Предметом исковых требований ГУП РК «Крымэнерго» является взыскание неустойки за нарушение сроков окончания выполнения работ этапов работ по разработке рабочей документации и выполнению землеустроительных работ.

Разработка рабочей документации.

ООО «ИК Сибири» в рамках договора № 193/410 выполнены работы по разработке рабочей документации на сумму 2 633 024,95 руб.

Графиком выполнения работ (Приложение № 2) сторонами установлен срок их выполнения: в течение 62 дней - до 28.03.2017г.

Акт сдачи-приемки рабочей документации № 3 подписан сторонами 04.05.2017г., то есть с нарушением установленного договором срока на 37 календарных дней (с 29.03.2017г. по 04.05.2017г.).

Согласно пункту 8.1.12 договора № 193/410 подрядчик обязан разработать рабочую документацию в срок, определенный настоящим договором и графиком выполнения работ (приложение № 2 к настоящему договору). В данный срок входит период от даты разработки рабочей документации до даты ее передачи заказчику на согласование. Срок на рассмотрение рабочей документации заказчиком в указанный срок не входит.

Рабочая документация, разрабатываемая подрядчиком, по объему, составу и качеству должна одновременно соответствовать требованиям разработанной проектной документации, Градостроительному кодексу Российской Федерации, применимым техническим регламентам, строительным нормам и правилам, экологическим нормам, требованиям антитеррористической, криминальной, промышленной, противопожарной и санитарной безопасности, нормативным правовым актам по обеспечению сохранности историко-археологического наследия, иным федеральным законам и нормативным (техническим) актам.

В соответствии с пунктом 4 «Задание на проектирование» (Приложение № 9 к договору) проектирование осуществляется в две стадии:

4.1  Проектная документация;

4.2 Рабочая документация.

В силу пункта 21 «Задание на проектирование» (Приложение № 9 к договору) при разработке рабочей документации подрядчик обязан руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Данным Постановлением определен состав проектной документации. Данное положение применяется при подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства; в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства. В соответствии принятыми нормами проектирование осуществляется в одну или в две стадии.

При двухстадийном проектировании документация составляется не сразу, а поэтапно: на первом этапе (стадия "П" - Проект) принимаются без детализации решения принципиального характера, касающиеся выбора типа сооружения, его расположения, основные архитектурно-планировочные и конструктивные решения, способа строительства, выбираются принципиальные схемы технологических процессов, решения по инженерному оборудованию. Выполняются сводные сметные расчеты, решаются вопросы организации строительства. После устранения проектировщиком выявленных недостатков проект рассматривается и утверждается (или отклоняется) заказчиком.

На второй стадии (стадия "РП" - Рабочий Проект) разрабатывается рабочая документация ("РД"). На этой стадии уточняются и детализируются решения, принятые на стадии "П", составляются рабочие чертежи, локальные сметы и прочая документация, необходимая для производства строительно-монтажных работ. Рабочая документация - это те чертежи и текстовой материал, который используется непосредственно на стройке (документация стадии "П", как правило, строителям не передается).

Рабочая документация разрабатывается в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений.

Рабочая документация содержит рабочие чертежи, документы, спецификации и является основанием для реализации принятых в проекте решений и, таким образом, представляет потребительскую ценность при возможности ее использования целиком.

ООО «ИК Сибири» в своих возражениях ссылается на пункт 8.1.12 договора             № 193/410, согласно которому подрядчик обязан разработать рабочую документацию в срок, определенный настоящим договором и графиком выполнения работ (приложение                 № 2 к настоящему договору).  В данный срок входит период от даты разработки рабочей документации до даты ее передачи заказчику на согласование. Срок на рассмотрение рабочей документации заказчиком в указанный срок не входит.

С учетом разъяснений, изложенных в пункте 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49, пункт 8.1.12 договора № 193/410 необходимо толковать во взаимосвязи с иными условиями договора, в частности, с пунктом 8.1.13:

«Разработанная подрядчиком документация в 5 (пяти) экземплярах передается заказчику на согласование. Заказчик обязан в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты представления согласовать рабочую документацию или отказать в ее согласовании и направить в течение 3 (трех) дней от даты отказа в согласовании мотивированный отказ с приложением перечня замечаний и указанием сроков устранения недостатков».

Таким образом, условиями договора установлен определенный  порядок сдачи-приемки выполненных работ по этапу - разработка рабочей документации.

Вся переписка,  на которую ссылается ООО «ИК Сибири» при выполнении работ по разработке рабочей документации, не является доказательством сдачи работ в пределах установленного договором срока.

Согласно статье 753  ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда.

В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в приемке результата работ должны участвовать представители государственных органов и органов местного самоуправления.

Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине подрядчика.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии с условиями договора подрядчик принял на себя обязательства по разработке рабочей документации и передаче ее заказчику в количестве 5 (пять) экземпляров.

Отдельные фрагменты рабочей документации не представляли для ГУП РК «Крымэнерго» никакой потребительской ценности и не могли быть использованы в его деятельности для последующего строительства ПС 110/10 кВ «Перевальное-2», поскольку только единый документ полностью определяет объект строительства и его состав. Передача отдельных элементов о выполнении работ данного этапа не свидетельствует.

Согласно пункту 1.5 договора № 193/410 «Акт сдачи приемки Рабочей документации» - документ о приемке заказчиком разработанной подрядчиком рабочей документации. Акт составляется подрядчиком  по форме Приложения 13 к договору при условии соответствия рабочей документации Проектной документации. В случае, если в результате разработки рабочей документации подрядчиком будет создан результат интеллектуальной деятельности, то подписание данного акта свидетельствует о том, что исключительные права на результат интеллектуальной деятельности, созданный в ходе выполнения соответствующих работ, переданы заказчику.

В соответствии со ст.67 АПК РФ арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.

Согласно ст.68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

ООО «ИК Сибири» не представлено относимых и допустимых доказательств – подписанных сторонами по договору актов сдачи-приемки рабочей документации, подтверждающих окончание выполнения работ в пределах установленного договором срока. 

Единственным относимым и допустимым доказательством передачи ответчиком всей рабочей документации в количестве 65 томов в 5 (пяти) экземплярах истцу является Акт сдачи-приемки рабочей документации  № 3 от 04.05.2017г.

Необходимо отметить, что при выполнении ответчиком работ, до их окончательной сдачи ответчик постоянно устранял недостатки направленных истцу документов, в связи с их возвратом для доработки. 

ООО «ИК Сибири» в рамках договора № 193/410 выполнены землеустроительные работы на сумму 423 862,09 руб.

Согласно пункту 2.3 договора № 193/410 в редакции Дополнительного соглашения                № 1-193/410 срок выполнения землеустроительных работ 165 дней – с 26.09.2016г. по 10.03.2017г. включительно.

Акт сдачи-приемки прочих работ № 4 подписан 15.03.2018г. – нарушен срок окончания работ на 352 календарных дня (с 29.03.2017г. по 15.03.2018г.).

Согласно пункту 2.1 договора № 193/410 от 11.03.2016г. ООО «ИК Сибири» (Подрядчик) обязуется выполнить комплекс работ, в которые входит, в том числе, работы по оформлению прав на земельные участки для проведения проектно-изыскательских работ.

В соответствии с пунктом 1.14 договора «Оформление прав на земельные участки для проведения проектно-изыскательских работ» - совершение действий по оформлению на имя Заказчика (ГУП РК «Крымэнерго») правоустанавливающих документов (при необходимости) на земельные (лесные) участки, необходимые для проведения изыскательских работ, по оформлению материалов для предварительного согласования места размещения Объекта в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ, подготовка токсационного описания  лесных участков, сбор сведений об объектах культурного наследия, памятниках культуры, ООПТ и др. Выполнение данных действий осуществляется в соответствии с требованиями земельного, лесного, природоохранного законодательства РФ.

Согласно пункту 1.15 договора «Оформление прав на земельные участки для строительства Объекта»  – необходимый для строительства Объекта комплекс мероприятий по оформлению на имя Заказчика прав на земельные участки (в том числе, но не ограничиваясь, выполнение кадастровых работ, оценка объектов недвижимого имущества и др.) для размещения объекта (его частей, таких как опоры ВЛ и иные площадные сооружения), по оформлению правоустанавливающих документов на эти земельные участки, по установлению границ охранных зон.

В силу пункта 6.8 договора Подрядчик обязуется оформить права на земельные участки для строительства и размещения Объекта, а также получить в уполномоченных органах государственной власти необходимые разрешения и согласования, необходимые для выполнения работ по договору.

Согласно пункту 18.1 договора Приложение № 9 «Задание на проектирование» является необъемлемой частью договора.

В соответствии с пунктом 26.6 Приложения № 9 Проектная организация получает все необходимые согласования и заключения с природоохранными организациями, ГО и ЧС, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, ФАУ «Главгосэкспертиза России» (при необходимости) и другими государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления.

Пунктом 26.15 Приложения № 9 предусмотрено, что при необходимости, по запросу проектной организации, выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).

Для оформления земельно-правовых отношений со всеми заинтересованными лицами и организациями, а также для получения исходно-разрешительной документации ООО «ИК Сибири» письмом № 04-090 от 18.04.2016г. обратилось в ГУП РК «Крымэнерго» для получения доверенности на ФИО4.

ГУП РК  «Крымэнерго» 22.04.2016г. (исх № 410/5244) направило в адрес ООО «ИК Сибири» оформленную доверенность № 92-Д от 18.04.2016г. с правом представлять интересы Предприятия во всех муниципальных и государственных учреждениях, организациях, совершать от имени Предприятия определенные действия. 

В нарушение указанных условий договора согласование с муниципальными учреждениями, органами государственной власти ГУП РК «Крымэнерго» проводило самостоятельно.

В силу пункта 6.13 договора № 193/410 подрядчик обязуется незамедлительно известить заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможности неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- иных независящих от подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом подрядчик при наступлении вышеуказанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.

В  соответствии  со  статьей  716  ГК  РФ  подрядчик  обязан  немедленно предупредить  заказчика  и  до  получения  от него  указаний  приостановить  работу  при обнаружении:

- непригодности   или   недоброкачественности   предоставленных   заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

- возможных  неблагоприятных  для  заказчика  последствий  выполнения  его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности  результатов  выполняемой  работы  либо  создают  невозможность  ее завершения в срок.

Подрядчик,  не  предупредивший  заказчика  об  обстоятельствах,  указанных  в пункте  1  настоящей  статьи,  либо  продолживший  работу,  не  дожидаясь  истечения указанного  в  договоре  срока, а  при  его  отсутствии  разумного  срока  для  ответа  на предупреждение  или  несмотря  на  своевременное  указание  заказчика  о  прекращении работы,  не  вправе  при  предъявлении  к  нему  или  им  к  заказчику  соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Ссылка ответчика на приостановление подрядчиком выполнения землеустроительных работ на основании письма № 12-320 от 08.12.2017г. подлежит отклонению ввиду следующего.

Государственный комитет  по государственной регистрации и кадастру Республики Крым письмом от 11.12.2017 № 60879/20 уведомил ГУП РК «Крымэнерго» о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зоне с особыми условиями использования – Зоны публичного сервитута для размещения объекта «Электроснабжение военных городков №№ 26 и 27 в Симферопольском районе, с.Перевальное, со строительством ПС 110/10 кВ Перевальное», и присвоении учетного номера 90.12.2.84.

Письмом от 14.12.2017г. № 410/22235 ГУП РК «Крымэнерго» уведомило ООО                 «ИК Сибири» о необходимости принять меры по скорейшему выполнению взятых на себя обязательств по реализации договора № 193/410. При этом в данном письме отдельно указано, что в обязанности ООО «ИК Сибири» входит выполнение всего комплекса землеустроительных работ по договору № 193/410.

Какие-либо указания ГУП РК «Крымэнерго» в данном письме о возобновлении ООО «ИК Сибири» работ по договору не дает, что подтверждает непризнание факта их предшествующего приостановления.

Также необходимо отметить, что подрядчик не согласовал с заказчиком соответствующих изменений сроков выполнения работ по этапу – землеустроительные работы.

Кроме того, ответчиком после направления письма о приостановлении работ продолжалось выполнение работ, что свидетельствует об отсутствии приостановления их выполнения:

 - 29.12.2017г. ГУП РК «Крымэнерго» письмом № 410/23835 запросило от ООО                «ИК Сибири» документы для подготовки соглашения об установлении земельного сервитута. ООО «ИК Сибири» направило в адрес ГУП РК «Крымэнерго» запрошенные документы (сопроводительное письмо № 01-020 от 23.01.2018г.);

 - 05.02.2018г. ООО «ИК Сибири» письмом № 02-037 сообщает ГУП РК «Крымэнерго» о выполнении работ по договору № 193/410 по этапу – землеустроительные работы, и просит подписать акты выполненных работ. В письме - ответе от 08.02.2018г. (исх № 410/2478) ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о выявленных недостатках, а также указывает пути их устранения.

После устранения замечаний между ГУП РК «Крымэнерго» и ООО «ИК Сибири»                 15 марта 2018 года подписан Акт приема-передачи землеустроительных работ № 4.

Таким образом, факт нарушения подрядчиком срока окончания выполнения работ по этапу – землеустроительные работы, подтвержден относимыми и допустимыми доказательствами, ввиду чего доводы ответчика подлежат судом отклонению.

В соответствии с пунктом 11.4 договора за нарушение сроков начала и/или окончания выполнения работ, предусмотренных статьей 3 настоящего договора, заказчик имеет право начислить подрядчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования от стоимости просроченного обязательства. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.

В связи с тем, что ответчик не исполнил обязательства по оплате выполненных работ в установленный срок, истцом правомерно применена имущественная ответственность в виде взыскания пени.

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору ГУП РК «Крымэнерго» заявлено требование о взыскании с ООО «ИК Сибири» неустойки в размере 47 400,50 руб за нарушение сроков выполнения этапов  работ в рамках  договора № 193/410, а именно:

-Разработка рабочей документации в сумме 31 530,48 руб;

- Землеустроительные работы в сумме 36 056,54 руб.

Общая сумма начисленных ответчику пеней составляет 67 587,02 руб.

При определении размера исковых требований ГУП РК «Крымэнерго» учтена уплаченная ООО «ИК Сибири» сумма 20 186,52 руб по платежному поручению № 154 от 23.05.2017г.:

67 587,02 – 20 186,52 = 47 400,50 руб.

Однако, в представленном расчете неустойки суд находит ошибки.

Определенность в отношениях сторон по вопросу о размере неустойки, подлежащей уплате в связи с допущенной ответчиком просрочкой по договору, наступила в момент окончания исполнения таких обязательств (момент завершения работ), в связи с чем при расчете неустойки необходимо руководствоваться ставкой Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на день прекращения обязательства.

Данная правовая позиция соответствует правовой позиции, изложенной в определении Верховного суда Российской Федерации от  04.12.2018 по делу № 302-ЭС18-10991.

С учетом изложенного, суд приводит свой расчет:

2 633 024,95 × 37 × 1 / 300 × 9,25% =  30 038,42 руб.

Всего:  45908,44

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению частично.

Судебные расходы подлежат распределению в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании вышеизложенного, а также  руководствуясь статьями  110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым,

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с  ООО «Инженерная компания Сибири» (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) в пользу ГУП РК «Крымэнерго» (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) пеню в сумме 45 908,44 руб., расходы на оплату госпошлины в                  1937,00 руб.

В удовлетворении требований в части взыскания пени в сумме 1 492,06 руб. отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья                                                     В.И. Гайворонский