Арбитражный суд

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А75-10670/2018

21 сентября 2018 г.

г. Ханты-Мансийск

Резолютивная часть решения объявлена 14 сентября 2018 г.

Полный текст решения изготовлен 21 сентября 2018 г.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Щепелина Ю.П., при ведении протокола заседания помощником судьи Кудриным В.В., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 628616, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, панель 9, улица 11П, дом 17А, строение 4) к обществу с ограниченной ответственностью "МОНТАЖЭНЕРГОСТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 620130, 

<

...>, квартира 96) о признании договора расторгнутым и взыскании 1 531 760 рублей 96 копеек,

при участии представителей сторон:

от истца - не явились,

от ответчика - директор ФИО1 на основании решения учредителя общества от 25.06.2018 (до перерыва), ФИО2 по доверенности от 21.08.2018 № 01-Ю/2018 (до перерыва),

установил:

общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с иском к обществу с ограниченной ответственностью "МОНТАЖЭНЕРГОСТРОЙ" (далее – ответчик) о признании договора субподряда на выполнение строительно-монтажных работ от 30.01.2018 № 9729-102/СУБ (далее - договор) расторгнутым и взыскании 1 514 599 рублей 32 копеек, в том числе 1 500 000 рублей – основной задолженности, 14 599 рублей 32 копеек - процентов за пользование чужими денежными средствами, исчисленных за период с 17.05.2018 по 04.07.2018. Дополнительно истец заявил требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемых по день фактической оплат основной задолженности. В качестве основания для удовлетворения заявленных требований истец ссылается на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору.

Представитель истца для участия в судебное заседание не явился, извещен.

Возражения истца относительно рассмотрения дела в отсутствие представителей в материалы дела не поступили.

Согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд рассмотрел дело по существу по имеющимся в деле доказательствам в отсутствие надлежаще извещенного истца.

Изучив материалы дела и доводы истца, суд установил нижеследующее.

30 января 2018 года между истцом (генподрядчик) и ответчиком (субподрядчик) заключен договор.

В соответствии с пунктом 1.1. договора Субподрядчик обязуется по заданию Генподрядчика оказать следующие услуги (далее по тексту - Услуги):

Работы по установке и монтажу двух силовых трансформаторов 63МВЛ на фундамент на объекте «ПС 110/35/6 кВ «Тайлаковская» в составе стройки «Внешнее электроснабжение Тайлаковского месторождения нефти», а Подрядчик обязуется принять результат услуги и оплатить в соответствии с настоящим Договором. Работы включают в себя:

- такелаж трансформаторов 1Т и 2Т 63 МВА (разгрузка и установка на фундамент);

- монтаж силовых трансформаторов 1Т и 2Т 63 МВА.

На основании пункта 1.3 договора Субподрядчик в счет Договорной цены поставляет на строительную площадку все Материалы, необходимые для выполнения Работ по Договору (за исключением Оборудования и материалов, входящих в поставку Заказчика). Материалы, поставляемые Субподрядчиком, должны быть сертифицированы и соответствовать Проектной и/или Рабочей документации.

Субподрядчик обязуется по доверенности принять от Генподрядчика материалы и оборудование, входящие в поставку Заказчика, необходимые для выполнения работ но настоящему Договору, и подписать накладную на отпуск материалов на сторону.

Срок оказания Услуг - 01.02.2018 г. - 31.03.2018 г. (пункт 1.6 договора).

Договорная цена и порядок расчетов определены в разделе 2 договора:

- пункт 2.1. Договорная цена Работ по настоящему Договору составляет:

- 2 542 372 рубля 88 копеек без НДС;

- 457 627 рублей 12 копеек НДС (18%);

- 3 000 000 рублей всего с НДС.

- пункт 2.2. Договорная цена может быть увеличена или уменьшена в случае:

- корректировки Рабочей документации по согласованию с Заказчиком;

- изменения объемов работ по решению Заказчика;

о чем Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору.

- пункт 2.3. Стоимость Услуг включает в себя всю сумму расходов Субподрядчика, связанных с оказанием Услуг.

- пункт 2.4. В течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента заключения настоящего Договора Подрядчик перечисляет Субподрядчику аванс в размере - 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 152 542,37 рубля.

- пункт 2.5. Генподрядчик    обязуется осуществить оплату оставшихся денежных средств в течение 30 календарных дней с даты получения от Субподрядчика оригиналов следующих документов:

- Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2).

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3).

- Счета-фактуры.

- пункт 2.6. Оплата выполненных Работ производится Генподрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика.

Приемка выполненных работ, учетная документация установлена в разделе 3 договора:

- пункт 3.1. В   течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания срока оказания Услуг Субподрядчик обязан представить Подрядчику следующие документы:

- Акт приема-сдачи выполненных работ (далее по тексту - Акт, по форме Приложения №3) - в 2-х экземплярах;

- Счет, счет-фактуру, оформленные в соответствии со ст. 168 и ст. 169 НК РФ - по одному экземпляру,

- Документацию в соответствии с техническим заданием.

- пункт 3.2. Работа считается принятой после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Форма №КС-2). справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), при наличии подписанных с обеих сторон документов перечисленных в пунктах 3.1 настоящего Договора.

- пункт 3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору Генподрядчик имеет право отказаться от подписания Акта о приемке выполненных работ (Форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), а также не оплачивать соответствующий объём Работ до устранения Субподрядчиком выявленных недостатков в Работах или в оформлении документов указанных, в пункте 3.1.

В этом случае, а также при наличии у Генподрядчика претензий к документам, указанным в пункте 3.1, Генподрядчик направляет Субподрядчику мотивированный отказ в течение срока, предусмотренного для рассмотрения указанных документов. При направлении Генподрядчиком мотивированного отказа от подписания Акта о приемке выполненных работ (Форма №КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) Субподрядчик обязан в сроки, определенные Генподрядчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить откорректированные документы, указанные в пункте 3.1 Генподрядчику. После устранения Субподрядчиком замечаний процедура проведения приемки повторяется в соответствии с положениями настоящей статьи.

Согласно разделу 4 договора Субподрядчик обязан:

- пункт 4.1. Выполнить Работы качественно в объеме и сроки, установленные в настоящем договоре и приложениях к нему, в соответствии с действующими нормами и утвержденной проектно-сметной документацией, и сдать результат работ Генподрядчику в установленный срок.

- пункт 4.17. Производить строительно-монтажные работы квалифицированно,в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией, СНиП и другими нормативными регламентами в строительстве согласно Законодательству Российской Федерации, в сроки, установленные графиком работ, а также обеспечить гарантийный срок выполненных работ 2 (два) года от даты Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14). Если в соответствии с настоящим Договором результат Работ, предоставленный Субподрядчиком, принят Генподрядчиком по частям, течение Гарантийного срока начинается со дня приемки Работ в целом.

- пункт 4.20. В случае, когда исполнение работы по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Генподрядчика, Субподрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работ.

Согласно разделу 5 договора Генподрядчик обязан:

- пункт 5.2. Передает Субподрядчику 2 (два) экземпляра Проектной/Рабочей документации Рабочей документации, утвержденной Заказчиком «В производство работ». Один из 2 (двух) переданных Субподрядчику экземпляров Проектной/Рабочей документации должен постоянно храниться у Субподрядчика на Объекте. Этот экземпляр в любое время предоставляется в распоряжение Представителей Генподрядчика, Представителей авторского, технического надзора и строительного контроля.

- пункт 5.3. Обеспечить готовность объекта для начала производства Работ.

- пункт 5.4. Осуществлять технический надзор и контроль за выполнением работ Субподрядчиком, вести соответствующий учет.

- пункт 5.6. Генподрядчик    осуществляет временное электроснабжение на период оказания Услуг на строительной площадке в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями (не менее 200 кВт).

- пункт 5.7. Генподрядчик    обеспечивает доступ персонала Субподрядчика на Объект при условии соблюдения последним контрольно-пропускного режима, установленного на Объекте.

На основании пункта 6.5 договора каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

В пункте 5, 6 технического задания (приложение № 1 к договору) установлено следующее:

Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг:

- Отсутствие предписаний государственных контролирующих органов.

- Субподрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним paбот соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

- Субподрядчик несет ответственность перед заказчиком за качество работ в соответствии с гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами.

- Если субподрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков,

Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям, в соответствии с нормативной и рабочей документацией.

На основании пункта 2.4. договора Истец по платежному поручению №41 от 12.02.2018 оплатил Ответчику 1 500 000 рублей в качестве предоплаты. 

Письмом от 29.03.2018 № 51 ответчик направил акты и в одностороннем порядке отказался от исполнения, получены истцом 11.04.2018.

Претензией исх. от 13.04.2018  №18 истец потребовал вернуть аванс (письмо возвращено по истечении срока хранения).

Письмом от 20.04.2018 № 20 истец отказался от подписания актов (письмо возвращено по истечении срока хранения) с приложением предписания строительного контроля, не отрицал выполнение первого этапа, сообщил о принятии работ на сумму 300 000 рублей.

Согласно пункту 9.1 договора, договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств. Условия настоящего договора распространяются на фактические отношения сторон, возникшие до его подписания.

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.

Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.

Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

На основании пунктов 1, 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда установлено в статье 719 Гражданского кодекса Российской Федерации:

1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

2. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно пункту 2, 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

Договор расторгнут с 11.04.2018.

Ответчик представил отзыв на иск, в соответствии с которым считает исковые требования необоснованными и не подлежащему удовлетворению.

Доводы ответчика не подлежат удовлетворению, так как документально не подтверждены, ходатайство о назначении судебной экспертизы не заявлено

Определением суда от 18.06.2018 сторонам предложено рассмотреть вопрос о назначении судебной экспертизы, ходатайств о назначении судебной экспертизы не заявлено.Согласно пункту 5 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации  при возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

При данных обстоятельствах односторонний отказ ответчика от исполнения обязательства по договору является недопустимым в силу требований статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного, суд находит требование о взыскании основной задолженности в размере 1 200 000 рублей подлежащим удовлетворению.

Дополнительно истец заявил требование процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 14 599 рублей 32 копеек, исчисленных за период с 17.05.2018 по 04.07.2018, а также по день фактического исполнения обязательства.   

Как установлено пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Надлежащий расчет процентов за пользование чужими денежными средствами составил 11 679 рублей 45 копеек, исчисленная за период с 17.05.2018 по 04.07.2018, а также 17 161 рубль 64 копейки, исчисленные с 05.07.2018 по 14.09.2018.

Таким образом, с ответчика подлежит взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 28 841 рубль 09 копеек, а также начиная с 15 сентября 2018 года по день фактического исполнения указанного обязательства.

Исходя из размера рассмотренных исковых требований, подлежащая уплате государственная пошлина в соответствии с пунктом 6 статьи 52, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации составила 34 318 рублей.

Истец по платежным поручениям от 02.07.2018 № 676, от 24.07.2018 № 726 уплатил государственную пошлину в размере 30 087 рублей.

Недоплата государственной пошлины составила 172 рублей.

В соответствии со статьями 101, 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд отнес судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 28 373 рубля 85 копеек на ответчика, 5 600 рублей 15 копеек на истца, а также возложения обязанности по уплате государственной пошлины в размере 172 рублей на ответчика.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ" удовлетворить частично.

Признать договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ от 30.01.2018 № 9729-102-суб, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ" и обществом с ограниченной ответственностью "МОНТАЖЭНЕРГОСТРОЙ", расторгнутым с 11 апреля 2018 года.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "МОНТАЖЭНЕРГОСТРОЙ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ" 1 228 841 рубль 09 копеек, в том числе 1 200 000 рублей - основную задолженность, 28 841 рубль 09 копеек - проценты за пользование чужими денежными средствами.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "МОНТАЖЭНЕРГОСТРОЙ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ" проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на основную задолженность в размере 1 200 000 рублей исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, начиная с 15 сентября 2018 года по день фактического исполнения указанного обязательства. Со дня частичного уменьшения основной задолженности указанные проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат начислению на оставшуюся основную задолженность.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "МОНТАЖЭНЕРГОСТРОЙ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ" 28 545 рублей 85 копеек - судебные расходы по уплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "МОНТАЖЭНЕРГОСТРОЙ" в десятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу уплатить в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 172 рублей.

В случае неисполнения решения суда в указанной части выдать исполнительный лист.

Настоящее решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в суд кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                                  Ю.П. Щепелин