АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А03-18682/2023

г. Барнаул

24 июля 2024 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Пашковой Е.Н., при ведении  протокола судебного заседания помощником ФИО1, рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по иску Администрации Волчихинского района Алтайского  края, с. Волчиха (ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «Электромонтаж», г. Тарко – Сале (ОГРН 

<

***>) об обязании устранить  недостатки работы,  

 с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, акционерное общество  Проектный институт «Алтайкоммунпроект» (ОГРН 

<

***>),  

 при участии представителей сторон: от истца: не явился, извещен, 

от ответчика: ФИО2 (выписка из ЕГРЮЛ), ФИО3 (доверенность,  паспорт, диплом),  

 от третьего лица: не явился, извещен, 

 На основании статей 309, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации,  руководствуясь статьями 27, пунктом 3.1 статьи 70, статьями 110, пунктом 4 статьи 137,  пунктом 2 части 1 статьи 148, пунктом 3 статьи 156, статьями 167-171, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Алтайского края  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Электромонтаж», г. Тарко –  Сале (ОГРН 

<

***>) в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в  законную силу безвозмездно устранить недостатки в выполненных работах по устройству  гидроизоляционного слоя стенок и днища резервуара чистой воды путем выполнения  следующих работ:  

-демонтаж гидроизоляционного и выравнивающего слоев стенок и колонн из  листов полиолефина и пенополистерола, площадью 202 м2, дна и низа покрытия  резервуара чистой воды, общей площадью 243 м2;  

-устройство гидроизоляции методом торкретирования (набрызг бетонной смеси  под высоким давлением) стенок и днища резервуара чистой воды, толщиной 30 мм с  армированием, общей площадью 445 м2;  

-железнение поверхностей, общей площадью 445 м2. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Электромонтаж», г. Тарко  – Сале (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия  решения, либо в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу, если такое решение было предметом  рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья Е.Н. Пашкова