АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА

Пушкина ул., д. 45, г. Хабаровск, 680000, официальный сайт: www.fasdvo.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ Ф03-5912/2023

21 декабря 2023 года

г. Хабаровск

Резолютивная часть постановления объявлена 20 декабря 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 декабря 2023 года.

Арбитражный суд Дальневосточного округа в составе:

председательствующего судьи Камалиевой Г.А.

судей Мельниковой Н.Ю., Яшкиной Е.К.

при участии:

от ПАО «ФСК ЕЭС»: ФИО1, представитель по доверенности                   от 20.01.2023 № 4-23/2

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»

на решение от 10.07.2023, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 21.09.2023

по делу №  А73-4294/2023 Арбитражного суда Хабаровского края

по иску публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» 

к обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоРемСервис»                 

о взыскании 941 992 руб.

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 121353, г. Москва, м.о. Можайский, ул. Беловежская, д. 4; далее – ПАО «ФСК ЕЭС») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоРемСервис»                        (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 115093, г. Москва, вн. тер. г. м.о. Даниловский, ул. Павловская, д. 6; далее – ООО «ЭнергоРемСервис») о взыскании пени в размере 941 992 руб. за период с 01.03.2022 по 28.02.2023 по договору от 29.07.2021 № 831453, взыскании пени с 01.03.2023 до момента фактического исполнения обязательства.

Решением от 10.07.2023, оставленным без изменения постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 21.09.2023, исковые требования удовлетворены частично. С ООО «ЭнергоРемСервис» в пользу ПАО «ФСК ЕЭС» взысканы пени в размере 794 886 руб. 40 коп., пени, начиная с 05.07.2023, исходя из основного долга 1 290 400 руб., в размере 0,2% за каждый день просрочки по день фактической оплаты основного долга.

Законность вынесенных по делу решения и постановления проверяется в порядке статьи 274 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по кассационной жалобе ПАО «ФСК ЕЭС», в обоснование которой заявитель указывает на отсутствие правовых оснований для применения постановления Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» (далее – Постановление № 497). Отмечает, что ответчик не представил доказательств, что пострадал от обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, в отношении ответчика не подано заявление о несостоятельности (банкротстве). Обращает внимание, что задолженность ответчика, с учетом периода просрочки исполнения обязательств, возникла задолго до введения моратория, последний обладал возможностью исполнить условия договора в срок. В этой связи податель кассационной жалобы просит обжалуемые по делу решение и постановление отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.  

Отзыв на кассационную жалобу не поступил.

В судебном заседании кассационной инстанции представитель                    ПАО «ФСК ЕЭС» привел свои правовые позиции, дав соответствующие доводам кассационной жалобы пояснения. 

ООО «ЭнергоРемСервис», извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе путем размещения соответствующей информации на сайте арбитражного суда в сети Интернет, своих представителей для участия в судебном заседании суда кассационной инстанции не направило.

Проверив законность обжалуемых судебных актов, изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, Арбитражный суд Дальневосточного округа не усматривает оснований для их отмены.

Как установлено судами и следует из материалов дела, 29.07.2021 между ПАО «ФСК ЕЭС» (заказчик) и ООО «ЭнергоРемСервис» (подрядчик) заключен договор № 831453 на выполнение проектно-изыскательских работ по инвестиционному проекту «Реконструкция ПС 220 кВ Белогорск (Оснащение инженерно-техническими средствами охраны)», по условиям которого подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по выполнению проектных работ по объекту, в том числе: выполнение предпроектного обследования, выполнение инженерных изысканий, разработка проектной документации (в том числе локальных смет и сводного сметного расчета), проведение экспертизы сметной документации, разработка закупочной документации, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном договором. 

Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в календарном графике выполнения работ и стоимости (Приложение 1) и задании на проектирование (Приложение 4). 

Пунктом 3.1 договора установлен срок выполнения работ: начало выполнения с момента заключения договора, окончание – 28.02.2022. 

На основании пунктов 3.3.-3.4 договора работа по разработке закупочной документации завершается созданием закупочной документации в полном объеме в соответствии с условиями настоящего договора, утвержденной заказчиком, а также принятой по актам сдачи-приемки результатов выполненных работ. Подрядчик передает заказчику результаты выполненных работ на электронном и бумажном носителях, а также исключительное право на результаты выполненных работ в полном объеме. 

В соответствии с пунктом 4.1 стоимость работ по договору составляет 1 075 333 руб. 33 коп., кроме того, НДС в размере 215 066 руб. 67 коп. Общая стоимость договора с НДС составляет не более 1 290 400 руб. 

Пунктом 11.2.1 договора предусмотрено, что за нарушение сроков окончания работ по договору, в том числе по причине некачественного выполнения работ, размер пени составляет 0,2% от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. 

ООО «ЭнергоРемСервис» письмом от 20.07.2021 № ЭРС 488/21 попросил предоставить заказчика исходные данные на проектирование. 

Заказчик письмом от 02.08.2021 № МЗ/2/3916 сообщил, что исходные данные для проектирования загружены в службу обмена файлами                        ПАО «ФСК ЕЭС», https://data.fsk-ees.ru, представлены параметры подключения (логин, пароль). 

В установленный договором срок ответчиком работы не выполнены.

Претензией от 07.02.2023 № ЦЗ/1/252 заказчик потребовал подрядчика уплатить пени за нарушение срока выполнения работ.

В связи с отказом ответчика в добровольном порядке удовлетворить претензию истца, последний обратился в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Согласно положениям статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (пункт 1 статьи 708 ГК РФ).

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (статья 329 ГК РФ).

В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (части 1 и 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Факт нарушения подрядчиком срока выполнения работ установлен судами, подтвержден материалами настоящего дела, по существу ответчиком не опровергнут.

Исследовав и оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, в том числе условия договора, суды первой и апелляционной инстанций, установив факт нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, пришли к выводу, что у истца имелись основания для применения мер ответственности за просрочку исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.

При этом, проверяя расчет неустойки за нарушение срока выполнения работ, начисленной за период с 01.03.2022 по 04.07.2023, суды первой и апелляционной инстанций, учитывая введенный Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» мораторий на начисление санкций в период с 01.04.2022 до 01.10.2022, признали подлежащей взысканию неустойку в размере                         794 886 руб. 40 коп., а также неустойку в размере 0,2% за каждый день просрочки с 05.07.2023 по день фактической оплаты основного долга.

Оснований не согласиться с выводами судов первой и апелляционной инстанций у суда округа не имеется.

Судом кассационной инстанции отклоняются доводы истца                               об отсутствии правовых оснований для применения Постановление № 497, поскольку ответчик не представил доказательств, что пострадал                               от обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, ввиду следующего.

Постановлением № 497 с 01.04.2022 на территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, суды правомерно исходили из того, что в период действия указанного моратория неустойка не подлежит начислению.

Согласно подпунктам «а», «б» пункта 2 Постановления № 497 его положения не применяются в отношении должников, являющихся застройщиками многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в единый реестр проблемных объектов на дату вступления в силу настоящего постановления; включенных по мотивированному предложению руководителя федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию единой государственной политики в отрасли экономики, в которой осуществляет деятельность соответствующее лицо, или высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрировано или на территории которого осуществляет деятельность соответствующее лицо, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень лиц, на которых не распространяется действие моратория, деятельность которых регулируется Федеральным законом «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации» и (или) Федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», а также положениями, предусмотренными Федеральным законом                                          «О некоммерческих организациях» и (или) Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации», касающимися лиц, выполняющих функции иностранных агентов, либо которые являются аффилированными лицами указанных лиц.

Поскольку ответчик не относится к лицам, к которым введенный Постановлением № 497 мораторий не применяется, суды правильно применили названное постановление, разрешая настоящий спор. Такой подход соотносится с принципом юридического равенства регулирования сходных отношений (статья 19 Конституции Российской Федерации), в том числе обуславливающим соблюдение баланса интересов сторон.

Однородные по своей юридической природе отношения должны регулироваться одинаковым образом; конституционному принципу равенства противоречит любая дискриминация, то есть такие устанавливаемые законом различия в правах и свободах, которые в сходных обстоятельствах ставят одну категорию лиц в менее благоприятные (или, наоборот, более благоприятные) условия по сравнению с другими категориями (Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24.05.2001 № 8-П, от 03.06.2004 № 11-П, от 15.06.2006 № 6-П, от 16.06.2006 № 7-П, от 05.04.2007 № 5-П, от 25.03.2008 № 6-П, от 26.02.2010 № 4-П и от 14.07.2011 № 16-П, Определение от 07.06.2001 № 141-О).

Принятие Постановления № 497 с учетом положений статьи 9.1 Закона о банкротстве обусловлено необходимостью поддержки российской экономики и предполагает помощь всем субъектам экономического оборота и не требует специального заявления ответчика об освобождении его от уплаты неустойки.

При рассмотрении спора имеющиеся в материалах дела доказательства исследованы судами первой и апелляционной инстанций в совокупности по правилам, предусмотренным статьями 67, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, им дана правовая оценка согласно статье 71 названного Кодекса. В соответствии с частями 1, 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющие правовое значение для дела обстоятельства определены судами с учетом существа спора, на основании доводов и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами права.

Фактические обстоятельства дела установлены в полном объеме, выводы судов соответствуют доказательствам, имеющимся в материалах дела, и нормам действующего законодательства.

Новых доводов, имеющих существенное значение для рассмотрения данного спора и опровергающих правильность вывода суда апелляционной инстанции, в кассационной жалобе не приведено.

Нормы материального права применены судами по отношению к установленным ими обстоятельствам правильно, выводы судов соответствуют имеющимся в деле доказательствам, исследованным в соответствии с требованиями, определенными процессуальным законом.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебных актов, судом округа не выявлено.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Дальневосточного округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 10.07.2023, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 21.09.2023 по делу №  А73-4294/2023 Арбитражного суда Хабаровского края оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья                                               Г.А. Камалиева     

Судьи                                                                                        Н.Ю. Мельникова     

                                                                                                   Е.К. Яшкина