Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-78194/2019

22 декабря 2019 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  06 декабря 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  20 декабря 2019 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коросташова А.А.

 

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1,

 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖ" (адрес:  Россия 198095, 

<

...> ОФИС 121Н, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛЬШОЙ ПРОСПЕКТ" (адрес:  Россия 191024, 

<

...> ЛИТ. А, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании,

 

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 09.01.2019,

                   ФИО3 по решению № 1 от 01.12.2018,

- от ответчика: ФИО4 по доверенности от 02.04.2019,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОНТАЖ" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "БОЛЬШОЙ ПРОСПЕКТ" о взыскании 55 436 руб. 15 коп. долга, 43 129 руб. 32 коп. неустойки  с последующим начислением неустойки с 01.05.2019 по день оплаты долга и исходя из ставки 0,1% от суммы за каждый день просрочки, но не более 67 742 руб. 98 коп. в рамках контракта от 22.01.2016 № 1/01, 399 700 руб. 48 коп. долга, 119 594 руб. 00 коп. неустойки в рамках контракта от 07.04.2017 № 07/04.

Представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований.

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

22.01.2016 между сторонами заключен контракт № 1/01, в соответствии с которым Заказчик (ответчик) поручает, а Подрядчик (истец) принимает на себя обязательства по устройству полов паркинга и подсобных помещений здания гостиницы, расположенной по адресу: 

<

...>. лит. А, Г, а также проведение работ по нанесению проникающей гидроизоляции в местах протечек на стенах и полах данных помещений (далее - Объект), а Заказчик обязуется произвести полную оплату в порядке, предусмотренном в Контракте.

Согласно пункту 2.1 Контракта стоимость всех работ по Контракту составляет                   1 108 723 руб. 00 коп. Сроки выполнения работ по Контракту установлены сторонами в разделе 3 Контракта: начало работ - 25.01.2016, окончание работ - 10.02.2016. Порядок и условия платежей определены в Приложении № 1 к Контракт).

Обязательства Истца по названному контракту исполнены надлежащим образом в срок, что подтверждается актами выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, подписанными Сторонами 10.02.2016.

В соответствии с пунктом 2 Приложения № 1 к Контракту оплата выполненных работ производится Заказчиком после подписания форм КС-2. КС-3, передачи подрядчиком полного комплекта исполнительной документации на выполненные работы, счёта-фактуры и выставления счёта Подрядчиком. При этом при оплате стоимости принятых работ пропорционально удерживается гарантийная сумма.

В силу пункта 3 Приложения № 1 к Контракту гарантийная сумма в размере 5% от стоимости Контракта выплачивается Подрядчику по окончании гарантийного периода в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента передачи Подрядчиком Заказчику полного комплекта исполнительной документации и подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки результата работ.

ООО «Большой проспект» приняв работы, выполненные в рамках контракта               № 1/01 произвело оплату в размере 1 053 286 руб. 85 коп.

Неоплаченной осталась сумма 55436 руб. 15 коп., которую Ответчик удержал в качестве гарантийного обязательства.

Согласно условиям Контракта Ответчик обязался перечислить указанную сумму не позднее 13.03.2017 (п. 2 ст. 12 и п. 3 Приложения № 1 Контракта).

07.04.2017 года между сторонами заключен контракт № 07/04, в соответствии с которым Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по устройству цементно-песчаной стяжки и полимерных полов в здании гостиницы, расположенной по адресу: 

<

...>, лит. А, Г (далее - Объект), а Заказчик обязуется произвести полную оплату в порядке, предусмотренном в Контракте.

Согласно пункту 2.1 Контракта № 07/04 стоимость всех работ по Контракту составляет 1 195 940 руб. 00 коп.: стоимость первого лапа работ составляет 461 590 руб. 88 коп., стоимость второго этапа - 734 349 руб. 12 коп. Сроки выполнения работ по Контракту установлены сторонами в разделе 3 Контракта: начало работ по первому этану -10.04.2017, окончание работ-25.04.2017; начало работ по второму этапу - 25.04.2017, окончание работ - 15.05.2017. Порядок и условия платежей определены в Приложении № 1 к Контракту.

В соответствии с пунктом 1 Приложения № 1 к Контракту № 07/04 авансовый платеж первого этапа работ в размере 60%, что составляет 276 954 руб. 52 коп., перечисляется частями в течении двух дней после подписания Контракта, а именно 30%, и 30% перед приемкой раствора. Оставшиеся 40% (в сумме 184 636 руб. 36 коп.) оплачиваются после сдачи первого этапа Заказчику.

Авансовый платеж второго этапа работ составляет 30% (220 304 руб. 74 коп.) и выплачивается Подрядчику перед приемкой раствора (п. 2 Приложения № 1 к Контракту № 07/04).

Подрядчик исполнил свои обязательства в установленный договором срок, передал сотрудникам Заказчика проектную документацию и акты по форме                                КС-2 и КС-3 от 17.01.2018. Ответчик фактически работы и документацию принял, но от подписания актов уклонился. В связи с чем, почтовым отправлением Истцом были повторно направлены акты КС-2 и КС-3 и акт сверки взаиморасчетов, подписанные Подрядчиком. Указанные документы получены Ответчиком, но не возращены, мотивированный отказ от подписания Актов не представил.

Факт исполнения обязательств Истцом по выполнению работ подтверждается подписанными Сторонами актами освидетельствования скрытых работ № 1 от 20.04.2017., № 1.1 от 24.04.2017, №2 от 16.06.2017, № 2.1 от 22.06.2017, № 3 от 17.07.2017, № 3.1 от 02.08.2017, № 4 от 28.12.2017, № 4.1 от 28.12.2017, № 4.2 от 17.01.2018.

Ответчиком произведена частичная оплата в размере 796 239 руб. 52 коп., что подтверждается платежными поручениями № 133 от 10.04.2017 (на сумму 138 477 руб. 26 коп.),№ 157 от 24.04.2017 (на сумму 138 477 руб. 26 коп.), № 244 от 19.06.2017 (на сумму 169 035 руб.), № 271 от 05.07.2017 (на сумму 350 250 руб.).

В виду сказанного, считаем, что Ответчик был своевременно извещен о завершении работ (о чем свидетельствует подпись ответственного липа в акте освидетельствования скрытых работ № 4.2 от 17.01.2018), фактически принял результат работ, при этом оплату выполненных работ в полном объеме не произвел, задолженность ООО «Большой проспект» по Контракту № 07/04 составляет                       399 700 руб. 48 коп.

Пунктом 14.4 статьи 14 Контракта № 07/04 предусмотрено, что в случае несоблюдения предусмотренных Контрактом сроков платежей Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы контракта.

Размер неустойки за период с 18.01.2018 по 30.04.2019 составит 174669 руб.                11 коп. При этом лимит договорной неустойки составляет 119 594 руб. 00 коп.

Пунктом 4 статьи 14 Контракта № 1/01 предусмотрено, что в случае несоблюдения предусмотренных Контрактом сроков платежей Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы контракта.

Размер неустойки за период с 14.03.2017 по 30.04.2019 составит 43129 руб.                    32 коп. При этом лимит договорной неустойки составляет 110 872 руб. 30 коп.

Истец направил в адрес ответчика претензионное требование о погашении задолженности по оплате выполненных по договору работ.

Оставление ответчиком данной претензии без ответа и удовлетворения явилось основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Договорные правоотношения сторон по своей правовой природе относятся к договору подряда и регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В договоре подряда указывается цена подлежащей выполнению работ или способы ее определения (статься 709 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Положениями части 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

В соответствии со статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии с правилами статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из представленных в материалы дела доказательств следует, что истец обязательства по выполнению работ, согласно заключенного договора подряда  исполнил в полном объеме.

Однако встречные обязательства по оплате выполненных и принятых работ ответчиком исполнены ненадлежащим образом, ответчик оплату выполненных и принятых работ в полном объеме не произвел, в связи с чем истцом заявлены требования о взыскании задолженности по контракту от 22.01.2016 №1/01 а также по контракту от 07.04.2017 № 07/04.

Учитывая вышеизложенное, а также то, что на момент рассмотрения настоящего спора доказательств оплаты выполненных работ в установленный договором сроки в полном объеме ответчиком не представлено, своими действиями ответчик нарушил взятые на себя обязательства и права истца, которые в силу статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат защите, а требование истца о взыскании задолженности подлежит удовлетворению.

Статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Представленный истцом расчет суммы пени судом проверен, признан верным.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины следует возложить на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Иск удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "БОЛЬШОЙ ПРОСПЕКТ" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОНТАЖ" 55 436 руб. 15 коп. долга, 43 129 руб. 32 коп. неустойки с последующим начислением неустойки с 01.05.2019 по день оплаты долга исходя из ставки 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки, но не более 67 742 руб. 98 коп. в рамках контракта от 22.01.2016 №1/01, 399 700 руб. 48 коп. долга, 119 594 руб. 00 коп. неустойки в рамках контракта от 07.04.2017 № 07/04, а также 15 357 руб. 00 коп. судебных расходов по уплате государственной пошлины

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                            Коросташов А.А.